Арбитражный суд Мурманской области

ул. Академика Книповича, 20, г. Мурманск, 183038

http://murmansk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А42-10129/2023

город Мурманск

05 марта 2024 года

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Тарасова А.Е. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ММБУ «УДХ» к ООО «СеверСтрой» о понуждении исполнить гарантийные обязательства,

при участии в заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность от 09.01.2024 (до перерыва),

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом 

 

установил:

ММБУ «УДХ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ООО «СеверСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик) о понуждении исполнить гарантийные обязательства по гражданско-правовому договору от 28.05.2019 № 08/052019/0352, а именно: обязать ответчика не позднее одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по гражданско-правовому договору от 28.05.2019 № 08/052019/0352, произвести с соблюдением нормативных требований и регламентов, применяемых при производстве данного типа работ, гарантийный ремонт участков автомобильных дорог, в том числе:

1. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Бондарная от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-           разрушение продольного шва асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана (36,9 м2),

-           разрушение поперечного шва асфальтобетонного покрытия и поперечные трещины на проезжей части на всей протяженности объекта от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана (2,97 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 32 по улице Бондарная (9,75 м2),

-           не заделаны места отбора проб на проезжей части в районе дома № 32 по улице Бондарная (3 шт.),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на выезде с улицы Бондарная (3 м2),

-           трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре в районе пешеходного перехода у дома № 13 по улице Бондарной (0,051 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе выезда на проспект Кольский (4,52 м2).

2. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Папанина до улицы Октябрьской в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-           разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия на проезжей части на всей протяженности от улицы Папанина до улицы Октябрьской (24,08 м2),

-           разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности от улицы Папанина до улицы Октябрьской (2,55 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 95 по проспекту Ленина (1,44 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 91 по проспекту Ленина (1,44 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Октябрьской (0,55 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 102 по проспекту Ленина (4 м2).

3. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Шмидта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от улицы Комсомольской до улицы Капитана ФИО3 (3,82 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 (1,56 м2),

-          разрушение поперечного и продольного шва, трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре на всей протяженности объекта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 (1,43 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе троллейбусной опоры № 755 по улице Шмидта (3,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе троллейбусной опоры № 755 по улице Шмидта (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе троллейбусной опоры № 753 по улице Шмидта (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 39/1 по улице Шмидта (4,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе троллейбусной опоры № 748 по улице Шмидта (2,1 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе дома № 39 по улице Шмидта (южное направление) (3 шт.),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 47 по улице Шмидта (2,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе примыкания к улице Комсомольская (1,7 м2),

4. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Полярные Зори от улицы Гвардейская до улицы Карла Маркса в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (231,9 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (4,97 м2),

-          разрушение поперечного и продольного шва, трещины тротуара на всей протяженности объекта (2,43 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пересечении улицы Полярные Зори с улицей Гвардейская (7,89 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 1а по улице Гвардейская (4,3 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на выезде от дома 1а по улице Гвардейская (2,12 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 10 по улице Полярные Зори (1,84 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1378 (2,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на заезде к дому № 17/2 по улице Полярные Зори (5,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе заезда к дому № 17/2 по улице Полярные Зори (2,88 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 20 по улице Полярные Зори (6,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1355 (0,55 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пересечении с улицей Академика Книповича (12,41 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 31/1 по улице Полярные Зори (4,5 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Профессора Сомова (2,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 30 по улице Полярные Зори (5,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 34 по улице Полярные Зори (0,03 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 38 по улице Полярные Зори (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 38 по улице Полярные Зори (1,38 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1381 (0,32 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 40 по улице Полярные Зори (0,06 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пешеходном переходе в районе дома № 35 по улице Полярные Зори (1,32 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части около опоры НО № 1385 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 42 по улице Полярные Зори (6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 35/2 по улице Полярные Зори (10,36 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе дома № 35/2 по улице Полярные Зори (2,88 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 44 по улице Полярные Зори (3,3 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 46а по улице Полярные Зори (9,08 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 47 по улице Полярные Зори (1,4 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе дома № 47 по улице Полярные Зори (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Трудовые Резервы (0,7 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Карла Маркса (12 м2),

-          не заделаны места отбора проб на проезжей части в районе дома № 40 по улице Полярные Зори (южное направление) (3 шт.).

5. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по проспекту Героев-североморцев от улицы Александрова до улицы Чумбарова-Лучинского в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (92,54 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре по всей протяженности объекта (3,21 м2),

-          разрушение поперечного шва и продольные трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре по всей протяженности объекта (2,46 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 267 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 255 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 253 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части между опорами № 253 и № 251 (114 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 251 (8,9 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 249 (1,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 247 (0,14 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта (северное направление) (2,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 237 (1,02 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 231 (0,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 8а по проспекту Героев-североморцев (8,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 12 по проспекту Героев-североморцев (4,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта «ул. 6-й Комсомольской Батареи» (южное направление) (15,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца в районе опоры № 234 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 38 по проспекту Героев-североморцев (6,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе перекрестка с улицей Чумбарова-Лучинского (43 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе домов №№ 24, 28 по проспекту Героев-североморцев (5 шт.).

6. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по проспекту Героев-североморцев от дома № 72 по проспекту Героев-североморцев до проезда Михаила Ивченко в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (20,8 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (1,56 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 163 (0,5 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 161 (1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 158 (3,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе пешеходного перехода у дома № 72б по проспекту Героев-североморцев (южное направление) (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта (северное направление) (15,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 77 по проспекту Героев-североморцев (8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 145 (0,25 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 141 (1,4 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе опоры № 159 (южное направление) (3 шт.).

В обоснование иска истец указал, что в период гарантийных обязательств по договору были выявлены недостатки работ, которые ответчик не устранил.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по существу, в предварительное судебное заседание не явился. Отзыв на иск не представил.

С учетом мнения представителя истца, обстоятельств дела, руководствуясь статьями 136, 137 и 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), суд определил завершить предварительное судебное заседание, перейти к рассмотрению спора по существу в основное судебное заседание и рассмотреть спор в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении иска настаивал по изложенным в нем основаниям.

В судебном заседании 27.02.2024 судом объявлен перерыв до 05.03.2024.

После перерыва стороны в судебное заседание не явились.

Руководствуясь статьей 163 АПК РФ судебное заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

 

Из материалов дела следует, что по итогам аукциона в электронной форме между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) 28.05.2019 заключен гражданско-правовой договор № 08/052019/0352 (далее – Договор), в соответствии с условиями которого ответчик принял на себя обязательство выполнить работы по ремонту (выборочно) автомобильных дорог общего пользования местного значения в административных округах города Мурманска (пункт 1.2. Договора).

В пункте 1.3. Договора согласовано, что состав и объем работ, выполняемых Подрядчиком, установлен «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору) и перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к Договору) (пункт 1.3. Договора).

Результат работ принят Заказчиком, что подтверждается актом приемки результата выполненных работ от 18.12.2019.

В пункте 6.1. Договора указано, что гарантии качества результата работ распространяются на все его составляющие, в том числе на все примененные строительные материалы, смонтированные изделия, конструкции и работы, выполненные Подрядчиком.

В пункте 6.4. Договора согласован гарантийный срок на работы – 48 месяцев.

Подрядчик гарантирует в согласованный сторонами срок предпринять все действия по безвозмездному устранению несоответствий результата работ, возникших в период гарантийного срока (пункт 6.7. Договора).

14.04.2023 представители сторон провели обследование объектов производства работ и обнаружили дефекты (недостатки) результата работ, возникшие в период гарантийного срока. Результаты осмотра и выявленные дефекты (недостатки) работ отражены в акте обследования. Ответчику поручено устранить выявленные замечания в срок до 14.06.2023 в рамках гарантийных обязательств.

Поручение истца оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

 

Факт выполнения ответчиком работ по Договору и факт принятия этих работ Заказчиком, подтвержден материалами дела.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии со статьей 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

При обнаружении недостатков работ в течение гарантийного срока, бремя доказывания, что недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, лежит на подрядчике.

Недостатки работ в настоящем случае были обнаружены в пределах гарантийного срока.

В силу пункта 31 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательства того, что недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, произошли вследствие неправильной эксплуатации объекта, нормального износа объекта или его частей, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ответчик не представил (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).

Выполнение работ с недостатками подтверждается представленными доказательствами.

Доказательств устранения выявленных недостатков работ также не представлено.

Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Презумпция вины подрядчика за недостатки работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, провозглашена в главе 37 ГК РФ.

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено относимых и допустимых доказательств (статьи 67, 68 АПК РФ) подтверждающих, что недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, возникли не по вине подрядчика, а вследствие воздействия на результат работ иных лиц, либо по иным причинам. Кроме того, суду не представлено доказательств того, что выявленные дефекты не относятся к гарантийным обязательствам.

С учетом изложенного, требование истца документально подтверждено, соответствует статьям 309, 310, 722, 723 и 724 ГК РФ, а иск обоснован и подлежит удовлетворению на основании совокупности перечисленных обстоятельств дела и норм права.

С учетом характера, объема подлежащей выполнению работы, суд находит, что для устранения недостатков работ месячный срок является разумным и достаточным для их устранения.

Истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, которая в силу статьей 110 АПК РФ, 33317 и 33321 НК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в сумме 6 000 ?.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, в связи с чем в соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ он направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области 

 

решил:

иск удовлетворить.

Обязать ООО «СеверСтрой» в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по  гражданско-правовому договору от 28.05.2019 № 08/052019/0352 и выполнить с соблюдением нормативных требований и регламентов, применяемых при производстве данного типа работ, гарантийный ремонт автомобильных дорог, а именно:

1. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Бондарная от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-           разрушение продольного шва асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана (36,9 м2),

-           разрушение поперечного шва асфальтобетонного покрытия и поперечные трещины на проезжей части на всей протяженности объекта от дома № 9 по улице Бондарной до улицы Баумана (2,97 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 32 по улице Бондарная (9,75 м2),

-           не заделаны места отбора проб на проезжей части в районе дома № 32 по улице Бондарная (3 шт.),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на выезде с улицы Бондарная (3 м2),

-           трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре в районе пешеходного перехода у дома № 13 по улице Бондарной (0,051 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе выезда на проспект Кольский (4,52 м2).

2. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Папанина до улицы Октябрьской в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-           разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия на проезжей части на всей протяженности от улицы Папанина до улицы Октябрьской (24,08 м2),

-           разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности от улицы Папанина до улицы Октябрьской (2,55 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 95 по проспекту Ленина (1,44 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 91 по проспекту Ленина (1,44 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Октябрьской (0,55 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 102 по проспекту Ленина (4 м2).

3. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Шмидта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от улицы Комсомольской до улицы Капитана ФИО3 (3,82 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 (1,56 м2),

-          разрушение поперечного и продольного шва, трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре на всей протяженности объекта от улицы Комсомольская до улицы Капитана ФИО3 (1,43 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе троллейбусной опоры № 755 по улице Шмидта (3,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе троллейбусной опоры № 755 по улице Шмидта (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе троллейбусной опоры № 753 по улице Шмидта (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 39/1 по улице Шмидта (4,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе троллейбусной опоры № 748 по улице Шмидта (2,1 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе дома № 39 по улице Шмидта (южное направление) (3 шт.),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 47 по улице Шмидта (2,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе примыкания к улице Комсомольская (1,7 м2),

4. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по улице Полярные Зори от улицы Гвардейская до улицы Карла Маркса в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (231,9 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (4,97 м2),

-          разрушение поперечного и продольного шва, трещины тротуара на всей протяженности объекта (2,43 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пересечении улицы Полярные Зори с улицей Гвардейская (7,89 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 1а по улице Гвардейская (4,3 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на выезде от дома 1а по улице Гвардейская (2,12 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 10 по улице Полярные Зори (1,84 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1378 (2,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на заезде к дому № 17/2 по улице Полярные Зори (5,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе заезда к дому № 17/2 по улице Полярные Зори (2,88 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 20 по улице Полярные Зори (6,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1355 (0,55 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пересечении с улицей Академика Книповича (12,41 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 31/1 по улице Полярные Зори (4,5 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Профессора Сомова (2,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 30 по улице Полярные Зори (5,1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 34 по улице Полярные Зори (0,03 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе дома № 38 по улице Полярные Зори (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 38 по улице Полярные Зори (1,38 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части около опоры НО № 1381 (0,32 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 40 по улице Полярные Зори (0,06 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на пешеходном переходе в районе дома № 35 по улице Полярные Зори (1,32 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части около опоры НО № 1385 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 42 по улице Полярные Зори (6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 35/2 по улице Полярные Зори (10,36 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе дома № 35/2 по улице Полярные Зори (2,88 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 44 по улице Полярные Зори (3,3 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 46а по улице Полярные Зори (9,08 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 47 по улице Полярные Зори (1,4 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев на проезжей части в районе дома № 47 по улице Полярные Зори (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Трудовые Резервы (0,7 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части примыкания к улице Карла Маркса (12 м2),

-          не заделаны места отбора проб на проезжей части в районе дома № 40 по улице Полярные Зори (южное направление) (3 шт.).

5. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по проспекту Героев-североморцев от улицы Александрова до улицы Чумбарова-Лучинского в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (92,54 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре по всей протяженности объекта (3,21 м2),

-          разрушение поперечного шва и продольные трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре по всей протяженности объекта (2,46 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 267 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 255 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе опоры № 253 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части между опорами № 253 и № 251 (114 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 251 (8,9 м2),

-           разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 249 (1,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 247 (0,14 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта (северное направление) (2,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 237 (1,02 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 231 (0,6 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 8а по проспекту Героев-североморцев (8,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 12 по проспекту Героев-североморцев (4,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта «ул. 6-й Комсомольской Батареи» (южное направление) (15,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца в районе опоры № 234 (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 38 по проспекту Героев-североморцев (6,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе перекрестка с улицей Чумбарова-Лучинского (43 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе домов №№ 24, 28 по проспекту Героев-североморцев (5 шт.).

6. Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги и тротуаров по проспекту Героев-североморцев от дома № 72 по проспекту Героев-североморцев до проезда Михаила Ивченко в городе Мурманске – устранить следующие дефекты:

-          разрушение продольного шва примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (20,8 м2),

-          разрушение поперечного шва и трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части на всей протяженности объекта (1,56 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 163 (0,5 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 161 (1 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 158 (3,2 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг колодца на проезжей части в районе пешеходного перехода у дома № 72б по проспекту Героев-североморцев (южное направление) (1,44 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе остановки общественного транспорта (северное направление) (15,8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 77 по проспекту Героев-североморцев (8 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 145 (0,25 м2),

-          разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе опоры № 141 (1,4 м2),

-          не заделаны места отбора проб в районе опоры № 159 (южное направление) (3 шт.).

Взыскать с ООО «СеверСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                                                                                А.Е.Тарасов