АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, 

<

...>; тел/ факс: 

<

***>; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-2431/2025

город Саратов

29 сентября 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройресурс-ЭН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в течении тридцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить в рамках гарантийных обязательств выявленные недостатки (дефекты) работ по строительству жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, 

<

...>, а именно:  

Ремонтные работы в квартире № 9, расположенной по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, 

<

...> 

 (наименование работ и затрат) 

Соста влен  

ресурсно- индексным  

мето дом  

Осно вание  

(проектная и (или) иная техническая документация)  

Составлен(а) в текущем уровне цен  

01.07.2025 

Сметная стоимость  

106 ,35  

тыс. руб.  

в том числе:  

строительн ых работ  

88, 63  

тыс. руб.  

Средства на оплату труда рабочих  

20,42 

тыс. руб.  

монтажных работ  

0,00 

тыс. руб.  

Средства на оплату труда машинистов  

0,04 

тыс. руб.  

оборудован ия  

0,00 

тыс. руб.  

Нормативные затраты 

труда рабочих 

65,06 

чел.-ч. 

прочих затрат 

0,00 

тыс. руб.  

Нормативные затраты труда 

машинистов 

0,11 

чел.-ч. 

 № п/п  

Обоснован ие  

Наименование работ и затрат  

Единица 

Количество 

Сметная стоимость, руб. 

изме

рения  

на  

един ицу изме рения  

коэффи циенты  

всего с учетом коэффици 

ентов 

на  

единицу измерен 

ия в базисном  

уровне  

цен  

инд екс  

на  

един ицу изме рения  

в 

теку щем уров не  

цен  

коэффи циенты  

всег о в  

теку щем уров не  

цен  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Полы 

1 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций 

100 м2 

0,1885 

1 

0,1885 

Объем=18,85 / 100 

Итого прямые затраты 

859,71 

ФОТ 

856,30 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

90 

90 

770,67 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

46 

46 

393,90 

Всего по позиции 

10 738,89 

2 024,28 

2 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

5,82465 

1 

5,82465 

138,05  

1,85 

255,39 

1 487,56 

Всего по позиции 

1 487,56 

3 

ГЭСНр57-01-002-01  

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 

100 м2 

0,1885 

1 

0,1885 

Объем=18,85 / 100 

Итого прямые затраты 

633,71 

ФОТ 

632,35 

Пр/812-091.0-1  

НР Полы (ремонтно-строительные) 

% 

89 

89 

562,79 

Пр/774-091.0 

СП Полы (ремонтно-строительные) 

% 

49 

49 

309,85 

Всего по позиции 

7 991,2 

5  

1 506,35 

4 

ГЭСНр57-01-003-01  

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 

100 м  

0,171 

1 

0,171 

Объем=17,1 / 100 

Итого прямые затраты 

187,53 

ФОТ 

187,53 

Пр/812-091.0-1  

НР Полы (ремонтно-строительные) 

% 

89 

89 

166,90 

Пр/774-091.0 

СП Полы (ремонтно-строительные) 

% 

49 

49 

91,89 

Всего по позиции 

2 610,0 

6  

446,32 

5 

47-1 

Погрузка в  

автотранспортное 

средство: мусор строительный с погрузкой вручную  

т 

0,107405 

1 

0,107405 

878,79 

94,39 

Объем=Ф7.р1+Ф8.р1 

Всего по позиции 

94,39 

6 

02-15-1-01-0010 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с  

усовершенствованным (асфальтобетонным,  

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км  

т 

0,107405 

1 

0,107405 

175,4 9  

18,85 

Всего по позиции 

18,85 

7 

ГЭСН11-01-057-01 

Устройство гетерогенного и 

гомогенного покрытия на клее со свариванием  

полотнищ в стыках 

100 м2 

0,185 

1 

0,185 

Объем=18,5 / 100 

Итого прямые затраты  

5 197,63 

ФОТ 

2 662,22 

Пр/812-011.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Полы 

% 

112 

0,9 

100,8 

2 683,52 

Пр/774-011.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Полы 

% 

65 

0,85 

55,25 

1 470,88 

Всего по позиции 

50 

551,5 1  

9 352,03 

8 

ФСБЦ-01.6.03.04-0027 

Линолеум ПВХ без подосновы 

м2 

18,87 

1 

18,87 

919,80 

1,19 

1 094,5 

6  

20 654, 

35  

Всего по позиции 

20 654, 

35  

9 

ГЭСН11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на  

винтах самонарезающих  

100 м 

0,171 

1 

0,171 

Объем=17,1 / 100 

Итого прямые затраты  

663,52 

ФОТ 

392,31 

Пр/812-011.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Полы 

% 

112 

0,9 

100,8 

395,45 

Пр/774-011.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Полы 

% 

65 

0,85 

55,25 

216,75 

Всего по позиции 

7 460,3 

5  

1 275,72 

10 

ФСБЦ-11.3.03.06-0011 

Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной  

м 

17,271 

1 

17,271 

27,65 

1,14 

31,52  

544,38 

Всего по позиции 

544,38 

Всего по разделу 1 Полы 

37 404, 

23  

Раздел 2. Потолок 

11 

ГЭСНр62-04-011-01  

Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок  

м2 

18,85 

1 

18,85 

Итого прямые затраты  

3 075,34 

ФОТ 

3 075,34 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

2 767,81 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

46 

46 

1 414,66 

Всего по позиции 

385,0 3  

7 257,81 

12 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций  

100 м2 

0,1885 

1 

0,1885 

Объем=18,85 / 100 

Итого прямые затраты  

859,71 

ФОТ 

856,30 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

770,67 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

46 

46 

393,90 

Всего по позиции 

10 

738,8 9  

2 024,28 

13 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

5,82465 

1 

5,82465 

138,05 

1,85 

255,3 9  

1 487,56 

Всего по позиции 

1 487,56 

14 

ГЭСН15-04-007-02 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по  

штукатурке потолков  

100 м2 

0,1885 

1 

0,1885 

Объем=18,85 / 100 

Итого прямые затраты  

4 857,17 

ФОТ 

3 878,53 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы  

% 

100 

0,9 

90 

3 490,68 

Пр/774-015.0, Приказ № 

СП Отделочные работы  

% 

49 

0,85 

41,65 

1 615,41 

774/пр от 11.12.2020 п.16 

Всего по позиции 

52 855,49 

9 963,26 

15 

ФСБЦ-14.3.02.01-0362 

Краска водно-дисперсионная 

акрилатная ВД-АК-104  

т 

0,006 2205  

1 

0,0062205 

87 665,56 

1,85 

162 181,29 

1 008,85 

Всего по позиции 

1 008,85 

16 

ФСБЦ-14.3.01.03-0001 

Состав грунтовочный глубокого проникновения  

кг 

4,147 

1 

4,147 

65,84 

1,36 

89,54 

371,32 

Объем=Ф2.р2*1000 

Всего по позиции 

371,32 

17 

ГЭСН11-01-040-01 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2  

100 м 

0,179 

1 

0,179 

Объем=17,9 / 100 

Итого прямые затраты  

773,74 

ФОТ 

587,58 

Пр/812-011.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Полы 

% 

112 

0,9 

100,8 

592,28 

Пр/774-011.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Полы 

% 

65 

0,85 

55,25 

324,64 

Всего по позиции 

9 445,0 

3  

1 690,66 

18 

ФСБЦ-01.6.04.03-0026 

Плинтус потолочный из экструдированного  

полистирола 

м 

18,079 

1 

18,079 

51,13 

1,2 

61,36 

1 109,33 

Всего по позиции 

1 109,33 

Всего по разделу 2 Потолок 

24 913, 

07  

Раздел 3. Стены 

19 

ГЭСНр63-02-001-01  

Снятие обоев: простых и улучшенных  

100 м2 

0,4176 

1 

0,4176 

Объем=41,76 / 100 

Итого прямые затраты  

1 263,39 

ФОТ 

1 263,39 

Пр/812-097.0-1  

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы  

(ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

1 137,05 

Пр/774-097.0 

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы  

(ремонтно-строительные)  

% 

45 

45 

568,53 

Всего по позиции 

7 109,6

2 968,

20 

47-1 

Погрузка в  

автотранспортное 

средство: мусор строительный с погрузкой вручную  

т 

0,012528 

1 

0,012528  

878,7 9  

11,01 

Всего по позиции 

11,01 

21 

02-15-1-01-0010 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с  

усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км  

т 

0,012528 

1 

0,012528  

175,4 9  

2,20 

Всего по позиции 

2,20 

22 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций 

100 м2 

0,4176 

1 

0,4176 

Объем=41,76 / 100 

Итого прямые затраты 

1 904,62 

ФОТ 

1 897,05 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

90 

90 

1 707,35 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

46 

46 

872,64 

Всего по позиции 

10 

739,0 1  

4 484,61 

23 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

12,90384 

1 

12,90384  

138,05 

1,85 

255,3 9  

3 295,51 

Всего по позиции 

3 295,51 

24 

ГЭСН15-06-001-01 

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и  

средней плотности 

100 м2 

0,4176 

1 

0,4176 

Объем=41,76 / 100 

Итого прямые затраты 

4 881,19 

ФОТ 

4 173,34 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы 

% 

100 

0,9 

90 

3 756,01 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы 

% 

49 

0,85 

41,65 

1 738,20 

Всего по позиции 

24 

845,3 

10 375,

25 

ФСБЦ-01.6.02.01-1008 

Обои бумажные 

м2 

47,18 88  

1 

47,1888  

88,42 

1,24 

109,64 

5 173,78 

Объем=Ф10.р1*100 

Всего по позиции 

5 173,78 

Всего по разделу 3 Стены 

26 311, 

48  

Итоги по смете: 

 Всего прямые затраты (справочно) 

60 416, 

35  

 в том числе: 

 Оплата труда рабочих 

20 423, 

82  

 Эксплуатация машин 

46,67 

 Оплата труда машинистов (Отм) 

38,42 

 Материалы 

39 780, 

99  

 Перевозка 

126,45 

 Строительные работы 

88 628, 

78  

 Строительные работы 

88 502, 

33  

 в том числе: 

 оплата труда 

20 423, 

82  

 эксплуатация машин и механизмов 

46,67 

 оплата труда машинистов (Отм) 

38,42 

 материалы 

39 780, 

99  

 накладные расходы 

18 801, 

18  

 сметная прибыль 

9 411,25 

 Перевозка 

126,45 

 Всего ФОТ (справочно) 

20 462, 

24  

 Всего накладные расходы (справочно) 

18 801, 

18  

 Всего сметная прибыль (справочно) 

9 411,25 

 НДС 20% 

17 725, 

76  

ВСЕГО по смете 

106 354, 54  

 справочно: 

 Затраты труда рабочих 

65,063617  

 Затраты труда машинистов 

0,112125  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройресурс-ЭН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в течении тридцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить в рамках гарантийных обязательств выявленные недостатки (дефекты) работ по строительству жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, 

<

...>, а именно:   

Ремонтные работы в квартире № 9, расположенной по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, 

<

...>  

 (наименование работ и затрат) 

Соста влен  

ресурсно- индексным  

мето дом  

Осно вание  

(проектная и (или) иная техническая документация)  

Составлен(а) в текущем уровне цен  

01.07.2025 

Сметная стоимость  

35, 57  

тыс. руб.  

в том числе:  

строительн ых работ  

24, 94  

тыс. руб.  

Средства на оплату труда рабочих  

6,59 

тыс. руб.  

монтажных работ  

0,00 

тыс. руб.  

Средства на оплату труда машинистов  

0,06 

тыс. руб.  

оборудован ия  

4,70 

тыс. руб.  

Нормативные затраты труда рабочих  

20,60 

чел.-ч. 

прочих затрат 

0,00 

тыс. руб.  

Нормативные затраты труда машинистов  

0,17 

чел.-ч. 

 № п/п  

Обоснован ие  

Наименование работ и затрат  

Един ица  

изме рения  

Количество 

Сметная стоимость, руб. 

на  

един ицу изме рения  

коэффи циенты  

всего с учетом коэффици 

ентов 

на  

единицу измерени я в  

базисном уровне  

цен 

инд екс  

на  

един ицу изме рения  

в 

теку щем уров не  

цен  

коэффи циенты  

всег о в  

теку щем уров не  

цен  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. обработка от грибка потолка 

1 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций  

100 м2 

0,271 

1 

0,271 

Объем=27,1 / 100 

Итого прямые затраты  

1 236,00 

ФОТ 

1 231,08 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно- 

строительные) 

% 

90 

90 

1 107,97 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно- 

строительные) 

% 

46 

46 

566,30 

Всего по позиции  

10 739,0

2 910,

2 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

8,3739 

1 

8,3739 

138,05  

1,85 

255,3 9  

2 138,61 

Всего по позиции 

2 138,61 

Всего по разделу 1 обработка от грибка потолка 

5 048,88 

Раздел 2. обработка от грибка стен 

3 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций 

100 м2 

0,7884 

1 

0,7884 

Объем=78,84 / 100 

Итого прямые затраты 

3 595,79 

ФОТ 

3 581,50 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

90 

90 

3 223,35 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

46 

46 

1 647,49 

Всего по позиции 

10 

739,0 0  

8 466,63 

4 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

24,36156 

1 

24,36156 

138,05  

1,85 

255,3 9  

6 221,70 

Всего по позиции 

6 221,70 

Всего по разделу 2 обработка от грибка стен 

14 688, 

33  

Раздел 3. установка вентиляторов 

5 

ГЭСН20-03-005-01 

Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг 

шт 

2 

1 

2 

Итого прямые затраты 

2 007,02 

ФОТ 

1 834,30 

Пр/812-016.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)  

% 

121 

0,9 

108,9 

1 997,55 

Пр/774-016.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,  

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)  

% 

72 

0,85 

61,2 

1 122,59 

Всего по позиции 

2 

563,5 

5 127,

6 

ФСБЦ-19.1.01.11-0014 

Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм 

шт 

1 

1 

1 

67,98 

1,06 

72,06  

72,06 

Всего по позиции 

72,06 

7 О  

ФСБЦ-64.1.02.03-0011 

Вентилятор канальный осевой,  

производительность 85 м3/час, напряжение  

230/50 В/Гц, мощность двигателя 15 Вт  

шт 

2 

1 

2 

1 478,42 

1,59 

2 350,6 

9  

4 701,38 

Всего по позиции 

4 701,38 

Всего по разделу 3 установка вентиляторов 

9 900,60 

Итоги по смете: 

 Всего прямые затраты (справочно) 

15 271, 

18  

 в том числе: 

 Оплата труда рабочих 

6 585,44 

 Эксплуатация машин 

102,18 

 Оплата труда машинистов (Отм) 

61,44 

 Материалы 

8 522,12 

 Строительные работы 

24 936, 

43  

 в том числе: 

 оплата труда 

6 585,44 

 эксплуатация машин и механизмов 

102,18 

 оплата труда машинистов (Отм) 

61,44 

 материалы 

8 522,12 

 накладные расходы 

6 328,87 

 сметная прибыль 

3 336,38 

 Оборудование 

4 701,38 

 Инженерное оборудование 

4 701,38 

Всего 

29 637, 

81  

 Всего ФОТ (справочно) 

6 646,88 

 Всего накладные расходы (справочно) 

6 328,87 

 Всего сметная прибыль (справочно) 

3 336,38 

 НДС 20% 

5 

56 

ВСЕГО по смете 

35 565, 

37  

 справочно: 

 Затраты труда рабочих 

20,597638 

 Затраты труда машинистов 

0,171782 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  

застройщик «Стройресурс-ЭН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в течении тридцати дней со дня вступления решения в законную силу устранить в рамках гарантийных обязательств выявленные недостатки (дефекты) работ по строительству жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: Саратовская область, г.Энгельс, 

<

...>, д.10Е/3, д.10Е/4, д.10Е/5, д.10Е/6, а именно:   

Ремонтные работы на объектах: жилые многоквартирные дома по адресу:Саратовская обл., г. Энгельс, 

<

...>, № 10Е/2, № 10Е/3, № 10Е/4, № 10Е/5 и № 10Е/6  

 (наименование работ и затрат) 

Соста влен  

ресурсно- индексным  

мето дом  

Осно вание  

(проектная и (или) иная техническая документация)  

Составлен(а) в текущем уровне цен  

01.07.2025 

Сметная стоимость  

995 ,20  

тыс. руб.  

в том числе:  

строительн ых работ  

829 ,33  

тыс. руб.  

Средства на оплату труда рабочих 

140,49 

тыс. руб.  

монтажных работ  

0,00 

тыс. руб.  

Средства на оплату труда машинистов 

9,16 

тыс. руб.  

оборудован ия  

0,00 

тыс. руб.  

Нормативные затраты 

труда рабочих 

441,02 

чел.-ч. 

прочих затрат 

0,00 

тыс. руб.  

Нормативные затраты труда машинистов  

21,50 

чел.-ч. 

 № п/п  

Обоснован ие  

Наименование работ и затрат  

Един ица  

изме рения  

Количество 

Сметная стоимость, руб. 

на  

един ицу изме рения  

коэффи циенты  

всего с учетом коэффици 

ентов 

на  

единицу измерен

ия в базисном  

уровне 

цен  

инд екс  

на  

един ицу изме рения  

в 

теку щем уров не  

цен  

коэффи циенты  

всег о в  

теку щем уров не  

цен  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Подвальное помещение 

1 

ГЭСНр62-04-012-01  

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций  

100 м2 

14,8506 

1 

14,8506 

Объем=1485,06 / 100 

Итого прямые затраты  

67 731, 

57  

ФОТ 

67 

39 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы 

(ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

60 716, 

15  

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы 

(ремонтно-строительные)  

% 

46 

46 

31 032, 

70  

Всего по позиции 

10 738,99 

159 480, 42  

2 

ФСБЦ-14.2.06.03-1004 

Гидрофобизатор  

силиконовый концентрированный для  

пропиток каменных 

поверхностей  

кг 

458,8 8354  

1 

458,88354 

138,05 

1,85 

255,39 

117 194, 27  

Всего по позиции 

117 194, 27  

Всего по разделу 1 Подвальное помещение 

276 674, 69  

Раздел 2. Благоустройство 

Восстановление отмостки у домов 

3 

ГЭСНр68-02-004-04  

Разборка покрытий и  

оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  

100 м3 

0,06684 

1 

0,06684 

Объем=(167,1*0,04) / 100 

Итого прямые затраты 

5 392,59 

ФОТ 

4 153,45 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство 

(ремонтно-строительные)  

% 

102 

102 

4 236,52 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство 

(ремонтно-строительные)  

% 

54 

54 

2 242,86 

Всего по позиции 

177 617,74 

11 871, 

97  

4 

ГЭСН27-04-016-04 

Устройство прослойки из  

нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  

1000 м2 

0,1671 

1 

0,1671 

Объем=167,1 / 1000 

Итого прямые затраты 

2 705,82 

ФОТ 

1 673,29 

Пр/812-021.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Автомобильные дороги 

% 

147 

0,9 

132,3 

2 213,76 

Пр/774-021.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Автомобильные дороги 

% 

134 

0,85 

113,9 

1 905,88 

Всего по позиции 

40 846,5

6 825,

5 

ФСБЦ-01.7.12.05-1016 

Геополотно нетканое  

полипропиленовое, иглопробивное,  

термоскрепленное, поверхностная плотность  

500 г/м2 

м2 

183,81 

1 

183,81 

61,40 

1,25 

76,75 

14 107, 

42  

Объем=167,1*1,1 

Всего по позиции 

14 107, 

42  

6 

ГЭСНр68-02-001-01  

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 

1000 м2 

0,1671 

1 

0,1671 

Объем=167,1 / 1000 

Итого прямые затраты 

28 730, 

89  

ФОТ 

8 692,53 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 

% 

102 

102 

8 866,38 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 

% 

54 

54 

4 693,97 

Всего по позиции 

253 089,41 

42 291, 

24  

7 

ФСБЦ-02.2.05.04-2088 

Щебень из плотных  

горных пород для 

строительных работ М 600, фракция 20-40 мм  

м3 

11,11215 

1 

11,11215 

1 037,3 

4  

11 527, 

08  

Всего по позиции 

11 527, 

08  

8 

ГЭСН27-07-001-01 

Устройство  

асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных 

из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см  

100 м2 

1,671 

1 

1,671 

Объем=167,1 / 100 

Итого прямые затраты 

12 757, 

14  

ФОТ 

8 364,81 

Пр/812-021.1-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

% 

113 

0,9 

101,7 

8 507,01 

Пр/774-021.1,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

% 

77 

0,85 

65,45 

5 474,77 

Всего по позиции 

16 001,75 

26 738, 

92  

9 

ГЭСН27-07-001-02 

На каждые 0,5 см  

изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  

100 м2 

1,671 

1 

1,671 

Объем=167,1 / 100 

Итого прямые затраты 

5 403,91 

ФОТ 

5 359,33 

Пр/812-021.1-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,  

мостовых и площадок и прочее 

% 

113 

0,9 

101,7 

5 450,44 

Пр/774-021.1,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,  

мостовых и площадок и прочее 

% 

77 

0,85 

65,45 

3 507,68 

Всего по позиции 

8 594,8 

7  

14 362, 

03  

10 

ФСБЦ-04.2.01.01-0049 

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II  

т 

20,01858 

1 

20,01858 

3 622,62 

1,92 

6 955,4 

3  

139 237, 83  

Объем=Ф2.р1+Ф3.р1 

Всего по позиции 

139 237, 83  

восстановление пешеходных дорожек 

11 

ГЭСНр68-02-004-04  

Разборка покрытий и  

оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  

100 м3 

0,0284 

1 

0,0284 

Объем=(71*0,04) / 100 

Итого прямые затраты 

2 291,30 

ФОТ 

1 764,79 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство 

(ремонтно-строительные)  

% 

102 

102 

1 800,09 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство 

(ремонтно-строительные)  

% 

54 

54 

952,99 

Всего по позиции 

177 619,01 

5 044,38 

12 

ГЭСН27-04-016-04 

Устройство прослойки из  

нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной  

1000 м2 

0,071 

1 

0,071 

Объем=71 / 1000 

Итого прямые затраты 

1 149,70 

ФОТ 

710,98 

Пр/812-021.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Автомобильные дороги 

% 

147 

0,9 

132,3 

940,63 

Пр/774-021.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Автомобильные дороги 

% 

134 

0,85 

113,9 

809,81 

Всего по позиции 

40 847,04 

2 900,14 

13 

ФСБЦ-01.7.12.05-1016 

Геополотно нетканое  

полипропиленовое, иглопробивное,  

термоскрепленное, поверхностная плотность  

500 г/м2 

м2 

78,1 

1 

78,1 

61,40 

1,25 

76,75 

5 994,18 

Объем=71*1,1 

Всего по позиции 

5 994,18 

14 

ГЭСНр68-02-001-01  

Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 

1000 м2 

0,071 

1 

0,071 

Объем=71 / 1000 

Итого прямые затраты 

12 207, 

61  

ФОТ 

3 693,41 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 

% 

102 

102 

3 767,28 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 

% 

54 

54 

1 994,44 

Всего по позиции 

253 089,15 

17 969, 

33  

15 

ФСБЦ-02.2.05.04-2088 

Щебень из плотных  

горных пород для 

строительных работ М 600, фракция 20-40 мм  

м3 

4,7215 

1 

4,7215 

1 037,3 

4  

4 897,80 

Всего по позиции 

4 897,80 

16 

ГЭСН27-07-001-01 

Устройство  

асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных 

из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см  

100 м2 

0,71 

1 

0,71 

Объем=71 / 100 

Итого прямые затраты 

5 420,45 

ФОТ 

3 554,17 

Пр/812-021.1-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

% 

113 

0,9 

101,7 

3 614,59 

Пр/774-021.1,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее 

% 

77 

0,85 

65,45 

2 326,20 

Всего по позиции 

16 001,75 

11 361, 

24  

17 

ГЭСН27-07-001-02 

На каждые 0,5 см  

изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01  

100 м2 

0,71 

1 

0,71 

Объем=71 / 100 

Итого прямые затраты  

2 296,10 

ФОТ 

2 277,16 

Пр/812-021.1-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,  

мостовых и площадок и прочее  

% 

113 

0,9 

101,7 

2 315,87 

Пр/774-021.1,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,  

мостовых и площадок и прочее  

% 

77 

0,85 

65,45 

1 490,40 

Всего по позиции 

8 594,8 

9  

6 102,37 

18 

ФСБЦ-04.2.01.01-0049 

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II  

т 

8,5058 

1 

8,5058 

3 622,62 

1,92 

6 955,4 

3  

59 161, 

50  

Объем=Ф5.р1+Ф6.р1 

Всего по позиции 

59 161, 

50  

восстановление проезжей части двора асфальта (ямочный ремонт) 

19 

ГЭСНр68-02-004-04  

Разборка покрытий и  

оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  

100 м3 

0,0112 

1 

0,0112 

Объем=(16*0,07) / 100 

Итого прямые затраты  

903,61 

ФОТ 

695,97 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)  

% 

102 

102 

709,89 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)  

% 

54 

54 

375,82 

Всего по позиции 

177 617,86 

1 989,32 

20 

ГЭСНр68-02-001-01  

Исправление профиля оснований: щебеночных с  

добавлением нового материала  

1000 м2 

0,016 

1 

0,016 

Объем=16 / 1000 

Итого прямые затраты  

2 751,01 

ФОТ 

832,32 

Пр/812-102.0-1  

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)  

% 

102 

102 

848,97 

Пр/774-102.0 

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)  

% 

54 

54 

449,45 

Всего по позиции 

253 089,38 

4 049,43 

21 

ФСБЦ-02.2.05.04-2088 

Щебень из плотных  

горных пород для 

строительных работ М 600, фракция 20-40 мм  

м3 

1,064 

1 

1,064 

1 037,3 

4  

1 103,73 

Всего по позиции 

1 103,73 

22 

ГЭСН27-06-075-01 

Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона  

асфальтоукладчиками больших типоразмеров шириной укладки: до 7,5  

м толщиной 5 см  

1000 м2 

0,016 

1 

0,016 

Объем=16 / 1000 

Итого прямые затраты  

403,50 

ФОТ 

103,32 

Пр/812-021.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Автомобильные дороги  

% 

147 

0,9 

132,3 

136,69 

Пр/774-021.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Автомобильные дороги  

% 

134 

0,85 

113,9 

117,68 

Всего по позиции 

41 

116,8 8  

657,87 

23 

ГЭСН27-06-075-03 

Устройство слоя  

покрытия из щебеночно-мастичного  

асфальтобетона 

асфальтоукладчиками больших типоразмеров  

шириной укладки: до 7,5 м на 1 см изменения  

толщины слоя добавлять или исключать  

1000 м2 

0,016 

1 

0,016 

Объем=16 / 1000 

Итого прямые затраты  

75,31 

ФОТ 

16,27 

Пр/812-021.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Автомобильные дороги  

% 

147 

0,9 

132,3 

21,53 

Пр/774-021.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Автомобильные дороги  

% 

134 

0,85 

113,9 

18,53 

Всего по позиции 

7 210,6 

3  

115,37 

24 

ФСБЦ-04.2.01.01-0046 

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I  

т 

2,8 

1 

2,8 

3 713,62 

1,92 

7 130,1 

5  

19 964, 

42  

Всего по позиции 

19 964, 

42  

Всего по разделу 2 Благоустройство 

408 273, 03  

Раздел 3. ФАСАД 

25 

ГЭСН46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с  

поверхностей: стен и потолков кирпичных  

100 м2 

0,23 

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты  

1 526,82 

ФОТ 

1 526,82 

Пр/812-040.2-1  

НР Работы по  

реконструкции зданий и  

сооружений: разборка отдельных  

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в  

целом 

% 

91 

91 

1 389,41 

Пр/774-040.2 

СП Работы по  

реконструкции зданий и  

сооружений: разборка отдельных  

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в  

целом 

% 

52 

52 

793,95 

Всего по позиции 

16 

131,2 2  

3 710,18 

26 

ГЭСН26-01-036-01 

Демонтаж изоляции  

изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями  

холодных поверхностей: наружных стен  

100 м2 

0,23  

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты  

920,30 

ФОТ 

912,87 

Пр/812-020.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Теплоизоляционные работы  

% 

97 

0,9 

87,3 

796,94 

Пр/774-020.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Теплоизоляционные работы  

% 

55 

0,85 

46,75 

426,77 

Всего по позиции 

9 321,7 

8  

2 144,01 

27 

47-1 

Погрузка в  

автотранспортное 

средство: мусор строительный с погрузкой вручную  

т 

1,058  

1 

1,058 

878,7 9  

929,76 

Всего по позиции 

929,76 

28 

02-15-1-01-0010 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с  

усовершенствованным (асфальтобетонным,  

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км  

т 

1,058  

1 

1,058 

175,4 9  

185,67 

Всего по позиции 

185,

29 

ГЭСН26-01-036-01 

Изоляция изделиями из  

волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями  

холодных поверхностей: наружных стен 

100 м2 

0,23 

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты 

3 792,00 

ФОТ 

1 141,08 

Пр/812-020.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Теплоизоляционные работы 

% 

97 

0,9 

87,3 

996,16 

Пр/774-020.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Теплоизоляционные работы 

% 

55 

0,85 

46,75 

533,45 

Всего по позиции 

23 137,43 

5 321,61 

30 

ФСБЦ-12.2.05.10-0012 

Плиты  

теплоизоляционные из минеральной ваты на 

основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным  

слоем, 

м3 

1,265 

1 

1,265 

12 362,75 

1,49 

18 420,50 

23 301, 

93  

Объем=23*0,05*1,1 

Всего по позиции 

23 301, 

93  

31 

ФСБЦ-01.7.15.07-0131 

Дюбель-гвозди  

пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции,  

диаметр 10 мм, длина 120 мм  

10 шт 

18,4 

1 

18,4 

54,40 

1,35 

73,44 

1 351,30 

Объем=(23*8) / 10 

Всего по позиции 

1 351,30 

32 

ГЭСН15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 

100 м2 

0,23 

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты 

12 511, 

66  

ФОТ 

9 143,77 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы 

% 

100 

0,9 

90 

8 229,39 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы 

% 

49 

0,85 

41,65 

3 808,38 

Всего по позиции 

106 

24 

5 

43 

33 

ФСБЦ-01.8.01.06-0001 

Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность  

165 г/м2 

м2 

24,84 

1 

24,84 

49,36 

0,9 

44,42 

1 103,39 

Всего по позиции 

1 103,39 

34 

ГЭСНр62-02-007-07  

Шпатлевка ранее  

окрашенных фасадов под окраску  

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  

100 м2 

0,23 

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты  

4 846,41 

ФОТ 

1 447,95 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

1 303,16 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

46 

46 

666,06 

Всего по позиции 

29 633,17 

6 815,63 

35 

ГЭСН15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами в  

один тон: с лесов вручную по  

подготовленной поверхности 

100 м2 

0,23 

1 

0,23 

Объем=23 / 100 

Итого прямые затраты  

1 124,26 

ФОТ 

1 116,05 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы  

% 

100 

0,9 

90 

1 004,45 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы  

% 

49 

0,85 

41,65 

464,83 

Всего по позиции 

11 276,26 

2 593,54 

36 

ФСБЦ-14.4.01.02-0212 

Грунтовка акриловая АК-070  

т 

0,00322 

1 

0,00322  

178 871,85 

1,36 

243 265,72 

783,32 

Всего по позиции 

783,32 

37 

ФСБЦ-14.3.02.01-0362 

Краска водно-дисперсионная акрилатная 

т 

0,01058 

1 

0,01058  

87 665,56 

1,85 

162 181,29 

1 715,88 

Всего по позиции 

1 715,88 

Всего по разделу 3 ФАСАД 

74 

505,65 

Раздел 4. Подъезд 

Потолок (окраска) 

38 

ГЭСНр62-04-011-01  

Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок 

м2 

13 

1 

13 

Итого прямые затраты 

2 120,93 

ФОТ 

2 120,93 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

90 

90 

1 908,84 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 

% 

46 

46 

975,63 

Всего по позиции 

385,0 3  

5 005,40 

39 

ГЭСН15-02-019-04 

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное  

оштукатуривание) из 

сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:  

потолков 

100 м2 

0,13 

1 

0,13 

Объем=13 / 100 

Итого прямые затраты 

1 607,30 

ФОТ 

1 599,28 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы 

% 

100 

0,9 

90 

1 439,35 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы 

% 

49 

0,85 

41,65 

666,10 

Всего по позиции 

28 

559,6 2  

3 712,75 

40 

ФСБЦ-04.3.02.05-0004 

Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 

т 

0,052 

1 

0,052 

12 024,05 

1,29 

15 

511,0 2  

806,57 

Объем=4*13/1000 

Всего по позиции 

806,57 

41 

ФСБЦ-14.4.01.02-0012 

Грунтовка укрепляющая,  

глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая  

кг 

2,6 

1 

2,6 

68,29 

1,89 

129,0 7  

335,58 

Объем=13*0,2 

Всего по позиции 

335,58 

42 

ГЭСН15-04-007-04 

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под 

100 м2 

0,13 

1 

0,13 

окраску 

Объем=13 / 100 

Итого прямые затраты  

1 865,19 

ФОТ 

1 718,12 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы  

% 

100 

0,9 

90 

1 546,31 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы  

% 

49 

0,85 

41,65 

715,60 

Всего по позиции 

31 746,92 

4 127,10 

43 

ФСБЦ-14.3.02.01-0362 

Краска водно-дисперсионная 

акрилатная ВД-АК-104  

т 

0,00429 

1 

0,00429 

87 665,56 

1,85 

162 181,29 

695,76 

Всего по позиции 

695,76 

44 

ФСБЦ-14.3.01.03-0001 

Состав грунтовочный глубокого проникновения  

кг 

2,86 

1 

2,86 

65,84 

1,36 

89,54 

256,08 

Объем=Ф51.р2*1000 

Всего по позиции 

256,08 

Стены 

45 

ГЭСНр62-04-011-01  

Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок  

м2 

35,88 

1 

35,88 

Итого прямые затраты  

5 853,76 

ФОТ 

5 853,76 

Пр/812-096.0-1  

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

90 

90 

5 268,38 

Пр/774-096.0 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)  

% 

46 

46 

2 692,73 

Всего по позиции 

385,03 

13 814, 

87  

46 

ГЭСН46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с  

поверхностей: стен и потолков кирпичных  

100 м2 

0,3588 

1 

0,3588 

Объем=35,88 / 100 

Итого прямые затраты  

2 381,84 

ФОТ 

2 381,84 

Пр/812-040.2-1  

НР Работы по  

реконструкции зданий и  

сооружений: разборка отдельных  

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также  

% 

91 

91 

2 167,47 

зданий (сооружений) в целом 

Пр/774-040.2 

СП Работы по  

реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных  

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в  

целом 

% 

52 

52 

1 238,56 

Всего по позиции 

16 

131,1 9  

5 787,87 

47 

47-1 

Погрузка в  

автотранспортное 

средство: мусор строительный с погрузкой вручную  

т 

1,65048 

1 

1,65048 

878,7 9  

1 450,43 

Всего по позиции 

1 450,43 

48 

02-15-1-01-0010 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с  

усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км  

т 

1,65048 

1 

1,65048 

175,4 9  

289,64 

Всего по позиции 

289,64 

49 

ГЭСН15-02-019-03 

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное  

оштукатуривание) из 

сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  

100 м2 

0,3588 

1 

0,3588 

Объем=35,88 / 100 

Итого прямые затраты 

3 830,48 

ФОТ 

3 808,93 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы 

% 

100 

0,9 

90 

3 428,04 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы 

% 

49 

0,85 

41,65 

1 586,42 

Всего по позиции 

24 

651,4 5  

8 844,94 

50 

ГЭСН15-02-019-07 

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное  

оштукатуривание) из 

сухих растворных смесей на каждый 1 мм  

изменения толщины слоя добавлять или исключать  

100 м2 

0,3588 

1 

0,3588 

к расценке: 15-02-019-03  

Объем=35,88 / 100 

Итого прямые затраты  

3 659,35 

ФОТ 

3 638,00 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы  

% 

100 

0,9 

90 

3 274,20 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы  

% 

49 

0,85 

41,65 

1 515,23 

Всего по позиции 

23 

547,3 2  

8 448,78 

51 

ФСБЦ-14.3.01.01-0001 

Грунтовка адгезионная  

для обработки плотных,  

гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований  

кг 

7,176 

1 

7,176 

144,12 

1,36 

196,0 0  

1 406,50 

Объем=35,88*0,2 

Всего по позиции 

1 406,50 

52 

ФСБЦ-04.3.02.05-0004 

Смеси сухие гипсовые штукатурные  

быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное  

нанесение 

т 

0,200928 

1 

0,200928 

12 024,05 

1,29 

15 

511,0 2  

3 116,60 

Объем=35,88*5,6/1000 

Всего по позиции 

3 116,60 

53 

ГЭСН15-04-007-03 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен,  

подготовленным под окраску 

100 м2 

0,3588 

1 

0,3588 

Объем=35,88 / 100 

Итого прямые затраты  

4 275,98 

ФОТ 

3 884,64 

Пр/812-015.0-1,  

Приказ № 812/пр от  

21.12.2020 п.25  

НР Отделочные работы  

% 

100 

0,9 

90 

3 496,18 

Пр/774-015.0,  

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

СП Отделочные работы  

% 

49 

0,85 

41,65 

1 617,95 

Всего по позиции 

26 

170,8 

9 390,

54 

ФСБЦ-14.3.02.01-0362 

Краска водно-дисперсионная 

акрилатная ВД-АК-104  

т 

0,010764 

1 

0,010764 

87 665,56 

1,85 

162 181,29 

1 745,72 

Всего по позиции  

1 745,72 

55 

ФСБЦ-14.3.01.03-0001 

Состав грунтовочный глубокого проникновения  

кг 

7,176 

1 

7,176 

65,84 

1,36 

89,54 

642,54 

Объем=Ф50.р2*1000 

Всего по позиции  

642,54 

Всего по разделу 4 Подъезд 

69 877, 

24  

Итоги по смете: 

 Всего прямые затраты (справочно) 

613 841, 69  

 в том числе: 

 Оплата труда рабочих 

140 491, 84  

 Эксплуатация машин 

34 894, 

84  

 Оплата труда машинистов (Отм) 

9 156,39 

 Материалы 

426 443, 12  

 Перевозка 

2 855,50 

 Строительные работы 

829 330, 61  

 Строительные работы 

826 475, 11  

 в том числе: 

 оплата труда 

140 491, 84  

 эксплуатация машин и механизмов 

34 894, 

84  

 оплата труда машинистов (Отм) 

9 156,39 

 материалы 

426 443, 12  

 накладные расходы 

140 394, 08  

 сметная прибыль 

75 094, 

84  

 Перевозка 

2 855,50 

 Всего ФОТ (справочно) 

149 648, 23  

 Всего накладные расходы (справочно) 

140 394, 08  

 Всего сметная прибыль (справочно) 

75 094,

 НДС 20% 

165 866, 12  

ВСЕГО по смете 

995 196, 73  

 справочно: 

 Затраты труда рабочих 

441,01815 3  

 Затраты труда машинистов 

21,498091  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  

застройщик «Стройресурс-ЭН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов денежные средства за проведенную судебную экспертизу в размере 180 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройресурс-ЭН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1