20/2022-90927(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-7317/2022

г. Астрахань

14 ноября 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Баскаковой И.Ю.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167, 173, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести в Государственный контракт № 48 от 29.04.2022г. следующие изменения: 

1. Пункт 3.1 раздела 3 «Сроки выполнения работ» контракта изложить в следующей  редакции: «3.1. Работы по Контракту должны быть завершены Подрядчиком в срок не  позднее 01.09.2023 года, с правом досрочного выполнения».  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю. Баскакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.10.2021 7:20:44

14 ноября 2022 года Кому выдана Баскакова Инна Юрьевна