Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-96775/22

28 февраля 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2023 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Н.А. Поморцева ,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ООО " ТСК Мосэнерго"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании   

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно протоколу судебного заседания от 21.02.2023

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТСК МОСЭНЕРГО" (далее – Истец) обратилось в арбитражный суд Московской области с иском к ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ" (далее – Ответчик) о расторжении договора  о подключении к системам теплоснабжения объекта капитального строительства от 25.12.2017 № 10-11/17-1142, заключенный между ООО "ТСК МОСЭНЕРГО" и ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ".

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал и просил удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился,  с учетом имеющихся в материалах дела доказательств извещения, применяя положения ст. ст. 121, 123 АПК РФ извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. 

В силу ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела (часть 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ).

Возражений от сторон против рассмотрения спора в настоящем судебном заседании на дату его проведения не поступило, в связи с чем, суд, руководствуясь ч.4 ст.137 АПК РФ и п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», завершил предварительное судебное заседание и одновременно начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции по существу.

Рассмотрев представленные материалы дела, суд установил следующее.

             Между ООО «ТСК Мосэнерго» в лице ООО «ЦТП МОЭК», действующего на основании агентского договора от 23.11.2015 №1А-ЦТП-ТСКМЭ и ООО «Стройконсалтинг» заключен договор от 25.12.2017 № 10-11/17-1142 (далее - Договор) о подключении к системе теплоснабжения объекта капитального строительства «Медицинский центр», расположенного по адресу: Московская обл., г. Химки, в районе Химкинской ЦРБ (далее - Объект).

В соответствии с п. 1.1. Договора, Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

Согласно пункту 3.1. Договора о подключении, срок фактического подключения по договору - 18 месяцев со дня заключения Договора. Из данного пункта вытекает, что Ответчик обязан выполнить все свои обязательства, предусмотренные условиями подключения, не позднее 25.06.2019.

Как указал Истец,  мероприятия по подготовке Объекта к подключению, со стороны Ответчика не выполнены.

Порядок оплаты услуг согласован сторонами в п. 4.2 Договора:

-   платёж в размере 1 153 472,13 руб., оплачивается в течение 15 дней с даты заключения Договора;

-   платёж в размере 3 844 907,09 руб., оплачивается в течение 90 дней с даты заключения Договора, но не позднее даты фактического подключения.

Обязательства Заявителя по оплате вышеуказанных платежей не исполнены (ни в добровольном порядке, ни при предъявлении исполнительного листа для взыскания задолженности, дело №А41-20349/2020).

В соответствии с п. 3.1 Договора, срок подключения составляет 18 месяцев со дня его заключения, т.е. при надлежащем исполнении обязательств, подключение должно было быть завершено не позднее 25.06.2019.

            27.07.2022 Истец направил в адрес Ответчика претензию № АУ/01-07/975/22 от 22.07.2022 (трек-номер почтового отправления Почты России 11961870037175) о необходимости расторгнуть Договор в связи с истечением срока подключения объекта по причине неисполнения Заявителем своих обязательств и в течение 30 (тридцати) дней с даты получения данной претензии направить один подписанный экземпляр соглашения о расторжении в ООО «ТСК Мосэнерго», с одновременным уведомлением о расторжении договора в судебном порядке в случае неудовлетворения претензии в установленный срок.

Поскольку урегулирование спора в претензионном порядке положительного результата не принесло, мероприятия, предусмотренные пп. 2.3.2 – 2.3.17 Договора, Ответчиком также исполнены не были, Истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик документально мотивированный отзыв на иск не представил, возражений по существу исковых требований не заявил.

Суд исследовал материалы дела, изучил представленные документы, доводы и возражения представителей сторон,  считает требования  подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.   

В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

В ч. 2 ст. 450 ГК РФ установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (пункт 2 статьи 453 ГК РФ).

В соответствии с п. 26 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", действовавшим на дату заключения Договора (далее - Правила подключения), существенными условиями Договора о подключении являются:

а)  перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение;

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж)  условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

з)   обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

Согласно пункту 27 Правил подключения, мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения (являющиеся существенным условием договора о подключении), выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, содержат:

-     разработку     заявителем     проектной     документации     согласно     обязательствам, предусмотренным условиями на подключение;

-      выполнение условий подключения.

В соответствии с условиями Договора, Заявитель обязан выполнить его существенные условия, из которых Ответчиком не исполнены следующие:

- внесение платы за подключение в размере и в сроки, установленные Договором (п. 2.3.1. Договора; п.п. «в» п. 26 Правил №307);

- разработка проектной документации (п. 2.3.2. Договора; п.п. «а» п. 26, п. 27 Правил №307);

 -    представление Исполнителю утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения Условий подключения (п. 2.3.3 Договора; п.п. «а» п. 26, п. 27 Правил №307 );

-  представление Исполнителю исполнительной документации в объеме, необходимом для подтверждения     выполнения     Условий     подключения     и     выдачи     акта     о     готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (п.п.. 2 п. 2.3.3 Договора; п.п..«а» п. 26 Правил №307);

-   выполнение установленных в договоре условий подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению (п. 2.3.4 Договора; п.п.. «ж» п. 26 Правил №307);

 - выполнение Условий подключения в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе по установке приборов (узлов) учета теплоносителя и тепловой энергии) п.2.3.5 Договора; п.п., «з» п. 26 Правил №307);

-  соблюдение срока подключения Объекта к системе теплоснабжения (п. 3.1 Договора, п.п..«б» п. 26 правил №387).

Как следует из материалов дела сведений об исполнении всех обязательств,  предусмотренные договором Ответчиком не представлены.

Также со стороны Истца  мероприятия по подключению Объекта к системе теплоснабжения также отсутствуют. 

Согласно п. 5.4 Договора, в случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств, указанных в п.п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 4.2 (представление проектной и исполнительной документации; выполнение условий подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования; выполнение условий подключения; внесение платы за подключение), а также в иных случаях нарушения встречного исполнения обязательств, исполнение обязательств Исполнителя по подключению объекта к системе теплоснабжения приостанавливается, срок исполнения обязательств Исполнителя продлевается на срок неисполнения своих обязательств Заявителем.      

Пунктом 5.1 Договора установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения      условий      Договора      Стороны     несут      ответственность      в     соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно нормам действующего законодательства, по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Договор   о   подключении   содержит,   в   том   числе,   следующие   существенные   условия:

перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению, срок подключения, порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение (п. 26 Правил № 307).

Мероприятия       (в       том       числе       технические)       по    подключению       объекта       к       системе теплоснабжения,       выполняемые       заявителем,       содержат    разработку       заявителем       проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным  условиями на подключение, а также выполнение условий подключения.

В соответствии с пунктами 2.3.2-2.3.17 Договора, Заявитель обязан предоставить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию и исполнительную документацию, выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению, выполнить условия подключения в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии) в установленный Договором срок и письменно уведомить об этом исполнителя, подписать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования; до оформления Акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя предъявить устройства и сооружения, созданные для подключения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять государственный энергетический надзор; предъявить устройства и сооружения созданные для подключения к системам теплоснабжения,   для  осмотра   и   допуска  к  эксплуатации   федеральным  органам   исполнительной власти,      уполномоченным      осуществлять      государственный      санитарно-эпидемиологический      и федеральный государственный энергетический надзор (п.п. 26-28 Правил № 307).

Выполнение заявителем условий подключения, в т.ч. получение разрешительной документации (акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, акт осмотра и разрешение Ростехнадзора) является существенным условием договора о подключении. Указанные мероприятия должны быть выполнены заявителем в пределах срока на подключение объекта, о чем, помимо прочего, свидетельствует сложившаяся правоприменительная практика (постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.2021 № Ф05-30102/2021 по делу № А40-242984/2020).

В соответствии с п. 3.1 Договора, срок подключения составляет 18 месяцев со дня его заключения, т.е. при надлежащем исполнении обязательств, подключение должно было быть завершено не позднее 25.06.2019, указанный срок в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя (п.39 Правил №307), с подобным обращением Ответчик к Истцу не обращался, что свидетельствует об утрате интереса к исполнению Договора со стороны Ответчика.

В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

          Статьей 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Статьей 71 АПК РФ  установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 АПК РФ).  Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68  АПК РФ). 

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В условиях отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих исполнение ответчиком обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в установленные договором и техническим условием срок, данные обстоятельства являются достаточным основанием для вывода о существенном нарушении Договора ответчиком и наличии оснований для расторжения Договора в судебном порядке. 

Учитывая изложенные обстоятельства, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, суд приходит к выводу о признании заявленных исковых требований обоснованными и  подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учётом результатов рассмотрения спора, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

      Расторгнуть договор о подключении к системам теплоснабжения объекта капитального строительства от 25.12.2017 № 10-11/17-1142, заключенный между ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «Стройконсалтинг».

        Взыскать с ООО "СТРОЙКОНСАЛТИНГ"   в пользу  ООО " ТСК Мосэнерго"    государственную пошлину в размере 6000 руб.  

        Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке и сроки. 

 

Судья                                                          Н.А. Поморцева