АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2022 года

Дело № А33-10496/2021

Красноярск

       Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21.03.2022.

       В полном объёме решение изготовлено 28.03.2022.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Деревягина М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (ИНН 

<

***>,      ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о расторжении договора, о взыскании расходов,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 29.04.2021,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

установил:

публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (далее – ответчик) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 № 20.2400.8467.17., о взыскании с расходов, понесенных при исполнении договора от 05.10.2017 №20.2400.8467.17, в общей сумме 1 967 883,10 руб.

Определением от 09.05.2022 судебное разбирательство по делу отложено на 21.03.2022.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дело рассматривается в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (в настоящее время ПАО «Россети Сибирь»; сетевая организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (далее - заявитель) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 № 20.2400.8467.17, в соответствии с условиями которого  сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) электроустановки производственной базы, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

-  максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;

-  категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение   0,40 кВ; 

- максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств отсутствует кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора

Заявитель обязуется  оплатить расходы на технологическое  присоединение в  соответствии  с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановки производственной базы, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, улТамбовская-ул.ФИО3, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500286:1100.

Пунктом 4 договора предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

В силу пункта 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 26.12.2016г №677-п и составляет 514 890,18 руб., в том числе НДС 18% в сумме 78 542,57 руб.

Согласно пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15% платы за технологическое присоединение в размере 77 233,53 руб., в том числе НДС 18% в сумме 11 781,39 руб. вносятся в течение 15 дней (пятнадцати) со дня заключения настоящего договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 154 467,05 руб., в том числе НДС 18% в сумме 23 562,77 руб. вносятся в течение 60 (шестидесяти) дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

- 45% платы за технологическое присоединение в размере 231 700,58 руб., в том числе НДС 18% в сумме 35 344,16 руб. вносятся в течение 15 (пятнадцати) дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 51 489,02 руб., в том числе НДС 18% в сумме 7 854,25 руб. вносятся в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Пунктом 15 договора предусмотрено, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 10 технических условий для присоединения к электрическим сетям №8000325015 (приложение №1 к договору) сетевая организация осуществляет:

10.1. Организационные мероприятия:

10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны заявителя.

10.1.3. Фактические      действия      по      присоединению      и      обеспечению    работы энергопринимающих устройств заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. От РУ-0,4 кВ ТП 522 до границы объекта заявителя запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ. Марку и сечение кабеля, способ прокладки определить проектом.

Заявитель осуществляет:

11.а. Установить щит учета. Конструкция щита должна соответствовать требованиям электробезопасности и исключать возможность безучетного подключения электроэнергии.

11.б. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008№ 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.2.2. Учета электрической энергии: выполнить в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442), ПУЭ;

11.2.3. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.3.Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4.Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5.Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель, в  том числе обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

27.04.2018 между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (в настоящее время ПАО «Россети Сибирь»; сетевая организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (заявитель) подписано дополнительное соглашение № 1 к договору от 05.10.2017 №20.2400.8467.17, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 30.11.2018.

ООО «Стройфинанс» обратилось к ПАО «Россети Сибирь» с заявлением от 29.11.2019 о расторжении договора № 20.2400.8467.17.

Из искового заявления следует, что ПАО «Россети Сибирь» подготовлено соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 № 20.2400.8467.17, которое было направлено в адрес ответчика, также указано, что сетевой организацией по договору выполнены мероприятия на сумму 2 199 584,63, в том числе НДС 20% в сумме 366 597,44 руб., а именно:

-  выполнены  работы в части подготовки, выдачи, согласования технических условий на сумму 14 085 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 347,50 руб.;

- понесены расходы на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы в рамках исполнения договора на сумму 2 185 499,63 руб., в том числе НДС 20% в сумме 364 249,94 руб.

Согласно справке ПАО «Россети Сибирь» от 10.12.2019 по состоянию на 10.12.2019 по инвестиционному мероприятию (СПП-элементы): IT.24.0147.118 КЛ 0,4 кВ от ТП 522      (ООО «Стройфинанс») затраты составляют всего 1 821 249,69 руб., в том числе:                 ПИР подрядным способом - 228 159,74 руб.; СМР подрядным способом - 1 388 231 руб.; затраты подразделений ДКС - 36 556,27 руб.; капитализируемые проценты - 168 302,68 руб.

Согласно расчёту истца, расходы, понесенные истцом при исполнении договора от 05.10.2017 № 20.2400.8467.17, с учетом частичной оплаты в сумме 231 701,53 руб. составили 1 967 883,10 руб.  (2 199 584,63 руб. - 231 701,53 руб.).

В подтверждение несения расходов истец представил в материалы дела:

- договор подряда от 23.03.2018 № 10.2400.2305.18 между ПАО «МРСК Сибири» (заказчик) и ООО «РСО-Энерго» (подрядчик), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в соответствии со сводным  планом работ  (приложение № 18) и заданием на проектирование (приложение № 1) осуществить работы по строительству ВЛ-0,4-10 кВ, КЛ-0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ, установке дополнительных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (Лот № 4) и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором;

- акты о приемке выполненных работ от 09.07.2018 №/№ 19, 20;

- платежные поручения от 23.10.2019 № 42479, от 20.08.2018 № 31913;

- техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ;

В нарушение условий договора обязательства, предусмотренные техническими условиями, ответчиком не выполнены.

Как следует из материалов дела, соглашение о расторжении договора сторонами не подписано.

Доказательства исполнения своих обязательств по договору ответчиком в материалы дела не представлено.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8467.17 и по возмещению сетевой организации расходов в сумме 1 967 883,10 руб., истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике). Согласно статье 4 этого закона нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти. Руководствуясь статьей 21 закона Правительство Российской Федерации устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям. 

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения, Правила № 861).

По смыслу пункта 7 Правил технологического присоединения под таковым понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения. 

В силу пункта 15 Правил технологического присоединения договор технологического присоединения считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. 

В соответствии с пунктом 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов. 

Пунктом 19 Правил технологического присоединения предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения. 

Право заявителя на одностороннее расторжение договора технологического присоединения также согласно подпункту «в» пункта 16 Правил № 861 отнесено к существенным условиям данного договора.

Право исполнителя на одностороннее расторжение договора определяется с учетом общих правил статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 15 договора предусмотрено, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Как следует из искового заявления, истец заявляет требование о расторжении договора в связи с тем, что ответчик не выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 11 технических условий.

Соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8467.17 направлено истцом в адрес ответчика. 

       В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случае существенного нарушения договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспорено, что требования технических условий на технологическое присоединение в части, отнесенной на заявителя, им не были выполнены в предусмотренный договором срок. 

Доказательств наличия уважительных причин пропуска ответчиком сроков исполнения обязательств по договору не имеется, невозможность выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 11 технических условий по причинам, зависящим исключительно от истца, ответчиком не доказана.

Суд полагает, что поведение ответчика существенно нарушает баланс законных интересов сторон и добросовестные ожидания истца относительно результатов исполнения договора.

Пунктом 16(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), предусмотрено, что нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Срок исполнения истцом мероприятий по договору исходя из содержания технических условий наступает после срока исполнения ответчиком предусмотренных техническими условиями мероприятий. При этом ответчиком допущено нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению более чем на 12 месяцев. 

Таким образом, длительное неисполнение ответчиком мероприятий, указанных в технических условиях, в отсутствие оснований полагать, что исполнение со стороны ответчика когда-либо будет иметь место, квалифицируется судом как существенное нарушение условий договора ответчиком, влекущее право истца на судебное расторжение договора.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что требование о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8467.17 является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 1 967 883,10 руб. расходов, понесенных сетевой организацией в связи с выполнением мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8467.17. 

Из искового заявления следует, что сетевой организацией по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8467.17 выполнены мероприятия на сумму 2 199 584,63 руб., в том числе НДС 20% в сумме 366 597,44 руб., а именно:

-  выполнены  работы в части подготовки, выдачи, согласования технических условий на сумму 14 085 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 347,50 руб.;

- понесены расходы на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы в рамках исполнения договора на сумму 2 185 499,63 руб., в том числе НДС 20% в сумме 364 249,94 руб.

Согласно справке ПАО «Россети Сибирь» от 10.12.2019 по состоянию на 10.12.2019 по инвестиционному мероприятию (СПП-элементы): IT.24.0147.118 КЛ 0,4 кВ от ТП 522      (ООО «Стройфинанс») затраты составляют всего 1 821 249,69 руб., в том числе: ПИР подрядным способом - 228 159,74 руб.; СМР подрядным способом - 1 388 231 руб.; затраты подразделений ДКС - 36 556,27 руб.; капитализируемые проценты - 168 302,68 руб.

Согласно расчёту истца, расходы, понесенные истцом при исполнении договора от 05.10.2017 № 20.2400.8467.17, составили 1 967 883,10 руб. с учетом частичной оплаты в сумме 231 701,53 руб. (2 199 584,63 руб. - 231 701,53 руб.).

Согласно части 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно части 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В части 2 данной статьи указано, что убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Истец, подготовив и выдав ответчику технические условия, исполнил часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой компании, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что ответчик обязан возместить истцу понесенные последним расходы в размере 1 722 052,36 руб. (расходы на выполнение  работ в части подготовки, выдачи, согласования технических условий; расходы на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы); материалами дела подтверждается, что затраты в размере      1 722 052,36 руб. понесены истцом в интересах ответчика для исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8427.17. Неизбежность затрат для сетевой организации обусловлена публично-правовым характером правоотношений по технологическому присоединению, а основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора ответчиком.

В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не обосновал и документально не подтвердил относимость расходов в остальной сумме (затраты подразделений ДКС; капитализируемые проценты), необходимых для исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8427.17.

С учетом изложенного, исковые требования являются обоснованными частично и подлежат удовлетворению в размере 1 722 052,36 руб. В остальной части иска следует отказать.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела составляет 38 679 руб.

Истцом оплачена госпошлина в размере 32 679 руб. на основании платёжного поручения от 09.04.2021 № 12217.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 28 596,69 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца; госпошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.10.2017 №20.2400.8427.17.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) 1 722 052,36 руб., а также 28 596,69 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

М.В. Деревягин