И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А40-35024/22-151-262

г. Москва

29 августа 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 18.08.2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 29.08.2022 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Э.Л. Валиевым

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ОГРН 1047796301002) 

к АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» (ОГРН 1021602014224) 

при участии третьего лица ФГУП «АГА (А)»

при участии третьего лица в\у Сапегина Анастасия Александровна

о взыскании 2 055 056, 59 руб., 

при участии

от истца и третьего лица: Колбасов Д.Е. по доверенности от 30.12.2021 (от ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА); по доверенности от 11.04.2022 (от ФГУП «АГА (А)»

от ответчика и третьего лица в\у Сапегина Анастасия Александровна – представители не явились,

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен об обязании ответчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с условиями государственного контракта №0373100090916000036 от 18.10.2016; взыскании неустойки в размере 2 055 056, 59 руб. 

Истец и третье лицо требования поддержал в полном объеме. Представитель ответчика и третьего лица в\у Сапегина Анастасия Александровна в судебное заседание не явились, извещены, суд считает возможным в порядке ст. 156 АПК РФ провести судебное заседание в их отсутствие. 

Изучив материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение истца и третьего лица, суд пришел к следующим выводам. 

Между Федеральным агентством воздушного транспорта, действующим от имени Российской Федерации, в лице федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее - Истец), и АО «Трест Камдорстрой» (далее - Ответчик) заключен Государственный контракт от 18.10.2016 № 0373100090916000036 (далее - Контракт) по выполнению работ на объекте: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово» г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)» (далее - Объект).

По условиям п. 2.1 Контракта, Ответчик обязуется, в соответствии с Проектной документацией закупить Оборудование и материалы, выполнить работы по разработке Рабочей и иной технической документации, строительные, монтажные, и другие, связанные с Объектом работы, обеспечивающие полноценную работу вновь построенных/реконструированных объектов и их ввод в эксплуатацию, перечень, объем и сроки которых определяются в Приложении № 1 и № 2 к Контракту, и передать их Государственному заказчику в установленном Контрактом порядке.

Согласно п. 3.1.2. Контракта, подписав настоящий Контракт, Ответчик подтверждает, что он изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

Ответчик подтверждает готовность соблюдения требований, предъявляемых Истцу к порядку производства Работ, устранения недостатков и предоставления первичных документов и Исполнительной документации.

В соответствии с п. 12.1. Контракта, срок выполнения Работ — с даты заключения Контракта по 30.12.2021.

Начальный и конечный сроки выполнения Работ по Контракту, а также промежуточные сроки выполнения конкретного вида Работ по Контракту, и сроки выполнения Этапа(ов) Работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Согласно п. 11.13 Контракта в течение 1 (Одного) дня с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) Подрядчик представляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств на сумму 25 828 109, 63 руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта) со сроком действия, превышающим срок действия Контракта, не менее чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

В соответствии с п. 25.2 Контракта, Гарантийный срок устанавливается на все здания и Сооружения, а также Материалы и Оборудование, с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14) на 60 месяцев.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии (форма КС-14) подписан 14.01.2019.

Таким образом, Гарантийный срок установлен до 14.01.2024.

Срок действия банковской гарантии от 15.01.2019 № 0502/5/2017/248/24 истек 15.04.2020.

По состоянию на 23.06.2021, надлежащим образом оформленное обеспечение исполнения гарантийных обязательств на сумму 25 828 109, 63 руб. не предоставлено.

Таким образом, Ответчик нарушил требования, предусмотренные п. 11.13 Контракта.

В соответствии с п. 28.5 Контракта, в случае просрочки исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направил 02.07.2021 Ответчику требование № Исх-6629 об уплате неустойки (штрафов, пеней) за нарушение сроков:

- предоставления надлежащим образом оформленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в соответствии с п. 11.13 и статьей 25 Контракта.

Пеня в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, определяется по формуле П=(Ц — В) х С (где Ц — цена Контракта; В — стоимость фактически, исполненного  в  установленный  срок Исполнителем  обязательства  по  Контракту, определяемая на основании документа результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С — размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = С цб х ДП (где С цб — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Период просрочки с 16.04.2021 по 23.06.2021.

По состоянию на 23.06.2021, ставка рефинансирования — 5,5%

Сумма обеспечения гарантийных обязательств — 25 828 109, 63 руб.

Расчет штрафных санкций за ненадлежащее исполнение п. 11.13 Контракта - сумма неустойки: 2 055 056,59 руб.

Таким образом, сумма неустойки (пени) составляет сумму в размере 2 055 056, 59 руб.

Претензия Ответчиком в добровольном порядке не удовлетворена.

Указанное послужило обстоятельствами для обращения в суд с заявленными требованиями. 

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 368, 370, 371, 374, 375, 421, 431  Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Доводы отзыва ответчика суд отклоняет как несостоятельные, совокупностью надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждается обоснованность требований истца. 

В связи с чем, суд удовлетворяет требования истца об обязании ответчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с условиями государственного контракта №0373100090916000036 от 18.10.2016, с учетом п. 11.13; 28.5 и ст. 25 Контракта.

Рассмотрев требования о взыскании неустойки, суд находит расчет методологически и арифметически верным, при этом заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ суд отклоняет, поскольку учитывает ст. 421 и 431 ГК РФ, а также п. 28.5 контракта.  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате госпошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 368, 370, 371, 374, 375, 421, 431  ГК РФ, ст.  64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Обязать АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» (ОГРН 1021602014224) предоставить  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ОГРН 1047796301002) банковскую гарантию, в соответствии с условиями государственного контракта №0373100090916000036 от 18.10.2016, сроком действия до 14.01.2024. 

Взыскать с АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» (ОГРН 1021602014224) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ОГРН 1047796301002) неустойку в размере 2 055 056 руб. 59 коп.

Взыскать с  АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» (ОГРН 1021602014224) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 39 275 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья             К.В. Вольская