107_36561774 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ) 

 

Дело № А40-267336/22-107-1817

08 августа 2023 года

г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при  ведении протокола помощником судьи А.Э.Гогиберидзе, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело № А40-267336/22-107-1817 по иску ООО "БЛАГОДОМ  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику  ООО "КСК "ФМ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы  задолженности по договору № КВШ-ТЗ-13/12/21 от 13.12.2021 в размере 3 880 403,76  р., неустойки в размере 1 502 275,12 р. неустойки за период с 08.02.2022 по 30.11.2022,  неустойки за период с 01.12.2022 по день фактического исполнения обязательства,  встречного иска ООО "КСК "ФМ" к ООО "БЛАГОДОМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"  о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору   № КВШ-ТЗ-13/12/21 от 13.12.2021 в размере 5 044 156,67 р., процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 20.10.2022 по 30.05.2023 в размере 231  132,99 р., процентов с 01.06.2023 по дату фактического исполнения обязательств, при  участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 26.05.2023, удостоверение  адвоката, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от 01.02.2023,  паспорт, диплом,  

РЕШИЛ:

Отказать ООО "БЛАГОДОМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" в удовлетворении  первоначального иска к ООО "КСК "ФМ" о взыскании суммы задолженности по  договору № КВШ-ТЗ-13/12/21 от 13.12.2021 в размере 3 880 403,76 р., неустойки в  размере 1 502 275,12 р. неустойки за период с 08.02.2022 по 30.11.2022, неустойки за  период с 01.12.2022 по день фактического исполнения обязательства.  

Удовлетворить встречные исковые требования ООО "КСК "ФМ" к 

ООО 

"БЛАГОДОМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 

 частично. 

Взыскать с ООО "БЛАГОДОМ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" в пользу ООО "КСК  

"ФМ" сумму неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору  

 № КВШ-ТЗ-13/12/21 от 13.12.2021 в размере 4 960 030,99 р., процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 20.10.2022 по 30.05.2023 в размере  227 278,13 р. (всего задолженность и проценты в размере 5 187 309,12 р.), процентов с  01.06.2023 по дату фактического исполнения обязательств на сумму задолженности в  размере 4 960 030,99 р., исходя из ключевой ставки Банка России за каждый день  просрочки, государственную пошлину в размере 48 552 р.  

Возвратить ООО "КСК "ФМ" из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 4 267 р., уплаченную по платежному поручению № 56 от  26.01.2023.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течении месяца со дня принятия.  

СУДЬЯ М.В. Ларин