АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2485/2023

г. Белгород

11 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  

ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  

секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МБУ  

"УКС Шебекинского городского округа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  

ООО "КРОВСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить выявленные недостатки и замечания, изложенные в акте  

выявленных недостатков (дефектов) после проведения капитального ремонта от 25 июля  

2022 года, согласно условиям муниципального контракта № 0826600006319000284-20/9 от  

20 января 2020 года (с учетом уточнения искового заявления в порядке ст. 49 АПК РФ), 

при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, доверенность от 24.10.2023; от ответчика: не явился, уведомлен, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции 

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования МБУ "УКС Шебекинского городского округа"  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать ООО "КРОВСТРОЙ" в течение 30 календарных дней с момента  

вступления в законную силу судебного акта устранить, следующие недостатки на  

объекте МБОУ Поповская СОШ Шебекинского района Белгородской области: - забетонировать ограждение школы; - убрать в чердачном помещении строительный мусор; 

- в кабинете химии отремонтировать вытяжку (не функционирует система  

вентиляции); - в помещении столовой отремонтировать аварийное освещение; 

- установить в помещение детского сада светильники в тамбуре в количестве 2  

штук, а так же устранить провисание подвесной потолка; - в помещениях школы устранить трещины штукатурного слоя стен; - установить молниеотвод; - установить прибор учета тепловой энергии; 

- установить по всему периметру кровли, на местах примыканий к фасаду здания,  

уголок 90°; 

- установить крышку люка на канализационный колодец (на территории школы);  - устранить протекание кровли;  

- установить светильники на козырьке главного (центрального) входа в здание школы в количестве 4 штук; - дошкольный блок. Вход с улицы. Отделать облицовку крыльца плиткой; 

- главный (центральный) вход в здание школы. Отделать облицовку парапетов  крыльца;  

- помещение детского сада. Установить сан. тех. перегородки в туалете в  количестве 7 штук, так же установить защитные экраны на радиаторах отопления в  количестве 14 штук;  

- спортивный зал. Установить защитные сетки на окнах в количестве 6 штук,  светильниках в количестве 14 штук. Установить защитные экраны на радиаторах  отопления в помещении спортивного зала в количестве 8 штук.  

Взыскать с ООО "КРОВСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу МБУ "УКС Шебекинского городского округа" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев