28/2020-210768(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-27072/2019

г. Новосибирск

14 октября 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Муниципального казённого учреждения "Управление жилищно- коммунального хозяйства" г.Искитима Новосибирской области (ОГРН  

<

***>), г.Искитим  

к обществу с ограниченной ответственностью "Алекс" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, о неустойке при участии: 

от истца: ФИО2, доверенность от 06.03.2020 № 301, паспорт,  от ответчика: ФИО3, доверенность от 20.01.2020, паспорт,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Муниципального казённого учреждения  "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Искитима Новосибирской  области удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Алекс" в течение 30  дней со дня вступления в законную силу решения суда исполнить  

гарантийные обязательства по муниципальному контракту № Ф.2018.208900  от 22.05.2018, а именно:  

1. устранить колейность на асфальтобетонном покрытии по обе стороны  наката глубиной от 6 до 8 мм дома № 13а мкр. Индустриальный до моста через  р. Койниха;  

2. устранить просадку асфальтобетонного покрытия (заезд к дому № 38  ул. Комсомольская - до 25мм);  

3. устранить просадку асфальтобетонного покрытия (примыкание к  парковочному карману у дома № 204 ул. Советская - до 20 мм);  

4. устранить просадку уровня люков колодцев на 40 мм на заезде к дому   № 215 ул. Советская;  

5. устранить просадку асфальтобетонного покрытия примыкания  остановочного кармана и остановочной платформы (остановочная платформа  Горсад" со стороны дома № 221 ул. Советская - до 25мм);  

6 . устранить просадку асфальтобетонного покрытия примыкания  остановочного кармана (остановочная платформа "ТОРГ" со стороны дома   № 245а и 252 ул. Советская -до 25мм);  

7. устранить просадку асфальтобетонного покрытия пешеходном  переходе пересечения ул. Советская-ул. Юбилейная - до 20мм);  

8. устранить просадку асфальтобетонного покрытия примыкания  остановочного кармана (остановочная платформа "Черепановская" со стороны  дома № 46 мкр.Индустриальный - до 20мм);  

9. устранить просадку асфальтобетонного покрытия примыкания к  парковочному карману у домов № 360 и 365 ул. Советская (по обе стороны) -  до 20мм);  

10. устранить разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара на  участке от ул. Набережная в сторону моста через р. Койниха;  

11. устранить колейность на асфальтобетонном покрытии на перекрестке  ул.Советская-ул.ФИО4;  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ОГРН  1125476182260) в пользу Муниципального казённого учреждения  "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Искитима Новосибирской  области (ОГРН 1085472002109) пени за период с 21.05.2019 по 16.09.2019 в  размере 27 194 рублей 12 копеек, с 16.09.2019 продолжить начисление пени,  исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на момент  исполнения обязательства, от стоимости работ по устранению недостатков в  размере 1 613 096 рублей 40 копеек, до момента фактического исполнения  обществом с ограниченной ответственностью "Алекс" гарантийных  обязательства по муниципальному контракту № Ф.2018.208900 от 22.05.2018  в части устранения недостатков.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 7 088 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 15.04.2020 3:19:13

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна