АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-7634/24-67-55

г. Москва

11 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения оглашена 14 мая 2024 г. Полный текст решения изготовлен 11 июня 2024 г. 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Будько Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕГА" (127566, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., Д. 44, ЭТАЖ 7,  ПОМЕЩЕНИЕ IX, КОМНАТЫ №№ 2-13, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 07.06.2018, ИНН: 

<

***>)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (107031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  11.11.2002, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 6 025 873,01 руб. 

третье лицо: ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА  МОСКВЫ (125009, 

<

...>, СТР.1, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2012, ИНН: 

<

***>).  

при участии: от истца: ФИО1 по дов-ти от 06.05.2024 от ответчика: ФИО2 по дов-ти от 14.04.2023 от третьего лица: неявка, извещено 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕГА" (далее –  истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ  ОБЩЕСТВУ "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по  договору от 20.12.2021 № ТР-2021-5 в размере 5 963 299 руб. 21 коп., процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2023 по 25.12.2023 в  размере 62 573 руб. 80 коп.  

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком  обязательств по оплате выполненных работ.  

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам,  изложенным в отзыве.  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими частичному удовлетворению, на основании следующего.  

Как усматривается из материалов дела, 20.12.2021 между ООО «Амега»  (субподрядчик) (далее - Истец) и АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (подрядчик) (далее -  Ответчик) был заключен договор субподряда № ТР-2021-5 (далее - договор) на  выполнение Истцом работ по замене оконных блоков на объекте: «Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка  Магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского проспекта до  Калужского шоссе. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения  пассажирского транспорта» (прил. 1).  

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором  строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

18.09.2023 уведомлением о завершении части работ и готовности их к приему-передаче за исх. № 1109/1 от 11.09.2023 (с приложенными к нему актами о приемке  выполненных работ по форме КС-2, Справками о стоимости выполненных работ и  затрат по форме КС-3 № 6 от 30.05.2023, № 7 от 30.05.2023, № 8 от 05.06.2023 и актом  приема-передачи исполнительной документации от 08.09.2023 в двух экземплярах)  Истец известил Ответчика о готовности работ для сдачи-приемки (прил. 2).  

Уведомление Ответчиком принято 18.09.2023 ценным письмом с описью  вложения, о чём имеется Отчет об отслеживании отправления с почтовым  идентификатором 12741081013361 (прил. 3), а также кассовый чек и опись АО «Почта  России» (прил. 4).  

Как указано в п. 1 ст. 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика  о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда  работ или выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.  

Согласно пункту 10.1.4 договора Ответчик обязан был принять результат работ в  течение 15 рабочих дней с даты получения актов. Срок, отведенный на осуществление  приёмки работ, истек 10.10.2023. В указанный срок Ответчик каких-либо  мотивированных отказов в приёмке работ Субподрядчику не направил, и  следовательно, необоснованно уклонился от подписания актов выполненных работ.  

Законом прямо предусмотрено, что при уклонении одной из сторон от  подписания акта выполненных работ на нём делается соответствующая отметка и акт  подписывается другой стороной в одностороннем порядке (п. 4 ст. 753 ГК РФ).  

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от  24.09.2019 № 305-ЭС19-9109 по делу № А40-63742/2018 подтвердила право подрядчика  требовать оплаты работ, если заказчик не подписал акт и не представил  мотивированных возражений.  

В связи с необоснованным уклонением Ответчика от приемки работ и  подписания актов в отведенный срок, Истец на следующий день 11.10.2023,  руководствуясь п. 4 ст. 753 ГК РФ составил односторонние акты, поименованные в  таблице ниже:  

Дата 

КС-2, КС-3, акта п/п ИД  

 №  КС-2 иКС-3 

К оплате,   руб.  

Предусмотренный договором срок на оплату товара  

 Дата начала 

просрочки  платежа  

Подтверждение 

30.05.2023  

6 

1 138 477,  58  

15 дней с момента подписания актов (п. 4.3 Договора)  

 30.11.2023  

Прил. 5 к иску  

30.05.2023  

7 

3 215  471,05  

15 дней с момента подписания актов (п. 4.3 Договора)  

 30.11.2023  

Прил. 6 к иску  

05.06.2023  

8 

1 609  350,58  

15 дней с момента подписания актов (п. 4.3 Договора)  

 30.11.2023  

Прил. 7 к иску  

08.09.2023  

- 

- 

15 дней с момента подписания актов (п. 4.3 Договора)  

 30.11.2023  

Прил. 8 к иску  

Общая сумма 

задолженност и:  

5 963 299,21 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи двести  девяносто девять рублей 21 копейка)  

Затем второй экземпляр односторонних актов (прил. 5-8) Истец 15.11.2023  

передал Ответчику, приложив счета-фактуры (прил. 9-11), счета на оплату (прил. 12-14)  и требование-претензию о выплате задолженности от 03.11.2023 за исх. № 0311 (прил.  15), сопроводив поименованные документы ценным письмом от 03.11.2023 за исх. №  0311/2 (прил. 16) с описью вложения, о чём имеется Отчет об отслеживании  отправления с почтовым идентификатором 14401089001347 (прил. 17), а также  кассовый чек и опись выданные АО «Почта России» (прил. 18).  

Согласно пункту 4.3 договора подрядчик осуществляет платеж в течение 15  (пятнадцать) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, при наличии представленного Подрядчику комплекса исполнительной  документации.  

Согласно п. 20.2.1 договора предусмотрен претензионный порядок  урегулирования споров; срок для ответа на претензию - 7 дней, исчисляемые с момента  её получения стороной.  

Срок исполнения требования по вышеназванной претензии (прил. 15) истек  30.11.2023. Оплата Ответчиком до настоящего времени не произведена.  

Истцом были предприняты действия, направленные на примирение.  

Так, 30.11.2023 в ходе встречи представителей сторон, организованной по  инициативе Истца, Ответчик заверил о том, что в случае изменения условий расчетов  по договору, касающиеся, в том числе перечисленных выше КС-2, КС-3 № 6 от  30.05.2023, № 7 от 30.05.2023, № 8 от 05.06.2023 (согласно которым Подрядчик при  перечислении денежных средств за выполненные работы будет вправе удерживать в  счет оплаты услуг генподряда 5% от стоимости работ при одновременном снижении  размера обеспечительного платежа до 5% от стоимости выполненных работ) Ответчик  произведёт полное погашение задолженности по предыдущим периодам, а также  оплатит корректировочные КС-2 и КС-3 № 6 от 30.05.2023, № 7 от 30.05.2023, № 8 от  05.06.2023.  

С этой целью нарочным 05.12.2023 Ответчику были переданы  откорректированные под предложенные условия акты приема-передачи КС-2, КС-3 №  6 от 30.05.2023, № 7 от 30.05.2023, № 8 от 05.06.2023 и № 9 от 16.10.2023 в двух  

подлинных экземплярах, что подтверждается описью передаваемых документов (прил.  19).  

Ответчик отказался от подписания актов, что подтверждается письмом  Ответчика от 06.12.2023 за исх № 6568/23 (прил. 20).  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми  актами.  

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или  договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе  или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего  Кодекса.  

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного  обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих  обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта  выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное  письмо № 51).  

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами.  

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности  представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании  задолженности по договору от 20.12.2021 № ТР-2021-5 в размере 5 963 299 руб. 21 коп.  признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 01.12.2023 по 25.12.2023 в размере 62 573  руб. 80 коп.  

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания  денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат  уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой  Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.  

Согласно расчету истца, за период с 01.12.2023 по 25.12.2023 размер процентов  за неправомерное их удержание составил 62 573,80 руб.  

Вместе с тем, в соответствии с п. 4.3 Договора Подрядчик осуществляет  текущий платеж в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, при наличии представленного Подрядчику  комплекта исполнительной документации.  

При этом в соответствии с 10.1.4. Договора Подрядчик осуществляет приёмку  Работ, указанных в Акте о приёмке выполненных работ (Форма № КС-2), в течение 15  (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика указанного акта.  

Таким образом оплата по Актам КС-2 должна быть произведена в течении 15  календарных дней с даты приемки работ, а приемка осуществляется в течении 15  рабочих дней.  

С учетом направления ООО «Амега» Актом КС-2 № 6,7,8 письмом № 0112/1 от  01.12.2023 г., которое в адрес АО «ЦДС» поступило 04.12.2023 г., то оплата должна  быть произведена 10.01.2024 г., при этом ООО «Амега» производит расчет процентов с  01.12.2023 г., что не соответствует условиям Договора.  

С учетом того, что истец предъявил требования о взыскании процентов с  01.12.2023 по 25.12.2023, а фактически проценты должны исчисляться с 11.01.2024  г., то требование о взыскании процентов в размере 62 573,80 рублей  удовлетворению не подлежат.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на лиц,  участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРОДОРСТРОЙ" (ИНН:  

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АМЕГА" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 5 963 299 руб., 21 коп., а так же  

расходы по уплате госпошлины в размере 52 577 руб. 29 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья: В.Г. Джиоев