14/2017-50612(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-7473/2017

г. Благовещенск

18 сентября 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи М.В. Сутыриной, 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного  общества «Комплексная проектная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к государственному казенному учреждению Управление автомобильных дорог Амурской  

области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в государственный контракт, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт от 29.03.2016г. № 3353, заключенный  между закрытым акционерным обществом «Комплексная проектная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) и государственным казенным учреждением Управление  автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), изложив пункт 4.1 в следующей редакции: «4.1. Сроки выполнения работ:  начальный срок - со дня заключения настоящего Контракта, срок окончания - 19 месяцев со  дня заключения настоящего Контракта»; в Приложении № 2 «Календарный план выполнения  

работ» текст графы первой пятого столбца изложить в следующей редакции: «19 месяцев с  момента заключения Контракта».  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может  быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья М.В. Сутырина