АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело  № А19-30745/2023

г. Иркутск

10 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2024 года. Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2024 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Д. Ширяевой, рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску        ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664003, 

<

...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664042, 

<

...>) о взыскании 13 885 345 рублей 05 копеек,

по встречному иску об обязании списать неустойку,

 

при участии в судебном заседании:

от истца (по первоначальному иску): ФИО1 по доверенности;

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО2 по доверенности; 

 

установил:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТЕЛЬ» о взыскании 13 884 823 рублей 05 копеек, из них сумма пеней за просрочку выполненных работ составляет 13 684 823 рубля 05 копеек, сумма штрафов 200 000 рублей.

Ответчик в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предъявил для рассмотрения совместно с первоначальным иском встречный иск о понуждении ГУ МЧС России по Иркутской области в списании неустоек в порядке Постановления Правительства Российской Федерации  № 783.

Определением суда от 30.01.2024 принят встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

В судебном заседании истец по первоначальному иску поддержал заявленные требования, в удовлетворении встречного иска просил отказать, представил письменные пояснения по расчету штрафа.

Ответчик по первоначальному иску требования не признал, встречные исковые требования просил удовлетворить, представил ходатайство об уменьшении суммы неустойки.

В настоящем судебном акте стороны именуются истцом и ответчиком, каковыми они являются по первоначальному иску.

Арбитражный суд, проверив материалы дела, выслушав стороны, установил следующее.

21 марта 2022 года между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчик) заключен Государственный контракт № 2020177101542031094009413/154 на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства: Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Иркутской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г.Иркутск, Иркутской области, согласно которому Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок выполнить строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства (далее – Работы): Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Иркутской области» для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г.Иркутск, Иркутской области (далее – Объект) в рамках государственного оборонного заказа, и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить выполненные Работы на условиях, определенных Контрактом.

Согласно разделу 3 контракта, начало работ по настоящему Контракту–дата подписания Контракта. Срок окончания работ (конечный срок) – не позднее 1 декабря 2022 года. Промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены Графиком выполнения строительно-монтажных работ.

Согласно пункту 4.1 контракта, цена контракта составляет: 151 400 241 рубль 43 копейки.

Цена контракта в редакции дополнительного соглашения № 18 от 02.02.2023 составляет 195 849 836 рублей 51 копейку.

Как указывает истец, ответчик допустил просрочку выполнения работ. Работы на объекте выполнены ответчиком в полном объеме, что подтверждается актом приемки законченного строительства объекта  № 1 от 03.07.2023.

В соответствии с пунктом 20.1 Контракта Заказчиком установлено требованиео предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Согласно пункту 20.2 Контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком по его выбору в течение 3 (трех) дней со дня выполнения полного объема Работ на Объекте в сумме 7 804 136 рублей 16 копеек. 

Подрядчик обязан был предоставить обеспечение гарантийных обязательств не позднее 6.07.2023, так как акт приемки законченного строительства объекта № 1 был подписан сторонами 3.07. 2023.

Обеспечение гарантийных обязательств было предоставлено Подрядчиком в виде независимой гарантии 4.10.2023.

Учитывая, что работы были выполнены подрядчиком с просрочкой исполнения обязательств, в том числе по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств, заказчик произвел окончательный расчет с подрядчиком 16.10.2023. на основании последнего Акта о приемке выполненных работ № 12.2 от 3.03.2023, Акта приемки законченного строительства объекта № 1 от 3.07.2023.

Как указывает истец, так как банковская гарантия № 20777-447-0535362 от 10.07.2020, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, действовала до 31 января 2023 включительно, а исполнение контракта в соответствии с информацией, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, было завершено 17.10.2023, то в период с 31.01.2023  по 17.10. 2023 исполнение контракта не было обеспечено подрядчиком. 

Разделом 10 контракта установлена ответственность сторон в случае нарушения ими условий Контракта.

По условиям пункта 10.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Согласно пункту 10.4 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 10.5 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

В силу пункта 10.7 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа, определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительств  Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042, и равен 100 000 рублей. 

Истцом в адрес ответчика были направлены претензии о ненадлежащем исполнении условий государственного контракта, заказчиком было получено письмо подрядчика за исх. №23/121 от 15 сентября 2023 г., по существу которого подрядчик просит о списании начисленных по контракту пеней в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018г. № 783. Заказчик направил Подрядчику письмо за исх. № ИВ-236-6168, по смыслу которого списание начисленной и неуплаченной суммы неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с Постановлением № 783, не представляется возможным в силу изложенных в письме доводов. 

  Поскольку требования претензий ответчиком не исполнены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик по первоначальному иску обратился со встречным иском о понуждении ГУ МЧС России по Иркутской области в списании неустоек в порядке Постановления Правительства Российской Федерации  № 783.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.   

Проанализировав условия контракта, суд считает, что по своей правовой природе указанный контракт является договором  строительного подряда, заключенным в форме контракта.

Таким образом, действия сторон по настоящему делу должны подчиняться требованиям главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Судом установлено, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются, в том числе, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Частью 1 указанного Федерального закона установлено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд помимо Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации.

По смыслу приведенных норм права, определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком. Качество работы также характеризуется по результатам ее выполнения.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации  договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Оценив условия представленного государственного контракта, суд пришел к выводу о согласовании сторонами его существенных условий. При таких обстоятельствах суд считает указанный контракт заключенным.

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сдача и приёмка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.  

Таким образом, поскольку регулирующее подрядные взаимоотношения законодательство прямо предусматривает возможность подтверждения факта выполнения работ и его объема исключительно составлением акта, указанный документ свидетельствует как о факте приема работ, так и подтверждает объем таковых.

В подтверждение факта выполнения работ представлены акты, подписанные со стороны истца и ответчика.

Из представленных актов следует, что истцом указанные работы приняты без замечаний, доказательств наличия спора  по объемам и качеству выполненных работ либо их стоимости в материалы дела не представлено.  

При указанных обстоятельствах, оценив представленные истцом акты, арбитражный суд полагает, что таковые свидетельствуют о факте выполнения работ ответчиком и приемке таковых истцом, поскольку, истцом не указано на какие либо недостатки в выполненных работах, либо на отказ от подписания актов. Кроме того, сторонами не оспаривается, что данные акты подписаны уполномоченными на то лицами.

За нарушение сроков выполнения работ истцом заявлено требование о взыскании пении по контракту в размере  13 684 823 рублей 05 копеек.

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В соответствии с пунктом 2 статьи кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

При этом в силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Из материалов дела и фактических обстоятельств, следует, что имеет место нарушение сроков выполнения работ. 

В соответствии с пунктом 10.5 контракта,  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

Ответчик, не отрицает факт просрочки исполнения обязательств, однако указывает, что на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, неустойка должна быть списана.

Ответчиком представлен контррасчет.

В настоящее время работы по контракту выполнены в полном объеме, что подтверждается актами приемки выполненных работ по всем этапам, акты подписаны без замечаний по качеству выполненных работ.

Истец произвел расчет пени исходя из пункта 10.5 контракта, ключевая ставка определена в размере 15 % по состоянию на 01.11.2023,  период просрочки выполнения работ определен на основании журнала учета выполненных работ и актов о приемке выполненных работ. Период просрочки сторонами не оспаривается.

Довод истца о начислении неустойки в размере 15 % на весь период просрочки ошибочен, в связи со следующим.

Определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной должником просрочкой обязательств по контракту, наступает в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем, при расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991, от 18.09.2019 № 308-ЭС19-8291).

На основании изложенного суд произвел перерасчет пени, исходя из  ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства (дата завершения этапа работ):

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок № 1, Блок №  2 — разборочные работы 400/ГП-1-АР л. 11, 12:                         1 099 337,39 ? 2 ? 1/300 ? 4.25% = 311, 48 руб. (дата выполнения этапа 02.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию, комплекс работ — фундаменты 400/ГП-3-КЖ л.7:  249 781,48 ? 10 ? 1/300 ? 4.25% = 353,86 руб. (дата выполнения этапа 10.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — разборочные работы 400/ГП-1-АР л. 11, 12:  154 070,46 ? 2 ? 1/300 ? 4.25% = 43,65 руб. (дата выполнения этапа 02.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию, комплекс работ — фундаменты 400/ГП-3-КЖ л.7:  896 378,11 ? 2 ? 1/300 ? 4.25% = 253,97 руб. (дата выполнения этапа 02.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — восстановительные работы: 110 453,15 ? 45 ? 1/300 ? 4.25% = 704,14 руб. (дата выполнения этапа 14.11.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Земляные работы в осях 1-3, А/1-А/2, КР1 л.25-40: 17 222,52 ? 26 ? 1/300 ? 4.25% = 63,44 руб. (дата выполнения этапа 26.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Фундаменты в осях 1-3, А/1-А/2, 400/ГП-1-1КЖ л. 44: 278 434,08 ? 75 ? 1/300 ? 4.25% = 2 958,36 руб. (дата выполнения этапа 14.12.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — стены:  288 360,86 ? 44 ? 1/300 ? 4.25%  =                       1 797,45 руб. (дата выполнения этапа 14.12.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — земляные работы: 25 967,98 ? 32 ? 1/300 ? 4.25% = 117,72 руб. (дата выполнения этапа 01.11.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — фундаменты 400/ГП-3-КЖ л.7: 1 230 902,02 ? 55 ? 1/300 ? 4.25%  = 9 590,78 руб. (дата выполнения этапа 24.11.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — стены: 1 973 449,79 ? 48 ? 1/300 ? 4.25% = 13 419,46 руб. (дата выполнения этапа 18.12.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — земляные работы: 446 359,57 ? 12 ? 1/300 ? 4.25% = 758,81 руб. (дата выполнения этапа 12.10.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — фундаменты: 2 181 302,20 ? 82 ? 1/300 ? 4.25% = 25 339,46 руб. (дата выполнения этапа 21.12.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — разборочные работы 400/ГП-1-АР л.11,12: 1 168 049,08 ? 194 ? 1/300 ? 4.5% = 33 990,23 руб. (дата выполнения этапа 12.04.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Усиление кирпичных стен и железобетонных плит покрытия 400-ГП-1-КЖ л.8,41-44: 2 095 018,52 ? 194 ? 1/300 ? 4.5% = 60 965,04 руб. (дата выполнения этапа 12.04.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — восстановительные работы: 1 369 618,99 ? 261 ? 1/300 ? 5.5% = 65 536,27 руб. (дата выполнения этапа 18.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — фундаменты в осях 1-3, А/1-А/2, 400/ГП-1-1КЖ л. 44: 97 828,10 ? 75 ? 1/300 ? 4.25% = 1 039,42 руб. (дата выполнения этапа 14.12.2020).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — каркас в осях 1-3, А/1-А/2, КР1 л.31-34, 39: 314 658,97 ? 188 ? 1/300 ? 5% = 9 859,31 руб. (дата выполнения этапа 07.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — стены: 1 153 443,47 ? 220 ? 1/300 ? 5% = 42 292,93 руб. (дата выполнения этапа 08.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — перекрытие в осях 1-3, А/2-А/1, 400/ГП-1-КЖ л.46: 513 009,37 ? 188 ? 1/300 ? 5% = 16 074,29 руб. (дата выполнения этапа 07.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — земляные работы: 33 631,40 ? 261 ? 1/300 ? 5.5% = 1 609,26 руб. (дата выполнения этапа 18.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — стены: 5 886 406,01 ? 182 ? 1/300 ? 5% = 178 554,32 руб. (дата выполнения этапа 01.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — перекрытие 400/ГП-3-КЖ л.34, АР л.9: 5 920 349,34 ? 279 ? 1/300 ? 6.5% = 357 885,12 руб. (дата выполнения этапа 06.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — перегородки: 780 777,79 ? 125 ? 1/300 ? 4.5% = 14 639,58 руб. (дата выполнения этапа 04.04.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — перекрытие в осях 1-3, А/2-А/1, 400/ГП-1-КЖ л.46: 476 365,84 ? 213 ? 1/300 ? 5% = 16 910,99 руб. (дата выполнения этапа 01.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — стены: 720 360,65 ? 212 ? 1/300 ? 5% = 25 452,74 руб. (дата выполнения этапа 31.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — перекрытие 400/ГП-3-КЖ л.34, АР л.9: 2 330 886,69 ? 224 ? 1/300 ? 5% =                     87 019,77 руб. (дата выполнения этапа 12.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — перегородки: 916 565,23 ? 162 ? 1/300 ? 5% = 24 747,26 руб. (дата выполнения этапа 11.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — металлоконструкции: 9 670 485,26 ? 235 ? 1/300 ? 5.5% = 416 636,74 руб. (дата выполнения этапа 23.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Блок No2, Встроенные помещения в осях 3-10, А/Б-Б, 400/ГП-1-1КЖ л.7,48: 2 073 884,69 ? 209 ? 1/300 ? 5% = 72 240,32 руб. (дата выполнения этапа 28.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — земляные работы в осях 1-3, А/1-А/2, КР1 л.25-40: 6 058,16 ? 231 ? 1/300 ? 5% = 233,24 руб. (дата выполнения этапа 19.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Каркас в осях 1-3, А/1-А/2, КР1 л.31-34, 39:            34 962,11 ? 298 ? 1/300 ? 6.5% = 2 257,39 руб. (дата выполнения этапа 25.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — кровля: 5 011 706,90 ? 224 ? 1/300 ? 5.5% =                  205 814,10 руб. (дата выполнения этапа 12.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — окна: 465 645,17 ? 167 ? 1/300 ? 5.5% = 14 256,50 руб. (дата выполнения этапа 16.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — тепловой пункт: 199 407,35 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 15 454,07 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — силовое электрооборудование: 642 013,63 ? 308 ? 1/300 ? 7.5% = 49 435,05 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — каркас: 442 969,70 ? 224 ? 1/300 ? 5% = 16 537,54 руб. (дата выполнения этапа 12.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — полы: 190 540,49 ? 197 ? 1/300 ? 5.5% = 6 881,69 руб. (дата выполнения этапа 15.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — окна: 765 109,57 ? 228 ? 1/300 ? 5.5% = 31 981,58 руб. (дата выполнения этапа 16.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — двери: 414 222,20 ? 290 ? 1/300 ? 6.75% = 27 028,00 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — лестница Лм 1 400/ГП-3-КЖ л.35,36, АР л.13: 401 822,38 ? 183 ? 1/300 ? 5% = 12 255,58 руб. (дата выполнения этапа 01.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — водопровод и канализация: 226 965,97 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 17 589,86 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — отопление: 712 843,13 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 55 245,34 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — вентиляция: 1 727 263,78 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% =133 862,94 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — силовое электрооборудование: 53 824,09 ? 294 ? 1/300 ? 6.75% = 3 560,46 руб. (дата выполнения этапа 21.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — тепловой пункт: 231 652,28 ? 251 ? 1/300 ? 7.5% = 14 536,18 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — металлоконструкции: 1 841 997,19 ? 236 ? 1/300 ? 5.5% = 79 697,08 руб. (дата выполнения этапа 24.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — усиление кирпичных стен и железобетонных плит покрытия 400-ГП-1-КЖ л.8,41-44: 177 575,84 ? 307 ? 1/300 ? 6.5%= 11 811,75 руб. (дата выполнения этапа 03.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — кровля: 2 585 793,98 ? 249 ? 1/300 ? 6.5% = 139 503,59 руб. (дата выполнения этапа 06.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — перегородки Блок 1: 1 001 050,92 ? 219 ? 1/300 ? 5.5%= 40 192,19 руб. (дата выполнения этапа 07.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — окна: 219 127,14 ? 167 ? 1/300 ? 5.5% = 6 708,94 руб. (дата выполнения этапа 16.06.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Ворота БЛОК 2: 1 370 270,10 ? 298 ? 1/300 ? 6.75% = 91 876,61 руб. (дата выполнения этапа 24.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — лестницы: 375 502,85 ? 287 ? 1/300 ? 6.75% = 24 248,10 руб. (дата выполнения этапа 13.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — отопление: 1 234 710,86 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 95 690,09 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — силовое электрооборудование: 1 498 031,81 ? 308 ? 1/300 ? 7.5% = 115 348,45 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — электроосвещение: 1 431 891,40 ? 188 ? 1/300 ? 7.5% = 67 298,90 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — кровля 400/ГП-3-АР л.5,6: 1 525 778,08 ? 287 ? 1/300 ? 6.75% = 98 527,12 руб. (дата выполнения этапа 13.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — полы: 1 544 255,62 ? 217 ? 1/300 ? 5.5% = 61 435,64 руб. (дата выполнения этапа 05.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — окна: 625 998,74 ? 228 ? 1/300 ? 5.5% = 26 166,75 руб. (дата выполнения этапа 16.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — двери: 1 380 740,68 ? 290 ? 1/300 ? 6.75% = 90 093,33 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — лестница Лм 1 400/ГП-3-КЖ л.35,36, АР л.13: 44 646,92 ? 287 ? 1/300 ? 6.75% = 2 883,07 руб. (дата выполнения этапа 13.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — отделочные работы. Наружные 400/ГП-3-АР л.9: 2 770 001,82 ? 2 ? 1/300 ? 6.5% = 1 200,33 руб. (дата выполнения этапа 02.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — силовое электрооборудование: 1 489 133,26 ? 294 ? 1/300 ? 6.75% = 98 506,17 руб. (дата выполнения этапа 21.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — электроосвещение: 1 723 404,74 ? 188 ? 1/300 ? 7.5% =81 000,02 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — монтаж подъемной платформы: 2 338 238,54 ? 86 ? 1/300 ? 6.75% = 45 244,92 руб. (дата выполнения этапа 24.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — стены: 3 446 350,02 ? 242 ? 1/300 ? 6.5% = 180 703,62 руб. (дата выполнения этапа 30.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — кровля: 4 989 929,63 ? 273 ? 1/300 ? 6.5% = 295 154,34 руб. (дата выполнения этапа 30.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — перегородки: 507 224,17 ? 213 ? 1/300 ? 6.75% = 24 308,72 руб. (дата выполнения этапа 29.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — полы: 1 481 689,09 ? 78 ? 1/300 ? 6.75% = 26 003,64 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — окна: 166 912,37 ? 290 ? 1/300 ? 6.75% = 10 891,03 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — ворота: 1 458 371,47 ? 124 ? 1/300 ? 6.5% = 39 181,58 руб. (дата выполнения этапа 01.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — водоотстойник, лоток водоотводной, приямок, смотровая канава Скм-1: 1 820 756,96 ? 86 ? 1/300 ? 6.75% =          35 231,65 руб. (дата выполнения этапа 24.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — отделочные работы. Внутренние 400/ГП-1-АР л.13: 2 641 564,52 ? 15 ? 1/300 ? 6.75% = 8 915,28 руб. (дата выполнения этапа 15.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — восстановительные работы: 728 990,75 ? 329 ? 1/300 ? 6.5% = 51 964,89 руб. (дата выполнения этапа 25.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — перекрытие в осях 1-3, А/2-А/1, 400/ГП-1-КЖ л.46: 232 075,67 ? 516 ? 1/300 ? 20% = 79 834,03 руб. (дата выполнения этапа 05.04.2022).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — Блок No2, Встроенные помещения в осях 3-10, А/Б-Б, 400/ГП-1-1КЖ л.7,48: 424 771,56 ? 277 ? 1/300 ? 6.5% = 25 493,37 руб. (дата выполнения этапа 03.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — кровля: 238 238,46 ? 287 ? 1/300 ? 6.75% =                 15 384,25 руб. (дата выполнения этапа 13.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — двери: 1 668 511,19 ? 326 ? 1/300 ? 6.75% = 122 385,30 руб. (дата выполнения этапа 22.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — отделочные работы. Внутренние 400/ГП-1-АР л.13: 913 865,18 ? 15 ? 1/300 ? 6.75% = 3 084,29 руб. (дата выполнения этапа 15.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — козырьки, крыльцо Крц1 (400/ГП-КЖ л.47), пол по грунту (400/ГП-КЖ л.47): 159 407,66 ? 300 ? 1/300 ? 6.75% = 10 760,02 руб. (дата выполнения этапа 27.08.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — водопровод и канализация: 1 183 441,73 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 91 716,73 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — отопление: 456 673,88 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% =               35 392,23 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — тепловой пункт: 22 156,37 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 

1 717,12 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — вентиляция: 6 844 836,66 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 530 474,84 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — внутренне сети связи: 494 953,99 ? 165 ? 1/300 ? 7.5% = 20 416,85 руб. (дата выполнения этапа 12.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — телевизионная система охранного наблюдения: 1 291 407,97 ? 43 ? 1/300 ? 7.5% =13 882,64 руб. (дата выполнения этапа 12.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — полы: 500 386,73 ? 309 ? 1/300 ? 6.75% = 34 789,39 руб. (дата выполнения этапа 05.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — двери: 506 271,58 ? 290 ? 1/300 ? 6.75% = 33 034,22 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — крыльца, пандус: 99 614,02 ? 74 ? 1/300 ? 6.5% = 1 597,14 руб. (дата выполнения этапа 12.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — водопровод и канализация: 718 725,58 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 55 701,23 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — отопление: 475 228,75 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 36 830,23 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — вентиляция: 2 590 895,68 ? 310 ? 1/300 ? 7.5% = 200 794,42 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — кондиционирование: 1 960 476,90 ? 220 ? 1/300 ? 7.5% = 107 826,23 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — силовое электрооборудование: 251 179,10 ? 294 ? 1/300 ? 6.75% = 16 615,50 руб. (дата выполнения этапа 21.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — пожарная сигнализация: 1 024 339,52 ? 165 ? 1/300 ? 7.5% = 42 254,01 руб. (дата выполнения этапа 12.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию — монтаж подъемной платформы: 259 804,28 ? 274 ? 1/300 ? 20% = 47 457,58 руб. (дата выполнения этапа 05.04.2022).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — земляные работы: 49 595,51 ? 212 ? 1/300 ? 5% = 1 752,37 руб. (дата выполнения этапа 30.04.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — стены: 34 811,62 ? 242 ? 1/300 ? 6.5% = 1 825,29 руб. (дата выполнения этапа 30.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — кровля: 616 732,87 ? 277 ? 1/300 ? 6.5% = 37 014,25 руб. (дата выполнения этапа 03.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — полы: 5 573 973,23 ? 78 ? 1/300 ? 6.75% = 97 823,23 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — окна: 55 637,46 ? 290 ? 1/300 ? 6.75% = 3 630,34 руб. (дата выполнения этапа 16.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — двери: 625 071,62 ? 175 ? 1/300 ? 6.75% = 24 612,20 руб. (дата выполнения этапа 22.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — ворота: 625 016,34 ? 124 ? 1/300 ? 6.5% = 16 792,11 руб. (дата выполнения этапа 01.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — отделочные работы, внутренние: 700 648,32 ? 61 ? 1/300 ? 6.75% = 9 616,40 руб. (дата выполнения этапа 30.09.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — водопровод и канализация: 1 060 369,76 ? 37 ? 1/300 ? 7.5% = 9 808,42 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — отопление: 1 752 757,19 ? 58 ? 1/300 ? 7.5% = 25 414,98 руб. (дата выполнения этапа 27.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — вентиляция: 6 485 860,29 ? 6 ? 1/300 ? 7.5% = 9 728,79 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — электроосвещение: 159 099,05 ? 188 ? 1/300 ? 7.5% = 7 477,66 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — пожарная сигнализация: 420 529,45 ? 165 ? 1/300 ? 7.5% = 17 346,84 руб. (дата выполнения этапа 12.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию, комплекс работ — электроосвещение: 191 489,41 ? 188 ? 1/300 ? 7.5% = 9 000,00 руб. (дата выполнения этапа 04.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию, комплекс работ — телевизионная система охранного наблюдения: 2 462 069,84 ? 11 ? 1/300 ? 7.5% = 6 770,69 руб. (дата выполнения этапа 11.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административно-бытовому зданию, комплекс работ — тепловой пункт: 25 739,14 ? 251 ? 1/300 ? 7.5% = 1 615,13 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — тепловой пункт: 257 600,60 ? 37 ? 1/300 ? 7.5% = 2 382,81 руб. (дата выполнения этапа 06.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — земляные работы в осях 1-3, А/1-А/2, КР1 л.25-40: 15 054,56 ? 231 ? 1/300 ? 5% = 579,60 руб. (дата выполнения этапа 19.05.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — отделочные работы, наружные: 1 197 156,23 ? 25 ? 1/300 ? 5.5% = 5 486,97 руб. (дата выполнения этапа 25.07.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по административному зданию с пожарным депо Блок No 1, Блок No 2 — полы: 2 335 815,38 ? 289 ? 1/300 ? 6.75% = 151 886,40 руб. (дата выполнения этапа 16.10.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — система охранно-тревожной сигнализации: 511 812,84 ? 73 ? 1/300 ? 7.5% = 9 340,58 руб. (дата выполнения этапа 12.11.2021).

Комплекс работ, выполненных с просрочкой по зданию для хранения и обслуживания пожарной и специализированной техники — автоматическое пожаротушение: 792 662,17 ? 5 ? 1/300 ? 7.5% = 990,83 руб. (дата выполнения этапа 05.11.2021).

Согласно статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Обязательность применения подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве не поставлена в зависимость от соответствующего волеизъявления ответчика или от доказанности им наличия негативных последствий для его деятельности от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.

Основным материально-правовым последствием предоставления моратория будет являться отсрочка исполнения, соответственно, обязательного платежа или денежного обязательства. Перенесение срока исполнения обязательства или обязательного платежа на более поздний срок делает пользование должником денежными средствами кредитора в период действия моратория законными, что исключает возможность привлечения должника к ответственности за неисполнение денежного обязательства или обязательного платежа. По указанной причине в период действия моратория не могут начисляться неустойка (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательных платежей и денежных обязательств.

Таким образом, в период действия указанного моратория заявленные ко взысканию с 01.04.2022 пени по 05.04.2022 не подлежат начислению.

Общая сумма пени составляет 5 916 221 рубль.

Кроме того, истец просит взыскать штраф в размере 200 000 рублей.

Разделом 10 контракта установлена ответственность сторон в случае нарушения ими условий контракта.

По условиям пункта 10.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Согласно пункту  10.4 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   подрядчиком   обязательств,   предусмотренных  контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

Заказчиком выявлено 2 случая ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения: ненадлежащее исполнение условий пунктов 20.2, 19.8 контракта.

В соответствии с пунктом 20.1 контракта заказчиком установлено требование опредоставлении обеспечения гарантийных обязательств.

Согласно пункту 20.2 контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком по его выбору в течение 3 (трех) дней со дня выполнения полного объема Работ на Объекте в сумме 7 804 136  рублей 16 копеек.

Подрядчик обязан был предоставить обеспечение гарантийных обязательств не позднее 6 июля 2023 г.. так как акт приемки законченного строительства объекта № 1 был подписан Сторонами 3 июля 2023.

Обеспечение гарантийных обязательств было предоставлено подрядчиком в виде независимой гарантии 4 октября 2023.

Таким образом, подрядчик допустил нарушение условия контракта, предусмотренного пунктом 20.2 Контракта.

Учитывая, что работы были выполнены подрядчиком с просрочкой исполненияобязательств, в том числе по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств, заказчик произвел окончательный расчет с подрядчиком 16 октября 2023 г. на основании последнего Акта о приемке выполненных работ № 12.2 от 3 марта 2023, Акта приемкизаконченного строительства объекта № 1 от 3 июля 2023.

В соответствии с пунктом 19.8 контракта срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так как банковская гарантия № 20777-447-0535362 от 10 июля 2020 г., предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, действовала до 31 января 2023 включительно, а исполнение контракта в соответствии с информацией, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, было завершено 17 октября 2023, то в период с 01.02.2023 г. по 17.10.2023 исполнение контракта не было обеспечено подрядчиком.

Подрядчик должен был продлить банковскую гарантию либо предоставить новое обеспечение исполнения контракта, однако не осуществил соответствующих действий, что повлекло за собой нарушение пункта 19.8 Контракта.

Согласно пункту 10.7 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения, подрядчик уплачивает заказчику штраф. Размер штрафа, определяется в соответствии с правилами определения размера штрафа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, и равен 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том что, исковые требования о взыскании штрафа в размере 200 000 рублей заявлены истцом обоснованно.

Общая сумма неустойки составляет 6 116 221 рубль.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что цена контракта составляет 195 849 836 рублей 51 копейку, а 5 % от цены контракта составляет 9 792 491 рубль 83 копейки, следовательно,  неустойка в размере 6 116 221 рубля, не превышает  5 % от цены контракта, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для удовлетворения требований по первоначальному иску. 

Арбитражный суд считает, что у истца имелись основания для списания неустойки, начисленной в сумме  6 116 221 рубль на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783  в связи со следующим.

Согласно пункту 3 Постановления № 783, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта. 

Пунктом 2 Постановления № 783 установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.

Пунктом 4 Постановления № 783 установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение.

Исполнение контракта осуществлено сторонами в полном объеме в 2023 году, данные обстоятельства сторонами не оспариваются. 

Данный правовой подход изложен в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.

Верховный суд Российской Федерации акцентировал внимание, применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного суда Российской Федерации  28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.

Заказчик применительно к обстоятельствам настоящего дела не доказал невозможность применения установленного порядка в рамках рассмотрения спора в суде, равно как и не обосновал надлежащим образом свое право не применять указанный порядок. 

Несовершение ответчиком действий по подтверждению начисленной и неуплаченной суммы неустойки не может служить основанием для неприменения правил о списании неустойки, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам. 

Подпункт «а» пункта 3 Правил списания от 04.07.2018 № 783  предусматривает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, в том числе в случае и в порядке,  если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта.

Суд установил, что установленная судом неустойка в сумме 6 116 221 рубль  не превышает 5% цены контракта, исполнение которого завершено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае даже при наличии просрочки исполнения обязательства по выполнению работ, у заказчика имелись все основания для списания начисленной неустойки на основании подпункта "а" пункта 3, подпункта "в" пункта 2 Правил № 783. 

С учетом изложенного, поскольку размер начисленной неустойки не превышает         5 % цены контракта, обязательства по контракту исполнены ответчиком в полном объеме, начисленная заказчиком неустойка подлежит списанию, в связи с чем, требования истца по первоначальному иску суд находит необоснованными, в связи с чем, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Ответчик по первоначальному иску обратился со встречным иском о понуждении ГУ МЧС России по Иркутской области в списании неустоек в порядке Постановления Правительства Российской Федерации  № 783.

Учитывая, что  начисленная заказчиком неустойка подлежит списанию, и на основании этого судом отказано в удовлетворении первоначальных требований,  доводам ответчика дана оценка при рассмотрении первоначального иска, суд приходит к выводу, о том, что требования ответчика по встречному иску не подлежат удовлетворению, так как в данной ситуации  права  ответчика защищены при рассмотрении первоначального иска и восстановлению иным способом не подлежат.

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон судом дана соответствующая оценка, что нашло отражение в данном решении; иные доводы и пояснения несущественны и на выводы суда не влияют.

Разрешая вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец от уплаты государственной пошлины освобожден в силу положений статьи 333.37 Налогового Кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей по встречному иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать.      

            В удовлетворении встречного иска отказать.       

            Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.

 

 Судья                                                                                                              С. Н. Швидко