64_14799336  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А41-75777/23

16 ноября 2023 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Арешкиной И.Д., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Клочковым А.И.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  (ОГРН:1137799018081, ИНН:7701169833) к Обществу с ограниченной ответственностью  «Фибробетон» (ОГРН:5147746343949, ИНН:7721852318) об обязании безвозмездно  устранить недостатки и взыскании неустойки,  

при участии в заседании: от истца – Чистиков А.В. по дов., паспорт, диплом, от ответчика – не явился, извещен 

Руководствуясь статьями 110, 167, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Фибробетон» в месячный срок после вступления в силу решения  Арбитражного суда Московской области безвозмездно устранить выявленные  недостатки (дефекты), указанные в Рекламационном акте от 27.05.2022, после  капитального ремонта кровли из металлочерепицы многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Красноармейская, д.  4, а именно:  

- ослабление крепления и разгерметизация стыков парапетов (100 %); 

- ослабление крепления металлических листов кровельного покрытия в районе  выступающих элементов (30 м.кв.);  

- разгерметизация примыкания к слуховым окнам со стороны проезжей части (5 мест);  - застойные зоны на мягком покрытии над подъездом № 1 (5 м.кв.);  

- отсутствие прижимной планки в местах примыканий мягкой кровли  к выступающим элементам (100 %).  

Взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов неустойку за нарушение сроков устранения  недостатков работ, определенных в Рекламационном акте от 27.05.2022, в размере 828  459,93 руб. за период с 28.06.2022 по 30.08.2023, а также неустойку за нарушение  сроков устранения недостатков работ, определенных в Рекламационном акте от  27.05.2022, за период с 31.08.2023 по дату фактического исполнения обязательства по  устранению недостатков (дефектов) капитального ремонта, и 25 569 руб. расходов по  

В случае просрочки исполнения решения Арбитражного суда Московской области  взыскать с ООО «Фибробетон» в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день, начиная  со следующего дня, следующего за днем вступления настоящего решения суда в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья И.Д. Арешкина