Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, 

<

...>

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-6045/2025

«12»

сентября

2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«03» 

   сентября

2025 года

Решение изготовлено в полном объеме   

 «12»

    сентября

2025 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» к ООО «АСГАРД» о расторжении  контракта

по иску ООО «АСГАРД» к Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» к ООО «АСГАРД» о расторжении  контракта

третье лицо: ГКУ КО «РУЗКС» 

при участии в заседании:

от администрации: ФИО2, ФИО3 по доверенностям

от общества: ФИО4 по выписке

от ГКУ КО «РУЗКС»: ФИО5 по доверенности

установил. 

            Администрация муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» обратилась в суд с иском к ООО «АСГАРД» о расторжении  контракта от 12.08.2024 № 32/2024 (дело № А21-6045/2025).   

ООО «АСГАРД» обратилось в суд с иском к  Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» о расторжении контракта от 12.08.2024 № 32/2024 и о взыскании  1 655 285,06 рублей (дело № А21-6035/2025).

По ходатайству ООО «АСГАРД» определением суда от 07.07.2025 по делу № А21-6045/2025 требования сторон по делам № А21-6045/2025, №А21-6035/2025 объединены для рассмотрения в деле № А21-6045/2025. 

Администрация муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» заявила ходатайство о выделении требований ООО «АСГАРД» о взыскании 1 655 285,06 рублей в отдельное производство, поскольку имеется необходимость срочно провести организационные  мероприятия для заключения  контракта с уточненным техническим заданием в целях реконструкции системы водоснабжения. 

Определением суда от 03.09.2025 года требования ООО «АСГАРД» к Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» о взыскании  1 655 285,06 рублей выделены в отдельное производство для рассмотрения под номером А21-11227/2025.

При рассмотрении требований о расторжении контракта установлено.

Между сторонами был заключен контракт от 12.08.2024 № 32/2024. 

По условиям контракта  ООО «АСГАРД» (проектировщик) обязалось разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения пос. Большаково, Славского района Калининградской области», а Администрация (заказчик) обязалась результат работ принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.2 контракта срок выполнения работ 390 календарных дней.

В соответствии с пунктами 6.2.1, 6.2.2 контракта заказчик обязан передать проектировщику исходные данные для выполнения работ в соответствии с техническим заданием, оказать проектировщику содействие в выполнении работ. 

Из материалов дела следует, что проектировщика запрашивал у заказчика утвержденную в установленном порядке схему  развития системы водоснабжения с информацией по расчетным величинам расходов и диаметров водопроводов, мест расположения перспективных водозаборных сооружений, схему расположения существующего водопровода, информацию о запроектированных ранее, проектируемых и реализуемых объектах,  попадающих в границы проектирования;  сведения о химическом анализе воды из эксплуатируемой скважины; паспорта эксплуатируемых скважин, разрешения и лицензии на недропользование источником водоснабжения; заключения о соответствии границ санитарной зоны охраны водоснабжения и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам;  координаты границ зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

В полном объеме документы предоставлены не были.

В ходе реализации контракта проводились совещания, на которых обсуждались вопросы об исключении выполнения части работ  и изменения технического задания в части реконструкции существующего водозабора/строительстве нового водозабора.

Письмом от 14.04.2025 № 01-25/444 проектировщик предложил расторгнуть контракт от 12.08.2024 № 32/2024, поскольку им не получены все запрошенные документы,  не решен вопрос об изменении технического задания по итогам совещаний.   

Письмом от 24.04.2025 № 2043 заказчик предложил проектировщику расторгнуть контракт от 12.08.2024 № 32/2024 в связи с выявлением в ходе его исполнения необходимости выполнения работ, не предусмотренных контрактом без которых не представляется возможным получить необходимый результат.

Соглашения о расторжении контракта не было подписано, поскольку стороны не согласовали вопрос оплаты выполненных проектировщиком работ. 

 В соответствии с пунктом 10.3 контракта  его расторжение  производится на основании решения суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии со статьей 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения.

Из материалов дела следует, что ходе исполнения контракта встал вопрос о  реконструкции существующего водозабора либо строительстве нового водозабора для получения надлежащего результата по контракту. 

Указанное обстоятельство существенно изменяет обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении  контракта.

Фактически в переписке стороны признали эти обстоятельства, выразили согласие на прекращение договорных отношений, но не подписали соглашения из-за оплаты выполненных работ.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Требования  Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД» удовлетворить.

Расторгнуть муниципальный контракт от 12.08.2024 № 32/2024, заключенный между Администрацией муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» и обществом с ограниченной ответственностью «АСГАРД».

Взыскать с Администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД» расходы по госпошлине в сумме 50 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко