АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-7036/24-27-49

г. Москва

13 марта 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2024года Полный текст решения изготовлен 13 марта 2024 года 

Арбитражный суд в составе судьи Крикуновой В.И.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (123317, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2004, ИНН:  

<

***>, КПП: 770301001)  

ответчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО  ЧИСТЫХ БИОПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  АГЕНТСТВА (197110, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП:  781301001)  

о взыскании денежных средств в размере 3 726 000 руб. 00 коп.  при участии: согласно протоколу  

У С Т А Н О В И Л:

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  ОСОБО ЧИСТЫХ БИОПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (далее – ответчик) о взыскании неосновательного  обогащения в размере 3 726 000 руб.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования.  

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом  извещенного о месте и времени судебного заседания.  

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит  к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по  следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, в рамках федеральной целевой  программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской  

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91,  между Минпромторгом России (далее - Заказчик) и ФГУП «ГОС. НИИ ОЧБ» ФМБА  России (далее - Исполнитель) был заключен государственный контракт от 25 августа  20! 4 № 14411.2049999.19.074 на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Организация и проведение клинических исследований  лекарственного препарата на основе рекомбинантного рецепторного антагониста  интерлейкина-1 для лечения LADA-диабета» (далее - государственный контракт,  НИОКР).  

В соответствии с пунктом 16 государственного контракта его цена составила 48  750 000,00 (сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.  

Источником финансирования работ является федеральный бюджет Российской  Федерации (пункт 19 государственного контракта).  

В соответствии с пунктами 2, 3, 5 государственного контракта Исполнитель  обязан выполнить НИОКР в соответствии с техническим заданием, являющимся  приложением № 2 к государственному контракту (далее - техническое задание), и  передать Заказчику ее результаты и документацию, предусмотренную техническим  заданием, в предусмотренный государственным контрактом срок.  

В соответствии с пунктом 7 технического задания выполнение НИОКР состояло  из 4-х этапов.  

Работы по 1 и 2 этапам НИОКР выполнены Исполнителем и оплачены  Заказчиком в полном объеме (акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 12  декабря 2014 г., акт № 2 сдачи-приемки выполненных работ от 18 декабря 2015 г.,  платежные поручения № 488729 от 10 сентября 2014 г., № 760170 от 19 декабря 2014 г.,   № 851823 от 11 февраля 2015 г., № 557367 от 23 декабря 2015 г.).  

Работы по 3 и 4 этапам НИОКР до настоящего момента не выполнены. 

Во исполнение принятых на себя обязательств Заказчик 20 февраля 2016 г.  перечислил Исполнителю аванс за выполнение 3-го этапа НИОКР по государственному  контракту в размере 3 726 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением от  20 февраля 2016 г. № 666977.  

Заказчику от Исполнителя письмом от 18 октября 2017 г. № 09-12/446 поступило  уведомление о приостановлении работ по государственному контракту в связи с  невозможностью достижения результатов НИОКР, установленных требованиями  технического задания, по независящим от него причинам.  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от  16 апреля 2019 г. по делу № А40-230447/2018 установлена невозможность достижения  результатов НИОКР по 3-му и 4-му этапам НИОКР по государственному контракту по  независящим от Исполнителя обстоятельствам.  

Заказчик письмом от 25 мая 2022 г. № 49044/19 направил Исполнителю  досудебную претензию о возврате аванса за выполнение 3-го этапа НИОКР по  государственному контракту в размере 3 726 000 руб.  

В ответ на указанную претензию Исполнитель письмом от 7 июня 2022 г. № исх22/302 сообщил, об отсутствии финансовой возможности вернуть аванс за выполнение  3-го этапа НИОКР по государственному контракту в размере 3 726 000 руб. 00 коп.  

Исполнитель письмом от 17 февраля 2023 г. № исх - 23/47 подтвердил наличие  задолженности за выполнение 3-го этапа НИОКР по государственному контракту в  сумме 3 726 000 руб. и направил Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов  (вх. № МП - 143102 от 27 июня 2023 г.).  

Таким образом, задолженность ФГУП «ГОС. НИИ ОЧБ» ФМБА России перед  Минпромторгом России составляет 3 726 000 руб.  

Авансовый платеж за выполнение 3-го этапа НИОКР по государственному  контракту Заказчику до настоящего времени не возвращен.  

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось  основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего. 

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).  

В соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или  сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого  лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное  или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Поскольку доказательств выполнения и сдачи результата работ на спорную  сумму в соответствии с условиями контракта ответчик не представил, у него  отсутствую основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в  сумме 3 726 000 руб., которые являются неосновательным обогащением на стороне  ответчика и подлежат взысканию в пользу Истца.  

В связи с изложенными обстоятельствами, исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме.  

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ  возлагаются на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ БИОПРЕПАРАТОВ"  ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (197110, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 14.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781301001) в пользу  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (123317, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2004, ИНН:  

<

***>, КПП: 770301001) неосновательное обогащение в размере 3 726 000 руб.  

 Взыскать с ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ БИОПРЕПАРАТОВ"  ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (197110, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 14.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781301001) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 41 630 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: В.И. Крикунова