АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-14440/2024

г. Тюмень

16 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 сентября 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., при ведении протокола  секретарем  судебного заседания Гельцер Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 11 (р.п. Голышманово)  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной  ответственностью «Капиталл Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании денежных средств,

при участии в заседании представителей:  

от истца: ФИО1, на  основании  доверенности  №  12 от  19.07.2024;

от ответчика:  не явились, извещены,

установил:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 11 (р.п. Голышманово)  (далее - истец, ГБЗУ ТО «Областная больница № 11 (р.п. Голышманово)   обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Капиталл Групп» (далее - ответчик, ООО «Капиталл Групп») с требованием о взыскании денежных средств. 

Требования со ссылкой на статьи 329, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по Контракту  № 2021.4690/21 на  выполнение подрядных работ  по капитальному  ремонту «Капитальный ремонт лечебного корпуса «ГБЗУ ТО «Областная больница № 11», филиал № 2 «Аромашевская районная  больница», 

<

...>.

Представитель истца  исковые  требования  поддержал.

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие извещенного надлежащим образом ответчика. 

На основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 N 65 в связи с готовностью дела суд завершил предварительную подготовку по делу и перешел к рассмотрению дела в судебном заседании. 

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению  по  следующим  основаниям.

Как следует  из материалов дела 28.10.2021 г. между ГБЗУ ТО «Областная больница № 11 (р.п. Голышманово) (заказчик)  и ООО «Капиталл Групп» (подрядчик) был заключен контракт №2021.4690/21 на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт лечебного корпуса «ГБУЗ ТО «Областная больница №11», филиала №2, «Аромашевская районная больница», 

<

...> (корректировка)», согласно условиям которого Подрядчик в соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к настоящему контракту) на условиях настоящего контракта обязуется выполнить: подрядные работы по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт лечебного корпуса «ГБУЗ ТО «Областная больница №11», филиала №2, «Аромашевская районная больница», 

<

...> (корректировка)» (далее - объект), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Согласно пункту 11.1. контракта срок его действия - с момента его заключения. С момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным. Настоящий контракт действует по 01 ноября 2022 года.

Срок выполнения работ по контракту составляет не позднее 01.09.2022 г. (пункт 3.1. контракта).

Цена контракта определена сторонами в пункте 2.1. контракта и составляет 55 517 334,00 рублей, является твердой и включает все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта.

Основанием для оплаты работ являются подписанные Заказчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом, соответствуют условиям настоящего контракта (пункт 6.1. контракта).

В пункте 7.1. контракта сторонами предусмотрено, что Подрядчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца подписывает, предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и приглашает представителя Заказчика для приемки и осмотра выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения форм КС-2 и КС-3 рассмотреть их, организовать приемку указанных работ, подписать формы КС-2, КС-3 или направить мотивированный отказ от приемки работ и подписания указанных документов. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком форм КС-2, КС-3.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательства Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 4 от 09 февраля 2022 г., акт №1 на дополнительные работы от 04.02.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 09.02.2022 г. № 1, акт о приемке выполненных работ от 09.02.2022 № 1, Локальный сметный расчет № 02-01-02/1 HP от 09.02.2022 г.

Просрочка исполнения обязательства составила 91 день.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 8 от 01 марта 2022 г., акт о приемке выполненных работ №2 от 01.03.2022 г., акт о приемке выполненных работ №3 от 01.03.2022 г., акт о приемке выполненных работ №4 от 01.03.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.03.2022 г. № 2.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 9 от 10 марта 2022 г., акт о приемке выполненных работ №5 от 10.03.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.03.2022 г. № 3.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 16 от 01 апреля 2022 г., акт о приемке выполненных работ №6 от 01.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №7 от 01.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №8 от 01.04.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.04.2022 г. № 4.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 17 от 08 апреля 2022 г., акт о приемке выполненных работ №9 от 08.04.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 08.04.2022 г. № 5.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 23 от 25 апреля 2022 г., акт о приемке выполненных работ №10 от 25.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №11 от 25.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №12 от 25.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №13 от 25.04.2022 г., акт о приемке выполненных работ №14 от 25.04.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.04.2022 г. № 6.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 26 от 04 мая 2022 г., акт о приемке выполненных работ №15 от 04.05.2022 г., акт о приемке выполненных работ №16 от 04.05.2022 г., акт о приемке выполненных работ №17 от 04.05.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 04.05.2022 г. № 7.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 28 от 01 июня 2022 г., акт о приемке выполненных работ №18 от 01.06.2022 г., акт о приемке выполненных работ №19 от 01.06.2022 г., акт о приемке выполненных работ №20 от 01.06.2022 г., акт о приемке выполненных работ №21 от 01.06.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.06.2022 г. № 8.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 40 от 01 июля 2022 г., акт о приемке выполненных работ №22 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №23 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №24 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №25 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №26 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №27 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №28 от 01.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ №29 от 01.07.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.07.2022 г. № 9.

В подтверждение факта выполнения работ в срок, установленный контрактом Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 53 от 01 августа 2022 г., акт о приемке выполненных работ №30 от 01.08.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 01.08.2022 г. № 10.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 60 от 02 сентября 2022 г., акт о приемке выполненных работ №31 от 01.09.2022 г., акт о приемке выполненных работ №32 от 01.09.2022 г., акт о приемке выполненных работ №33 от 01.09.2022 г., акт о приемке выполненных работ №34 от 01.09.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 02.09.2022 г. № 11.

Просрочка исполнения обязательства составила 1 день.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 81 от 24 октября 2022 г., акт о приемке выполненных работ №35 от 24.10.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.10.2022 г. № 12.

Просрочка исполнения обязательства составила 52 дня.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 100 от 07 декабря 2022 г., акт о приемке выполненных работ №36 от 07.12.2022 г., акт о приемке выполненных работ №37 от 07.12.2022 г., акт о приемке выполненных работ №37 от 07.12.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 07.12.2022 г.№ 13.

Просрочка исполнения обязательства составила 44 дня.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 93 от 21 декабря 2022 г., акт о приемке выполненных работ №39 от 21.12.2022 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2022 г. № 14.

Просрочка исполнения обязательства составила 14 дней.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 3 от 03 февраля 2023 г., акт о приемке выполненных работ №40 от 03.02.2023 г., акт о приемке выполненных работ №41 от 03.02.2023 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.02.2023 г. № 15.

Просрочка исполнения обязательства составила 44 дня.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 6 от 20 февраля 2023 г., акт о приемке выполненных работ №42 от 20.02.2023 г., акт о приемке выполненных работ №43 от 03.02.2023 г., акт о приемке выполненных работ №44 от 20.02.2023 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.02.2023 г.№ 16.

Просрочка исполнения обязательства составила 17 дней.

В подтверждение факта выполнения работ с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком размещены в единой информационной системе документы о приемке: счет на оплату № 19 от 29 марта 2023 г., акт о приемке выполненных работ №45 от 29.03.2023 г., акт о приемке выполненных работ №46 от 29.03.2023 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.03.2023 г. № 17.

Просрочка исполнения обязательства составила 37 дней.

В период с 30 марта 2023 года до вступления в силу 14.11.2023 г. решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 1 ноября 2023 г. № 2538, подрядчик не выполнял работы в соответствии с контрактом на объекте.

Просрочка исполнения обязательства составила 230 дней.

Истец направлял в адрес ответчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 16.06.2023 г. № 1503 посредством единой информационной системы в сфере закупок, что подтверждается копией отправления. Истец направлял в адрес ответчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 23.11.2023 г. № 2773 посредством официальной электронной почты, что подтверждается копией отправления электронной почты, Истец направлял в адрес ответчика требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 05.04.2024 г. № 1144 посредством Почты России, письмо вручено адресату.

Поскольку ответчик обязательства добровольно не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив материалы дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению, исходя из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Отношения сторон, возникшие из контракта, квалифицированы судом в качестве договора подряда для государственных нужд, которые подлежат регулированию главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе). 

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Частями 6, 7 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы. 

Как указано выше, истец обратился в суд за взысканием неустойки предусмотренной пунктом 8.5 контракта за неисполнение подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом.

Материалами дела подтвержден факт просрочки исполнения обязательств ответчиком.

Расчет истца судом проверен, ответчиком не оспорен.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства и обстоятельства дела, суд признал требование о взыскании неустойки подлежащим удовлетворению в размере 4 785 015 рублей  34 копейки.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьей 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталл Групп» в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 11 (р.п. Голышманово) неустойку в размере 4 785 015 руб. 34 коп., а также 46 925 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.

 

 Судья

 

Шанаурина Ю.В.