Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5970/2020

г. Хабаровск

22 января 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.01.2021 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Саламатовой К.О.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680022, 

<

...>)

к Краевому государственному казенному учреждению «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

о  взыскании 22  358 642 руб. 69 коп.

и по иску Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680021, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Капторстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 680022, 

<

...>)

о взыскании 10 672 299 руб. 88 коп.

при участии в судебном заседании:

от ООО «Капторстрой» – ФИО1 по доверенности от 11.01.2021 г., ФИО2 по доверенности от 08.12.2020 г., 

от КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» – ФИО3 по доверенности № 01/2021 от 11.01.2021 г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Капторстрой» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о взыскании с Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» убытков в размере 22 293 935 руб. 33 коп.

Представитель истца в судебном заседании 13.08.2020 г. заявил ходатайство об объединении в одно производство настоящего дела с делом № А73-9846/2020  по иску Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» неотработанного аванса по контракту № 0122200002519005902-АН от 18.10.2019 г. в размере 11 423 055 руб. 99 коп.

Определением от 13.08.2020 г. суд объединил дела № А73-5970/2020 и № А73-9846/2020 в одно производство, присвоив делу единый номер № А73-5970/2020.

Представитель ООО «Капторстрой» в судебном заседании 07.09.2020 г. заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав, что просит взыскать убытки в размере 22 358 642 руб. 69 коп., составляющие расходы по охране строительного объекта в размере 101 640 руб. 00 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г., расходы по оплате топлива для обеспечения электроснабжением спецтехники и объекта в размере 554 977 руб. 92 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г., расходы по оплате банковской гарантии № 11Э-С-113069/19 в размере 13 050 952 руб. 74 коп., расходы, связанные с оказанием услуг на получение банковской гарантии в размере 6 639 821 руб. 63 коп., расходы по уплате процентов, связанных с получением банковской гарантии в размере 828 799 руб. 87 коп., трудозатраты и иные обязательные платежи, налоги, взносы в размере 1 182 450 руб. 53 коп.

Уточнение исковых требований принято судом.

Представитель КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в судебном заседании 07.09.2020 г. заявил ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав, что просит взыскать неотработанный аванс в размере 10 672 299 руб. 88 коп.

Уточнение исковых требований принято судом.

Представитель ООО «Капторстрой» в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска о взыскании убытков (с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ) по основаниям, изложенным в иске, наличие неотработанного аванса в сумме 10 672 299 руб. 88 коп. заявленной истцом по встречному иску не оспорил.

Представитель КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» в судебном заседании  исковые требования ООО «Капторстрой» о взыскании убытков не признал, поддержал возражения, указанные в отзыве на иск, настаивал на взыскании неотработанного аванса в сумме 10 672 299 руб. 88 коп. (с учетом в порядке ст. 49 АПК РФ) 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, по итогам электронного аукциона, 18.10.2019 г. между ООО «Капторстрой» (подрядчик) и КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (заказчик) заключен контракт № 0122200002519005902-АН (идентификационный код закупки 192272109307627220100101250014120414), по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства «Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест» в с. Некрасовка Хабаровского района», а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Пунктом 2.1 установлена цена контракта, которая составляет 1 264 727 930 руб. 00 коп., включая НДС.

Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, все затраты и издержки, в том числе затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с подрядчика в связи с исполнением контракта (пункт 2.4 контракта).

В соответствии с пунктом 3.2 контракта, оплата работ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством по безналичному расчету путём перечисления заказчиком денежных средств на отельный счет подрядчика, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта в следующем порядке: аванс в 2019 году в размере 4 % от цены контракт в течение 30 дней с момента  заключения контракта на основании счета, предоставленного подрядчиком; аванс в 2020 году в размере 11 % от цены контракта до 30.03.2020 г. на основании счета, предоставленного подрядчиком.

Согласно пункту 5.1 контракта начало выполнения работ: с момента заключения контракта,  окончание выполнения работ  - не позднее 10.10.2021 г.

Результатом выполненных работ является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требования энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов и заключение федерального государственного экологического надзора (пункт 6.1 контракта).

Письмом № 04/3186 от 23.12.2019 г. заказчик уведомил подрядчика о приостановлении работ до особых распоряжений, ссылаясь на письмо Министерства социальной защиты населения  Хабаровского края № ВХ 18402 от 20.12.2019 г., в котором указано о нецелесообразности дальнейшего строительства поднадзорного ему объекта до решения вопроса о финансировании из федерального бюджета.

ООО «Капторстрой»,  не получив  от заказчика информации о порядке  компенсации своих убытков в связи с приостановлением работ, направил заказчику письмо 27.12.2019 № 4578 о расторжении контракта и возврате банковской гарантии.

 Заказчик в ответ на данное письмо письмом от 14.01.2020 г. № 03/40 предложил  подрядчику расторгнуть  контракт по соглашению сторон и вернуть неотработанный аванс (письмо от 14.01.2020 г. № 03/40).

Подрядчик письмом от 18.02.2020 г. №108-02 обратился с требованием  к заказчику о принятии мер по консервации объекта в установленном законом порядке.

Подрядчик в виду не получения ответа от заказчика и в связи с невозможностью  исполнения контракта,  03.03.2020 г. письмом №152-03 известил  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик свои обязательства в рамках контракта по оплате авансовых платежей исполнил частично в сумме  25 773 195 руб. 88 коп. (платежное поручение №  110656 от 28.10.2019 г.)

В период выполнения работ и действия контракта подрядчиком к приемке предъявлено к приемке работ на общую сумму  15 100 896 руб., что подтверждается  справками КС-3 №1 от 16.12.2019 г., КС-3 № 2 от 12.03.2020 г., актами формы КС-2 №1,№2,№3,№4 от 16.12.2019 г., №5 от13.03.2020 г., №6 от 13.03.2020 г.

В связи с чем, сумма неотработанного аванса составила 10 672 299 руб. 88 коп., что не оспорено сторонами.

Как указано ООО «Капторстрой», в результате неисполнения заказчиком надлежащим образом встречных обязательств по финансированию строительства, повлекших прекращение работ на объекте, в период с октября по декабрь 2019 г. подрядчик понес убытки по содержанию и охране объекта строительства.

 В силу пунктов 4.4.12, 4.4.20, 4.4.21 контракта, на подрядчика возлагается обязанность по содержанию и обеспечению охраны объекта: обеспечить объект необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями (материалы), вести постоянный контроль за качеством материалов, осуществлять проверку их качества; обеспечить сохранность объекта на весь период строительства; обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения работ и приемки заказчиком выполненных работ. 

Во исполнение принятых подрядчиком обязательств, 25.10.2019 г. между ООО ЧОО «Блокпост» и ООО «Капторстрой» заключён договор № 21/19-Ф на оказание услуг по охране объекта: Строительная площадка «Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест» в селе Некрасовка Хабаровского района.

В период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г. расходы по стоимости услуг на обеспечение охраны объекта строительства составили 101 640 руб. 00 коп. и оплачены  подрядчиком платежными поручениями №6083 от 02.12.2019 г., №6815, № 6816, № 6818 от 30.12.2019 г. ООО «Капторстрой» в подтверждение  оказания услуг охраны также представило акты оказания услуг за  указанный период.

Кроме того, в период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г. электроснабжение строительной площадки подрядчиком обеспечивалось автономно, посредством установки передвижного дизельного генератора 40 кВт, согласно справке от 23.04.2020 г., принадлежащего ООО «Капторстрой».

Во исполнение принятых подрядчиком обязательств, 01.11.2008 г. между ООО «ЕвроДизель-Дв» и ООО «Капторстрой» заключён договор купли-продажи нефтепродуктов на АЗС. 

В подтверждение несения расходов на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта в материалы дела представлены  товарные накладные № 288 от 25.11.2019 г., № 282 от 16.11.2019 г., № 300 от 02.12.2019 г., а также платежные поручения № 5840 от 21.11.2019 г., № 6360 от 10.12.2019 г., № 6513 от 30.12.2019 г.

Закупочная стоимость дизельного топлива по товарным накладным № 288 от 25.11.2019 г., № 282 от 16.11.2019 г., № 300 от 02.12.2019 г. составила 40 руб. 83 коп. (без НДС), стоимость (с НДС 20%)  составила  49 руб.00 коп. за литр.

Всего, согласно расчету ООО «Капторстрой» за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г. расходы на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта составили в размере 554 977 руб. 92 коп. из расчета 11 326,08 литров израсходованного топлива за 68 дней работы генератора 40 кВт.

ООО «Капторстрой»  также указало, что им понесены расходы на трудозатраты и иные обязательные платежи, налоги, взносы в сумме 1 182 450 руб. 53 коп., рассчитанные им за период проведения закупочной процедуры по заключению  контракта с 31.07.2019 г. по 18.10.2019 г.

Кроме того, как указало ООО «Капторстрой», подрядчик планировал в ходе исполнения контракта за счет полученной прибыли компенсировать расходы на информационно-консультативные услуги по  получению    положительного решения о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения контракта.

 08.10.2019 г. между ООО «Капторстрой» и ООО «МАРГИ» заключен договор № 081019/БП на оказание информационно-консультационных услуг, направленных на получение заказчиком одной из кредитных организаций положительного решения о предоставлении заказчиком банковского продукта.

Стоимость услуг ООО «МАРГИ» составила в размере 3,5 % от суммы полученного банковского продукта.

ООО «Капторстрой» в подтверждение несения расходов по оплате оказанных информационно-консультационных услуг представило платежное поручение № 5064 от 28.10.2019 г. в размере 6 639 821 руб. 63 коп.

Помимо этого, размер  обеспечения по данному контракту составил 189 709 189 руб. 50 коп. ООО «Капторстрой» до даты подписания контракта оформил банковскую гарантию на требуемую сумму, уплатив по платежному поручению №4887 от 16.10.2019 г. за услуги банка вознаграждение в размере 13 050 952 руб. 74 коп. (платежное поручение № 4887 от 16.10.2019 г.).

Договор о предоставлении банковской гарантии на сумму 189 709 189 руб. 50 коп. ООО «Капторстрой» заключил 17.10.2019 г. с  АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Пунктом 2.4 данного договора предусмотрено, что в случае досрочного прекращения действия гарантии перерасчет полученного банком вознаграждения не производится.

Заказчик отказался от своих прав по гарантии, путем направления в банк письменного уведомления от 14.03.2020 г. № 01/534, что послужило прекращением гарантии. 

В результате досрочного расторжения контракта, как полагает ООО «Капторстрой», им понесены убытки в сумме 13 050 952 руб. 74 коп. 

Кроме того, как указало ООО «Капторстрой» на этапе заключения контракта, в обеспечение своих обязательств, согласно действующему законодательству, истцом были привлечены заемные кредитные средства по договору об открытии кредитной линии, заключенному с ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» №7-2019/Л-ХБР от 08.10.2019 г., где ставка по кредиту составила 8,5 %, согласно пункту 2.3.1 договора.

В связи с чем, расходы по уплате процентов, связанных с получением банковской гарантии, за три месяца с момента получения кредитных средств, составили в сумме 828 799 руб. 87 коп.

ООО «Капторстрой» обратилось к КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» с претензией № 109-02 от 18.02.2020 г. о  возмещении убытков.

Поскольку КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» претензия оставлена без удовлетворения, ООО «Капторстрой», указывая на понесенные убытки в общем размере 22 358 642 руб. 69 коп. (с учетом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ) обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края», указывая на наличие неотработанного аванса в сумме 10 672 299 руб. 88 коп. (с учетом в порядке ст. 49 АПК РФ)  обратилось  к ООО «Капторстрой»  с встречным иском. 

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд считает, что иск ООО «Капторстрой» подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу части 1 статьи 451 ГК РФ основанием для изменения или расторжения договора является существенное изменение обстоятельств. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В соответствии с пунктом 5 статьи 453 ГК РФ существенное нарушение договора одной из сторон, послужившее основанием для изменения или расторжения договора предоставляет другой стороне право требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

На основании статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в форме возмещения вреда истцу необходимо доказать следующую совокупность обстоятельств: причинение убытков, а также их размер, противоправное поведение причинителя вреда (вину), наличие причинно-следственной связи между возникшими убытками и действиями указанного лица.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного кодекса Российской Федерации).

        ООО «Капторстрой»,  полагая, что  в результате неисполнения заказчиком надлежащим образом встречных обязательств по финансированию строительства, повлекших прекращение работ на объекте,  обратилось  с иском о взыскании убытков  в размере 22 358 642 руб. 69 коп., составляющих расходы по охране строительного объекта в размере 101 640 руб. 00 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г., расходы по оплате топлива для обеспечения электроснабжением спецтехники и объекта в размере 554 977 руб. 92 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г., расходы по оплате банковской гарантии № 11Э-С-113069/19 в размере 13 050 952 руб. 74 коп., расходы, связанные с оказанием услуг на получение банковской гарантии в размере 6 639 821 руб. 63 коп., расходы по уплате процентов, связанных с получением банковской гарантии в размере 828 799 руб. 87 коп., трудозатраты и иные обязательные платежи, налоги, взносы в размере 1 182 450 руб. 53 коп.

Как следует из материалов дела, письмом № 04/3186 от 23.12.2019 г. заказчик уведомил подрядчика о приостановлении работ до особых распоряжений, ссылаясь на письмо Министерства социальной защиты населения  Хабаровского края № ВХ 18402 от 20.12.2019 г., в котором указано о нецелесообразности дальнейшего строительства поднадзорного ему объекта до решения вопроса о финансировании из федерального бюджета.

       ООО «Капторстрой»,  не получив  от заказчика информации о порядке  компенсации своих убытков в связи с приостановлением работ, направило заказчику письмо 27.12.2019 № 4578 о расторжении контракта и возврате банковской гарантии.

В свою очередь, КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» в ответ данное на письмо подрядчика о расторжении контракта заявило, о своей воле на расторжение, предложив подрядчику расторгнуть  контракт по соглашению сторон (письмо от 14.01.2020 г. № 03/40), в связи с чем, суд полагает, что контракт № 0122200002519005902-АН от 18.10.2019 г. расторгнут по обоюдной воле сторон.

        В рассматриваемом случае  контракт расторгнут в связи со снятием бюджетного финансирования на выполнение предусмотренных  контрактом работ.

         Доказательств наличия вины заказчика (КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края») в отсутствие бюджетного финансирования, непринятие заказчиком необходимых мер, направленных на  исполнение спорного контракта, повлекшего его расторжение, в материалах дела не имеется и подрядчиком не представлено.

          ООО «Капторстрой» заявлено о взыскании расходов по оплате банковской гарантии № 11Э-С-113069/19 в размере 13 050 952 руб. 74 коп., расходов, связанных с оказанием услуг на получение банковской гарантии в размере 6 639 821 руб. 63 коп., расходов по уплате процентов, связанных с получением банковской гарантии в размере 828 799 руб. 87 коп.,  а также трудозатраты и иные обязательные платежи, налоги, взносы в размере 1 182 450 руб. 53 коп.

Между тем, условиями контракта не предусмотрено возмещение заказчиком денежных средств, связанных с оформлением  банковской гарантии  и услуг, связанных с  ним.

Поскольку расходы  на трудозатраты и иные обязательные платежи, налоги, взносы в размере 1 182 450 руб. 53 коп. истцом по первоначальному иску не подтверждены надлежащим доказательствами, оснований для удовлетворения данного требования судом не установлено. При этом судом также принято во внимание, что подрядчик заявил требование о возмещении трудозатрат  и иных обязательных платежей, налогов, взносов, рассчитанных им за период проведения закупочной процедуры по заключению  контракта с 31.07.2019 г. по 18.10.2019 г.

ООО «Капторстрой», указывая, что не покрыты все расходы заявило требования о взыскании  расходов  по охране строительного объекта в размере 101 640 руб. 00 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г. и  расходы по оплате топлива для обеспечения электроснабжением спецтехники и объекта в размере 554 977 руб. 92 коп. за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г.,

        Как следует из материалов дела, электроснабжение строительной площадки обеспечивалось автономно  посредством установки передвижного дизельного генератора 40 кВт, согласно справки от 23.04.2020г., принадлежащего ООО «Капторстрой».

        Доказательств, свидетельствующих об обратном, не представлено.

В подтверждение несения расходов на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта в материалы дела представлены  товарные накладные № 288 от 25.11.2019 г., № 282 от 16.11.2019 г., № 300 от 02.12.2019 г., а также платежные поручения № 5840 от 21.11.2019 г., № 6360 от 10.12.2019 г., № 6513 от 30.12.2019 г.

Всего, согласно расчету ООО «Капторстрой» за период с 25.10.2019 г. по 31.12.2019 г. расходы на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта составили 554 977 руб. 92 коп. из расчета 11 326,08 литров израсходованного топлива за 68 дней работы генератора 40 кВт.

В подтверждение несения расходов на оплату охраны объекта строительства, ООО «Капторстрой» в материалы дела представлены  акты № 170 от 31.10.2019 г., № 190 от 30.11.2019 г., № 210 от 31.12.2019 г. и платежные поручения № 6083 от 02.12.2019 г., № 6815 от 30.12.2019 г., № 6816 от 30.12.2019 г.,  № 6818 от 30.12.2019 г. на сумму 101 640 руб. 00 коп.

Возражения КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» относительно отсутствия обязанности возмещения затрат на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта судом не приняты как документально не подтвержденные. Доказательств того, что указанные заявленные истцом по встречному иску расходы учтены в КС-2 и полностью покрыты, не представлено.

       Ответчик по первоначальному иску, указывая, что  расходы учтены в КС-2 и полностью покрыты, представил расчет, согласно которому накладные расходы составили  667 028 руб. 99 коп., из них 289 824 руб. 10 коп. оплата  труда АХП, 163 422 руб.10 коп. расходы на   энергоснабжение, 38 743 руб. 81 коп. расходы на охрану. В связи с чем, ответчик полагает, что за счет образовавшего остатка накладных расходов в сумме  175 038 руб. 98 коп. (667 028 руб. 99 коп. - 289 824 руб. 10 коп. -163 422 руб.10 коп. -  38 743 руб. 81 коп.) и  за счет сметной  прибыли в сумме   395 814 руб. 86 коп.,  подрядчик может покрыть указанные выше расходы.

        Однако ответчик не учитывает за счет полученных накладных (667 028 руб. 99 коп.) и сметной прибыли (395 814 руб. 86 коп.) подрядчику за счет указанных средств были оплачены иные расходы, что заказчиком не опровергнуто. 

        Истец, не соглашаясь с данными доводами  истца по первоначальному иску, представил контрасчет, согласно которому в составе накладных расходов на охрану строительной площадки подрядчику оплачено 13 798 руб. 23 коп., а на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений и помещений занимаемых АХП (электроэнергия, отопление, освещение, водоснабжение, канализация, содержание в чистоте) – 15 445 руб. 78 коп.

        Ответчиком по представленному контрасчету возражений не заявлено.

        Доказательств того, что затраты на охрану объекта и расходы на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта отплачены заказчиком в полном  объеме  в составе  принятых работ, не представлено.

На основании изложенного, исковые требования ООО «Капторстрой» о взыскании расходов на оплату топлива для обеспечения спецтехники и электроснабжения объекта подлежат удовлетворению в заявленном размере - 554 977 руб. 92 коп., расходы на оплату охраны объекта подлежат удовлетворению в размере 87 841 руб. 77 коп.  (101 640 руб.00 коп. – 13 798 руб. 23 коп.), всего 642 819 руб. 69 коп.

В удовлетворении остальной части следует отказать.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал иск КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Во исполнение принятых на себя обязательств по контракту № 0122200002519005902-АН от 18.10.2019 г., КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» перечислило на расчетный счет ООО «Капторстрой» аванс в размере 25 773 195 руб. 88 коп., что подтверждается платежным поручением № 110656 от 28.10.2019 г.

За период действия контракта, подрядчиком предъявлено к приемке работ на общую сумму 15 100 896 руб. 00 коп., что подтверждается    справками КС-3 №1 от 16.12.2019 г., КС-3 № 2 от 12.03.2020 г., актами формы КС-2 №1,№2,№3,№4 от 16.12.2019 г., №5 от13.03.2020 г., №6 от 13.03.2020 г.

В связи с чем, сумма неотработанного аванса составила 10 672 299 руб. 88 коп. (25 773 195 руб. 88 коп. -15 100 896 руб. 00 коп.), что не оспорено сторонами.

Поскольку контракт между сторонами расторгнут, при указанных обстоятельствах правовых оснований для удержания денежных средств, перечисленных в качестве аванса по контракту в сумме 10 672 299 руб. 88 коп., у ООО «Капторстрой»  не имеется.

В силу статьи 1102 ГК РФ  лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Поскольку иное не установлено ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Доказательств возврата аванса ООО «Капторстрой» не представлено, возражений по размеру неотработанного аванса в сумме 10 672 299 руб. 88 коп. не заявлено.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного исковые требования КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» о взыскании аванса в размере 10 672 299 руб. 88 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с тем, что исковое требование КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» направлено к зачету первоначально заявленного требования с ООО «Капторстрой» в пользу КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» подлежит взысканию 10 029 480 руб. 19 коп.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в соответствии с правилами, установленными статьей  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» удовлетворить частично в сумме  642 819 руб. 69 коп., а также  расходы по госпошлине в сумме  3 875 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречный иск Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» удовлетворить в сумме 10 672 299 руб. 88 коп.

Произвести зачет установленных судом встречных однородных требований.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» в пользу Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края»  10 029 480 руб. 19 коп.

Взыскать с Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» расходы по госпошлине в сумме 3 875 руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  76 685 руб. 00 коп.        

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

      Судья            С.И. Дюкова