АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-22794/2022  «21» марта 2023 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Белявцевой Т.Л. (в отсутствие  возражений участников процесса),  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного  унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» (ОГРН  1033600038218, ИНН 3664037363), г. Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью «ПСМК» (ОГРН 1163668113619; ИНН  3662239276), г.Воронеж  

о взыскании 1 404 487 руб. 30 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по  договору № 111 от 27.04.2022 за период с 01.10.2022 по 15.12.2022 с продолжением  начисления неустойки с 16.12.2022 по дату выполнения работ в полном объеме,  расходов по уплате госпошлины  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Чикулаева Е.И. – представитель по доверенности № 27 от 09.01.2023, диплом,  паспорт,  

от ответчика: не явился, извещен 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСМК» (ОГРН  1163668113619; ИНН 3662239276) в пользу государственного унитарного предприятия  Воронежской области «Облкоммунсервис» (ОГРН 1033600038218, ИНН 3664037363)  1 404 487 руб. 30 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору   № 112 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах от 27.04.2022 за период с 01.10.2022 по 15.12.2022, а также  неустойку за период с 16.12.2022 по день фактического исполнения обществом с  ограниченной ответственностью «ПСМК» обязательств по выполнению  предусмотренных договором № 112 на выполнение работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах от 27.04.2022 работ либо до даты его  расторжения в соответствии с пунктом 7.4 указанного договора из расчета 0,5% от  стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены (от 3 696 019 руб. 22 коп.); 27 045  руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

 Судья Т.Л. Белявцева