АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №

А55-29197/2022

16 декабря 2022 года

г.Самара

 

 Резолютивная часть    объявлена 13 декабря 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 16 декабря 2022 года 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,

 при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

 рассмотрев 13.12.2022 в судебном заседании, в котором была оглашена резолютивная часть решения дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "АСК "АРКАДА"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройсервис" 

о взыскании 3 800 000,00 рублей

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО2, доверенность от 01.09.2022 

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АСК «АРКАДА» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройсервис" долга 3 800 000,00 руб. задолженности по договору № 27/08-21 РП на выполнение проектных работ от 27 08 2021 года.

  Лица участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания. Стороны получили судебную корреспонденцию, истец обеспечил явку своего представителя в судебное заседание.

Рассмотрев исковые требования, суд считает их подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 27 08 2021 г между ООО «АСК «АРКАДА» (Подрядчик) и ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» (Заказчик) заключен договор № 27/08-21 РП на выполнение проектных работ.

В соответствии с п 1 1 данного договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и требованиями к содержанию проекта, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 02 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление) по объекту «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями по адресу г Самара, Кировский район, Московское шоссе, 270», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде разделов разработанной документации (Стадия «П» и Стадия «Р»)

Согласно протоколу № 1 согласования договорной цены от 27 08 2021 года стоимость стадии «П» составила 7 600 000 руб , стоимость стадии «Р» составила 11 400 000 руб , а общая стоимость договора 19 000 000 руб.

В соответствии с п 4 2 договора оплата проектных работ по разработке проектной документации (стадия  «П») осуществляется Заказчиком в следующем порядке

- аванс в размере 20% от суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора

- 20% от суммы договора - в течение 10 (Десяти) рабочих дней после передачи Подрядчиком проектной документации, получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ

Заказчиком была произведена оплата аванса в размере 3 800 000 руб , что подтверждается платежным поручением № 8 от 01 09 2021 г Согласно п 6 1 заключенного договора по завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта разработанной документации, предусмотренной Техническим заданием и условиями Договора в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF

Обязательства по разработке проектной документации (стадия «П») были выполнены Подрядчиком надлежащим образом, проектная документация и акт сдачи-приемки выполненных работ переданы Заказчику, что подтверждается накладной № 1 от 30 05 2022 года с отметкой о получении.

В соответствии с п 6 2-6 5 заключенного договора Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после извещения его Подрядчиком о готовности разработанной проектной документации к прохождению государственной (негосударственной) экспертизы подписать промежуточный Акт сдачи- приемки работ и направить его Подрядчику, либо мотивированный отказ от приемки работ

В случае мотивированного отказа Заказчика при обнаружении последним недостатков разработанной проектной документации Сторонами составляется перечень необходимых доработок и согласовываются порядок и сроки их выполнения

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы проектной документации подписывает Акт сдачи-приемки работ и направляет его Подрядчику

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения экспертизы проектной документации Заказчик не направляет Подрядчику подписанный Акт, то работы по Акту считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком по односторонне оформленному Акту сдачи-приемки

Однако до настоящего времени акт сдачи-приемки проектной документации Заказчиком не подписан, мотивированный отказ от приемки работ не заявлен.

Согласно Отчету о выполнении консультационных услуг по негосударственной экспертизе на предмет соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов № 0006-22, подготовленному ООО «Проектный институт Средволгогипроводхоз» результаты инженерных изысканий и проектная документация на строительство объекта «Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями по адресу г Самара, Кировский район, Московское шоссе, 270», при условии выполнения рекомендаций экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.

Письмом № 09/07 от 01 07 2022 года ООО «СЗ «Стройсервис» известило истца о невозможности исполнения финансовых обязательств в связи с экономической ситуацией и предложило согласиться на отсрочку оплаты и отказ от имущественных санкций (неустойки).

15 07 2022 года ООО «АСК «АРКАДА» повторно направило Заказчику акт сдачи-приемки проектной документации, который был получен ответчиком, но до настоящего времени также не подписан.

Таким образом, по состоянию на текущий момент задолженность составляет 3 800 000 руб и до настоящего времени не погашена.

Истец подготовил документацию по стадии «П», стоимость работ, в данной части, согласно договора составляет  7 600 000 руб. Оплачено только 3 800 000,00 рублей. Остаток задолженности  3 800 000,00 рублей (7 600 000,00 – 3 800 000,00).

Согласно ст 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

В силу ст 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Суд не находит обоснованных оснований в отказе ответчика принять выполненные истцом работы, подписать акты приемки – передачи работ. Передача результатов работ, в рассматриваемой части истцом подтверждена.

Согласно ст. 711 ГК РФ, ответчик обязан оплатить  истцу фактически выполненные работы.

Согласно ст 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных актов.

Ответчик факт выполнения работ не оспорил, доказательств оплаты долга не представил. 

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспоренные ответчиком обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование своих требований, считаются ответчиком признанными. 

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика основного долга суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истец при подаче иска госпошлину не оплачивал, исходя из цены иска размер госпошлины составляет 42 000,00 рублей. В соответствии со ст.110 АПК РФ, госпошлина подлежит  отнесению на ответчика, со взысканием ее в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройсервис" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АСК "АРКАДА" (ИНН 

<

***>)  3 800 000,00 рублей основного долга.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройсервис" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 42 000,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья              Лукин А.Г.