АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-4523/2024

город Новосибирск

02 апреля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола помощником судьи Кондратовой К.В. рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению федерального государственного казенного  учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ОГРН  

<

***>), г.Москва, к обществу с ограниченной ответственностью «АСК Лидер»  (ОГРН 

<

***>), г. Горно-Алтайск, об обязании устранить недостатки выполненных  работ. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - ФИО1 (доверенность № 7 от  07.02.2024, паспорт, диплом), от ответчика – не явился, не извещен.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АСК Лидер» (ОГРН  

<

***>)в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах на объекте  «Здание автовокзала в МАПП Ташанта», расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош- Агачинский район, федеральная автодорога М-52 «Чуйский тракт». 943 км:  

1. Приклеить к полу две керамические плитки площадью 0,32 м2 в женском туалете 1 этажа  (помещение № 5);  

2. Произвести расшивку облицовки плиток керамических в женском туалете 1 этажа  (помещение № 5) на полу площадью 2 м2, на стенах 0,5 м2;  

3. Произвести расшивку облицовки плиток керамических в мужском туалете 1 этажа  (помещение № 7) на полу площадью 1 м2;  

4. Произвести расшивку облицовки плиток керамических в женском туалете 2 этажа  (помещение № 21) на полу площадью 2 м2;  

5. Произвести расшивку облицовки плиток керамических в мужском туалете 2 этажа  (помещение № 23) на полу площадью 2 м2;  

6. Приклеить линолеум площадью 12 м2 в коридоре 1 этажа: 

7. Устранить перепад в уровнях стяжки пола из цементно-стружечных плит под  линолеумом площадью 4 м2 в коридоре 1 этажа;  

8. Приклеить линолеум площадью 8 м2 в зале паспортного контроля и оформления ручной  клади 1 этажа:  

9. Устранить перепад в уровнях стяжки пола из цементно-стружечных плит под  линолеумом площадью 4 м2 в зале паспортного контроля и оформления ручной клади 1 этажа;  

10. Отрегулировать плотность закрывания двух дверей двухстворчатых ПВХ со  стеклопакетом в зале паспортного контроля и оформления ручной клади 1 этажа:  

1 1. Установить один фиксатор защелки двери в зале паспортного контроля и оформления  ручной клади 1 этажа;  

12. Заменить два доводчика двери в зале паспортного контроля и оформления ручной клади  1 этажа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСК Лидер» (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рубля  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Н. Дорофеева