АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А16-3143/2021

г. Биробиджан

11 апреля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2022 года. Полный текст решения изготовлен 11 апреля 2022 года.

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Кручинина А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Отдела муниципальных закупок администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ёсити" (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании устранить недостатки,

при участии представителей истца – начальника ФИО2,

                                                        – ФИО3 (доверенность от 19.01.2022),

УСТАНОВИЛ:

Отдел муниципальных закупок администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области обратился в Арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ёсити" об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту № 6 от 03.07.2020.

В уточнениях, поступивших в суд 28.03.2022, истец просил обязать ответчика своими силами и за свой счет выполнить следующие работы по устранению недостатков работ, выполненных в рамках муниципального контракта № 6 от 03.07.2020 на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств с приобретением малых архитектурных форм на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, а именно:

1) на объекте в с. Красивое:

а)забетонировать основание песочного дворика и переустановить его;

б)выполнить работы по монтажу волейбольной сетки и столбов;

в)переустановить качели-диван таким образом, чтобы было выдержано установленное в паспорте объекта расстояние до другого детского оборудования и качание было сбалансировано;

г)установить крепления подвесного моста на цепях;

д)установить на детских двойных качелях на гибком подвесе спинки, предусмотренные конструкцией; установить качели на одинаковой высоте; отрегулировать сидения по горизонтали; забетонировать основание качелей;

е)переустановить и закрепить крышу теневого навеса;

ж)переустановить тренажер (маятник) таким образом, чтобы детали основного крепежного элемента и вращательных частей не соприкасались друг с другом и не создавали трение;

з)установить на тренажер-шагоход недостающий элемент для постановки ноги.

и)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями.

2) на объекте в с. Опытное поле:

а)установить карусель выше уровня земли, обеспечив возможность ее использования по назначению;

б)заменить сидения качелей двухместных на гибком подвесе на предусмотренные технической документацией;

в)закрепить крышу на теневом навесе;

г)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями;

д)установить урны и скамейки.

3) на объекте в с. Алексеевка:

а)установить качели-диван;

б)установить качели двухместные на гибком подвесе;

в)закрепить крышу теневого навеса;

г)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями.

Представители истца в судебном заседании настаивали на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении и уточнениях к нему.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом (ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, уведомленный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, отзыв на иск не представил.

Дело рассматривается в отсутствие ответчика согласно статье 156 АПК РФ.

Суд, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей истца, установил следующее.

Сторонами 03.07.2020 в соответствии с протоколом электронного аукциона от 17.06.2020 заключен муниципальный контракт № 6 (далее – Контракт). Согласно указанному контракту и дополнительным соглашениям к нему Подрядчик (ответчик) обязался выполнить работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с приобретением малых архитектурных форм на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области и сдать результат Заказчику (истец), а последний обязался принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта. Цена контракта составила 1 482 909,46 руб. В соответствии с актом приема-передачи от 30.10.2020 работы приняты.

При проверке выполненных работ протоколом обследования от 23.06.2021 малых архитектурных форм на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области установлены недостатки.

Поскольку досудебная претензия от 25.06.2021 № 115 оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, истец обратился в суд с иском о понуждении к устранению недостатков выполненных работ.

Суд, рассмотрев доводы истца, оценив представленные доказательства, приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, обязательства должны исполняться надлежащим образом, согласно условиям обязательства и требованиям закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

Отношения сторон по муниципальному контракту № 6 от 03.07.2020определяются нормами §§ 1, 3 и 5 главы 37 ГК РФ, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пунктом 1 статьи 754 ГК РФ определено, что Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (п. 2 ст. 755 ГК РФ).

Гарантийный срок на выполненные работы согласно пункту 8.2.1 Контракта составляет 1 год с даты подписания актов о приемке выполненных работ.

Наличие недостатков выполненных работ подтверждается протоколом обследования от 23.06.2021 и ответчиком признаны, так как согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая отсутствие доказательств устранения выявленных недостатков до настоящего времени, суд считает возможным удовлетворить требования истца.

Так как истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании статей 105 АПК РФ и 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно статьям 102, 103 АПК РФ и 333.17 и 333.21 НК РФ с ответчика в доход федерального бюджета следует взыскать 6 000 руб. государственной пошлины по иску.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ёсити" своими силами и за свой счет выполнить следующие работы по устранению недостатков работ, выполненных в рамках муниципального контракта № 6 от 03.07.2020 на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств с приобретением малых архитектурных форм на территории Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, а именно:

1) на объекте в с. Красивое:

а)забетонировать основание песочного дворика и переустановить его;

б)выполнить работы по монтажу волейбольной сетки и столбов;

в)переустановить качели-диван таким образом, чтобы было выдержано установленное в паспорте объекта расстояние до другого детского оборудования и качание было сбалансировано;

г)установить крепления подвесного моста на цепях;

д)установить на детских двойных качелях на гибком подвесе спинки, предусмотренные конструкцией; установить качели на одинаковой высоте; отрегулировать сидения по горизонтали; забетонировать основание качелей;

е)переустановить и закрепить крышу теневого навеса;

ж)переустановить тренажер (маятник) таким образом, чтобы детали основного крепежного элемента и вращательных частей не соприкасались друг с другом и не создавали трение;

з)установить на тренажер-шагоход недостающий элемент для постановки ноги.

и)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями.

2) на объекте в с. Опытное поле:

а)установить карусель выше уровня земли, обеспечив возможность ее использования по назначению;

б)заменить сидения качелей двухместных на гибком подвесе на предусмотренные технической документацией;

в)закрепить крышу на теневом навесе;

г)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями;

д)установить урны и скамейки.

3) на объекте в с. Алексеевка:

а)установить качели-диван;

б)установить качели двухместные на гибком подвесе;

в)закрепить крышу теневого навеса;

г)доукомплектовать спортивный комплекс необходимыми запчастями.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ёсити" в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

 

Судья

А.Н. Кручинин