Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-67666/2022-52-471

город Москва

20 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2022 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «МОСПРОМСТРОЙ» (127994, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «АЛП-ТРОН» (400119 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2015, ИНН: 

<

***>)

о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 9 294 886, 40 руб. по договору от 30.07.2019 № ППТ1-4/0011-2019/МПС, штрафа в размере 650 006, 90 руб., неустойки в размере 7 090 574, 92 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 447 300, 49 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. № 19-05/225 от 16.07.2021 г.),

от ответчика – представитель не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «МОСПРОМСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АЛП-ТРОН» о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 9 294 886, 40 руб. по договору от 30.07.2019 № ППТ1-4/0011-2019/МПС, штрафа в размере 650 006, 90 руб., неустойки в размере 7 090 574, 92 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 447 300, 49 руб.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился. Отзыв не представил.

При этом суд отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу статьи 131 АПК РФ лица, является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв с контррасчетом в порядке статьи 131 АПК РФ.

В нарушение статьи 131 АПК РФ лица, ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 и статья 41 АПК РФ).

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего.

Как указывает истец в обоснование иска, между АО «Моспромстрой» (далее - Заказчик) и ООО «Алп-Трон» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда № ППТ1-4/0011-2019/МПС от 30.07.2019г. (далее - Договор).

В соответствии с предметом договора Подрядчик обязался выполнить по заданию Заказчика собственными и/или привлеченными силами и средствами полный комплекс работ, указанный в Перечне стоимости по видам и объемам работ на объекте: г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское (далее - Объект).

Согласно п.2.1. Договора цена работ, выполняемых Подрядчиком, составляет 66 710 507 руб. 04 коп.

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 1 от 29.11.2019г. стоимость работ Сторонами изменена и составляет 13 635 721 руб. 01 коп. НДС исчисляется дополнительно по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статьей 4 Договора Стороны установили, что дата начала выполнения работ: «01» августа 2019 г.; Дата окончания выполнения работ «30» марта 2020 г.

Сдача-приемка работ, выполненных в Отчетном периоде, производится Сторонами путем подписания Актов о приемке выполненных работ.

В соответствии с п. 7.2. Договора Подрядчик не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания Отчетного периода нарочно предоставляет Уполномоченному представителю Заказчика по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 

<

...>:

- Акт о приемке выполненных работ;

- Справку о стоимости выполненных работ;

- Накопительную ведомость;

- Надлежащим образом оформленный счет-фактуру;

- Исполнительную документацию,  подтверждающую выполнение в Отчетном периоде предъявленных к сдаче Работ;

По состоянию на 01.04.2022г. Истцом принята часть работ на сумму 12 267 413,45 руб. (без учета НДС), что подтверждается Актами выполненных работ:

1.КС № 1 от 30.04.2020 на сумму 8 571 014,65 руб.;

2.КС № 2 от 31.08.2020 на сумму 2 558 361,42 руб.;

3.КС № 3 от 15.10.2020 на сумму 1 138 037,38 руб.

Всего 12 267 413 руб. 45 коп.

В соответствии с условиями договора Заказчик 13.09.2019 произвел выплату аванса Подрядчику в размере 24 015 782 руб. 54 коп., что подтверждается платежным поручением № 8408 от 13.09.2019г.

В соответствии с Актами выполненных работ Подрядчиком из суммы выплаченного аванса удержано 13 248 806 руб. 52 коп. в счет оплаты выполненных работ.

Таким образом, сумма неотработанного аванса по состоянию на 01.04.2021г. составляет: 24 015 782,54 (выплаченный аванс) - 13 248 806,52 (удержанный аванс) = 10 766 976 руб. 02 коп.

В соответствии с п. 5.1.2. Договора Подрядчик обязан выполнить все Работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также проектной (рабочей) документацией.

Однако до настоящего времени Подрядчиком свои обязательства по Договору в полном объеме не выполнены, результат Работ, выполненных на Объекте, в установленном Договором порядке к приемке не представлен.

В соответствии с п. 10.7 Договора Подрядчик несет полную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Суммы штрафных санкций/исковых требований, а также иных убытков уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования от Заказчика.

В свою очередь Подрядчиком требования о возмещении штрафов (убытков) в размере 650 006 руб. 90 коп. не исполнены.

На основании п. 13.2 Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней.

Уведомлением №ИСХ-3130-01-ГО от 04.10.2021 Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, (почтовый идентификатор № 12700663060575).

Стороны пришли к соглашению, что при расторжении/изменении Договора на основании одностороннего отказа от исполнения/ одностороннего изменения Договора, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления о расторжении (изменении) Договора, (п. 13.4. Договора).

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора доставлено в место вручения 09.10.2021г. Таким образом, Договор считается расторгнутым 14.10.2021г.

Таким образом, у Подрядчика перед Заказчиком образовалась задолженность в размере 18 698 457 руб. 94 коп., из которых:

- 10 766 976 руб. 02 коп. - сумма неотработанного аванса;

- 7 281 475 руб. 02 коп. - неустойка, начисленная в соответствии с п. 10.1 Договора;

- 650 006 руб. 90 коп. - штрафы (убытки).

Наряду с этим у Заказчика имеются обязательства перед Подрядчиком по выплате Гарантийного удержания в размере 1 472 089,62 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи восемьдесят девять тысяч) рублей 62 копейки.

Уведомлением от 14.03.2022г. №ИСХ-0762-01-ОГ Заказчик в соответствии с п. 10.8 Договора удержал сумму Гарантийного удержания (Обеспечительного платежа) в размере 1 472 089,62 рублей 62 копейки в счет аванса, неподтвержденного выполненными Работами, так как Подрядчик не исполнил требование Заказчика №ИСХ-3130-01-ОГ от 04.10.2021г. в добровольном порядке.

Таким образом, сумма неотработанного аванса составляет: 10 766 976,02 - 1 472 089,62 = 9 294 886,40 руб.

Положениями статей 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 3 ст. 708 ГК РФ, указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу положений статьи 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В силу положений пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Указанная норма права предполагает неосновательное обогащение одного лица за счет другого (пострадавшего) при отсутствии обязательственных правоотношений между участниками.

Ввиду особенностей института неосновательного обогащения фактические обстоятельства и правовые причины возникновения подобных обязательств могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п. В соответствии с частью 3 статьи 1103 ГК РФ правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, если иное не установлено ГК РФ.

Следовательно, истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения.

Наличие указанных условий одновременно обязывает возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Таким образом, с учетом расторжения договора неотработанный аванс в размере 9 294 886,40 руб. подлежит возврату Истцу.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании пункта 10.1 договора истец начислил ответчику неустойку за период с 31.03.2020 г. по 14.10.2021 г. в размере 7 090 574,92 руб.

Расчет истца ответчиком по существу не оспорен, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно, ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.

Следовательно, требование о взыскании неустойки является обоснованным.

Также в соответствии со статьей 395 ГК РФ после даты расторжения договора истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 447 300,49 руб. за период с 15.10.2021 г. по 01.04.2022 г.

Вместе с тем, суд отмечает, что согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона № 127-ФЗ на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Таким образом, в период действия указанного моратория установленные договором штрафные санкции за период с 01.04.2022 г. не подлежат начислению.

С учетом изложенного судом произведен расчет процентов за период с 15.10.2021 г. по 31.03.2022 г., согласно которому их размер составляет сумму в размере 442 207,40 руб., которая и подлежит удовлетворению.

Также подлежит удовлетворению и сумма убытков (штрафов) в размере 650 006,90 руб., складывающаяся из:

- Требование об уплате штрафа (Предписание № 251 от 09.10.2019 г.);

- Компенсация расходов по электроэнергии за апрель 2020 г.;

- Компенсация расходов электроэнергии за май 2020 г.;

- Требование об уплате штрафа (Предписание № 255 от 14.10.2019 г.);

- Требование об уплате штрафа (Постановление № 1370 и № 1351-Ю от 30.06.2020 г.);

- Требование об уплате штрафа (Предписание № 8235/19 от 09.10.2019 г.);

- Требование об уплате штрафа (Предписание № 240 от 02.10.2019 г.).

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 № 5256/11, по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, обязанность по собиранию доказательств на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора.

По смыслу положений статьи 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ и подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 12, 15, 307, 308, 309, 310, 395, 330, 702, 708, 711, 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 71, 110, 123, 156, 167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЛП-ТРОН» (ИНН: 3460057724) в пользу акционерного общества «МОСПРОМСТРОЙ» (ИНН: 7710034310)  неотработанный аванс в размере 9 294 886, 40 руб., убытки в размере 650 006, 90 руб., неустойку в размере 7 090 574, 92 руб. за период с 31.03.2020 по 14.10.2021г., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 442 207,40 руб. за период с 15.10.2021 по 31.03.2022г., госпошлину в размере 110 381,83 руб.

          В остальной части отказать.

            Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

Судья                                                                                      Р.Е. Галиева