Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

 по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

№ А41-13772/23

23 мая 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения изготовлена 17 апреля 2023 года Полный текст решения изготовлен 23 мая 2023 года. 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В. Дубровская , рассмотрев  в порядке упрощенного производства дело по заявлению ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙПРОГРЕСС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 577 830 руб. 89  коп. неосновательного обогащения по договору от 27.05.2022 № 469ст, без вызова сторон,  

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ»  (далее – истец, ФКП «ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ») обратилось в Арбитражный суд  Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «СТРОЙПРОГРЕСС» (далее – ООО «СТРОЙПРОГРЕСС», ответчик) о взыскании 577 830  руб. 89 коп. неосновательного обогащения по договору от 27.05.2022 № 469ст.  

Исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства в  соответствии с правилами Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ).  

Исковое заявление и приложенные к нему документы, а также определение о  рассмотрении дела в порядке упрощённого производства в установленном порядке  размещены на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

Нарушений порядка и сроков опубликования на официальном сайте арбитражного суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов дела, повлекших  нарушение процессуальных прав сторон, судом не установлено.  

Копии определения о рассмотрении дела в порядке упрощённого производства с кодом  доступа к материалам дела направлены сторонам.  

Дело рассмотрено в порядке упрощённого производства без вызова сторон, после  истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных  документов в соответствии с главой 29 АПК РФ, по имеющимся в материалах дела  доказательствам.  

17.04.2023 Арбитражным судом Московской области принята и размещена  резолютивная часть решения суда по настоящему делу в соответствии с положениями статьи  229 АПК РФ, в удовлетворении иска отказано.  

Резолютивная часть решения суда размещена на официальном сайте суда в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://asmo.arbitr.ru/.  

Истцом подано ходатайство о составлении мотивированного решения. 

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. ст. ст. 309, 310, 702, 1102, 1107  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы  ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ по договору от  27.05.2022 № 469ст, в связи с чем, просит вернуть уплаченные денежные средства в части  невыполненных ответчиком работ.  

Как следует из искового заявления, между ФКП «Щелковский биокомбинат»  (Заказчик) и ООО «Стройпрогресс» (, Исполнитель) заключен договор от 27.05.2022 № 469ст  (далее - Договор), согласно которому Исполнитель принял на себя обязательства выполнить  работы по демонтажу подземного участка теплосети (инв. № 65) на территории отделения  иммунизации ФКП «Щелковский биокомбинат» в соответствии с техническим заданием  (Приложение № 1), локальной сметой (приложение № 2), графиком производства работ  (приложение № 3),  

Согласно пункту 2.1 Договора общая стоимость работ определяется локальной сметой  и составляет 1 200 051 (Один миллион двести тысяч пятьдесят один) руб. 60 коп., в том  числе НДС (20%) 200 008 (Двести тысяч восемь) руб. 60 коп. (Цена Договора).  

В соответствии с пунктом 3.1.1 Договора начальный срок выполнения работ - не  позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения аванса, а конечный срок выполнения работ  согласно графику производства работ - 25 рабочих дней. С учетом даты выплаченного  Исполнителю аванса работы должны были быть выполнены в срок не позднее 04.07.2022.  

В рамках исполнения обязательств по Договору Заказчик платежным поручением от  27.05.2022 № 1662 перечислил Исполнителю авансовый платеж на сумму 377 444,41 рубля.  

Согласно акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 и справке по форме КС-3 от 24.06.2022   № 1 Подрядчик выполнил работы на общую сумму 1 200 051,60 рублей.  

Платежным поручением от 26.07.2022 № 2312 Заказчик произвел Исполнителю оплату  стоимости работ в полном объеме в размере 822 607,19 рублей.  

07.09.2022 Заказчиком в адрес Исполнителя направлено письмо (информационное  уведомление) № 2039/7-03 о том, что комиссией Заказчика будут производиться замеры  глубины залегания коммуникаций (лотков теплотрассы), демонтаж которых производил  Исполнитель.  

08.09.2022 в результате проведения замера глубины Заказчику стало известно о  несоответствии объемов работ, указанных в смете фактически выполненному, что  подтверждается актом замера глубины залегания лотков от 08.09.2022 № б/н, а именно:  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа  «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью  1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 2» - 378 куб.м., фактически объем работ составил 204,48 куб.м.;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют  работающих вне карьера на расстояние до 1 км» - 604,8 т., фактически объем работ составил  368,06 т.;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Демонтаж в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2» - 106  куб.м., фактически объем работ составил 26,64 мЛ3;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона,  бетона, керамзитобетона массой до 3 т» - 64 т. фактически объем работ составил 47,95 т.;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  

работающих вне карьера на расстояние до 35 км» - 64 т. фактически объем работ составил  47,95 т.;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами  мощностью 121 кВт (165 л.с), группа грунтов» -378 куб.м, фактически объем работ составил  274 куб.м;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем работ по  позиции «Уплотнение фунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2» - 378  куб.м., фактически объем работ составил 274 куб.м.;  

согласно локальной смете и акту по форме КС-2 от 24.06.2022 № 1 объем материалов  по позиции «Песок природный» - 381 куб.м, фактически объем работ составил 274 куб.м.  

Стоимость работ и материалов по локальной смете составила 1 200 051,60 руб. 

Фактическая стоимость работ и материалов в соответствии с актом замера глубины  залегания лотков от 08.09.2022 № б/н составила 622 220,71 руб.  

Поскольку со стороны Истца оплата стоимости работ произведена в размере 1 200  051,60 руб., а фактически работы Ответчиком выполнены на сумму 622 220,71 руб., то у  Ответчика перед Истцом имеется обязательство возвратить полученную разницу в размере  577 830,89 руб., которая является для Ответчика неосновательным обогащением.  

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 11.10.2022 № 2211/8-01 с  предложением вернуть денежные средства в указанном выше размере.  

Ответчик возврат не произвел, что послужило основанием для обращения истца в  арбитражный суд с заявленными требованиями.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из сделок, под которыми  статья 153 ГК РФ признает действия граждан и юридических лиц, направленные на  установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу  другого лица определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет  право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из  договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском  кодексе Российской Федерации.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда  (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских  работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные  настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского  кодекса Российской Федерации об этих видах договоров (статья 702 ГК РФ).  

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена  подлежащей выполнению работы или способы ее определения.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену  после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1  статьи 711 ГК РФ).  

В пункте 1 статьи 721 ГК РФ предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком  работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.  Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными  в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах  разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если  такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата  работы такого рода.  

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком  работ является сдача их результата заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ).  

В силу положений пункта 1 статьи 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение  подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного  подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан  немедленно приступить к его приемке.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло  имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить  последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или  сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную  стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные  последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его  стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения (статья 1105  ГК РФ).  

Как установлено судом и не оспорено истцом, подрядчик выполнил согласованные в  договоре работы, заказчик подписал акты приемки выполненных работ, принял результат  работ по согласованной сторонами в контракте стоимости, претензий по качеству и объему  выполненных работ не заявил.  

Дополнительного согласования сторонами изменения или уменьшения твердой цены  контракта не производилось. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.  

В материалы дела представлен акт замера глубины залегания лотков от 08.09.2022 №  б/н, подтверждающий доводы истца о неосновательности сбережения ответчиком денежных  средств в заявленном размере.  

Вместе с тем, проведенная по истечении двух месяцев после сдачи-приемки  выполненных работ проверка не может являться безусловным доказательством  необоснованного сбережения имущества (приобретатель) за счет истца (потерпевшего).  

07.09.2022 истцом в адрес ответчика направлено уведомление № 2039/7-03 о том, что  комиссией Заказчика будут производиться замеры глубины залегания коммуникаций (лотков  теплотрассы), демонтаж которых производил Исполнитель. Доказательства направления  указанного письма от 07.09.2022 в адрес ответчика материалы дела не содержат. Также суд  обращает внимание, что к материалам дела приложена почтовая квитанция от 10.10.2022 о  направлении досудебной претензии от 11.10.2022 исх. № 2211/8-01.  

При этом комиссионная проверка была назначена Заказчиком уже на следующий день08.09.2022, то есть даже в случае направления уведомления № 2039/7-03 посредством Почты  России, ответчик не мог быть надлежащим образом извещен о дате и времени проведения  замеров глубины залегания коммуникаций (лотков теплотрассы).  

Таким образом, проведенная проверка сама по себе не дает основания полагать, что  работы оплачены заказчиком по завышенной цене и не порождает новых обязательств  сторон по договору.  

Данный документ является односторонним доказательством истца, составлен без  вызова и участия ответчика, не подтвержден иными объективными данными.  

При этом стоимость подлежащих выполнению работ зафиксирована в договоре,  включает в себя компенсацию всех расходов Исполнителя в соответствии с пунктом 2.1  договора, доказательств дополнительного согласования сторонами уменьшения цены не  представлено, одностороннее уменьшение заказчиком твердой цены не основано на нормах  права.  

Кроме того, в соответствии с пунктами 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1. договора заказчик вправе в  любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по  договору, вносить замечания и давать обязательные для выполнения указания об объеме и  ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и  приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.  

Документов, свидетельствующих об установлении заказчиком недостатков,  обнаруженных в ходе выполнения работ, истцом в обоснование своей правовой позиции в  материалы дела не представлено. Требования пунктов 6.1-6.3 договора о порядке исполнения  гарантийных обязательств Заказчиком не соблюдены.  

В силу пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда» принятие работ свидетельствует о потребительской  ценности произведенных работ и желании ими воспользоваться, возврат выполненных работ  и использованных при их исполнении материалов невозможен, следовательно, заявленное  исковое требование подлежит удовлетворению, а понесенные подрядчиком затраты -  компенсации.  

На момент приемки работ фактические объемы работ полностью соотносились с  объемами, указанными договоре, Техническом задании, в актах выполненных работ и  справках о стоимости выполненных работ и затрат. Данные работы по демонтажу  подземного участка теплосети являются скрытыми (раздел 4 договора), акты  освидетельствования скрытых работ истцом не представлены, как и не представлена иная  исполнительная документация, журналы работ, подтверждающие факт ненадлежащего  выполнения ответчиком работ. Процедура приемки скрытых работ на момент приемки работ  должна была быть сторонами соблюдена согласно условиям договора.  

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  При этом согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны  быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в  арбитражном суде иными доказательствами.  

В силу частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Допустимым доказательством в случае разрешения спора о стоимости, качества и  объема выполненных работ является заключение эксперта. Однако истец не заявлял  ходатайства о назначении по делу строительно-технической экспертизы.  

Как разъяснено в пунктах 3 и 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения  арбитражными судами законодательства об экспертизе», в случае если ходатайство о  назначении по делу судебной экспертизы не поступило или согласие не было получено,  оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи  65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд  оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности,  а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

При таких обстоятельствах, суд полагает, что доводы иска о завышении ответчиком  стоимости выполненных по договору работ являются несостоятельными, поскольку работы  ответчиком выполнены, без замечаний приняты и оплачены истцом. Достоверных и  бесспорных доказательств, свидетельствующих о завышении стоимости работ, истцом не  представлено.  

Изучив все представленные истцом документы, исследовав вышеприведенные нормы  права и судебную практику их применения, арбитражный суд не находит оснований для  удовлетворения исковых требований.  

Расходы по оплате государственной пошлине распределяются в соответствии со  статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167-171, 180-181, 228-229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дубровская