101/2023-146594(1) 

 

Арбитражный суд Брянской области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  решения

 по делу 

№ А09-7321/2023

город Брянск

19 декабря 2023 года

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Прокопенко Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного казенного  

учреждения «Управление капитального строительства Брянской области»  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  

«Стройгарант» 

третье лицо: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Климовская школа-интернат», об обязании устранить недостатки при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 2 от 27.12.2022, 

от ответчика в режиме веб - конференции: ФИО3 по доверенности № 1 от  

20.03.2023, от третьего лица: не явился, 

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Брянской области» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройгарант» в течение тридцати дней с даты вступления решения суда в  законную силу устранить недостатки в рамках гарантийного срока по государственному  контракту № 0127200000219004873 от 05.09.2019 на объекте Климовская специальная  (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, а именно:  

- загерметизировать входы и выходы трубопроводов в колодцах теплотрассы, 

- завершить работы по электрической части КНС с подключением погружных  насосов в автоматическим режиме,  

- завершить ремонтно-восстановительные общестроительные работы КНС с  восстановлением асфальтобетонного покрытия,  

- устранить протечки кровли в блоке № 1,дезинфицировать и заменить стропила,  пораженные грибком, восстановить откосы слуховых окон,  

- определить и устранить протечки в блоке № 3, 2, коридоре и других местах  протечки кровли,  

- в блоке № 1 усилить рамы с заменой поликарбоната покрытий световых приямков  техподполья,  

- в блоке № 3 над дверью эвакуационного выхода из помещений мастерской  установить светильник, в столярной мастерской выполнить переподключение  оборудования напряжения (380 на 220) – согласно ПУЭ,  

- в блоке № 3 заменить часть линолеумного покрытия, пораженного грибком,  - в блоке № 3 усилить крепление кресел актового зала,  

- в блоке № 1 над дверью эвакуационного выхода установить и подключить  светильники, а также выполнить регулировку открывных створок оконных и дверных  блоков,  

- в бордюрах благоустройства прорезать места для пропуска воды с газонов,  

- восстановить отпавшую (отошедшую) плитку на цоколях блоков, приямках  световых окон по всему периметру школы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройгарант» государственную пошлину в доход федерального бюджета в  размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд г. Тула. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд  Брянской области.  

Судья Прокопенко Е.Н.