Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-69346/20-3-511

г. Москва

30 июля 2020г.

Резолютивная часть объявлена 23 июля 2020 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 30 июля 2020 г. 

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., 

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУТРАНС" (109431, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Л, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2016, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (390046, 

<

...>/2 2ЭТ.НЕЖ.ПОМ.Н1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 23 262 989,72 руб.

В судебное заседание явились:

От истца: ФИО2 по дов. № 1 от 21.01.2020 г. (удостоверение)  

От ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании с АО "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" в пользу ООО "БАУТРАНС" задолженности по Договору № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 6 300 744 руб. 37 коп., неустойки в размере 1 248 242  руб. 98 коп.,  задолженности по Договору № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 3 033 422 руб. 26 коп., неустойки в размере 888 182 руб. 73 коп., задолженности по Договору № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 10 718 120 руб. 13 коп., неустойки в размере 1 074 277 руб. 25 коп.

В судебное заседание не явился представитель ответчика. Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное по адресу ответчика возвращено в суд. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления, о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте http://www.msk.arbitr.ru.

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на иск, согласно которого ответчик возражал против удовлетворения заявленных истцом требований.

Представитель истца требования поддержал в полном объёме.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, 26 сентября 2018 года между АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» (далее – Заказчик, Ответчик) и ООО «БАУТРАНС» (далее – Подрядчик, Истец) заключен Договор № ЛЕН-24/09/18 (далее по тексту - Договор № ЛЕН-24/09/18), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по разработке котлована и вывозу грунта, с учетом устройства шпунтового ограждения и распорной системы на Объекте (под которым в Договоре № ЛЕН-24/09/18 понимается строительство Многофункционального гостинично-торгового комплекса с подземной автостоянкой (2-я очередь строительства), на земельном участке по адресу: 

<

...>, с кадастровым номером 77:06:0001002:147) в объеме указанном в «Структуре договорной цены» (Приложение № 1 к Договору № ЛЕН-24/09/18) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора № ЛЕН-24/09/18.

В соответствии с п. 3.1 Договора № ЛЕН-24/09/18 (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 28 декабря 2018 года) стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со «Структурой договорной цены» (Приложение № 1 к Договору № ЛЕН-24/09/18) и составляет 86 122 209,52 рублей (восемьдесят шесть миллионов сто двадцать две тысячи двести девять рублей 52 копейки), в т.ч. НДС 20% 14 283 567,48 рублей (четырнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 48 копеек) включает в себя все затраты подрядчика по выполнению им обязательств по Договору № ЛЕН-24/09/18, при выполнении работ на Объекте (за исключением стоимости материалов/оборудования, входящего в давальческое сырье Заказчика).

В соответствии с п. 4.1.1.1 Договора № ЛЕН-24/09/18 первый аванс в размере 8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 1 220 338,98 рублей (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь рублей 98 копеек), заказчик оплачивает в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета.

Согласно п. 4.1.1.2 Договора № ЛЕН-24/09/18 второй аванс в 8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% 1 220 338, 98 рублей (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь рублей 98 копеек), заказчик оплачивает в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности приступить к разработке котлована.

В соответствии с п. 4.1.2 Договора № ЛЕН-24/09/18 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию заказчиком в соответствующем отчетном периоде: в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% (пять процентов) за исключением удержания из стоимости земляных работ; в счет пропорционального зачета ранее перечисленных заказчиком авансов до их полного погашения в счет стоимости выполнения работ по Договору № ЛЕН-24/09/18.

Согласно материалам дела, в период с 30 ноября 2018 года по 15 апреля 2019 года между Истцом и Ответчиком были подписаны Акты приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), в соответствии с которыми стоимость выполненных в период с 26 сентября 2018 года по 15 апреля 2019 года по Договору № ЛЕН-24/09/18 работ составляет 18 104 894,94 рублей.

Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору № ЛЕН-24/09/18 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме. 

Из материалов дела следует, что в указанный период АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» произведены оплаты в сумме 10 898 905,82 руб.

Согласно расчета Истца, с учетом приведенной стоимости выполненных ООО «БАУТРАНС» работ по Договору № ЛЕН-24/09/18 и размера произведенных АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору № ЛЕН-24/09/18 составляет 6 300 744,37 рублей.

Кроме того, как следует из материалов дела, 14 декабря 2018 года между Истцом и Ответчиком заключен Договор № ЛЕН-14/12/18 (далее по тексту - Договор № ЛЕН-14/12/18), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по сносу строений, сооружений и демонтаж фундаментов с выемкой из пятна земли и вывоз строительного мусора на полигон на Объекте (под которым в Договоре № ЛЕН-14/12/18 понимается строительство Многофункционального гостинично-торгового комплекса с подземной автостоянкой (2-я очередь строительства), на земельном участке по адресу: 

<

...>) в объеме указанном в «Структуре договорной цены» (Приложение № 1 к Договору № ЛЕН-14/12/18) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора № ЛЕН-14/12/18.

В соответствии с п. 3.1 Договора № ЛЕН-14/12/18 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 09 января 2019 года) стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со «Структурой договорной цены» (Приложение № 1 к Договору № ЛЕН-14/12/18) и составляет 15 300 723,01 руб., кроме того НДС (сумма НДС исчисляется и уплачивается сторонами по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ), является предельной, учитывает все затраты подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору № ЛЕН-14/12/18 при выполнении работ на Объекте.

В соответствии с п. 4.1.1 Договора № ЛЕН-14/12/18 заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета оплачивает аванс в размере 4 166 666,67 руб., кроме того НДС (сумма НДС исчисляется и уплачивается по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ на дату платежа).

Согласно п. 4.1.2 Договора № ЛЕН-14/12/18 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета и счета-фактуры на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% (пять процентов) и ранее перечисленного заказчиком аванса пропорционально стоимости выполненных в отчетном периоде работ.

Согласно материалам дела, в период с 31 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года Истцом и Ответчиком были подписаны Акты приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), в соответствии с которыми стоимость выполненных в период с 15 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года по Договору № ЛЕН-14/12/18 работ составляет 21 250 419,33 рублей с учетом НДС:

Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору № ЛЕН-14/12/18 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме. 

Из материалов дела следует, что в указанный период АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» произведены оплаты в сумме 17 131 184,70 руб.

С учетом приведенной стоимости выполненных ООО «БАУТРАНС» работ по Договору № ЛЕН-14/12/18 и размера произведенных АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору № ЛЕН-14/12/18 составляет 3 033 422, 26 рублей .

Также, как следует из материалов дела, 04 апреля 2019 года между Истцом и Ответчиком заключен Договор № ХАВ-04/04/19 (далее по тексту - Договор № ХАВ-04/04/19), в соответствии с условиями которого (п.п. 2.1-2.2) заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства, выполнить собственными и/или привлеченными силами работы по разработке котлована и вывозу грунта, с учётом устройства «стены в грунте» на Объекте (под которым в Договоре № ХАВ-04/04/19 понимается многоквартирный жилой дом, состоящий из трех 8-этажньгх жилых корпусов, размещенных на одноуровневой подземной автостоянке, с количеством этажей 8 + 1 подземный этаж, с размещением индивидуальных внеквартирных хозяйственных кладовых в подземном этаже, расположенный по адресу: 

<

...>) в объеме указанном в «Структуре договорной цены» (Приложение № 1 к Договору № ХАВ-04/04/19) и сдать в установленный срок, результат надлежаще выполненных работ, заказчику. При этом заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком надлежащим образом работы и оплатить их на условиях Договора № ХАВ-04/04/19.

В соответствии с п. 3.1 Договора № ХАВ-04/04/19 стоимость работ по данному Договору определена в соответствии со «Структурой договорной цены» (Приложение №1 к Договору № ХАВ-04/04/19) и составляет 33 671 388,60 рублей, в т.ч. НДС 20% 5 611 898,10 рублей, включает в себя все затраты подрядчика по выполнению им обязательств по Договору № ХАВ-04/04/19, при выполнении работ на Объекте (за исключением стоимости материалов/оборудования, входящего в давальческое сырье заказчика).

В соответствии с п. 4.1.1 Договора № ХАВ-04/04/19 заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета после подписания Договора № ХАВ-04/04/19 оплачивает аванс на выполнение работ в размере 8 425 110,00 рублей (Восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто десять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 1 404 185, 00 рублей.

Согласно п. 4.1.2 Договора № ХАВ-04/04/19 оплата фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета на основании подписанных обеими сторонами в установленном порядке Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), с указанием в ней сумм подлежащих удержанию заказчиком в соответствующем отчетном периоде: в счет обеспечения Гарантийного депозита в размере 5% (пять процентов) за исключением удержания из стоимости земляных работ; в счет пропорционального зачета ранее перечисленного заказчиком аванса до его полного погашения в счет стоимости выполненных работ по Договору № ХАВ-04/04/19.

Согласно материалам дела, в период с 04 апреля 2019 года по 15 августа 2019 года ООО «БАУТРАНС» были выполнены работы, общая стоимость которых в соответствии с Актами приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) составляет 25 679 073,82 рублей.

При этом, суд отмечает, что Акт приемки выполненных работ (ф. КС-2) иСправка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 01 от 01.07.2019 года были подписаны Истцом и Ответчиком.

От подписания Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) №02 от 02.10.2019 года Ответчик уклонился. 

При этом, в соответствии с п. 4.2.2 Договора № ХАВ-04/04/19, рассмотрение переданной подрядчиком отчетной документации, подписание Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) либо направление подрядчику мотивированного отказа от их подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней является обязанностью заказчика. При этом в случае не направления подписанных документов либо мотивированного отказа от их подписания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, работы считаются принятыми.

Факт получения АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» 15 ноября 2019 года Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 02 от 02.10.2019 года, а также Счета № 100207 и Счета-фактуры № 100213 от 02.10.2019 г. подтверждается отметкой на Сопроводительном письме от 15.11.2019 года.

С учетом изложенного, работы, выполненные Истцом и указанные в Акте приемки выполненных работ (КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 02 от 02.10.2019 года приняты Ответчиком.

Вместе с тем оплата выполненных Истцом по Договору № ХАВ-04/04/19 работ Ответчиком в установленные Договором сроки и порядке произведена не в полном объеме. 

Согласно материалам дела, в указанный период АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» произведены оплаты, на общую сумму 13 677 000 руб.

С учетом приведенной стоимости выполненных ООО «БАУТРАНС» работ по Договору № ХАВ-04/04/19 и размера произведенных АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» по данному Договору оплат, задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ по Договору № ХАВ-04/04/19 составляет 10 718 120,13 рублей.

22 января 2020 года в адрес АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» была направлена Претензия в порядке досудебного урегулирования спора с требованием погасить имеющуюся задолженность. Претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск, суд отклоняет как необоснованные и не подтвержденные документально.

Так, выполненные Истцом работы, указанные в актах выполненных работ (КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), от подписания которых Ответчик уклоняется, считаются принятыми в соответствии с законом и п. 4.2.2 Договоров.

В силу статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Указанное законоположение конкретизировано в пункте 4.2.2 Договора № ЛЕН-24/09/18 от 24.09.2018, № ЛЕН-14/12/18 от 14.12.2018 и № ХАВ-04/04/19 от 04.04.2019, в соответствии с которым Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает переданную Подрядчиком в соответствии с п. 4.2.1 сопроводительную документацию, подписывает Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) со своей стороны и один экземпляр возвращает Подрядчику, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием в нем причин, препятствующих оформлению в установленном порядке, в случае не направления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, считаются принятыми.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приёмку.

От подписания Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 02 от 02.10.2019 года Ответчик необоснованно уклонился.

Факт получения АО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» 15 ноября 2019 года Акта приемки выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 02 от 02.10.2019 года, а также Счета № 100207 и Счета-фактуры № 100213 от 02.10.2019 г. подтверждается отметкой на Сопроводительном письме от 15.11.2019 года.

Мотивированного отказа от их подписания Ответчик Истцу не направлял.

С учетом положений п. 4.2.2 Договора № ХАВ-04/04/19 работы, выполненные Истцом и указанные в Акте приемки выполненных работ (КС-2) и в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 02 от 02.10.2019 года приняты Ответчиком.

При этом, суд принимает во внимание факт частичного погашения Ответчиком задолженности перед Истцом.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал оплату задолженности по Договору № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 6 300 744 руб. 37 коп., задолженности по Договору № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 3 033 422 руб. 26 коп., задолженности по Договору № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 10 718 120 руб. 13 коп., суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, исковые требования по взысканию суммы долга правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п. 10.2. Договоров  № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года, № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года, № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года если заказчик не выполнит своих обязательств по оплате выполненных работ, то он обязуется уплатить подрядчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Согласно расчета истца, сумма неустойки по Договору № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года по состоянию на 29.02.2020 составила  1 248 242 руб. 98 коп., сумма неустойки по Договору № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года по состоянию на 29.02.2020 составила 888 182 руб. 73 коп., сумма неустойки  по Договору № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года по состоянию на 29.02.2020 составила 1 074 277  руб. 25 коп.

Суд отмечает, что ходатайства о применении судом ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено.  

Таким образом, сумма неустойки по Договору № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года по состоянию на 29.02.2020 составила  1 248 242 руб. 98 коп., сумма неустойки по Договору № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года по состоянию на 29.02.2020 составила 888 182 руб. 73 коп., сумма неустойки  по Договору № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года по состоянию на 29.02.2020 составила 1 074 277  руб. 25 коп. также подлежит взысканию с ответчика, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего  исполнения условий Договора.

Расходы истца по госпошлине распределены судом в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" (390046, 

<

...>/2 2ЭТ.НЕЖ.ПОМ.Н1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУТРАНС" (109431, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 70, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ XII КОМ 3Л, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2016, ИНН: 

<

***>) задолженность по Договору № ЛЕН-24/09/18 от 26 сентября 2018 года в размере 6 300 744 (Шесть миллионов триста тысяч семьсот сорок четыре) руб. 37 коп., неустойку в размере 1 248 242 (Один миллион двести сорок восемь) руб. 98 коп.; задолженность по Договору № ЛЕН-14/12/18 от 14 декабря 2018 года в размере 3 033 422 (Три миллиона тридцать три тысячи четыреста двадцать два) руб. 26 коп., неустойку в размере 888 182 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два) руб. 73 коп.; задолженность по Договору № ХАВ-04/04/19 от 04 апреля 2019 года в размере 10 718 120 (Десять миллионов семьсот восемнадцать тысяч сто двадцать) руб. 13 коп., неустойку в размере 1 074 277 (Один миллион семьдесят четыре тысячи двести семьдесят семь) руб. 25 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 139 315 (Сто тридцать девять тысяч триста пятнадцать) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его  изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

             Судья                    А.А. Федоточкин