АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-37994/2024

г. Нижний Новгород                                                                                        14 марта 2025 года

Дата объявления резолютивной части решения 13 марта 2025 года 

Дата изготовления решения в полном объеме 14 марта 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-729),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., после перерыва секретарем судебного заседания Епифановой Д.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье"               (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о понуждении заключить договор,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.01.2025, ФИО2 по доверенности от 09.01.2025,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.10.2024,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" обратилось            в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" о понуждении заключить договор.

            В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялись перерывы до 04.03.2025 и 13.03.2025.

            Ответчик против удовлетворения иска возразил по доводам, приведенным в отзыве на иск и дополнениях к нему.

            ООО "Специнвестпроект" представило возражения на доводы ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

В адрес истца обратилось ООО "Специализированный застройщик "Экострой"             с  заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям истца энергопринимающих устройств объектов комплексной жилой застройки (многоквартирные жилые дома, КНС, паркинг, поликлиника, детский сад), расположенных по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, вблизи д. Ржавка              и д. Утечино, на земельных участках с кадастровыми номерами 52:26:0010033:217                      и 52:26:0010033:11694.

Принадлежащая истцу ПС 110/10 "Афонинская", расположенная по адресу: Кстовский район, 300 м. южнее д. Афонино, к которой производится технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "Специализированный застройщик "Экострой", присоединена к электросетям ПАО "Россети Центр и Приволжье".

ООО "Специнвестпроект" 26.04.2024 посредством личного кабинета, зарегистрированного на портале "Портал-тп.рф", направило ответчику заявку                              на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в связи с увеличением объема максимальной мощности в интересах ООО "Специализированный застройщик "Экострой" следующих объектов электросетевого хозяйства, предназначенных                      для электроснабжения ПС 110/10 "Афонинская":

- отпайка от опоры № 1 ВЛ 110 кВ "ГАСТ" на ПС «Афонинская»;

- отпайка от опоры № 29 ВЛ 110 кВ "Афонинская" на ПС "Афонинская".

Заявка зарегистрирована на портале "Портал-тп.рф" под номером 10672066.

Поскольку ответа на заявку от ответчика не поступило, истец подготовил                            и направил в его адрес проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий к нему с просьбой подписать его в течение 30 дней с даты получения (письмо исх. № 4060 от 04.10.2024, получено ответчиком 04.10.2024). 

Так как ответа на данное предложение от ПАО "Россети Центр и Приволжье"                 не поступило, ООО "Специнвестпроект" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации                (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора; понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445  данного Кодекса            (пункт 3 статьи 426 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии            с данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется  от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор; в этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов                          по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004               № 861 (далее - Правила № 861).

Согласно пункту 2 Правил № 861 их действие распространяется на случаи:

- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

- изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

- присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года)                в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                от 26.07.2007 № 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

- изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с  Правилами  вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021             № 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

- предусмотренные пунктом 41 данных Правил.

Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства установлены разделом V Правил № 861.

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в следующем случае: сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией                        и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации                          в заключении договора (пункт 43 Правил № 861).

Согласно пункту 16 Правил № 861 договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется                   в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и данными Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей                  и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Согласно пункту 25(4) Правил № 861 в технических условиях для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) данных Правил, должны быть указаны:

- схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения;

- максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

- распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;

- обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения);

- требования, указанные в подпунктах "в" - "д" и "ж" пункта 25 данных Правил.

Как указано в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ); при этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, учитывая, что заявка          № 10672066 от 26.04.2024, соответствующая требованиям пункта 13(1) Правил № 861, направлена в смежную сетевую организацию, которая не вправе отказать в заключении договора, а напротив, обязана создать техническую возможность для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, суд пришел к выводу                                о правомерности предъявленного ООО "Специнвестпроект" искового требования.

В части размера платы за технологическое присоединение суд принимает                    в редакции ответчика пункты 3.1 и 3.1.1 договора, исходя из следующего.

Как указал истец, поскольку заявка на увеличение максимальной мощности                   направлена им в 2024 году, а оферта договора ответчиком в 2024 году                                не направлена, недополучение платы от заявителя является предпринимательским риском ПАО "Россети Центр и Приволжье", в связи с чем плата по договору в любом случае должна рассчитываться на основании Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12.12.2023 № 54/1. 

В редакции истца указанные пункты изложены следующим образом:

"3.1. Размер платы за технологическое присоединение рассчитан по тарифным ставкам, утвержденным Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12.12.2023 № 54/1 и составляет 21 651.31 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 31 копейка, в том числе НДС 20% в сумме 3 608.55 (три тысячи шестьсот восемь) рублей 55 копеек. 

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: 

Р = С1.1 + С1.2 (руб.)(без НДС), 

Р = 18 042.76 (руб.) (без НДС), 

где: Р – плата за технологическое присоединение; 

С1.1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение). 

С1.2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) в зависимости от дифференциации: 

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%). 

Всего с учетом 20 % НДС: Р = 18 042.76 ? 1.2 = 21 651.31 руб. 

3.1.1. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

Платеж 

Всего к оплате (с НДС), руб. 

Срок оплаты 

Платеж № 1 

21 651.31 

В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Договора 

Ответчик, возражая против удовлетворения иска, в части пунктов 3.1 и 3.1.1 представил обоснование об использовании при расчете платы за технологическое присоединение тарифных ставов, утвержденных Решением Региональной службы                     по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1, действующих с 01.01.2025              по 31.12.2025.

В редакции ответчика пункты 3.1 и 3.1.1 изложены следующим образом:

"3.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется                          в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области                № 54/1 от 15.11.2024 г., и составляет 24 619,25 (Двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (Четыре тысячи сто три) рубля21 копейка. 

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: 

P = С1.1 + С1.2 (руб.) (без НДС), 

Р = 4 948,41 + 15 567,63 = 20 516,04 (руб.) (без НДС), 

где: Р – плата за технологическое присоединение; 

С1.1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение). 

С1.2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) в зависимости от дифференциации: 

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%). 

Всего с учетом 20 % НДС: Р = 20 516,04 ? 1.2 = 24 619,25 руб.

3.1.1. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

Платеж 

Всего к оплате (с НДС), руб. 

Срок оплаты 

Платеж № 1 

24 619,25

В течение 15 (Пятнадцати) дней 

с момента заключения Договора 

Как следует из Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570 по делу                      № А62-434/2016 договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре.

Согласно статье 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным                  для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу пункта 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой                        в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд                     с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Таким образом, момент заключения договора технологического присоединения                будет определяться моментом вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Согласно пункту 17 Правил технологического присоединения размер платы                 за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В силу пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 размер стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной мощности определяется в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение                           к электрическим сетям исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств    и (или) объектов электроэнергетики заявителя, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта.

Размер платы по договору ООО "Специнвестпроект" определен в соответствии                с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 54/1 от 12.12.2023 и составил 21 651.31 руб. (с НДС).

В то время как с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 действует Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1.

Таким образом, при расчете размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО "Россети Центр и Приволжье" в случае передачи спора на рассмотрение суда, подлежит применению                      действующее с 01.01.2025 решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1.

Прочие доводы сторон судом рассмотрены и отклонены, поскольку                             не подтверждены надлежащими доказательствами, не основаны на нормах права,                         не способны повлиять на исход спора.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности,                а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

С учетом изложенного, оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу, что исковое требование ООО "Специнвестпроект" является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,                в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

При таком исходе дела, понесенные истцом расходы по оплате государственной пошлины в размере 50000 руб. относятся на ПАО "Россети Центр и Приволжье".

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

понудить публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – сетевая организация) заключить                        с обществом с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект"                                  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – заявитель) договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующих условиях:

"1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства (далее энергопринимающие устройства) Заявителя (далее – технологическое присоединение): 

- отпайка от опоры № 1 ВЛ 110 кВ "ГАСТ" на ПС 110кВ Афонинская; 

- отпайка от опоры № 29 ВЛ 110 кВ "Афонинская" на ПС Афонинская, предназначенных для электроснабжения ПС 110/10 "Афонинская", расположенных                  по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее д. Афонино 

со следующими характеристиками: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:               21,0 МВт (в том числе ранее присоединенная – 6,5 МВт); 

- категория надежности: 2 категория - 21,0 МВт; 

- точки присоединения: 

- Опора № 1 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "ГАСТ" на ПС "Афонинская" с максимальной мощностью ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 3,25 МВт; 

- Опора № 29 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "Афонинская" с максимальной мощностью ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 3,25 МВт. 

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы или энергопринимающих устройств Заявителя. Максимальная мощность, разрешенная к одномоментному использованию по указанным точкам присоединения, не должна превышать 6,5 МВт. 

- Опора № 1 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "ГАСТ" на ПС "Афонинская" с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств – 7,25 МВт; 

- Опора № 29 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "Афонинская" с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств – 7,25 МВт. 

Указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы или энергопринимающих устройств Заявителя. Максимальная мощность, разрешенная                    к одномоментному использованию по точкам присоединения, не должна превышать          14,5 МВт. 

- класс напряжения в точках присоединения 110 кВ, 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него                      в технических условиях (далее – ТУ) в срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора, внести плату за технологическое присоединение и в случае расторжения/изменения договора и/или иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы                              в соответствии с условиями настоящего Договора. Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. 

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему Договору Сторонами составляет не более 4 (четырех) лет с даты заключения Договора. 

1.4. В случае если отдельным соглашением не будет установлено иное, сетевая организация несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ участка Заявителя, а Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в пределах границ участка, до точек присоединения, указанных в технических условиях. 

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.5 и 2.3.9 настоящего Договора. 

1.5. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением к настоящему Договору, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства                           по настоящему Договору и осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору. 

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, рассмотреть возможность согласования частичного отступления от технических условий в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.1.3. После получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила ТП). 

2.1.4. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 

2.1.5. После осуществления Сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя и фактического приема (подачи) напряжения и мощности с учетом срока, указанного в пункте 1.5 Договора, подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку                   и получение Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанный               со стороны Сетевой организации в 2 (двух) экземплярах. 

2.1.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, направить в адрес Заявителя способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения, письмо с указанием суммы фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора, содержащее требование об их компенсации. 

2.1.7. Направить заявителю в двух экземплярах подписанное со своей стороны дополнительное соглашение с новым расчетом платы за технологическое присоединение в случае изменений законодательства РФ, связанных с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов и сборов, иных обязательных платежей. Изменение тарифного решения, указанного в п. 3.1 договора, в период действия договора не является основанием для пересмотра платы за технологическое присоединение. 

2.1.8. Направить заявителю в двух экземплярах подписанное со своей стороны дополнительное соглашение с новым расчетом суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, в случае изменений законодательства РФ, связанных с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов и сборов, иных обязательных платежей. Изменение тарифного решения, указанного в п. 3.1 договора, в период действия договора не является основанием для пересмотра платы за технологическое присоединение. 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Проверять ход выполнения заявителем технических условий. 

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. 

2.2.4. В случае нарушения заявителем обязанностей, предусмотренных п. 3.1 Договора, в том числе в случае нарушения срока оплаты любого из платежей, указанных в п. 3.1 Договора, Сетевая организация в качестве способа защиты своего нарушенного права может обратиться в суд с иском о взыскании с Заявителя подлежащей оплате суммы задолженности и (или) неустойки. 

2.2.5. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии технической возможности технологического присоединения, при письменном обращении Заявителя продлить их действие в порядке и на основаниях, установленных законодательством. 

2.2.6. Сетевая организация вправе не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий: 

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, техническим условиям и (или) требованиям нормативно-технической документации; 

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) техническим условиям. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока действия настоящего Договора. 

2.2.7. При нарушении Заявителем установленного в пункте 1.3. Договора срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, расторгнуть Договор по решению суда. При этом Заявитель обязан компенсировать Сетевой организации фактически понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в соответствии с п. 2.3.13 настоящего Договора. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные технические условия, в том числе утвержденные изменения в ТУ (при наличии изменений). 

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в том числе указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате технологического присоединения и выполнении своих мероприятий по осуществлению технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями. 

2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по техническим условиям (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты направления уведомления о выполнении технических условий) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям технических условий. 

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении технических условий со стороны Заявителя с приложением документов, предусмотренных законодательством в сфере технологического присоединения, способом, подтверждающим отправку и получение уведомления. 

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения технических условий Заявителем. 

2.3.7. В течение 5 (пяти) дней со дня получения подписать представленный Сетевой организацией Акт о выполнении технических условий либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию. 

2.3.8. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения утвержденного органом федерального государственного энергетического надзора Акта допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя направить копию                 в Сетевую организацию способом, подтверждающим отправку и получение уведомления. 

2.3.9. С учетом срока, указанного в пункте 1.5 настоящего Договора, подписать представленный Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения и направить в Сетевую организацию либо представить мотивированный отказ от подписания. В случае не поступления в указанный срок подписанного Акта об осуществлении технологического присоединения, либо не представления мотивированного отказа от подписания, Акт считается подписанным, а услуга оказанной Сетевой организацией и принятой заявителем в полном объеме и без претензий. 

2.3.10. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств требованиям правил, регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов. 

2.3.11. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся                       в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с потреблением и (или) передачей электрической энергии. 

2.3.12. При осуществлении права на отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору - направить в Сетевую организацию уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Сетевой организацией указанного уведомления. Отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) возможен не позднее завершения выполнения мероприятий по вводу объектов электроэнергетики Заявителя, Сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем. 

2.3.13. В случае расторжения, одностороннего отказа от исполнения договора компенсировать Сетевой организации понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в том числе, но не ограничиваясь, связанные с подготовкой и выдачей Сетевой организации технических условий Заявителю. Возмещение расходов производится Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов с актом фактически понесенных расходов, независимо от факта подписания указанного акта Заявителем. 

Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 

Размер понесенных Сетевой организацией расходов, в целях их возмещения Заявителем, рассчитывается Сетевой организацией в одностороннем порядке, в том числе по выбору Сетевой организации может быть осуществлен полностью либо в части с применением утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированной тарифной ставки С1 (ее составляющей в отношении отдельного мероприятия) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам. 

2.3.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящего и акта фактически понесенных Сетевой организацией расходов, подписать акт фактически понесенных расходов и направить его оригинал в адрес Сетевой организации либо представить мотивированные возражения. 

При неполучении Сетевой организацией мотивированных возражений относительно акта фактически понесенных расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней                         с даты его получения Заявителем акт фактически понесенных расходов считается подписанным (согласованным) со стороны Заявителя. 

2.3.15. Направить в адрес Сетевой организации в течение 5 (пяти) рабочих дней            с даты получения письма о возмещении понесенных расходов и акта фактически понесенных расходов уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой организацией расходов. 

2.3.16. Заявитель обязан подписать указанное в п.2.1.7 Договора дополнительное соглашение и в течение 10 рабочих дней со дня получения направить в адрес сетевой организации один из подписанных обеими сторонами экземпляров. 

В случае если Сетевая организация направила в адрес Заявителя указанное               в п. 2.1.7 Договора дополнительное соглашение, а Заявитель не направил подписанный им экземпляр в установленный срок в адрес Сетевой организации дополнительное соглашение, то направленное в адрес Заявителя дополнительное соглашение считается заключенным Сторонами. 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от технических условий обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений. 

2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре, с учетом возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в связи с осуществлением технологического присоединения. 

2.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктами 2.3.13-2.3.15 настоящего Договора. 

При осуществлении права на отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору Заявитель направляет в Сетевую организацию уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора, способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Сетевой организацией указанного уведомления. Отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) возможен не позднее завершения выполнения мероприятий по вводу объектов электроэнергетики Заявителя, Сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем. 

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 54/1                       от 15.11.2024, и составляет 24 619,25 (Двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 4 103,21 (Четыре тысячи сто три) рубля 21 копейка. 

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: 

P = С1.1 + С1.2 (руб.) (без НДС), 

Р = 4 948,41 + 15 567,63 = 20 516,04 (руб.) (без НДС), 

где: Р – плата за технологическое присоединение; 

С1.1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение). 

С1.2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) в зависимости от дифференциации: 

1.2 – ставка налога на добавленную стоимость (20%). 

Всего с учетом 20 % НДС: Р = 20 516,04 ? 1.2 = 24 619,25 руб.

3.1.1. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

Платеж 

Всего к оплате (с НДС), руб. 

Срок оплаты 

Платеж № 1 

24 619,25

В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Договора

3.2. В случае если на момент заключения сторонами указанного в п. 2.1.7 Договора дополнительного соглашения к Договору сумма внесенных Заявителем по Договору платежей будет превышать размер платы за технологическое присоединение, утвержденный дополнительным соглашением, Сетевая организация будет обязана возвратить Заявителю сумму, превышающую установленный дополнительным соглашением размер платы за технологическое присоединение, в течение 60 дней с момента заключения такого дополнительного соглашения. 

В случае если на момент заключения сторонами указанного в п. 2.1.7 Договора дополнительного соглашения к Договору сумма внесенных Заявителем по Договору платежей окажется меньше размера платы за технологическое присоединение, утвержденного дополнительным соглашением, Заявитель будет обязан доплатить Сетевой организации оставшуюся сумму за технологическое присоединение в течение 60 дней с момента заключения такого дополнительного соглашения, если иной срок не предусмотрен условиями вышеуказанного дополнительного соглашения 

3.3. Оплата по п. 3.1.1 Договора не зависит от стадии выполнения сторонами технических условий (приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.4. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса. 

3.6. Ранее полученные платежи засчитываются (в порядке их поступления) в счет погашения задолженности за оказанные услуги на дату подписания первичной учётной документации в сумме оказанных услуг или на сумму полученного платежа в случае, если сумма платежа составляет менее суммы оказанных услуг. 

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии                                             с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Сторона договора, нарушившая сроки исполнения обязательств (мероприятий, обязательств по внесению платы (в том числе авансовых платежей, предусмотренных пунктом 3.1.1 Договора), установленных настоящим Договором, обязана уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению - не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности. 

4.5. Неисполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, в том числе обязательств по внесению оплаты за технологическое присоединение, включая авансовые платежи, освобождает сетевую организацию от ответственности за нарушение срока фактического присоединения к электрической сети. 

4.6. Сторона договора, нарушившая сроки исполнения обязательств (мероприятий и/или обязательств по оплате), установленных настоящим Договором, обязана уплатить понесенные другой Стороной Договора расходы в определенном в судебном акте размере, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной пунктом 4.2 Договора, в случае необоснованного уклонения либо отказа Стороны от ее уплаты. 

4.7. В случае нарушения заявителем сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 договора, а также невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в период их действия, Сетевая организация имеет право требовать расторжения указанного договора и компенсации фактически понесенных расходов. При несогласии заявителя с указанным требованием спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с разделом 5 договора. 

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством. 

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: Сетевая организация: info@nn.mrsk-cp.ru; Заявитель: info@si-proekt.ru. 

6. Заключительные положения

6.1. В случае одностороннего отказа Заявителя от Договора в соответствии                с п. 2.4.2 или расторжения Договора в судебном или внесудебном порядке Заявитель обязуется возместить Сетевой организации расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы за подготовку и выдачу технических условий в размере, установленном п. 3.1.1 Договора. 

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий иные документы, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение, 

Все письма и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение. 

6.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов, указанных разделе 8 Договора, уведомить друг друга о произошедших изменениях. Стороны освобождаются от ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения указанной обязанности. 

6.4. При исполнении договора стороны обязуются соблюдать положения законодательства о государственной и (или) коммерческой тайне, в том числе, но не исключительно, положения Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне». 

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения Сторонами обязательств. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем без разногласий экземпляра Договора в Сетевую организацию (при наличии разногласий – с даты их урегулирования). Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7. Перечень приложений к Договору

Приложение № 1 

- 

Технические условия. 

Приложение № 2 

- 

Форма Акта об осуществлении технологического присоединения

8. Реквизиты сторон

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" –"Нижновэнерго" энергопринимающих устройств ООО "Специнвестпроект"

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 26.04.2024 № Н/ЦЦ-НН-10672066-ПТП и являются неотъемлемой частью Договора                                   об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств     ООО "Специнвестпроект", именуемого в дальнейшем Заявитель, к электрическим сетям филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго". 

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" при условии согласования АО "СО ЕЭС" и действительны в течение 6 (шести) лет. 

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя (ПС 110 кВ "Афонинская")                   с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, на 14,5 МВт (максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя после осуществления технологического присоединения увеличивается с 6,5 МВт до 21,0 МВт). 

с сохранением после выполнения настоящих технических условий 2 (двух) существующих точек присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

- Опора № 1 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "ГАСТ" на ПС "Афонинская" с максимальной мощностью 10,5 МВт; 

- Опора № 29 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ "Афонинская" с максимальной мощностью 10,5 МВт. 

Схема присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "Россети Центр                    и Приволжье" - "Нижновэнерго" обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения в объеме 21,0 МВт по второй категории надежности электроснабжения. 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий: 

1.1. На ПС 110кВ "Афонинская" замену двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ                и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии                    с требованиями к оснащению оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты                      и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101), и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты               и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

2.2. Оснастить основное (первичное) электротехническое оборудование                       на объектах электросетевого хозяйства, указанное в разделе 1 настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы)               по общей причине. 

Технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам ПА (кроме АЧР).

2.3. Выполнить учет электроэнергии в соответствии со следующими требованиями: 

ООО "Специнвестпроект" обеспечивает коммерческий учет потребляемой электроэнергии в РУ 10 кВ ПС 110 кВ "Афонинская" с применением четырех узлов учета 10 кВ в соответствии с требованиями Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 153-34.09.101-94), Правил устройства электроустановок (глава 1.5), Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (раздел Х), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (глава 2.11). Коммерческий учет электроэнергии организовать с применением статического (электронного) трансформаторного универсального счетчика класса точности 0,5S или выше, обеспечивающего хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета, позволяющего осуществлять контроль исчезновения напряжения во вторичных цепях трансформатора напряжения. Класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должен быть не ниже 0,5. Измерительные трансформаторы должны быть установлены в каждой фазе. Подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. Предусмотреть защиту средств учета от несанкционированного доступа. Счетчик электроэнергии и измерительные трансформаторы должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства средств измерений. 

Учет электрической энергии осуществляется средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения в количестве четырех штук. 

В случае если приборы учета расположены не на границе балансовой принадлежности, то объем потребления электрической энергии, определенный                          на основании показаний таких приборов учета, подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности (энергопринимающих устройств) до места установки приборов учета (ППРФ №442 от 04.05.2012г. п.148). 

Место установки счетчиков электроэнергии трехфазных косвенного включения и измерительных трансформаторов определить на этапе проектирования. 

2.4. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

3.1. Обеспечить подключение энергопринимающих устройств Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (в том числе АЧР, АОПО). Устройства противоаварийной автоматики должны соответствовать требованиям Приказа № 101.

3.2. В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg ? ? 0,5 в точках присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети. 

3.3. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения и тока в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя:

3.3.1. Фильтрокомпенсирующие и симметрирующие (в пофазном исполнении) устройства, исключающие нарушение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго". 

3.3.2. Средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации                    в автоматизированную систему ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", показатели качества электроэнергии должны передаваться в объеме в соответствии                      с ГОСТ 32144-2013. 

3.4. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013              в сети 35 кВ и выше. 

3.5. В случае если для обеспечения электроснабжения электроприемников аварийной и (или) технологической брони требуется наличие автономных резервных источников питания, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к особой категории первой категории надежности электроснабжения, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания с автоматикой, обеспечивающей автоматический запуск и исключающей подачу напряжения от автономных источников                в сеть энергосистемы. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

4.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.1, с учетом требований раздела 2 и 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

4.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"                  и АО "СО ЕЭС" (Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ) с корректировкой утвержденных технических условий.

4.3. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" и                    АО "СО ЕЭС" (Филиала АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ). После проведения проверки получить от филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" акт                           о выполнении настоящих технических условий, согласованный АО "СО ЕЭС" (Филиалом АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ).

4.4. Соблюдение настоящих технических условий носит длящийся характер и является обязательным для Заявителя и Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В случае осуществления Заявителем в дальнейшем строительства объекта по производству электрической энергии, не имеющего точек присоединения непосредственно к объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", но при этом опосредованно через объекты электросетевого хозяйства иных лиц (в том числе электрические сети Заявителя) присоединяемого                      к электрическим сетям филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", Заявителем должны быть получены отдельные технические условия на технологическое присоединение такого объекта по производству электрической энергии к электрическим сетям филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

            Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)                50000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

            Исполнительный лист выдать в установленном процессуальным законодательством порядке. 

            Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его                  в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                       Ю.С. Паутова