АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-8804/2018

г. Нижний Новгород                         18 марта 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр – 9-125),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску акционерного общества «Атомстройэкспорт»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику: открытому акционерному обществу «Строительный трест №8»                       (УНП 200002603)

о взыскании 1 573 690 руб. 70 коп., 

при участии представителей сторон:

от истца: не явились,

от ответчика: не явились,  

установил:

акционерное общество «Атомстройэкспорт» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Строительный трест №8» о взыскании 800 руб. штрафа, в том числе 300 000 руб. – по договору от 10.06.2015 №7759/150365, 100 000 руб. – по договору от 17.11.2015 №7759/151068, 400 000 руб. – по договору 15.02.2016 №7759/160075, 773 690 руб. 70 коп. пени, в том числе 89 063 руб. 37 коп. – по договору от 10.06.2015 №7759/150365,684 627 руб. 33 коп. – по договору от 17.11.2015 №7759/151068.

Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310, 330, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением обязанности по оплате выполненных работ.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в суд не обеспечили. От ответчика письменный отзыв с документальным обоснованием своей позиции по делу не поступил.

Спор в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрен в отсутствие надлежащим образом извещенных сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из исковых материалов, между акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (генподрядчик) и открытым акционерным обществом «Строительный трест №6» (субподрядчик) заключен договоры на выполнение строительно-монтажных работ от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068, от 15.02.2016 №7759/160075.

По условиям пункта 2.1 договора от 10.06.2015 №7759/150365 субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить, а генподрядчик принять и оплатить строительно-монтажные работы по объекту: «Белорусская АЭС. Энергоблок №1. Основной период строительства. Строительно-монтажные работы. Убежище на 1200 укрываемых (01 UZM). Оборудование в здании. Технологическое оборудование в здании (технологическая часть)» с последующей передачей результата работ генподрядчику.

По условиям пункта 2.1 договора от 17.11.2015 №7759/151068 субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить, а генподрядчик принять и оплатить строительно-монтажные работы по объекту: «Белорусская АЭС. Энергоблок №1,2. Основной период строительства. Строительно-монтажные работы. Мастерские зоны свободного доступа с материальным складом (00UST). Грузоподъемные и транспортные устройства, станочное и лабораторное оборудование (технологическая часть)» с последующей передачей результат работ генподрядчику.

По условиям пункта 2.1 договора от 15.02.2016 №7759/160075 субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить, а генподрядчик принять и оплатить строительно-монтажные работы по объекту: «Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Основной период строительства. Строительно-монтажные работы. Брызгальные бассейны (21URR, 22URR), бл.2. Технологическое оборудование брызгательного бассейна 21URR. Технологическое оборудование брызгательного бассейна 22URR. Трубопроводы брызгательного бассейна 21URR. Трубопроводы брызгательного бассейна 22URR. Камеры переключений (21URS, 22URS), бл.2. Технологическое оборудование камеры переключений 21URS. Технологическое оборудование камеры переключений 22URS. Трубопроводы камеры переключений 21URS. Трубопроводы камеры переключений 22URS. Насосная станция ответственных потребителей (21UQC, 22UQC) бл.2. Технологическое оборудование. Трубопроводы насосной станции ответственных потребителей 21UQC. Трубопроводы насосной станции ответственных потребителей 22UQC (технологическая часть) с последующей передачей результата работ генподрядчику.

В силу подпункта 5.3.4 пункта 5 договора № 150365 субподрядчик обязан выполнять работы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (Приложение № 4).

В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 договора № 150365 субподрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств.

Согласно подпункту 14.4 пункта 14 договора № 150365 в случае, если обеспечение исполнения договора не было предоставлено субподрядчиком до заключения договора, субподрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Субподрядчик представляет обеспечение исполнения договора № 150365 в размере 5% (пять процентов) от цены Договора № 150365 в одной из форм, предусмотренных подпунктом 14.1 пункта 14 договора № 150365 (безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, перечисление денежных средств генподрядчику (обеспечительный взнос)), за исключением случаев предоставления гарантийного письма органа исполнительной власти, предусмотренного подпунктом 14.1.6 пункта 14 Договора № 150365.

Согласно подпункту 3.1 пункта 3 договора № 150365 цена составляет 2 108 008,81 российских рублей, размер обеспечения исполнения договора № 150365 - 105 400,44 российских рублей.

В силу подпункта 5.3.4 договора № 151068 субподрядчик обязан выполнятьРаботы в определенные договором сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (приложение № 4 к договору).

Графиком производства работ (Приложение № 4 к договору) установлен конечный срок выполнения работ «ОСР№3-55. Мастерские зоны свободного доступа. Материальный склад (00UST) грузоподъемные и транспортные устройства, статочное и лабораторное оборудование» - 30.06.2016.

В соответствии с подпунктом 14.1 договора № 151068 субподрядчикобязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору, кромегарантийных обязательств.

Согласно подпункту 14.4 пункта 14 договора № 151068 в случае, если обеспечение исполнения договора не было предоставлено субподрядчиком до заключения договора, субподрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Субподрядчик представляет обеспечение исполнения договора № 151068 в размере 5% (пять процентов) от цены договора № 151068 в одной из форм, предусмотренных п. 14.1 пункта 14 договора № 151068 (безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, перечисление денежных средств генподрядчику (обеспечительный взнос)).

Цена договора № 151068 составляет 19 989 119,08 российских рублей, размер обеспечения исполнения договора № 151068 составляет 999 455,95 российских рублей.

В силу подпункта 5.3.4 договора № 160075 субподрядчик обязан выполнять работы в определенные договором № 160075 сроки в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (приложение № 4 к договору № 160075).

Согласно пункту 12.2.1 пункта 12 договоров при нарушении субподрядчиком конечного срока выполнения работ, определенного графиком производства работ (Приложение № 4 к договору), субподрядчик выплачивает генподрядчику штраф в размере 100 000 российских рублей.

В силу подпункту 12.2.8 пункта 12 договоров при нарушениисубподрядчиком срока предоставления генподрядчику обеспечения (в том числезамены) обеспечения исполнения договора, субподрядчик выплачиваетгенподрядчику пеню в размере 0,1% от суммы, на которую должно быть предоставлено соответствующее обеспечение за каждыйдень просрочки исполнения данного обязательства.

Ответчик в установленные договорами сроки работы не выполнил, обеспечение исполнения обязательств по договорам от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068 не представил. В связи с этим, истец начислил ответчику штраф за нарушение сроков выполнения работ по договорам от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068, от 15.02.2016 №7759/160075 в размере 800 000 руб. и пени за нарушение сроков предоставления обеспечения договоров от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068 в размере 773 690 руб. 70 коп. и направил в его адрес претензию от 23.03.2017 №007/34-01/12/554.

Поскольку до настоящего времени пени и штраф не погашены в полном объеме, акционерное общество «Атомстройэкспорт» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, суд считает требования истца подлежащим удовлетворению в силу следующего.

На основании статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку доказательств своевременного окончания работ по договорам от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068, от 15.02.2016 №7759/160075 не представлено, нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения по договорам от 10.06.2015 №7759/150365, от 17.11.2015 №7759/151068 ответчиком не оспорено и подтверждено материалами дела, ответственность за данные нарушения предусмотрена положениями условиями договоров, требования истца о взыскании штрафа в размере 800 000 руб. и пени в сумме 773 690 руб. 70 коп. являются обоснованным и подлежат удовлетворению. Произведенный истцом расчет неустойки судом проверен и принимается.

Расходы по государственной пошлине составляют 28 737 руб., которые в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с открытого акционерного общества «Строительный трест №8»                       (УНП 200002603) в пользу акционерного общества «Атомстройэкспорт»                               (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 800 000 руб. штрафа, 773 690 руб. 70 коп. пени, 28 737 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья                     Н.В. Тряскова