АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-43045/2019

14 октября 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.А. Мезриной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью  "ТСК ВЕСТ" (ИНН 6658494800, ОГРН 1169658134931)

к обществу с ограниченной ответственностью  "ССК" (ИНН 6679084812, ОГРН 1156658108529)

о взыскании 761 985 руб. 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца представитель ФИО2 представитель по доверенности от 21.01.2019

от ответчика  представитель не явился. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью  "Северская Строительная Компания" с требованием о взыскании 743605,80 руб.- задолженность по договору субподряда № 26-17 от 12.09.2017, 18379,20 руб.- пени за период с 01.03.2019 по 23.07.2019

Определением суда от 31.07.2019 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

02.09.2019 от истца поступило ходатайство о проведении предварительного судебного заседания без участия представителя. Возражает против перехода в основное судебное заседание. 

В судебном заседании- 03.09.2019 ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, просит в иске отказать, поскольку произведена добровольная оплата задолженности, а также представил контррасчет неустойки. 

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. Определением от 03 сентября 2019 назначено судебное заседание. 

08.10.2019 от ответчика поступило заявление, просит провести судебное заседание в отсутствие представителя, поддерживает доводы изложенные в отзыве.

В судебном заседании – 08.10.2019 истцом заявлено ходатайство об уменьшении размера исковых в части суммы долга до 0 руб. 00 коп., а также об уменьшении суммы неустойки до 17561, 90 руб. в связи с уточнением расчета. Ходатайство удовлетворено судом в порядке ст. 49 АПК РФ. Требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, судом не рассматривается, поскольку изначально данные требования истцом не были заявлены, в ходе судебного заседания ходатайство было отозвано.

Истец настаивает на удовлетворении заявленных исковых требований, ответчик явку представителя не обеспечил (ст. 156 АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Как следует из материалов дела, между ООО «ТСК «ВЕСТ» (Субподрядчик) и ООО «Северская строительная компания» (Генподрядчик) был заключен договор субподряда № 26-17 от 12.09.2017, согласно которому Субподрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами, согласованный с генподрядчиком объем строительных работ (монолитный  ж/б фундамент) на объекте ПАО «Северный трубный завод» Комплексная реконструкция трубопрокатного производства с установкой непрерывного стана в ТНЦ -1. Термоотдел № 3 Фундамент печи для отпуска труб проект У-74034-КЖ3.2, в соответствие с проектной документацией, передать результат выполненных работ Генподрядчику, принять участие во вводе объекта в эксплуатацию, своевременно устранять дефекты, выполненные в процессе работ, а также в период ввода Объекта в эксплуатацию и в период гарантийной эксплуатации /п. 1.1 Договора/. 

На основании п. 1.2. Договора, Работы выполняются  Субподрядчиком с использованием материалов,  строительных механизмов и техники, предоставляемых Генподрядчиком. Опалубка, малая механизация,  инструмент предоставляет Субподрядчик.

В соответствии с п. 1.3. Договора, Генподрядчик обязуется передать проектную документацию, необходимую для производства работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы.

Согласно п. 1.4. Договора,Субподрядчик вправе передать взятые на себя обязательства по настоящему Договору третьему лицу при условии получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в следующие сроки: 

-начало выполнения работ - октябрь 2017;

- сроки выполнения этапов определяются Графиком производства работ, дополнительными соглашениями на отдельные этапы выполнения работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора; 

- срок завершения всех работ – декабрь 2017.

Этапы выполнения работ определяются Графиком производства работ /п. 2.1. Договора/. 

Стоимость работ и порядок расчетов предусмотрены в разделе 3 настоящего договора. 

В соответствии с ведомостью договорной цены по строительным работам к договору, стоимость работ составляет 1110508,47 руб. в т.ч. НДС 18 % 

Кроме того между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2017, согласно которому Генподрядчик оплачивает стоимость услуг «Субподрядчика» в размере 90% от их стоимости согласно ежемесячных справок о стоимости выполненных работ и затрат  формы КС-2 и КС-3. Полная оплата производится после подписания «Генподрядчиком» Акта сдачи- приемки работ и исправления замечаний данные Ростехнадзором. /п.1 Доп. Соглашения/. 

В последующем,  между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2 от 09.01.2018, согласно которому стороны пришли к соглашению об исключении из условий Договора п. 3.8 /п.1 Доп. Соглашения/.

Кроме того, на основании п.2 Доп. Соглашения, сроки выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению:

-Начало - январь 2018

-Окончание – март 2018 

В соответствии с ведомостью договорной цены по строительным работам к дополнительному соглашению № 2, стоимость работ составляет 573260,34 руб., в т.ч. НДС 18%.

Проанализировав условия представленного договора, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе данный договор является договором строительного подряда, соответственно правоотношения сторон по указанному договору регулируются нормами параграфов 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу п. 1 ст. 711 и п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ. 

В подтверждение факта выполнения работ, истцом представлены следующие документы: 

- акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.10.2017 на сумму 285700,00 руб.,-справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.10.2017 на сумму 285700,00 руб. 

- акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.11.2017 на сумму 4671700,00 руб., -справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2017 на сумму 4671700,00 руб. 

- акт о приемке выполненных работ № 3 от 31.12.2017 на сумму 1134640,00 руб., -справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.12.2017 на сумму 1134640,00 руб. 

- акт о приемке выполненных работ № 4 от 31.01.2018 на сумму 2196869,60 руб., -справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 31.01.2018 на сумму 2196869,60 руб. 

- акт о приемке выполненных работ № 5 от 28.02.2018 на сумму 620586,03 руб.,-справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 28.02.2018 на сумму 620586,03 руб.

- акт о приемке выполненных работ № 6 от 30.04.2018 на сумму 1022628,00 руб. ,-справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.04.2018 на сумму 1022628,00 руб. 

- акт о приемке выполненных работ № 6 от 30.06.2018 на сумму 500000,00 руб., -справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.06.2018 на сумму 500000,00 руб. 

Документы подписаны обеими сторонами без  каких- либо замечаний.   

Кроме того, между сторонами был подписан акт сверки взаимных расчетов за период: 01.04.2019 – 13.06.2019, согласно которому у ответчика имеется задолженность в размере 743605,80 руб.

Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, на ответчике лежит обязанность по оплате выполненных и принятых работ (ст. 702, ст. 711 ГК РФ). 

Ответчиком была произведена оплата основного долга до принятии  искового заявления  судом  (принято 31.07.2019),  что подтверждается платежными поручениями:

- № 1853 от 12.07.2019

- № 1990 от 26.07.2019. Следовательно, обязательство по оплате исполнено (ст. 408 ГК РФ). 

После получения отзыва ответчика, требования истцом были скорректированы.

Поскольку ответчиком допущена просрочка в оплате выполненных работ, истец заявил требование  о взыскании с ответчика пени за период с 01.03.2019 по 23.07.2019 в размере 17561,90 руб. (с учетом уточнения исковых требований).    

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства.

Согласно п. 8.2.1. договора, за нарушение срока оплаты работ предусмотрена пеня в размере 0,01 % от суммы просрочки за каждый день нарушения срока оплаты. 

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен и признан верным, в том числе, по периоду начисления. Истец уточнил требования, в том числе с учетом возражений ответчика по расчету.

С учетом изложенного, исковые требования о взыскании пени подлежат удовлетворению в сумме 17561,90 руб.

Государственная пошлина в сумме 2000,00 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В остальной части госпошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Исковые требования удовлетворить

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Северская Строительная Компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТСК ВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 17561,90 руб.- пени за период с 01.03.2019 по 23.07.2019, а также 2000,00 руб. - возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТСК ВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 17000,00 руб.  оплаченную по платежному поручению № 118 от 28.06.2019. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

СудьяЕ.А. Мезрина