АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

05 августа 2025 года

Дело № А33-36653/2023

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 22 июля 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 05 августа 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Тимергалеевой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства лесного хозяйства Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за невыполнение работ по лесовосстановлению,

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца:

- КГБУ «Богучанское лесничество»,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Григорьевой К.А.,

установил:

министерство лесного хозяйства Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЛесСервис» (далее – ответчик) о взыскании неустойки за невыполнение работ по отчистке лесосеки от порубочных остатков, отсутствие столбов, не вывезенной древесины в установленный срок, предусмотренный договором аренды лесного участка для заготовки древесины от 25.12.2017 № 13/2-и, в размере 641 941 руб. 97 коп.

Определением от 19.12.2023 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечено КГБУ «Богучанское лесничество».

Определением от 22.02.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В предварительном судебном заседании 31.05.2024 суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнения исковых требований от 05.02.2024. Спор рассматривается с учетом произведенных изменений, согласно которым истец просит взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную пп. «в», «л», «м» п. 14 договора аренды лесного участка от 25.12.2017 №13/2-и:

- за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в размере 514 447 руб. 06 коп.;

- за оставление не вывезенной в установленный срок древесины в размере 74 285 руб. 52 коп.,

- за уничтожение или повреждение столбов в размере 70 977 руб. 20 коп.

В предварительном судебном заседании 31.05.2024 на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил: окончить подготовку дела к судебному разбирательству, завершить предварительное судебное заседание, продолжить рассмотрение настоящего дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, о чем вынесено протокольное определение.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между министерством лесного хозяйства Красноярского края (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛесСервис» (арендатор) заключен договор аренды лесного участка от 25.12.2017 № 13/2-и, согласно которому министерство передает ООО «ЛесСервис» лесной участок на общей площади 113789 га, во временное пользование сроком на 49 лет, для заготовки древесины, расположенный: Красноярский край, Богучанский район, Богучанское лесничество, Богучанское участковое лесничество в кварталах №№ 10-14,41,42,47-52,60-68,77 (за исключением части выдела 3), 78,79,81,82,91-98,102-108,110-126,131-148; Карабульское участковое лесничество в кварталах №№ 2-13,28-36,49-52,54-64,79-86,102-108,123-130,143-146,162, 179-180, с номером учетной записи в государственном лесном реестре 24-03711 -2017-1-309-1. 

В пункте 14 договора предусмотрена ответственность арендатора в виде уплаты неустойки, в  том числе: 

подпункт «в»: за невыполнение или несвоевременное работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода  за лесами, захламление по вине арендатора просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 52 метров  в виде неустойки в размере пятикратной стоимости затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов – согласно калькуляции арендодателя;

подпункт «л»: за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины в лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки, сооружения – в виде семикратной стоимости не вывезенной в срок древесины, определенной по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленной Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах; 

подпункт «м»: за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков в виде десятикратной стоимости их изготовления и установки. 

Заготовка древесины ООО «ЛесСервис» производилась на основании договора от 25.12.2017 № 13/2-и, в соответствии с лесными декларациями № б/н от 22.07.2021 в период с 28.07.2021 по 30.12.2021, № б/н от 30.06.2021 в период с 07.07.2021 по 30.12.2021.

1) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 62, в выделах №№ 13,14, лесосека № 9 Богучанского участкового лесничества Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно: размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,62 га (не выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 2,33 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 5,95 га. Также по результатам осмотра выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 20 куб. м. породы лиственницы, длиной 3,5 м, в объеме 15 куб. м. породы сосна, длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,62 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 3,62 = 71011 руб. 36 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 3,62 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 20*44,28*7= 6199 руб. 20 коп. Где, 20 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -15*55,44*7= 5821 руб. 20 коп. Где, 15 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 12020 руб. 40 коп.

2) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 11, в выделе № 16, лесосека № 4 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно:  размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,17 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 5 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3,5 м, в объеме 30 куб. м. породы сосна- длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,17 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 1,17 = 22951 руб. 18 коп. где, 3923,28 – размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 1,17 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -30*44,28*7= 9298 руб. 80 коп. где, 30 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -5*55,44*7= 1940 руб. 40 коп. Где, 5 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 11239 руб. 20 коп. отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

3) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 63, в выделе № 14, лесосека № 7 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,92 га (не выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по линии отвода 4-5-6 лесосеки на площади 0,3 га; общая площадь выполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 2,22 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 12 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3,5 м. в объеме 8 куб. м. породы сосна- длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,22 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб. Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,22 = 43548 руб. 40 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,22 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -12*44,28*7= 3719 руб. 52 коп. Где, 12 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -8* 55,44*7= 3104 руб. 64 коп. Где, 8 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 6824 руб. 16 коп.

4) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 63, в выделе № 8, лесосека № 10 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,85 га. Также осмотром выявлен факт не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 75 куб. м. породы осина - 19 куб. м, сосна - 56 куб. м, - длиной 6 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,85 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,85 = 16 673 руб. 94 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,85 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна - 56*55,44*7=21732 руб. 48 коп. Где, 56 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -19*5,58*7= 742 руб. 14 коп. Где, 19 - объем древесины породы осина, 5,58 - ставка платы, установленная древесины, в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 22 474 руб. 62 коп.

5) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 15,17, лесосека № 6 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,52 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 50-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,16 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 0,68 га. Также осмотром выявлен факт не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 6 куб. м. породы лиственницы - длиной 3 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,68 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,68 = 13 339 руб. 15 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,68 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 6*44,28*7= 1859 руб. 76 коп. Где, 6 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 1859 руб. 76 коп.

6) В  ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделе № 15, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,62 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,28 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 0,9 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 10 куб. м. породы лиственница - 7 куб. м, сосна - 3 куб. м, - длиной 4 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,9 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 0,9 = 17 654 руб. 76 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,9 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна -3*55,44*7= 1164 руб. 24 коп. Где, 3 - объем древесины породы сосна, 55,44 древесины, - ставка платы, установленная в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода лиственница – 7*44,28*7=2169 руб. 72 коп. Где, 7 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3333 руб. 96 коп.

7) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 10,11, лесосека № 4 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,0 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,42 г; общая площадь неочистки мест рубок составляет 2,42 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 15 куб. м. породы лиственницы 5куб. м. - длиной 4 м, 10 куб. м. породы береза - длиной 3 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,42 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,42 = 56 102 руб. 90 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,86 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 6*44,28*7= 1859 руб. 76 коп. Где, 6 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода береза -6*27,72*7= 1164 руб. 24 коп. Где, 6 - объем древесины породы береза, 27,72 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3024 руб. 00 коп.

8) В  ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 15,17, лесосека № 7 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,5 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,86 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 2,36 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в общем объеме 20 куб. м. из них: породы лиственницы, в объеме 14 куб. м. -длиной 4 м, в объеме 6 куб. м. породы сосна - длиной 4 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,36 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 4859,15 х 5 x 2,36 = 57 337 руб. 97 коп. где, 4859,15 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,86 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница – 14*44,28*7= 4339 руб. 14 коп. Где, 14 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода сосна 6*55,44*7=2328 руб. 48 коп. Где, 6 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 6 667 руб. 62 коп.

9) В  ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 41, в выделе № 16, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,95 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,95 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,95 = 18 635 руб. 58 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,95 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

10) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 41, в выделе № 16, лесосека № 6 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,44 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,44 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,44 = 8 631 руб. 21 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,44 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

11) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 13, в выделе № 24, лесосека № 2 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,92 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в общем объеме 20 куб. м. из них: 5 куб. м. породы лиственницы, длиной 3,5 м, в объеме 15 куб. м. породы осина-длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,92 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,92 = 18 047 руб. 08 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,92 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница – 5*44,28*7= 1549 руб. 80 коп. Где, 5 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода сосна -15*5,58*7= 585 руб. 90 коп. Где, 15 - объем древесины породы сосна, 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 2 135 руб. 70 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

12) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 64, в выделах №№ 4,7,8, лесосека № 1 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,7 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,8 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 4,5 га. Также осмотром выявлен факт отсутствия лесосечного столба.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 4,5 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 4,5 = 88 237 руб. 80 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 4,5 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

13) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 47, в выделе № 11, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,1 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной  древесины в общем объеме 45 куб. м. из них: 5 куб. м. породы сосна, длиной 6 м, в объеме 40 куб. м. породы осина - длиной 6 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,1 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 4859,15 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 4859,15х 5 x 1,1 = 26 725 руб. 32 коп. где, 4859,15 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 1,1 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна -15*55,44*7= 1940 руб. 40 коп. Где, 5 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -40*5,58*7= 1562 руб. 40 коп. Где, 40 - объем древесины породы осина, 5,58 древесины, - ставка платы, установленная в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3 502 руб. 80 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

14) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 13, в выделе № 24, лесосека № 3 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,83 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной  древесины в общем объеме 10 куб. м. из них: 3 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3 м, в объеме 7 куб. м. породы осина - длиной 3 м.

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,83 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,83 = 55 514 руб. 41 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,83 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -3*44,28*7= 929 руб. 88 коп. Где, 3 - объем древесины породы лиственница, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -7*5,58*7= 273 руб. 42 коп. Где, 7 - объем древесины породы осина, 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 1 203 руб. 30 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

Из материалов дела следует, что по результатам осмотра лесосек составлены следующие документы:

- акты осмотров лесосек от 17.05.2022 № б/н, 18.05.2022 № б/н, 20.05.2022 № б/н, 19.05.2022 б/н, 26.05.2022 № б/н, 27.05.2022 № б/н, 30.05.2022 № б/н, 31.05.2022 № б/н;

- сообщения о результатах осмотров лесосек от 18.05.2022 № б/н, 20.05.2022 № б/н, 14.06.2022 № б/н;

- схемы (абрисы);

- расчеты ущерба.

Схемами (абрисами) зафиксированы результаты замеров, произведенных на местности, направление линий замеров, в масштабе отмечена площадь захламления лесосек.

В рамках досудебного урегулирования спора арендатору направлены претензии от 13.08.2023 № 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 о добровольной оплате неустоек на общую сумму 641 941 руб. 97 коп. 

Требования претензии ответчиком не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В отзыве от 31.01.2024 и в дополнениях от 13.08.2024 ответчик со ссылкой на повторные акты повторного осмотра лесосек (копии актов от 22.09.2023, от 09.11.2023, от 11.06.2024 представлены ответчиком в материалы дела) указал на устранение ранее выявленных нарушений требований лесного законодательства, в связи с чем, ссылается на отсутствие оснований для взыскания неустойки в размере 314 336 руб. 64 коп.

Согласно уточненным исковым требованиям (заявление от 05.02.2024) истец просит взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную пп. «в», «л», «м» п. 14 договора аренды лесного участка от 25.12.2017 №13/2-и:

- за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в размере 514 447 руб. 06 коп.;

- за оставление не вывезенной в установленный срок древесины в размере 74 285 руб. 52 коп.,

- за уничтожение или повреждение столбов в размере 70 977 руб. 20 коп.

В дополнительных пояснениях от 09.02.2024 истец указал на отсутствие оснований для снижения неустойки, поскольку действия по устранению нарушений требований лесного законодательства должны были быть произведены ответчиком в период действия лесных деклараций.

21.03.2023 истцом в материалы дела представлена справка от 20.03.2025 № 58, из которой следует, что по состоянию на 20.03.2025 обязательства ООО «ЛесСервис» согласно договору аренды № 13/2-и от 25.12.20217 в части устранения выявленных нарушений требований лесного законодательства исполнены на следующих лесосеках Богучанского участкового лесничества: квартал 62, выдел 13,14, лесосека 9; квартал 63, выдел 14, лесосека 7; квартал 63, выдел 8, лесосека 10; квартал 68, выдел 15,17, лесосека 6; квартал 68, выдел 15, лесосека 5; квартал 68, выдел 10,11, лесосека 4; квартал 68, выдел 15,17, лесосека 7; квартал 64, выдел 4,7,8 лесосека 1; квартал 47, выдел 11, лесосека 5. На повторный осмотр лесосек, с целью фиксации устранения нарушений в квартале 11, выдел 16, лесосека 4, квартале 41, выдел 16, лесосека 5, квартале 41, выдел 16, лесосека 6, квартале 13, выдел 24, лесосека 2, квартале 13, выдел 24, лесосека 3 Богучанского участкового лесничества заявок от ООО «ЛесСервис» не поступало, осмотр не производился; а также копии актов осмотра от 22.09.2023, от 09.11.2023, от 11.06.2024, 03.09.2024, 12.09.2024.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано Министерство лесного хозяйства Красноярского края, действующее на основании Положения.

Постановлением Правительства края от 26.07.2016 № 374-п утверждено Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края (далее - Положение о Министерстве).

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края, который на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет надзор (контроль) в области лесных отношений. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2023 № 1103-п внесены изменения в Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в частности, наименование Министерства изменено на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. 

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования Министерства лесного хозяйства Красноярского края на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее также – Министерство).

Таким образом, Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края является надлежащим истцом по делу.

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации изложены принципы лесного законодательства, содержание которых охватывает отношения по управлению, сохранению, воспроизводству, охране, защите, использованию лесов, в том числе по обеспечению многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.5 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии проектирования и последующего осуществления мероприятий по воспроизводству лесов на указанных лесных участках.

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) природный объект определяется как естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; естественная экологическая система - это объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.

В силу статьи 4 Закона 7-ФЗ объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

В соответствии со статьей 11 Закона № 7-ФЗ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом иными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств, одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В качестве основания возникновения обязательств статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации называет договоры и сделки.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов; обеспечение охраны и защиты лесов.

Согласно статье 2 Лесного кодекса Российской Федерации лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 Лесного кодекса Российской Федерации порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами, правилами лесовостановления.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 12 «Правил заготовки древесины» от 01.12.2020 № 993, не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки от порубочных остатков (остатков древесины, образующихся на лесосеке при валке и трелевке (транспортировке) деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающих вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост).

В соответствии с. пунктом 20 Правил санитарной безопасности в лесах не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации.

Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации определены правила санитарной безопасности в лесах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с пунктом 26 Правил при проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

Согласно с подпунктом «б» пункта 27 Правил пожарной безопасности в лесах при проведении очистки мест рубок осуществляется укладка порубочных остатков длиной не более 2 метров.

Установленные правила осуществления лесопользования предусматривают обязанность по очистке мест рубок от порубочных остатков способами, предписанными технологической картой, разработанными с учетом снижения негативного воздействия на природный объект в ходе лесозаготовительной деятельности. Несоблюдение предписанного способа очистки мест рубок способствует возникновению факторов, негативно влияющих на санитарную и пожарную безопасность лесов.

Заготовка древесины ООО «ЛесСервис» производилась на основании договора от 25.12.2017 № 13/2-и, в соответствии с лесными декларациями № б/н от 22.07.2021 в период с 28.07.2021 по 30.12.2021, № б/н от 30.06.2021 в период с 07.07.2021 по 30.12.2021.

1) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 62, в выделах №№ 13,14, лесосека № 9 Богучанского участкового лесничества Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно: размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,62 га (не выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 2,33 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 5,95 га. Также по результатам осмотра выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 20 куб. м. породы лиственницы, длиной 3,5 м, в объеме 15 куб. м. породы сосна, длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,62 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 3,62 = 71011 руб. 36 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 3,62 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 20*44,28*7= 6199 руб. 20 коп. Где, 20 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -15*55,44*7= 5821 руб. 20 коп. Где, 15 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 12020 руб. 40 коп.

2) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 11, в выделе № 16, лесосека № 4 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно:  размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,17 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 5 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3,5 м, в объеме 30 куб. м. породы сосна- длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,17 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 1,17 = 22951 руб. 18 коп. где, 3923,28 – размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 1,17 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -30*44,28*7= 9298 руб. 80 коп. где, 30 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -5*55,44*7= 1940 руб. 40 коп. Где, 5 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 11239 руб. 20 коп. отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

3) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 63, в выделе № 14, лесосека № 7 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,92 га (не выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по линии отвода 4-5-6 лесосеки на площади 0,3 га; общая площадь выполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 2,22 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 12 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3,5 м. в объеме 8 куб. м. породы сосна- длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,22 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб. Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,22 = 43548 руб. 40 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,22 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -12*44,28*7= 3719 руб. 52 коп. Где, 12 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода сосна -8* 55,44*7= 3104 руб. 64 коп. Где, 8 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 6824 руб. 16 коп.

4) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 63, в выделе № 8, лесосека № 10 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,85 га. Также осмотром выявлен факт не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 75 куб. м. породы осина - 19 куб. м, сосна - 56 куб. м, - длиной 6 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,85 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,85 = 16 673 руб. 94 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,85 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна - 56*55,44*7=21732 руб. 48 коп. Где, 56 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -19*5,58*7= 742 руб. 14 коп. Где, 19 - объем древесины породы осина, 5,58 - ставка платы, установленная древесины, в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 22 474 руб. 62 коп.

5) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 15,17, лесосека № 6 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,52 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 50-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,16 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 0,68 га. Также осмотром выявлен факт не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 6 куб. м. породы лиственницы - длиной 3 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,68 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,68 = 13 339 руб. 15 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,68 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 6*44,28*7= 1859 руб. 76 коп. Где, 6 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 1859 руб. 76 коп.

6) В  ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделе № 15, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,62 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,28 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 0,9 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 10 куб. м. породы лиственница - 7 куб. м, сосна - 3 куб. м, - длиной 4 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,9 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 0,9 = 17 654 руб. 76 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,9 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна -3*55,44*7= 1164 руб. 24 коп. Где, 3 - объем древесины породы сосна, 55,44 древесины, - ставка платы, установленная в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода лиственница – 7*44,28*7=2169 руб. 72 коп. Где, 7 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3333 руб. 96 коп.

7) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 10,11, лесосека № 4 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,0 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,42 г; общая площадь неочистки мест рубок составляет 2,42 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в объеме 15 куб. м. породы лиственницы 5куб. м. - длиной 4 м, 10 куб. м. породы береза - длиной 3 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,42 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,42 = 56 102 руб. 90 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,86 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница - 6*44,28*7= 1859 руб. 76 коп. Где, 6 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода береза -6*27,72*7= 1164 руб. 24 коп. Где, 6 - объем древесины породы береза, 27,72 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3024 руб. 00 коп.

8) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 68, в выделах № 15,17, лесосека № 7 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,5 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,86 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 2,36 га. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в общем объеме 20 куб. м. из них: породы лиственницы, в объеме 14 куб. м. -длиной 4 м, в объеме 6 куб. м. породы сосна - длиной 4 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,36 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 4859,15 х 5 x 2,36 = 57 337 руб. 97 коп. где, 4859,15 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,86 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница – 14*44,28*7= 4339 руб. 14 коп. Где, 14 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода сосна 6*55,44*7=2328 руб. 48 коп. Где, 6 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 6 667 руб. 62 коп.

9) В  ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 41, в выделе № 16, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,95 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,95 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее – РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,95 = 18 635 руб. 58 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,95 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

10) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 41, в выделе № 16, лесосека № 6 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,44 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,44 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,44 = 8 631 руб. 21 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,44 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп

11) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 13, в выделе № 24, лесосека № 2 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,92 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной древесины в общем объеме 20 куб. м. из них: 5 куб. м. породы лиственницы, длиной 3,5 м, в объеме 15 куб. м. породы осина-длиной 3,5 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 0,92 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 х 0,92 = 18 047 руб. 08 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 0,92 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница – 5*44,28*7= 1549 руб. 80 коп. Где, 5 - объем древесины породы лиственницы, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором. Порода сосна -15*5,58*7= 585 руб. 90 коп. Где, 15 - объем древесины породы сосна, 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором;

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 2 135 руб. 70 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

12) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 64, в выделах №№ 4,7,8, лесосека № 1 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 3,7 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и захламление 10-метровой полосы по всему периметру лесосеки на площади 0,8 га; общая площадь невыполнения работ по очистке мест рубок от порубочных остатков 4,5 га. Также осмотром выявлен факт отсутствия лесосечного столба.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 4,5 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 4,5 = 88 237 руб. 80 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 4,5 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

13) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 47, в выделе № 11, лесосека № 5 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,1 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной  древесины в общем объеме 45 куб. м. из них: 5 куб. м. породы сосна, длиной 6 м, в объеме 40 куб. м. породы осина - длиной 6 м.

Истцом начислена неустойка с учетом следующего:

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 1,1 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 4859,15 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 4859,15х 5 x 1,1 = 26 725 руб. 32 коп. где, 4859,15 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 1,1 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода сосна -15*55,44*7= 1940 руб. 40 коп. Где, 5 - объем древесины породы сосна, 55,44 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -40*5,58*7= 1562 руб. 40 коп. Где, 40 - объем древесины породы осина, 5,58 древесины, - ставка платы, установленная в отношении деловой средней 7 - кратность, установленная в соответствии с договором

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 3 502 руб. 80 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором. Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

14) В ходе натурного осмотра лесного участка в квартале № 13, в выделе № 24, лесосека № 3 Богучанское участковое лесничество Богучанского лесничества сотрудником КГБУ «Богучанское лесничество» выявлен факт нарушения лесного законодательства, а именно размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,83 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков) и отсутствие лесосечного столба. Также осмотром выявлен факт наличия не вывезенной в установленный срок заготовленной  древесины в общем объеме 10 куб. м. из них: 3 куб. м. породы лиственницы, - длиной 3 м, в объеме 7 куб. м. породы осина - длиной 3 м.

- размещение в лесах отходов производства и потребления на площади 2,83 га (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков):

В соответствии с расчётно-технологической картой (далее - РТК) КГБУ «Богучанское лесничество» на очистку мест рубок от порубочных остатков размер затрат на 1 га работ по очистке территории, подвергшейся захламлению, составляет 3923,28 руб.

Согласно условиям подпункта «в» пункта 14 договора аренды размер неустойки составляет 3923,28 х 5 x 2,83 = 55 514 руб. 41 коп. где, 3923,28 - размер затрат по РТК; 5 - кратность, установленная в соответствии с договором; 2,83 - площадь размещения в лесах отходов производства и потребления (невыполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков)

- не вывезенная в установленный срок древесина: Порода лиственница -3*44,28*7= 929 руб. 88 коп. Где, 3 - объем древесины породы лиственница, 44,28 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором; Порода осина -7*5,58*7= 273 руб. 42 коп. Где, 7 - объем древесины породы осина, 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором 5,58 - ставка платы, установленная в отношении деловой средней древесины, 7 - кратность, установленная в соответствии с договором

Таким образом, размер неустойки за оставление не вывезенной установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках составляет 1 203 руб. 30 коп. - отсутствие лесосечного столба: 10*1013,96-10 139 руб. 60 коп. где, 1013,96 - размер затрат по РТК; 10 - кратность, установленная в соответствии с договором.

Таким образом, размер неустойки составляет: 10 139 руб. 60 коп.

Общий размер начисленной истцом неустойки составляет 659 709 руб. 78 коп., в том числе:

- за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в размере 514 447 руб. 06 коп.;

- за оставление не вывезенной в установленный срок древесины в размере 74 285 руб. 52 коп.,

- за уничтожение или повреждение столбов в размере 70 977 руб. 20 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, арендодатель и арендатор несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

В пункте 14 договора предусмотрена ответственность арендатора в виде уплаты неустойки, в  том числе: 

подпункт «в»: за невыполнение или несвоевременное работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода  за лесами, захламление по вине арендатора просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 52 метров  в виде неустойки в размере пятикратной стоимости затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов – согласно калькуляции арендодателя;

подпункт «л»: за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины в лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки, сооружения – в виде семикратной стоимости не вывезенной в срок древесины, определенной по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленной Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах; 

подпункт «м»: за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков в виде десятикратной стоимости их изготовления и установки. 

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд установил, что расчет неустойки произведен верно, в соответствии с условиями договора, действующего законодательства и фактическими обстоятельствами дела.

Контррасчет неустойки ответчиком в материалы дела не представлен.

Допущенные ответчиком нарушения зафиксированы в следующих документах:

- акты осмотров лесосек от 17.05.2022 № б/н, 18.05.2022 № б/н, 20.05.2022 № б/н, 19.05.2022 б/н, 26.05.2022 № б/н, 27.05.2022 № б/н, 30.05.2022 № б/н, 31.05.2022 № б/н;

- сообщения о результатах осмотров лесосек от 18.05.2022 № б/н, 20.05.2022 № б/н, 14.06.2022 № б/н;

- схемы (абрисы);

- расчеты ущерба.

Схемами (абрисами) зафиксированы результаты замеров, произведенных на местности, направление линий замеров, в масштабе отмечена площадь захламления лесосек.

Доказательства отсутствия указанных нарушений ответчиком в материалы дела не представлены. Предоставленные истцом документы не оспорены.

Оспаривая исковые требования, ответчик указал на частичное устранение нарушений требований лесного законодательства.

Вместе с тем, учитывая предмет и основание иска (требование о взыскании неустойки), указанный довод не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку в рассматриваем случае судом подлежит разрешению вопрос о наличии оснований для привлечения ответчика к установленной договором ответственности в виде неустойки за уже допущенное нарушение в сфере лесного законодательства, при этом обязанность по выполнению требований лесного законодательства возложена на лесопользователя в силу действующего законодательства и условий договоров аренды.

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В то же время пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации из данного правила установлено исключение в отношении лиц, действующих в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Указанные лица несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из приведенного правового подхода к вопросу ответственности за нарушение обязательства субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, учитывая специфику арендных отношений лесных участков, исследовав и оценив по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, установив факт невыполнения ООО «ЛесСервис» в спорном периоде требований лесного законодательсвта, суд пришел к  выводу о наличии оснований для наступления договорной ответственности общества.

Сведения о том, что ответчиком были приняты все необходимые и зависящие от него меры в целях исполнения принятого на себя обязательства в деле отсутствуют. Поскольку ответчик доказательства надлежащего выполнения мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации не представил, требование о взыскании неустойки предъявлено истцом правомерно.

Доказательств оплаты суммы начисленной неустойки ответчиком не представлено.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

С учетом приведенных норм и результата рассмотрения спора с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 16 194 руб., исходя из размера исковых требований.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛесСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу министерства лесного хозяйства Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 659 709 руб. 78 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛесСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 16 194 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Тимергалеева