№ 5-4-141/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

15 марта 2017 г. г. Батайск Мировой судья судебного участка № 4 Батайского судебного района Ростовской области Третьяк С.В., находящийся по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, д.186, рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица - ООО «АрхПроектСтрой», расположенного по адресу: г. Батайск, ул. Станиславского, 1 «д» оф. 1,  

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «АрхПроектСтрой», осуществляющим строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. Бекентьева, 10 на основании договора генподряда от 17.02.2016 г. № 1-ГР/2016), направлено извещение № 2 о сроках завершения работ, подлежащих проверке при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства вх. № 38/08/1833 от 16.11.2016 г., в п. 7 которого указаны наименование: организация строительных работ, земляные работы, устройство свайного основания и дата завершения работ подлежащих проверке 09.12.2016 г. По состоянию на 19.01.2017 г.работы по устройству свайного основания не завершены, не выполнены работы по погружению свай в осях А\В-1/6, Б/В-6/8, А/В-8/13, документация по указанному объему работ для проверки не представлена, в связи с чем не представляется возможным провести проверку в соответствии с п.1 программы проверок.

 В нарушение ч.6 ст. 52 ГрК РФ, лицом, осуществляющим строительство ООО «АрхПроектСтрой» не выполнена обязанность по извещению представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, сведения (информация) о сроках завершения работ по устройству свайного основания представлены искаженном виде. Работы, по устройству свайного основания, указанные в извещении к указанной дате не выполнены. 

 В судебное заседание представитель юридического лица не явился, о времени и месте рассмотрения извещался надлежащим образом. Мировой судья находит возможным рассматривать дело в его отсутствие. 

Изучив материалы дела, мировой судья находит факт совершения ООО «АрхПроектСтрой», а также его вину в совершении вмененного административного правонарушения, установленными и подтвержденными совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств: - протоколом об административном правонарушении № 175004 от 19.01.2017 г., - Уставом ООО «АрхПроектСтрой»; - выпиской из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, - копией распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 05.12.2016 г., - копией акта проверки юридического лица № 07.01.227/2017.1 от 19.01.2017 г., - копией извещения № 2 о сроках завершения работ, подлежащих проверкепри строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.

Действия ООО «АрхПроектСтрой» мировой судья квалифицирует по ст. 19.7. КоАП РФ - непредставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.

Решая вопрос о размере наказания, судья принимает во внимание характер совершенного правонарушения, данные о юридическом лице, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, отсутствие смягчающих административную ответственность обстоятельств, и полагает назначить наказание в виде предупреждения. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»,

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «АрхПроектСтрой» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения. 

 Постановление может быть обжаловано в Батайский городской суд Ростовской области через мирового судью в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.

 Мировой судья Третьяк С.В.