Вводная и резолютивная часть оглашены 10.09.2025

Дело № 5-490/2025 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 по делу об административном правонарушении

ул. Комсомольская, д. 3, с. Некрасовка

Хабаровского района Хабаровского края 15 сентября 2025 года

Мировой судья судебного участка № 66 судебного района «Хабаровский район Хабаровского края» Бунина Н.Ю., с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО3, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица - директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>) ФИО5 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>

УСТАНОВИЛ:

29.08.2024, 02.11.2024 ФИО3 по адресу: 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, допустил нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в перечислении МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> за счет субсидий на иные цели ИП ФИО6 за фактически невыполненные работы по акту от 01.08.2024 № 2 по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР> 54 690,07 руб., по акту от 01.08.2024 

<

НОМЕР> по Контракту от 01.07.2024 

<

НОМЕР> 328,94 руб. Общая сумма нецелевого использования средств бюджета Хабаровского муниципального района составила 240 019,01 руб., чем нарушил ч. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При рассмотрении административного дела ФИО3 вину в совершении правонарушения признал частично, пояснил, что на момент проверки действительно имелись указанные нарушения. Первоначальный проект на ремонт спортивного зала в 2022 году у них был на 7 000 000 рублей, однако школа в данный проект не вошла, Министерство в 2024 году выделило 3 000 000 рублей, был проведен аукцион, определен подрядчик (ИП ФИО6), который снизил сумму затрат на 1 000 000 рублей, однако в процессе работы он стал предъявлять претензии, что денежных средств не хватает. Он (ФИО3) не обратил внимание, что в проекте указаны противопожарные двери в количестве 5 штук, затем они же указаны повторно в следующем проекте, это было обнаружено при проведении ревизии. Он не имеет строительного образования, согласно контракту, для приема выполненных работ должна быть создана комиссия, он обращался в управление образования, однако ему сказали принимать работы самостоятельно, можно включить ФИО7, заместителя начальника управления образования. Последняя сказала подписывать акты, потом будем разбираться. Он подписал акты, больше никто подписи не ставил. К ФИО6 он также обращался с требованием устранить недостатки, однако он отказался что-либо делать, сказав, что акты выполненных работ подписаны. В финансовом управлении ему сказали возместить в бюджет порядка 240 000 рублей, однако школа деньги не зарабатывает, ему придется уплатить их из собственных средств. Поскольку он не имеет сейчас таких денег в наличии, попросил отсрочку для уплаты, их необходимо уплатить до конца 2025 года. Работы в спортивном зале были выполнены в полном объеме, с подрядчиком оговорены, он не внес изменения в проект. Радиаторы отопления были закрыты старой фанерой, поскольку новая фанера не подходит из-за резкого запаха. Окраска, грунтовка также относятся к установке щитов, закрывающих радиаторы отопления. В раздевалках стоят 3 двери деревянные, вместо указанных из ПВХ, т.к. в этом ряду все двери деревянные, чтобы были все одного цвета, то есть фактически двери стоят, однако в проект также не внесены изменения. Различия в квадратных метрах при установке дверей не были учтены, поскольку он не знал, что двери необходимо считать в квадратных метрах, считает их по количеству (в штуках).

Выслушав ФИО3, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему. Согласно ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) бюджетная система Российской Федерации основана на принципах эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств. В ст. 162 БК РФ определено, что получатель бюджетных средств обеспечивает целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. В силу пункта 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.? Частью 1 ст. 306.4 БК РФ установлено, что нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств. Согласно п. 1 ст. 78.1 БК РФ в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим типам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Управлением образования Хабаровского муниципального района (да­лее - управление образования) с МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> заключено согла­шение от 19.02.2024 № 20-2024-069511 о предоставлении из бюджета Хаба­ровского муниципального района субсидии на иные цели по обновлению материально-технической базы для организаций учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической куль­турой и спортом в 2024 году (далее - соглашение от 19.02.2024 № 20-2024- 069511) в размере 3000000,00 руб. По дополнительному соглашению от 08.11.2024 № 20-2024-069511/3 к соглашению от 19.02.2024 № 20-2024-069511 размер субсидии уменьшен на 1072801,00 руб. и составил 1927199,00 руб. По результатам электронного аукциона МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> за­ключен контракт от 14.03.2024 

<

НОМЕР> с ИП ФИО6 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала и спортивных раздевалок здания МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, цена контракта со­ставила 1927199,00 руб. (далее - контракт от 14.03.2024 

<

НОМЕР>) 12.08.2024 МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> осуществлена приемка работ в полном объеме на сумму 1927199,00 руб. по акту о приемке выполнен­ных работ от 12.08.2024 

<

НОМЕР>.

По поручению о перечислении на счет от 28.08.2024 

<

НОМЕР> сред­ства субсидии в сумме 1927199,00 руб. перечислены управлением образо­вания в адрес МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>. За счет средств субсидии МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> перечислены денеж­ные средства в адрес ИМ 

<

ФИО1> в сумме 1927199,00 руб. по расчетам за выполненные работы по платежному поручению от 29.08.2024 

<

НОМЕР>. В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр работ, выполнен­ных ИП ФИО6 по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР>. выборочный обмер и пересчет рабой материалов, оборудования. По результатам осмотра составлен акт контрольного обмера от 19.03.2025 

<

НОМЕР> и ведомость к акту, подписаны директором ФИО3, заместителем директора по АХР 

<

ФИО2> При проведении осмотра установлено, что объемы фактически выпол­ненных работ не соответствуют объемам работ, предусмотренным контрактом от 14.03.2024 

<

НОМЕР> и принятым по акту о приемке выпол­ненных работ от 01.08.2024 № 2 (архитектурные решения) (далее - акт от 01.08.2024 № 2) по отдельным позициям: - в разделе 2 «Двери», «Дверные блоки внутренние из ПВХ профилей» по позиции 19 акта от 01.08.2024 № 2 «Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)» количество составляет 9,5 кв. м, при осмотре и контрольном обмере установлено, что в двух спортивных раздевалках установлены 6 две­рей внутренних глухих из ПВХ профилей (по 3 двери в каждой раздевалке), размер каждой двери составляет 2,05 м*0,64 м, общая площадь 6 дверей 7,872 кв. м. Выявлено завышение в размере 1,628 кв. м (7,872 кв. м - 9,5 кв. м). - в разделе 4 «Оборудование для спортзала» по позиции 29 акта от 01.08.2024 № 2 «Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт 11/11, толщина 24 мм» количество составляет 0,4428 куб. м. При осмотре помещения спортивного зала установлено отсутствие фанеры, завышение составляет 0,4428 куб. м. В ходе осмотра установлено, что спортивный зал и спортивные разде­валки после проведенного ремонта находятся в неудовлетворительном со­стоянии: разрушение стыков спортивного линолеума, оштукатуренные сте­ны имеют неровности и признаки отслоения, пластиковый угол ок­на поддонах душевых деформирован, дверная фурнитура расшатана, на потолке спортивного зала имеются подтеки. В соответствии с п. 6.2 контракта от 14.03.2024 

<

НОМЕР> подрядчик после выполнения работ, предусмотренных контрактом в полном объеме, сообщает заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, предоставляет заказчику в том числе: акты освидетель­ствования скрытых работ (мри наличии), документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по контракту, исполнительные схемы, журналы производства работ. Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, журналы производства работ, предусмотренные п. 6.2 контракта от 14.03.2024 

<

НОМЕР> отсутствуют.

Таким образом, приемка работ по капитальному ремонту спортивного зала и раздевалок по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР> произведена МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> в отсутствии актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем, журналов производства работ. На основании запроса управления, исх. от 31.03.2025 

<

НОМЕР> му­ниципальным казенным учреждением «Центр закупок и материально-технического обеспечения Хабаровского муниципального района» (далее МКУ «ЦЗМТО») проведены сметные расчеты на работы и материалы, за­вышенные объемы работ (фактически невыполненные ИП 

<

ФИО1>), ко­торые установлены при проведении осмотра результатов ремонтных работ по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР>, на объекте МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>. Сметные расчеты направлены в Управление письмом МКУ «ЦЗМТО» исх. от 01.04.2025 

<

НОМЕР>. Согласно сметному расчету МКУ «ЦЗМТО» по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР> сметная стоимость на завышенные объемы работ и материалов (фактически не выполненные ИП ФИО6) в теку­щем уровне цен составляет 54 690,07 руб., в том числе: -блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (позиция 19 акта от 01.08.2024 № 19) в количестве 1,628 кв. м на сумму 15858.89 руб. не использовались при проведении капитального ремонта, работы по их установке (позиция 18 акта от 01.08.2024 № 2) на сумму 4 869,44 руб. подрядчиком ИП ФИО6 фактически не выполнялись. - работы по облицовке стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованным шпоном (позиция 28 Акта от 01.08.2024 № 2) в сумме 11022,89 руб., устройству каркасов из деревян­ных пропитанных брусков сечением 40*25 мм (позиция 30 акта от 01.08.2024 № 19) в сумме 17183,57 руб., окраске водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подго­товленным под окраску (позиция 32 акта от 01.08.2024 № 2) в сумме 6432.94 руб. подрядчиком ИП ФИО6 фактически не выполнялись. Строительные материалы для производства указанных видов работ не ис­пользовались, в том числе: фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК сорт II/II, толщина 24 мм (позиция 29 акта от 01.08.2024 № 2) в количестве 0,4428 куб. м на сумму 11733,33 руб.; брус­ки деревянные, размер 50*50 мм (позиция 31 акта от 01.08.2024 № 2) в ко­личестве 0,072 куб. м на сумму 819,08 руб.; краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (позиция 33 акта от 01.08.2024 № 2) в количестве 0,0054 т на сумму 1 000,43 руб.; грунтовка акриловая; PRIMER С проникающая, ад­гезионная, LITOCOL (позиция 34 Акта № 2 от 01.08.2024) в количестве 3,6 кг на сумму 1 315,03 руб. Контрольным мероприятием установлено, что необоснованные расхо­ды на оплату фактически невыполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала и спортивных раздевалок МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> по акту от 01.08.2024 № 2 по Контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР> составили 54 690.07 руб. Управлением образования с МБОУ СОШ с.Мирное заключено соглашение о предоставлении из бюджета Хабаровского муниципального района н 2024 году/2025-2026 годах субсидии на иные цели от 25.12.2023 

<

НОМЕР> (далее - соглашение от 25.12.2023 

<

НОМЕР>) на общую сумму 10573923,46 руб., в том числе 3169130,07 руб. на текущий ремонт муниципального имущества в рамках муниципальной программы «Развитие образования Хабаровского муниципального района». В течение 2024 года в соглашение от 25.12.2023 

<

НОМЕР> вносились изменения дополнительными соглашениями. Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2024 

<

НОМЕР> к Соглашению от 25.12.2023 

<

НОМЕР> общий объем субсидии на иные цели на 2024 год составил 16434446,32 руб., в том числе 3906740,38 руб. на текущий ремонт муниципального имущества в рамках муниципальной программы «Развитие образования Хабаровского муниципального района». В 2024 голу субсидия в полной объеме в сумме 3906740,38 руб. пе­речислена управлением образования в адрес МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>. За счет субсидии по текущему ремонту муниципального имущества в рамках муниципальной программы «Развитие образования Хабаровского муниципального района» МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> заключено два контракта по проведению работ по текущему ремонту спортивного зала здания МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> по двум муниципальным контрактам, заключенным с ИП ФИО6, на общую сумму 956330,24 руб., в том числе: - контракт от 01.07.2024 

<

НОМЕР>-24 с ИП 

<

ФИО1> Л.13. на выполнение текущего ремонта спортивного зала демонтажные работы, цена контракта 422 607,05 руб. МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> осуществлена приемка выполнен­ных работ (демонтажные работы) в сумме 422607,05 руб. по акту о приемке выполненных работ от 01.08.2024 № 1, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 01.08.2024 № 1, универсальному передаточному документу (далее - УПД) № 8 от 01.08.2024; расчеты с ИП 

<

ФИО1> произведены по платежному поручению от 02.11.2024 

<

НОМЕР> на сумму 422 607.05 руб. - контракт от 01.07.2024 

<

НОМЕР> на выполнение текущего ремонта спортивного зала - архитектурные решения, цена контракта 533723,19 руб. МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> осуществлена приемка выполненных работ (архитектурные решения) в сумме 533723.19 руб. (далее - контракт от 01.07.2024 

<

НОМЕР>) по акту о приемке выполненных работ от 01.08.2024 № 1 (далее акт от 01.08.2024 № 1), справке о стоимости выполненных ра­бот и затрат от 01.08.2024 № 1, УПД от 01.08.2024 № 9; расчеты с ИП Блаж­ко А.В. произведены по платежному поручению от 02.11,2024 

<

НОМЕР> на сумму 533723,19 руб. В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр работ, выполнен­ных ИП ФИО6 по Контракту от 01.07.2024 

<

НОМЕР>, выборочный обмер и пересчет работ, материалов, оборудования. По результатам осмотра составлен акт контрольного обмера о: 19.03.2025 № 2 и ведомость к акту, подписаны директором ФИО3, заместителем директора по АХР 

<

ФИО4>

При проведении осмотра установлено, что объемы фактически выпол­ненных работ не соответствуют объемам работ, предусмотренным контрак­том от 01.07.2024 

<

НОМЕР> м принятым по акту от 01.08.2024 № 1 по следующим позициям: - в разделе 2 «Двери», «Стальные» по позиции 13 акта от 01.08.2024 № 1 «Блок дверной стальной наружный двупольный с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 кв м» количество составляет 4,9 кв. м; - в разделе 2 «Двери», «Двери внутренние из алюминиевых профилей» по позиции 20 акта от 01.08.2024 № 1 «ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*850» - 1 шт., позиции 21 акта от 01.08.2024 «ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*830» - 1 шт., позиции 22 акта от 01 08.2024 № 1 «ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*740» - 1 шт. При осмотре помещений спортивного зала и спортивных раздевалок установлено отсутствие блоков дверных спальных наружных в количестве 4,9 кв. м. дверей внутренних из алюминиевых профилей: ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*850 -1 шт., ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*830 - 1 шт., ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*740- 1 шт. По остальным видам выполненных работ и материалам акта от 01.08.2024 № 1 при проведении осмотра отклонений не установлено. Согласно сметному расчету, выполненному МКУ «ЦЗМ'ГО» (ответ исх. от 01.04.2025 № 110), сметная стоимость на завышенные объемы работ и материалов (фактически не выполненные ИП ФИО6) в текущем уровне цен но Контракту от 01.07.2024 

<

НОМЕР> составляет 185328,94 руб.: - раздел 2 «Двери», «Стальные» Акта от 01.08.2024 № 1 блок дверной стальной наружный двупольный с замком-защелкой, без доводчика (пози­ция 13 акта от 01.08.2024 № 1) в количестве 4,9 кв. м на сумму 62809,77 руб., «Двери внутренние из алюминиевых профилей»: ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*850 (позиция 20 акта от 01.08.2024 № 1) в количестве 1 шт. на сумму 18 994,95 руб., ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*830 (позиция 21 акта от 01.08.2024 № 1) в количестве 1 шт. на сумму 18867,45 руб., ДАВ Г Оп Л Бпр Р 2060*740 (позиция 22 акта от 01.08.2024) в количестве 1 шт. на сумму 18295,40 руб. при проведении работ по ремонту в помещениях спортивного зала и спортивных раздевалок не установлены (отсутствуют). Работы по установке дверных блоков на сумму 22121,72 руб. (позиция 12 акта от 01.08.2024 № 1) и сумму 17 296,58 руб. (позиция 17 акта от 01.08.2024 № 1) подрядчиком ИП ФИО6 фактически не выполнялись. Контрольным мероприятием установлено, что необоснованные расхо­ды на оплату фактически невыполненных работ по ремонту спортивного та­ла МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> по акту от 01.08.2024 № 1 по контракту от 01.07.2024 

<

НОМЕР> составляют 185328,94 руб. Установленный факт зафиксирован актом плановой выездной провер­ки от 10.04.2025 № 4. Таким образом МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> перечислила за счет субсидий на иные цели ИП ФИО6 за фактически невыполненные работы по акту от 01.08.2024 № 2 по контракту от 14.03.2024 

<

НОМЕР> 54 690,07 руб., по акту от 01.08.2024 № 1 по Контракту от 01.07.2024 

<

НОМЕР> 328,94 руб. Общая сумма нецелевого использования средств бюджета Хабаровского муниципального района составила 240 019,01 руб. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, является должностное лицо. В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. В соответствии с распоряжением администрации Хабаровского муниципального района № 164 лс от 06.04.2022 директором МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> является ФИО3 Согласно распоряжению администрации Хабаровского района № 125 лс от 22.03.2024 «О продлении срочного трудовою договора с ФИО3» срок действия трудового договора с ФИО8 продлен по 05.04.2027 включительно. Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении от 28.05.2025;

- копией акта плановой выездной проверки МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> от 10.04.2025 № 4; - копиями распоряжений администрации Хабаровского района от 06.04.2022 № 164 лс; от 20.03.2023 № 114 лс; от 22.03.2024 № 125 лс; - копиейсоглашения от 09.02.2024 № 20-2024-069511 с приложениями; - копией соглашения от 25.12.2023 

<

НОМЕР> с приложениями; - копией контракта от 01.07.2024 

<

НОМЕР> с приложениями; - копией контракта от 14.03.2024 

<

НОМЕР> с приложениями; - копией писем от 31.03.2025 

<

НОМЕР>, от 01.04.2025 № 110, актов о приемке выполненных работ. Вышеперечисленные доказательства отвечают требованиям ст. 26.2 КоАП РФ, предъявляемым к доказательствам по делу об административном правонарушении, мировой судья признает их относимыми, допустимыми и доставочными для правильного разрешения дела. Таким образом, анализируя имеющиеся в материалах дела и исследованные в судебном заседании доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что вина должностного лица - директора МБОУ СОШ 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>. полностью доказана, и квалифицирует его действия по ст. 15.14 КоАП РФ - нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Обстоятельств, исключающих производство по данному делу, а также отягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено. В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, суд учитывает частичное признание вины. В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Как установлено судом, правонарушение ФИО3 совершено впервые, сведений о привлечении его к административной ответственности материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным применить в отношении должностного лица меру ответственности в виде предупреждения, так как в рассматриваемом случае наказание в виде предупреждения исполняет предупредительную функцию и является соразмерным допущенному нарушению, совершенное должностным лицом административное правонарушение не представляет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Данный вид наказания, с учетом изложенных выше обстоятельств, суд полагает соразмерным совершенному правонарушению и достаточным для предупреждения совершения новых правонарушений. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать должностное лицо - директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> Хабаровского муниципального района Хабаровского края ФИО5 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде предупреждения. Постановление может быть обжаловано в Хабаровский районный суд Хабаровского края в течение 10 дней со дня его получения либо вручения через мирового судью судебного участка № 66 судебного района «Хабаровский район Хабаровского края».

Мировой судья Н.Ю. Бунина Копия верна: мировой судья Н.Ю. Бунина