Дело № 2-1-57/2017 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Жуковский районный суд Калужской области

в составе председательствующего судьи Сизовой О.В., 

при секретаре Косян С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Жуков в зале суда

06 февраля 2017 года

гражданское дело по иску ФИО1 к СНТ «

<

данные изъяты>» о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, восстановлении присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

12.12.2016 года ФИО1 обратилась в суд с иском к СНТ «

<

данные изъяты>» о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, восстановлении присоединения к электрическим сетям.

06.02.2017 года в суд поступило мировое соглашение, заключенное между представителями истца и ответчика, которые просят утвердить подписанное между ними мировое соглашение, по условиям которого: 

Истец ФИО1 отказывается от исковых требований, а СНТ «

<

данные изъяты>» в лице председателя ФИО2 обязуется за счет СНТ «

<

данные изъяты>» провести восстановительные работы в два этапа: 

-первый этап: с четвертого по пятое февраля 2017 года произвести установку дополнительного электрического шкафа на участке № СНТ «

<

данные изъяты>», на месте существующего негерметичного соединения.

Соединение должно быть убрано во вновь установленный электрический шкаф. Провод, соединяющий ящик, перенесённый за территорию участка № СНТ «

<

данные изъяты>», с вновь установленным ящиком, должен быть 6 метров.

Соединяющий кабель, который выполнен из меди, должен быть убран в соответствии с ГОСтом.

-второй этап: с седьмого по десятое мая 2017 года. Закопать медный провод, соединяющий оба электрических шкафа в землю на глубину, в соответствии с ГОСТом.

Истица ФИО1 обязуется не чинить препятствия для проведения необходимых работ на своем участке № в СНТ «

<

данные изъяты>».

По окончании выполненных работ СНТ «

<

данные изъяты>» обязуется в присутствии истицы ФИО1 составить Акт выполненных работ.

СНТ «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО2, обязуется возместить истице ФИО1 оплату государственной пошлины в размере 300 (трехсот) рублей, за подачу искового заявления в Жуковский районный суд Калужской области по иску ФИО1 к СНТ «

<

данные изъяты>» о понуждении к подключению к электрическим сетям.

В соответствии со ст. ст. 39, 173 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд утверждает мировое соглашение сторон, поскольку заключенное соглашение не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и охраняемые законом интересы иных лиц. 

В силу ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Сторонам разъяснены последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.224,225 ГПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца ФИО1 по доверенности ФИО3 и представителем ответчика - председателем СНТ «

<

данные изъяты>» ФИО2, по условиям которого:

Истец ФИО1 отказывается от исковых требований, а СНТ «

<

данные изъяты>» в лице председателя ФИО2 обязуется за счет СНТ «

<

данные изъяты>» провести восстановительные работы в два этапа: 

-первый этап: с четвертого по пятое февраля 2017 года произвести установку дополнительного электрического шкафа на участке № СНТ «

<

данные изъяты>», на месте существующего негерметичного соединения.

Соединение должно быть убрано во вновь установленный электрический шкаф. Провод, соединяющий ящик, перенесённый за территорию участка № СНТ «

<

данные изъяты>», с вновь установленным ящиком, должен быть 6 метров.

Соединяющий кабель, который выполнен из меди, должен быть убран в соответствии с ГОСтом.

-второй этап: с седьмого по десятое мая 2017 года. Закопать медный провод, соединяющий оба электрических шкафа в землю на глубину, в соответствии с ГОСТом.

Истица ФИО1 обязуется не чинить препятствия для проведения необходимых работ на своем участке № в СНТ «

<

данные изъяты>».

По окончании выполненных работ СНТ «

<

данные изъяты>» обязуется в присутствии истицы ФИО1 составить Акт выполненных работ.

СНТ «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО2, обязуется возместить истице ФИО1 оплату государственной пошлины в размере 300 (трехсот) рублей, за подачу искового заявления в Жуковский районный суд Калужской области по иску ФИО1 к СНТ «

<

данные изъяты>» о понуждении к подключению к электрическим сетям.

Производство по гражданскому делу по иску ФИО1 к СНТ «

<

данные изъяты>» о признании действий по отключению электроэнергии незаконными, восстановлении присоединения к электрическим сетям – прекратить.

Определение может быть обжаловано в Калужский областной суд через Жуковский районный суд в течение 15 дней.

Судья О.В. Сизова