Дело № 2-289/2025 УИД 22RS0025-01-2025-000353-25

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

10 ноября 2025 года с. Косиха Косихинского района

Косихинский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Гомер О.А.,

при секретаре Бедаревой Н.С.,

с участием представителя процессуального истца Петренко И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Косихинского района Алтайского края в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Косихинского района Алтайского края обратился в Косихинский районный суд Алтайского края с иском в защиту интересов ФИО1 о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с условиями договора от 16.10.2024 № в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в силу, а также взыскании компенсации морального вреда в размере 5000 руб..

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что проведенной проверкой установлено, что 16.10.2024 между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки по адресу: 

<

адрес>. Срок исполнения договора – 6 месяцев со дня его заключения. В настоящее время условия указанного договора ПАО «Россети Сибирь» не выполнены, что подтверждается постановлением о назначении административного наказания по делу №, вынесенным должностным лицом Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. Внесенное прокурором района представление по факту неисполнения договора от 16.10.2024 № ПАО «Россети Сибирь» рассмотрено, нарушения не устранены. 

В судебном заседании помощник прокурора Косихинского района Алтайского края Петренко И.Ю. поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена (л.д. 112), в ходе производства по делу поддержала исковые требования прокурора, дополнительно указав, что условия договора с ее стороны выполнены в полном объеме. На земельном участке возведен двухэтажный дом, осталось выполнить косметический ремонт, и можно вселяться, но это не возможно из-за отсутствия электричества. По этой причине построенный дом невозможно ввести в эксплуатацию. Дом был построен за счет электричества организации-застройщика, но жить за счет этого электричества нет возможности. Семья истицы, состоящая из двух взрослых и шестерых детей, вынуждена проживать в двухкомнатном доме, находящийся в собственности более пятнадцати лет. При этом, имеется большой двухэтажный дом с четырьмя детскими на втором этаже и двумя санузлами. Предлагали ответчику вместо него сделать все, что требуется для технологического присоединения: поставить опору, закупить счетчик, но получили отрицательный ответ, поскольку оборудование должно быть приобретено ПАО «Россети Сибирь» за счет поступившей по договору оплаты (л.д. 110-111).

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, извещен (л.д. 113), представил в суд отзыв, в котором в удовлетворении иска просил отказать в полном объеме, либо установить срок исполнения решения суда равный 6 месяцев, в случае удовлетворения иска. В обоснование своих возражений представитель ответчика указал, что обращаясь в суд с иском в интересах ФИО1, прокурор не представил доказательства невозможности самостоятельного обращения гражданина в суд. Процедура технологического присоединения электропринимающих устройств физических лиц к электрическим сетям состоит из нескольких этапов, завершающихся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении присоединения. Одним из этапов является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором, среди которых подготовка, выдача сетевой организацией технических условий, проектной документации, выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий. ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (п. 10.1.1), а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами (п. 10.2). Срок исполнения решения суда равный двум месяцам является крайне недостаточным и нарушает принцип соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов сторон. Указанный в технических условиях объем работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетевых районов, чем поставит их в невыгодное положение, что в свою очередь приведет к нарушению прав и законных интересов потребителей других районов электрических сетей, обусловленному нехваткой средств для поддержания их энергокомплекса в качественном состоянии. В случае удовлетворения требований, решение суда будет неисполнимым в связи с недостаточным сроком для выполнения мероприятий капитального характера. Заявляя требование о компенсации морального вреда в размере 5000 руб. доказательств факта причинения истцу физических и нравственных страданий, не представлено. Само по себе нарушение имущественного обязательства не влечет права требования морального вреда. Требование в заявленном размере необоснованно, сторона не представляет исчерпывающего перечня доказательств, которые однозначно бы указывали на причинение морального вреда (л.д. 58-59).

Руководствуясь нормами ст.ст. 113, 117, 167 ГПК РФ, суд счет возможным рассмотреть дело в отсутствие материального истца и представителя ответчика.

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела и оценив каждое доказательство в отдельности и в их совокупности, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, ФИО1 с 19.06.2024 на праве собственности принадлежит земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2000 кв.м с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес> (л.д. 23-26).

16.10.2024 ФИО1 (Заявитель) заключила с ПАО «Россети Сибирь» (Сетевая организация) договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки по указанному адресу (далее – Договор присоединения от 16.10.2024 № Пунктом 5 указанного договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения (л.д. 13-15).

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, на основании публичного договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. 

В соответствии с абз. 1, 2 п. 3, п. 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительство РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с физическими лицами, энергопринимающие устройства которых не будут превышают максимальную мощность 15 кВт включительно и будут использоваться для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – физические лица), обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Из Правил № 861 следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом из подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25(1) Правил № 861 следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подп. «б» п. 25 и подп. «б» п. 25 (1) с п 28 Правил № 861, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволят сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ и Правил № 861 обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с п. 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16.3 Правил № 861 в случае заключения договора с физическими лицами, указанными, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Таким образом, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено подп. «г» п. 25(1) Правил № 861, в технических условиях для заявителей-физических лиц, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Пунктом 108 Правил № 861 установлено, что результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей-физических лиц, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. 

Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно п.п. 1, 3, 6 Договора присоединения от 16.10.2024 № ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению электропринимающих устройств до точки данного присоединения, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии и мощности; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения указанного выше осмотра (обследования) с соблюдением срока, установленного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием напряжения и мощности; составить при участии заявителя акт об осущестлвении присоединения и направить заявителю.

В свою очередь, ФИО1 приняла на себя обязательство оплатить расходы Сетевой организации на технологическое присоединение в размере 9283 руб. 90 коп. (п.п. 1, 10 договора), а также выполнить мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (п. 8).

Согласно п. 10 технических условий №, являющихся неотъемлемой частью договора № от 16.10.2024 (п. 4), для присоединения к электрическим сетям нового потребителя на ПАО «Россети Сибирь» возложена обязанность: подготовить технические условия на технологическое присоединение (п. 10.1.1); обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приме (подачу) напряжения и мощности для потребления электропринимающими устройствами заявителя (п. 10.1.2); выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п. 10.2); построить: ЛЭП-0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя (П. 10.2.1); выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии (10.2.3).

На ФИО1, согласно этим же техническим условиям, возложена обязанность выполнить ввод от комплекса коммерческого учета электроэнергии до энергопринимающих устройств, фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности (п.п. 11а, 11б).

В настоящее время, из указанных мероприятий сетевой организацией подготовлены и вручены Заявителю технические условия на технологическое присоединение (л.д. 16-18); разработан проект строительства ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: 

<

адрес>, (л.д. 134-147), ФИО1 произведена оплата по договору (л.д. 19-20), подготовлен проект строительства индивидуального дома по адресу: 

<

адрес>, согласованный с органом местного самоуправления по параметрам и допустимости размещения на земельном участке (л.д. 22, 124-127), возведен дом (л.д. 128-132).

Доказательства выполнения ПАО «Россети Сибирь» принятых на себя п.п. 10.1.2, 10.2.1, 10.2.3 технических условий мероприятий, суду не представлены.

До настоящего времени, технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не произведено. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

В статье 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Установленный п. 5 Договора присоединения № от 16.10.2024 срок выполнения ПАО «Россети Сибирь» мероприятий по технологическому присоединению является императивным и на момент обращения в суд с иском истек.

В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 4 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Таким образом, обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Сибирь» от ответственности за неисполнение исполнение обязательства по договору перед ФИО1, лежит на ответчике, однако таких доказательств им представлено не было и судом не установлено.

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 28.07.2025 № ПАО «Россети Сибирь» признано виновным в несоблюдение сроков выполнения мероприятий по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе Договору присоединения № от 16.10.2024, с назначением административного наказания по по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (л.д. 69-108). 

При установленных обстоятельствах, поскольку предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек, ответчик принятые на себя обязательства не исполнил, при этом, доказательств которые свидетельствовали бы об отсутствии вины в ненадлежащем исполнении обязательств по договору не представлено, подлежат удовлетворению исковые требования прокурора о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с Договором присоединения № от 16.10.2024.

Истец просит установить срок исполнения настоящего решения – 2 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика возражал против предложенного прокурором срока, с учетом объема работ, проведение которых необходимо для исполнения сетевой организацией условий договора, что повлечет нарушение прав и интересов других потребителе, обусловленному недостаточностью средств для поддержания их электрокомплекса в надлежащем состоянии.

Заключая Договор присоединения № от 16.10.2024, ПАО «Россети Сибирь» приняла на себя обязательство исполнить договор в течение 6 месяцев с момента его заключения.

При получении от ФИО1 оплаты расходов сетевой организации на технологическое присоединение ПАО «Россети Сибирь» обязано было приступить к выполнению согласованных в договоре работ.

На дату разрешения спора, с момента заключения договора прошло более одного года.

При данных обстоятельствах, следуя требованиям ч. 5 ст. 6.1, ч. 2 ст. 13, ч. 2 ст. 206, ст. 210 ГПК РФ, учитывая установленный законом общий срок вступления судебного акта в законную силу, существо обязательства ответчика, и учитывая возможности ответчика по его исполнению (проект строительства ВЛ-0,4 кВ (л.д. 134-147)), суд считает разумным предложенный прокурором срок для исполнения решения суд - два месяца со дня вступления в законную силу.

Объективных данных о недостаточности такового срока не представлено. Увеличение срока по усмотрению ответчика приведет к необоснованному отложению исполнения его обязательств по заключенному с ФИО1 договору на ещё более длительный срок, также учитывая имеющее место в настоящее время длительное неисполнения обязательства в добровольном порядке.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависимо от размера возмещения имущественного вреда.

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические их нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права или посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права. Потерпевший - истец по делу о компенсации морального вреда должен доказать факт нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага, а также то, что ответчик является лицом, действия (бездействие) которого повлекли эти нарушения, или лицом, в силу закона обязанным возместить вред. Вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в причинении вреда доказывается лицом, причинившим вред (п.п. 1, 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда»).

На основании ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 45 Постановления от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» также разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

В ходе судебного разбирательства был установлен факт нарушения прав ФИО1, как потребителя, вследствие невыполнения условий договора на технологическое присоединение к электрическим сетям со стороны ответчика.

Как следует из материалов дела, семья ФИО1 относится к многодетным семьям, в которой воспитывается 6 несовершеннолетних детей в возрасте от 1,5 месяца до 14 лет (л.д. 12, 115).

Семья проживает в доме по адресу: 

<

адрес> общей площадью 47,8 кв.м., жилой площадью 35,1 кв.м., состоящем из кухни и двух комнат (л.д. 116-123).

Вместе с тем, как следует из фототаблицы, представленной в суд прокурором, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО1, возведен двухэтажный жилой дом, в котором установлен топливный котел, окна и двери, сделан теплый пол. Конфигурация и планировка дома соответствуют проекту, представленному в Администрацию Косихинского района с уведомлением о строительстве индивидуального двухэтажного жилого дома общей площадью 161,31 кв.м., включающего в себя кухню-гостиную, пять спален (л.д. 124-132).

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает установленный факт нарушения прав истца как потребителя, характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, характер и степень нравственных страданий истца (испытание негативных эмоций в связи с невозможностью пользования электроэнергией при строительстве дома, вынужденным проживанием семьей составов восемь человек в доме площадью 47,8 кв.м., при наличии достроенного дома, площадью 161,31 кв.м., отвечающего по планировке потребностям и нуждам каждого члена семьи, но невозможностью им пользоваться из-за отсутствия электроэнергии), степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика заявленную истцом сумму в размере 5000 руб..

Кроме того, с ответчика подлежит взысканию в местный бюджет в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ госпошлина, от уплаты которой истец был освобожден при обращении в суд в размере 3000 руб..

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования прокурора Косихинского района Алтайского края в интересах ФИО1.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, распложенных по адресу: 

<

адрес>, по договору № от 16.10.2024, заключенному с ФИО1.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (

<

данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 5000 руб..

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход бюджета муниципального образования Косихинский район госпошлину в размере 3000 руб..

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Косихинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья О.А. Гомер