Заочное 

Решение

Именем Российской федерации

07 мая 2019 года

Раменский городской суд Московской области

В составе: председательствующего судьи Уваровой И.А.

При секретаре Иноземцевой К.А. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3210 по иску ФИО2 к ООО «Домстройсервис» о взыскании аванса, неустойки, судебных расходов, 

У с т а н о в и л:

Пяо Цзицзюнь обратился в суд с иском, которым просит взыскать с ООО «Домстройсервис» сумму неотработанного аванса 

<

...> руб., договорную неустойку за период с 

<

дата> до 

<

дата> в сумме 

<

...> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

...> руб., возврат госпошлины в сумме 

<

...> руб., расходы по оплате юридических услуг 

<

...> руб.

В обоснование требований ссылается на то, что заключил с ООО «ДОМСТРОЙСЕРВИС» (подрядчик) заключены три договора бытового подряда: Договор бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>; Договор бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>; Договор бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>.

Согласно указанным договорам и приложениям к ним, ООО «ДОМСТРОЙСЕРВИС» обязалось в срок с 3 апреля до 

<

дата> выполнить общестроительные и отделочные работы объектов: жилого дома, забора, бани и склада, общей стоимостью 

<

...> рублей. По приходным кассовым ордерам он уплатил ответчику 

<

...> рублей в счет выполнения в будущем строительных работ. По состоянию на 

<

дата> общестроительные и отделочные работы объектов: жилого дома, бани и склада не завершены, поэтапная сдача выполненных работ не проводилась. Конечные сроки сдачи объектов не выполнены, объект не сдан в эксплуатацию. Подрядчик на объекте не появляется с 

<

дата> и с этой даты фактически прекратил работы на объекте. На письменное требование заказчика, направленное в адрес подрядчика 

<

дата>, явиться 

<

дата> к 10:00 мск на объект строительства для оформления поэтапных актов сдачи-приемки выполненных работ, завершения строительных работ и передаче объекта заказчику, подрядчик не ответил и на объекте не появился. Требование с почтовым идентификатором 

<

номер> с 24 августа по 

<

дата> хранилось в почтовом отделении связи по месту юридического адреса ответчика и 

<

дата> выслано обратно отправителю - истцу. Таким образом, подрядчик в одностороннем порядке отказался от выполнения обязательств предусмотренных договорами бытового подряда, от сдачи заказчику выполненных работ уклоняется, на телефонные звонки не отвечает.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, фактическое прекращение подрядчиком работ на объекте с 

<

дата> и неисполнением подрядчиком своих обязательств, истец, ценным письмом с описью вложений направил в адрес ответчика требование о возврате в срок до 

<

дата> неотработанного аванса и уведомление о расторжении указанных договоров бытового подряда. С 

<

дата> требование и уведомление о расторжении договоров с почтовым идентификатором 

<

номер>, хранится в отделении почтовой связи по месту юридического адреса ответчика и по состоянию на 

<

дата> ответчику не вручено. Согласно отчету об отслеживании указанного почтового отправления по состоянию на 

<

дата>, срок хранения почтового отправления истек 

<

дата>, и отправление будет возвращено отправителю.

В судебное заседание истец Пяо Цзицзюнь не явился. Его представитель по доверенности ФИО4 (л.д.49). Поддержал исковые требования, уточнил, что договорную неустойку он просит взыскать согласно расчету в сумме 

<

...> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 

<

...> руб. Требования о взыскании расходов по оказанию юридической помощи в сумме 

<

...> руб. в настоящее время не поддерживает.

Ответчик ООО «ДОМСТРОЙСЕРВИС» представитель не явился. О слушании дела извещен судебной повесткой (л.д.53). Об уважительности причины неявки не сообщил, о слушании дела в свое отсутствие не просил. При таких обстоятельствах с учетом мнения представителя истца суд пришел к выводу о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Заслушав представителя истца, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Согласно договору бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>, заключенному между Пяо Цзицзюнь (заказчик) и ООО «ДОМСТРОЙСЕРВИС» (подрядчик) последний обязался в установленный срок, с 3 апреля по 

<

дата>, выполнить общестроительные и отделочные работы жилого дома в соответствии с приложением 

<

номер> к договору, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В пункте 3.1 договора, стороны установили, что строительные работы выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно, в порядке и сроки, предусмотренные договором, а именно:

- Первый этап: монтаж утепленной плиты основания с теплым полом, коммуникаций;

- Второй этап: монтаж силового каркаса первого-второго этажей, в том числе, и кровли;

- Третий этап: наружная отделка.

-Четвертый этап: прокладка коммуникаций и внутренняя отделка.

-Пятый этап: забор.

Обязанность по извещению заказчика о готовности к сдаче выполненных работ (этапов работ), пунктом 3.4 договора, возложена на подрядчика.

В соответствии с пунктом 3.6 договора, каждый этап выполненных подрядчиком работ оформляется подписанием сторонами отдельного акта сдачи-приемки выполненных работ, исключительно, по месту проведения строительных работ, на стройплощадке.

Дата выполнения подрядчиком своих обязательств по передаче результата работ заказчику, в силу пункта 3.7 договора, определяется на основании акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ, а в случае неявки заказчика для принятия работ, либо иного уклонения заказчика от приемки работ - дата составления подрядчиком одностороннего акта, свидетельствующего о выполнении своих договорных обязательств.

Этим же пунктом предусмотрено, что с даты соответствующего акта, подрядчик считается надлежащим образом выполнившим свои обязательства по сдаче работ заказчику, а у заказчика возникает обязанность по оплате выполненных работ.

В пункте 4.1 договора сторонами установлена его окончательная цена в размере 

<

...> рублей.

Пунктом 2.2.5 договора предусмотрена обязанность заказчика надлежащим образом исполнять денежные обязательства в порядке и на условиях предусмотренных договором.

Порядок оплаты заказчиком цены договора установлен пунктами 4.3 и 4.4 договора и является следующим:

первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора перед началом работ;

второй платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по первому этапу;

третий платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по второму этапу;

четвертый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по третьему этапу; 

пятый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по четвертому этапу;

шестой платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по пятому этапу.

Согласно договору бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата> подрядчик обязался в установленный срок, с 3 апреля по 

<

дата>, выполнить общестроительные и отделочные работы бани в соответствии с приложением 

<

номер> к договору, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В пункте 3.1 договора, стороны установили, что строительные работы выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно, в порядке и сроки, предусмотренные договором, а именно в три этапа:

Первый этап: монтаж свайно-винтового фундамента.

Второй этап: монтаж силового каркаса, в том числе и кровли.

Третий этап: наружная отделка и внутренняя отделка.

Обязанность по извещению заказчика о готовности к сдаче выполненных работ (этапов работ), пунктом 3.4 договора, возложена на подрядчика.

В соответствии с пунктом 3.6 договора, каждый этап выполненных подрядчиком работ оформляется подписанием сторонами отдельного акта сдачи-приемки выполненных работ, исключительно, по месту проведения строительных работ, на стройплощадке.

Дата выполнения подрядчиком своих обязательств по передаче результата работ заказчику, в силу пункта 3.7 договора, определяется на основании акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ, а в случае неявки заказчика для принятия работ, либо иного уклонения заказчика от приемки работ - дата составления подрядчиком одностороннего акта, свидетельствующего о выполнении своих договорных обязательств.

Этим же пунктом предусмотрено, что с даты соответствующего акта, подрядчик считается надлежащим образом выполнившим свои обязательства по сдаче работ заказчику, а у заказчика возникает обязанность по оплате выполненных работ.

В пункте 4.1 договора сторонами установлена его окончательная цена в размере 

<

...> рублей.

Пунктом 2.2.5 договора предусмотрена обязанность заказчика надлежащим образом исполнять денежные обязательства в порядке и на условиях предусмотренных договором.

Порядок оплаты заказчиком цены договора установлен пунктами 4.3 и 4.4 договора и является следующим:

- первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора перед началом работ;

второй платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по первому и второму этапам;

третий платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по третьему этапу.

Согласно договору бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата> подрядчик обязался в установленный срок, с 

<

дата>, выполнить общестроительные и отделочные работы склада в соответствии с приложением 

<

номер> к договору, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В пункте 3.1 договора, стороны установили, что строительные работы выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно, в порядке и сроки, предусмотренные договором, а именно в три этапа:

-Первый этап: монтаж плиты основания.

-Второй этап: монтаж стен, в том числе и кровли.

-Третий этап: монтаж ворот, освещения.

Обязанность по извещению заказчика о готовности к сдаче выполненных работ (этапов работ), пунктом 3.4 договора, возложена на подрядчика.

В соответствии с пунктом 3.6 договора, каждый этап выполненных подрядчиком работ оформляется подписанием сторонами отдельного акта сдачи-приемки выполненных работ, исключительно, по месту проведения строительных работ, на стройплощадке.

Дата выполнения подрядчиком своих обязательств по передаче результата работ заказчику, в силу пункта 3.7 договора, определяется на основании акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ, а в случае неявки заказчика для принятия работ, либо иного уклонения заказчика от приемки работ - дата составления подрядчиком одностороннего акта, свидетельствующего о выполнении своих договорных обязательств.

Этим же пунктом предусмотрено, что с даты соответствующего акта, подрядчик считается надлежащим образом выполнившим свои обязательства по сдаче работ заказчику, а у заказчика возникает обязанность по оплате выполненных работ.

В пункте 4.1 договора сторонами установлена его окончательная цена в размере 

<

...> рублей.

Пунктом 2.2.5 договора предусмотрена обязанность заказчика надлежащим образом исполнять денежные обязательства в порядке и на условиях предусмотренных договором.

Порядок оплаты заказчиком цены договора установлен пунктами 4.3 и 4.4 договора и является следующим:

-первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора перед началом работ;

второй платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по первому этапу, перед началом второго этапа;

-третий платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания акта выполненных работ по третьему этапу (л.д.24-39).

Таким образом, по трем указанным бытовым договорам, стоимость общестроительных и отделочных работ составила в размере 

<

...> рублей.

Из совокупного толкования пунктов 4.3 и 4.4 договоров следует, что сроки и порядок оплаты заказчиком цены первых этапов договоров являются следующими:

первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора 

<

номер> от 

<

дата>, перед началом работ, то есть 

<

дата>;

первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора 

<

номер> от 

<

дата>, перед началом работ, то есть 

<

дата>;

- первый платеж: 

<

...> рублей - в момент подписания договора 

<

номер> от 

<

дата>, перед началом работ, то есть 

<

дата>.

Таким образом, в соответствии с условиями договоров бытового подряда, заказчик был обязан осуществить первые платежи: в размере 

<

...> рублей - 

<

дата>, 

<

...> рублей - 

<

дата>.

Фактически, во исполнение условий договора заказчиком произведены следующие платежи:

- 

<

...> рублей, 

<

дата>., приходный кассовый ордер (далее - ПКО) 

<

номер>, основание: договор 

<

номер> (жилой дом);

-

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО 

<

номер>, основание: договор 

<

номер> (баня);

-

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО 

<

номер>, основание договор 

<

номер> (склад);

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО 

<

номер>, основание договор 

<

номер> (склад);

-

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО 

<

номер>, основание: договор 

<

номер> (баня);

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: ворота 

<

номер> и дренажные трубы по границе;

- 

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: устройство дренажа участка и асфальтового покрытия;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор бытового подряда;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор бытового подряда;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор бытового подряда;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор бытового подряда;

<

...> рублей, 

<

дата>., ПКО б/н, основание: договор бытового подряда;

- 

<

...> рублей, 

<

дата>., 

<

номер>, основание: договор бытового подряда 

<

номер> (жилой дом) (л.д.40-45).

Таким образом, истец выполнил обязанности по осуществлению первых авансовых платежей в размере 

<

...> рублей в объеме и сроки, предусмотренные договорами.

Сроки исполнения заказчиком последующих платежей установить невозможно, так как поэтапная сдача подрядчиком выполненных работ не производилась, соответственно первые и последующие платежи являлись авансовыми платежами.

Всего, по приходным кассовым ордерам заказчиком уплачен подрядчику аванс в сумме 

<

...> рублей.

По состоянию на 

<

дата> общестроительные и отделочные работы объектов: жилого дома, бани и склада не завершены, поэтапная сдача выполненных работ не проводилась. Конечные сроки сдачи объектов не выполнены.

Своей распиской от 

<

дата> генеральный директор ООО «ДОМСТРОЙСЕРВИС» ФИО1 подтвердил, что строительные работы по жилому дому, складу, забору, бане, дренажу, засыпке асфальтовой крошкой участка подрядчиком не выполнены и не сданы заказчику.

Истец уведомил ответчика об одностороннем расторжении договоров:

Договора бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>;

Договора бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>;

Договора бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>,

с 

<

дата>, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.

Требование истца возвратить неотработанный аванс в сумме 

<

...> рублей в срок до 

<

дата> оставлено ответчиком без удовлетворения (л.д.11-17).

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, в силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ заказчик отказался от исполнения договора и потребовал вернуть аванс (письмо от 

<

дата>). 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). Из системного толкования положений пункта 3 статьи 450 и пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что договор строительного подряда считается прекращенным с момента получения подрядчиком отказа заказчика от его исполнения или момента, когда подрядчик мог его получить. 

С 

<

дата> требование о возврате неотработанного аванса и уведомление о расторжении договоров (почтовый идентификатор 

<

номер>), хранится в отделении почтовой связи по месту юридического адреса ответчика и ответчику не вручено. По состоянию на 

<

дата> срок хранения почтового отправления истек.

Поскольку срок хранения письма истца от 

<

дата> об отказе от исполнения договора, направленное в адрес ответчика, истек 

<

дата>, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором 

<

номер>, следует, что спорные договоры бытового подряда

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, считаются прекращенными (расторгнутыми) с 

<

дата>.

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику. Основанием для возникновения обязательства заказчика по

оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо № 51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Сдача результата работ подрядчиком не производилась, соответственно и приемка его заказчиком также не производилась.

Пунктом 3.5 каждого из трех договоров предусмотрено, что заказчик обязан принять результат выполненных работ (этапов работ) и подписать соответствующие акты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления подрядчиком (п. 3.7 договора), соответствие результата выполненных работ требованиям договора проверяется заказчиком при принятии результата работ от подрядчика.

Согласно толкованию норм материального права, данному Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 Информационного письма от 24.01.2000 г. №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», подрядчик не вправе ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплату на основании одностороннего акта сдачи результата работ, если фактически объект в установленном порядке заказчику не передавался.

Какие-либо допустимые и достаточные доказательства извещения заказчика о выполнении работ, в счет оплаты которых могла быть учтена спорная сумма перечисленного аванса, сдачи их и приемки в установленном законом и договором порядке, ответчиком не представлено.

В соответствии со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.2 спорных договоров стороны предусмотрели ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, а именно обязанность ответчика уплатить 0,3% от цены договоров за каждый день просрочки.

Общая сумма неустойки, согласно расчету, составила - 

<

...> рублей (л.д.46).

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по возврату неотработанного аванса, в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

<

дата> с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 

<

...> руб. в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 

<

дата>. по 

<

дата>. из расчета 7,75% годовых по ключевой ставке установленной ЦБ РФ на этот период.

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Поскольку спорные договоры бытового подряда 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, расторгнуты с 

<

дата>., с 

<

дата>. подлежат уплате проценты в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив в совокупности представленные доказательства, которые ответчик в установленном законом порядке не опроверг, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в сумме 53576 руб.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 395, 450, 453, 702, 708, 711, 715, 717, 740, 746, 753, 1102, 1109 Гражданского кодекса РФ, ст.ст.56, 98,194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Пяо Цзицзюнь удовлетворить.

Взыскать с ООО «Домстройсервис» в пользу Пяо Цзицзюнь сумму неотработанного аванса 

<

...> руб., договорную неустойку за период с 

<

дата> до 

<

дата> в сумме 

<

...> руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 

<

дата> по 

<

дата> в сумме 

<

...> руб., возврат госпошлины в сумме 

<

...> руб.

Заочное решение может быть пересмотрено Раменским городским судом по заявлению, поданному ответчиком в 7-дневный срок со дня получения копии решения суда или обжаловано в Московский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 13 мая 2019 года.

Судья