№

25RS0№-36

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2026 года с. Вольно-Надеждинское

Надеждинский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Мерзляковой Д.С.,

при секретаре Машкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО5 к АО «ДРСК» Филиал «Приморские Электрические сети» о взыскании неустойки, возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику, в котором указала, что между ней и АО «ДРСК» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно п. 1.5 которого сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта заявителя, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Истец выполнила часть указанного договора и произвела оплату на счет сетевой организации за технологическое присоединение сумму в размере 527 910,69 рублей, однако на сегодняшний день ДД.ММ.ГГГГ год сетевая организация к работам так и не приступила.

Согласно п. 17 указанного договора, сторона, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 % от указанного общего размере платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки, при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренной настоящем абзаце порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от её уплаты.

ДД.ММ.ГГГГ истцом было получено от сетевой организации письмо № в котором, ответчик признал нарушение срока выполненных работ по договору и считает невозможным выполнение до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку срок выполнения указанного договора истек ДД.ММ.ГГГГ, просрочка за выполнение обязательств по договору составляет 1 год, истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за каждый день просрочки обязательств в размере 653 203 рубля 09 коп; а также незамедлительно приступить к выполнению работ по договору.

В судебное заседание истец не явилась, извещена о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, её представитель по доверенности ФИО2 на удовлетворении исковых требований настаивал по основаниям и доводам, изложенным в иске.

В судебное заседание представитель АО «ДРСК не явилась, извещена о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, представила письменный отзыв на иск, в котором просила в удовлетворении исковых требований отказать, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 настоящих Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с разделом 10 настоящих Правил, взаимоотношение между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил, осуществляются посредством личного кабинета потребителя, размещенного на сайте сетевой организации.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «ДРСК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (далее договор №), приложением к которому являются технические условия для электроснабжения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ Агентства по тарифам Приморского края и составил 746 517,82 руб. (п. 10 договора №).

Пунктом 10 технических условий определён комплекс мероприятий, который должна осуществить сетевая организация, к числу которых отнесена реконструкция ЛЭП 6 кВ фид. 6 кВ N29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз с организацией узла присоединения; установка разъединителя на опоре ЛЭП 6 кВ фид. 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз в сторону ответвления; строительство ЛЭП 6 кВ отпайкой от фид. 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз до проектируемой ТП 6/0,4 кВ выполненной изолированным проводом сечением не менее 50 мм 2 длиной порядка 5 м; строительство ТП 6/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА; строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ выполненной изолированным проводом сечением не менее 120 мм2 длиной порядка 5 м до границы земельного участка заявителя; организация коммерческого учета электрической энергии; мероприятия по фактическому присоединению объекта заявителя к электрическим сетям.

Кроме того, пунктом 11 указанный технических условий определены мероприятия, которые должны быть выполнены заявителем в границах собственного земельного участка, а именно: монтаж ЛЭП 0,4 кВ от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта заявителя; монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия; предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств; выполнить устройство контура заземления.

В п.п. 1 п. 8 договора № 22-873 предусмотрены обязанности сторон, в том числе указано, что заявитель обязан после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию об их выполнении.

В п. 85 Правил № 861 предписано, что доля проведения проверки выполненных технических условий заявитель предоставляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением требуемых документов. Техническое присоединение осуществляется после процедур проверки выполнения технических условий заявителем.

Согласно п. 88 Привил № 861 по результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в трехдневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт о выполнении технических условий.

Согласно п.п.2 п. 8 договора № № исполнение истцом мероприятий по технологическому присоединению оканчивается направлением в адрес сетевой организации уведомления об их выполнении, а после такого уведомления проводит проверку выполнения заявителем технических условий и при их надлежащем выполнении составляет подтверждающий акт и далее проводит иные мероприятия, предусмотренные п. 6 договора, заканчивающиеся составлением акта о технологическом присоединении.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Доказательств того, что уведомление и документы, которые прилагаются к уведомлению в подтверждение исполнения условий технического присоединения, были направлены истцом в адрес ответчика, истцом не представлены.

В судебном заседании не добыто доказательств того, что истец исполнила технические условия, обращалась к ответчику с заявлением о проведении проверки выполнения ею технических условий, и по её уведомлению проводился осмотр о готовности к осуществлению технологического присоединения,

Таким образом, поскольку истцом не выполнены обязательства по договору технологического присоединения, суд приходит к выводу, что в настоящее время у истца отсутствуют основания для взыскания неустойки и для возложения на ответчика обязанности по осуществлению технологического присоединения, в связи с чем, суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 ФИО6 к АО «ДРСК» Филиал «Приморские Электрические сети» о взыскании неустойки, возложении обязанности, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Надеждинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 30 января 2026 года.

Судья Д.С. Мерзлякова