УИД 38RS0031-01-2023-006461-60 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 

19.02.2024 

Иркутский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Говоровой А.Н. при секретаре судебного заседания Черных К.О.,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-338/2024 по иску ФИО1 к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» в лице филиала «Восточные электрические сети» о возложении обязанности исполнить договор, взыскании компенсации морального вреда, судебной неустойки,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца садоводческого потребительского кооператива «Байкальский», 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском, измененным в порядке статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к ОАО «ИЭСК» в лице филиала «Восточные электрические сети», в котором просил возложить на ответчика обязанность исполнить договор № от **/**/**** в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив фактическое переключение ранее подключенных энергопринимающих устройств заказчика к своим электрическим сетям по адресу: ...., в пределах максимальной (разрешенной) мощности энергопринимающих устройств 30 кВт по III (третья) категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., в случае удовлетворения исковых требований в целях побуждения ответчика к своевременному исполнению решения суда, на основании статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда. 

В обоснование заявленных требований ФИО1 указал, что **/**/**** заключил с ОАО «ИЭСК» в лице филиала «Восточные электрические сети» договор возмездного оказания услуги № по созданию технической возможности и по фактическому переключению к электрической сети ОАО «ИЭСК» в отношении энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: ..... Согласно пункту 1.5 договора срок оказания услуги не позднее 6 месяцев.

В связи с введенными в марте 2020 года ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции исполнить мероприятия в срок, указанный в договоре, не представилось возможным.

**/**/**** в адрес ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» подано уведомление о выполнении технических условий №. 

**/**/**** подано заявление о продлении срока выполнения мероприятий по договору. Сроки были продлены до **/**/****. 

**/**/**** между ФИО1 и ОАО «ИЭСК» подписан акт о выполнении технических условий. Пунктом 6 указанного акта установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями №, выполнены.

Дополнительно ОАО «ИЭСК» потребовало предоставить акт уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов. 

Получив акт и разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, ФИО1 подал уведомление № от **/**/**** о выполнении технических условий. Услуги по договору не оказаны.

**/**/****, **/**/**** ФИО1 обращался в ОАО «ИЭСК» с требованием произвести переключение по договору №. Ответы на обращения не получил.

По мнению истца, им выполнены все необходимые мероприятия по договору и дополнительные требования ответчика, ответчик незаконно уклоняется от исполнения договора.

Ответчик ОАО «ИЭСК» исковые требования не признал, указал, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии носит однократный характер, в отношении энергопринимающего устройства истца технологическое присоединение произведено, договор об осуществлении технологического присоединения является ничтожной сделкой.

В судебное заседание представители ответчика, третьего лица не явились, о времени и месте судебного разбирательства дела извещены надлежащим образом. причины неявки неизвестны. 

Суд на основании статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал.

Выслушав пояснения истца, учитывая позицию ответчика, изучив письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями процессуального законодательства, суд пришел к следующему. 

В статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (первый абзац).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным (четвертый абзац).

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в том числе правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора (абзацы шестой и девятый).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (восемнадцатый абзац).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению (девятнадцатый абзац).

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению (двадцатый абзац).

В соответствии с пунктом 40(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила технологического присоединения), владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства, за исключением объектов по производству электрической энергии, иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г. Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Согласно пункту 8(5) Правил технологического присоединения в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

В пункте 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, определено, что «акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении)» - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства; «документы о технологическом присоединении» - документы, составляемые (составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе, технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2023 №АКПИ23-113, под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что плата за технологическое присоединение взимается однократно; изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату технологического присоединения; реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляются реконструкция и увеличение мощности энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового (повторного) технологического присоединения.

В абзаце втором пункта 4 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике», согласно которому владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.

Следовательно, осуществление мероприятий технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в соответствии с положениями Правил возможно как посредством заключения договора об осуществлении технологического присоединения с сетевой организацией, так и путем опосредованного присоединения к ранее присоединенным энергопринимающим устройствам садоводческого некоммерческого товарищества при условии соблюдения выданных ранее технических условий.

Согласно письму ФАС России от 21.05.2019 №ВК/42082/19 «О рассмотрении обращения» однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что:

- плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения;

- изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение;

- реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляется реконструкция и увеличение мощности энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового (повторного) технологического присоединения.

Согласно пункту 2 Правил технологического присоединения действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

При этом, изменение точки присоединения является случаем технологического присоединения только тогда, когда в отношении ранее присоединенного энергопринимающего устройства меняется категория надежности, вид производственной деятельности без изменения максимальной мощности, но меняется схема внешнего электроснабжения.

Из анализа указанных норм права следует, что при изменении точки подключения ранее подключенного энергопринимающего устройства потребителя с изменением схемы внешнего электроснабжения, необходимо осуществлять технологическое присоединение.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником жилого дома с кадастровым номером 38:06:143519:9912, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: .....

**/**/**** между ОАО «ИЭСК» в лице филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» и ФИО1 заключен договор возмездного оказания услуг № по созданию технической возможности и фактическому переключению к электрической сети ОАО «ИЭСК». 

Согласно пункту 1.1 указанного договора ОАО «ИЭСК» приняло на себя обязательства с целях заключения в будущем договора энергоснабжения объекта жилой дом с кадастровым номером №, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: .... в пределах максимальной (разрешенной) мощности энергопринимающих устройства 30 кВт по III (третья) степень категории надежности энергопринимающих устройств по уровню напряжения 0,4 кВт, оказать услугу по созданию технической возможности и по фактическому переключению ранее подключенных энергопринимающих устройств заказчика к своим электрическим сетям. 

Из пункта 1.3 договора следует, что оказание услуг состоит из следующих мероприятий: а) подготовка и выдача технических условий; б) выполнение технических условий заказчиком и исполнителем; в) проверка исполнителем выполнения заказчиком технических условий; г) оформление акта об осуществлении фактического переключения к электросетям ОАО «ИЭСК»; д) фактическое переключение объекта заказчика к электрической сети ОАО «ИЭСК» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») при условии соответствия энергопринимающих устройств заказчика требованиям технических регламентов и действующих нормативно-технических документов. 

Срок оказания услуг в полном объеме не позднее 6 месяцев (пункт 5 договора). Срок оказания услуги может быть увеличен, по согласованию сторон на соответствующий срок задержки (пункт 1.7 договора). 

Услуга считается выполненной в полном объеме с момента подписания сторонами акта об осуществлении фактического переключения к электросетям ОАО «ИЭСК» (пункт 6 договора). 

Согласно пункту 3.1 договора стоимость услуги составила 17 652 руб. 96 коп.

ФИО1 **/**/**** произведена оплата по договору в полном объеме, о чем представлена справка о подтверждении платежа ПАО Сбербанк от **/**/****.

При заключении договора № ФИО1 выданы технические условия по созданию технической возможности и по фактическому переключению к электрической сети ОАО «ИЭСК», являющиеся приложением к договору №, с условиями предоставления максимальной мощности 30 кВт, категория надежности III (третья), класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ, точка присоединения ПС Березовая, ВЛ 10 кВ Березовая – яч. 23 Дачная, ТП-3393, ВЛ 0,4кВ, гр. 1, опора 3.

Таким образом, при заключении договора об осуществлении технологического присоединения сторонами согласованы существенные условия. 

**/**/**** в ОАО «ИЭСК» от ФИО1 поступило уведомление о выполнении технических условий с просьбой проведения осмотра (обследования) электроустановки и проверки выполнения технических условий. 

**/**/**** ФИО1 обратился в ОАО «ИЭСК» с заявлением о продлении срока выполнения мероприятий по договору № до **/**/****. 

**/**/**** между ОАО «ИЭСК» и ФИО1 подписан акт выполнения технических условий по договору № от **/**/****. 

Письмом № от **/**/**** ОАО «ИЭСК» уведомило ФИО1 о необходимости представить акт уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов согласно пункту 8.4 договора № от **/**/**** и пункта 7 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от **/**/**** №. 

**/**/**** Енисейским управлением Ростехнадзора ФИО1 выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки №, к которому приложен акт осмотра энергопринимающей установки по адресу: ...., проводившегося в период с **/**/**** по **/**/****. 

**/**/**** ФИО1 обратился ОАО «ИЭСК» с заявлением о продлении срока выполнения мероприятий по договору №. 

**/**/****, **/**/**** ФИО1 обращался в ОАО «ИЭСК» с требованием исполнить договор №. 

Доказательства исполнения ОАО «ИЭСК» договора № от **/**/**** в части фактическое переключение объекта заказчика к электрической сети ОАО «ИЭСК» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») не представлены.

Доводы ОАО «ИЭСК» о недействительности договора как заключенного с нарушением норм права является необоснованным, противоречат вышеуказанным разъяснениям, данным относительно однократности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пункту 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно акту об осуществлении технологического присоединения № от **/**/**** ОАО «ИЭСК» в лице филиала «Восточные электрические сети» осуществило технологическое присоединение СПК «Байкальский» с максимальной мощностью 1186 кВт, категории надежности III (третьей), точка присоединения ПС Березовая, КЛ 10 кВ Березовая-Дачная, опора 2.

Поскольку в данной ситуации производится изменение точки присоединения с изменением схемы внешнего энергоснабжения, суд полагает, что имелись основания для заключения договора технологического присоединения. В связи с чем, доводы ответчика о недействительности договора отклоняются судом.

Доказательства расторжения договора № от **/**/****, возврата ответчиком истцу оплаты по договору не представлены.

Учитывая изложенное, суд полагает правомерными требования истца о возложении на ответчика обязанности исполнить договора.

В связи с доказанностью нарушения ответчиком прав истца как потребителя на основании статей 13, 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» с продавца в пользу покупателя подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 500 руб.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Учитывая длительное неисполнение ответчиком обязательств по договору, суд полагает возможным взыскать судебную неустойку с ответчика в пользу истца в размере 5 000 руб. в месяц в случае неисполнения настоящего решения суда в части осуществления фактического переключения энергопринимающих устройств к электрической сети в течении 15 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика как проигравшей стороны в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 руб. 

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» в лице филиала «Восточные электрические сети» о возложении обязанности исполнить договор, взыскании компенсации морального вреда, судебной неустойки – удовлетворить частично.

Возложить на открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» обязанность исполнить договор № от **/**/**** в части осуществления фактического переключения к электрической сети открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» ранее подключенных энергопринимающих устройств ФИО1, расположенных по адресу: ...., в пределах максимальной (разрешенной) мощности энергопринимающих устройств 30 кВт по третьей категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ в течение 15 дней с даты вступления настоящего решения суда в законную силу.

Взыскать с открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 500 руб.

В случае неисполнения настоящего решения суда в части осуществления фактического переключения энергопринимающих устройств к электрической сети в течении 15 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 руб. в месяц.

Взыскать с открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» в доход бюджета Иркутского района государственную пошлину в размере 600 руб.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» в лице филиала «Восточные электрические сети» о взыскании судебной неустойки в ином размере – отказать.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Иркутский районный суд Иркутской области.

Судья 

А.Н. Говорова 

Решение суда в окончательной форме принято 27.02.2023.