Дело № 2-689/2020 

11RS0005-01-2020-000199-93

Решение

именем Российской Федерации

(заочное)

г. Ухта, Республика Коми

05 февраля 2020 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Хазиевой С.М., 

при секретаре Рузиной Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки,

установил:

Публичное акционерное общество «МРСК Северо-Запада» в лице производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (далее по тексту - ПАО «МРСК Северо-Запада», Общество) обратилось в Ухтинский городской суд с требованиями к ФИО1 о расторжении договора технического присоединения от 02.08.2016 года .... «Об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту – Договор), взыскании неустойки по день вынесения решения судом, расходов по уплате государственной пошлины в размере 6400 руб. В обоснование требований указано, что ответчиком условия по договору исполняются ненадлежащим образом.

В судебное заседание ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил. Суд, исходя из положений ст. 167, ст. 233 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

В настоящем судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 на заявленных требованиях настаивала, доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержала.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Пунктом 1 ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее - Правила №861).

В силу п. 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 16 Правил №861 предусмотрено, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Согласно п. 16.3 Правил №861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу пп. г п. 18 названных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В соответствии с п. 16.5 Правил №861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Как следует из материалов дела, 02.08.2016 года между ПАО «МРСК Северо-Запада» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетвого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» .... (далее по тексту – Договор), с учетом дополнительного соглашения от 08.11.2017 ...., по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технического присоединения устройств Заявителя – щит учета (п. 1) для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: .... (п. 2). 

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (п. 3).

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (п. 4).

Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня подписания дополнительного соглашения к Договору (п. 5).

В соответствии с п. 6 договора Сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п. 6.1); в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем (п. 6.2); не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования, указанного в п. 6.2 Договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю (п. 6.3).

Заявитель принял на себя обязательства надлежащим образом исполнять обязательства по Договору, в том числе по выполнению мероприятий по техническому присоединению в пределах границ участка, указанные в технических условиях (п. 8.1); после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (п. 8.2); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации (п. 8.3); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к энергетическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации (п. 8.4); надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение (п. 8.5); надлежащим образом уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности энергоснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников энергоснабжения (п. 8.5, 8.6).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: заявитель вносит 100% платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных дней со дня заключения Договора, размер платы составляет 550,90 руб. (п. 10, 11).

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору, другая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает неустойку в размере 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения Договора и общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. 

Пунктом 15 Технических условий предусмотрено, что срок их действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Судом также установлено, что ПАО «МРСК Северо-Запада» фактически выполнило мероприятия, необходимые для подключения объекта в точке присоединения, и уведомило об этом ФИО1 30.01.2018, а так же повторно уведомило ответчика 26.08.2019.

При этом ФИО1 не были исполнены в полном объеме мероприятия, предусмотренные Договором технологического присоединения от 02.08.2016 и Техническими условиями от 11.10.2017, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

26.08.2019 ПАО «МРСК Северо-Запада» направило в адрес ФИО1 претензию о невыполнении в срок мероприятий по осуществлению технологического присоединения.

30.11.2019 истец направил ФИО1 уведомление об истечении срока исполнения мероприятий по договору от 02.08.2016 а также соглашение о расторжении договора и акт выполненных работ. Ответчику было предложено уведомить об исполнении принятых на себя обязательств либо подписать соглашение о расторжении договора и акт выполненных работ.

25.09.2019 ПАО «МРСК Северо-Запада» повторно направило ответчику претензию об истечении срока исполнения мероприятий по договору от 02.08.2016.

Обращаясь в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» указало на существенное нарушение ответчиком условий данного договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Исходя из положений пп. 2 п. 1 ст. 450, п. п. 3, 12.1, 14, 16, 16.3, 16.5, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, суд исходит из того, что непроведение ответчиком в полном объеме мероприятий, указанных в технических условиях, является существенным нарушением условий договора, что влечет последствия, предусмотренные пп. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ провозглашает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Учитывая, что в ходе рассмотрения дела установлено, что ответчиком обязательства по договору исполнялись ненадлежащим образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка, предусмотренная Договором.

Учитывая, что в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, а истцом заявлены требования о взыскании неустойки в период с 20.08.2019 по день вынесения решения судом, в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 13744,50 руб. (550 * 10,5 (ставка рефинансирования) * 0,014 * 170).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства и приведенные выше нормы материального права, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

По правилам статьи 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать госпошлину в размере 6400 руб., уплаченную истцом при подаче искового заявления.

Руководствуясь ст.ст. 233-244 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки, удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2016 ...., заключенный между Публичным акционерным обществом «МРСК Северо-Запада» в лице производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, 

<

...> г. года рождения, уроженца ...., проживающего по адресу: .... в пользу Публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» (ИНН ...., ОГРН .... от 

<

...> г.) неустойку в размере 13744 рубля 50 коп., государственную пошлину в размере 6400 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Ухтинского городского суда - Хазиева С.М.