Дело №

УИД: 91RS0№-09

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

24 апреля 2025 года 

<

адрес>

Киевский районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего судьи – Хулаповой Г.А.,

при секретаре – ФИО4,

с участием ответчика – ФИО5

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 в лице представителя ФИО3 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителей,

установил:

ФИО2 в лице представителя ФИО3 обратилась в суд с вышеуказанным исковым заявлением, в котором просит понудить ГУП РК «Крымэнерго» в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить присоединение электроустановок, расположенных по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), к электрическим сетям в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и в соответствии с техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользуистца неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 17 667,72 рублей в соответствии с п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, рассчитанную по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору с ДД.ММ.ГГГГ до дня фактического исполнения решения суда в размере 430,92 рублей за каждый день просрочки исполнения ГУП РК «Крымэнерго» обязательств по договору, взыскать компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, неустойку с момента вступления в силу решения суда по день фактического исполнения обязательства по договору в размере 100 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем истечения двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, и по день фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения.

Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, со стороны истца обязательства по договору, в части выполнения технических условий по присоединению, исполнены, работы, подлежащие выполнению ответчиком, оплачены, однако ответчиком, в нарушение условий договора объект в указанный в договоре срок подключен к энергоносителям не был, ответчик свои обязательства не исполнил, в связи с чем истцом ответчику направлена претензия о незамедлительном подключении электроэнергии на объект.

Истец и его представитель в судебное заседание не явились. От представителя истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца.

Представитель ответчика ФИО5 в судебном заседании поддержала письменные возражения на исковое заявление, в которых просит отказать в удовлетворении исковых требований частично, снизить сумму морального вреда, неустойки, штрафа. Указала на то, что на день рассмотрения дела уже осуществлено подключение электроустановок истца, расположенных по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), к электрическим сетям в рамках заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и в соответствии с техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ №, в связи с чем, в данной части исковых требований просила отказать. 

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела и оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истец ФИО2 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №).

ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Разделом III договора предусмотрена плата за технологическое присоединение и порядок расчетов. Согласно приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, свидетельствующим об оплате 103 422,09 рублей, ФИО2 частично оплатила за технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с порядком, регламентированным п. 11 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 4 договора неотъемлемой частью договора являются технические условия. В соответствии с п. 12 технических условий срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 8.2 договора заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка заявителя уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации. ФИО2 во исполнение данного пункта договора подготовлена проектная документация, которая согласована сетевой организацией, о чем получено письмо ГУП РК «Крымэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ №. Также на официальный адрес электронной почты сетевой организации направлено уведомление о выполнении технических условий. Данное уведомление также направлено на официальный адрес электронной почты 

<

адрес>ных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго».

Таким образом, все обязанности, предусмотренные договором о технологическом присоединении к электрическим сетям, выполнены ФИО2 в полном объеме.

ГУП РК «Крымэнерго» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя по адресу 

<

адрес> (кадастровый №), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт, в том числе существующая мощность 9,5 кВт; категория надежности третья (100 кВт); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 5 договора).

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

Таким образом, сторонами заключён договор технологического присоединения, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электроэнергетике», и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, от ДД.ММ.ГГГГ № (Правила №).

На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила №), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14, 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 4 Правил №, любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с указанными Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Согласно пп. «в» п. 7 Правил №, стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с пп. «а», «б» п. 16 Правил №, договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, с также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Как следует из буквального содержания условий заключенного между сторонами договора и технических условий к нему, сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (п. 6).

Пунктом 8 договора установлено, что заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате счета; в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам.

Пунктом 10 Технических условий для присоединения к электрическим от ДД.ММ.ГГГГ № на сетевую организацию возложено осуществить ряд действий.

В ходе рассмотрения дела установлено, что согласно акту об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ № объект недвижимости истца подключен к электрической сети.

Изложенное в совокупности свидетельствует о несвоевременном неисполнении ответчиком своих обязательств по договору заключенного с истцом. Причины такового несвоевременного исполнения своих обязательств по договору со стороны ГУП РК «Крымэнерго» не связаны с действиями истца.

Таким образом, поскольку ответчиком в срок, предусмотренный договором, технологическое присоединение принадлежащего истцу объекта не осуществлено, суд приходит к выводу о нарушении прав истца, как потребителя.

Разрешая исковые требования, суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в порядке ст. 67 ГПК РФ, фактические обстоятельства дела, поскольку фактическое технологическое присоединение ГУП РК «Крымэнерго» осуществлено, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в части возложения на ответчика обязанности в осуществлении технологического присоединения.

Вместе с тем, суд считает обоснованными доводы истца о наличии оснований для взыскания неустойки.

В соответствии с разъяснениями пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Поскольку технологическое присоединение объекта недвижимости истца к электрическим сетям фактически осуществлено ДД.ММ.ГГГГ, а срок исполнения обязательств ответчика истёк ДД.ММ.ГГГГ, размер неустойки, подлежащей взысканию, составляет таким образом - 40 506,48 рублей.

Разрешая вопрос о размере компенсации морального вреда, принимая во внимание характер и объем причиненных истцу нравственных страданий, фактических обстоятельств причинения морального вреда, учитывая требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца компенсации морального вреда в размере 1000 рублей.

С учетом размера неустойки и компенсации морального вреда, подлежащих взысканию в пользу истца, суд определяет и размер штрафа в размере 20 753,24 рублей, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".

Рассматривая требования истца о взыскании судебной неустойки по ст. 308.3 ГК РФ, суд, учитывая изложенные выше обстоятельства, не находит основания для удовлетворения данного требования.

Также в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковое заявление ФИО2 в лице ФИО3 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, паспорт серии 4619 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 500-053, адрес регистрации: 

<

адрес>): неустойку 40 506, 48 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя в сумме 20 753,24 рублей, а всего взыскать 62 259,72 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в доход местного бюджета 4000 рублей в счет государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья Г.А. Хулапова