Дело №

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

в связи с утверждением мирового соглашения

ДД.ММ.ГГГГ Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Калашниковой Т.А.,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Тантал» о возложении обязанности устранить недостатки, и компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л :

Истец обратился в суд с указанным выше исковым заявлением. Просил обязать ответчика устранить существенные недостатки в квартире, принадлежащей истцу, расположенной по адресу: 

<

адрес>; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>. Закону «О защите прав потребителей».

Представитель истца ФИО7, действующая на основании доверенности, и генеральный директор ООО «Тантал» ФИО4 в судебном заседании подали заявление о заключении мирового соглашения.(л.д.______)

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания.

Согласно ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ - повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и несовершеннолетнего ребенка, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, руководствуясь ст.ст. 220,221 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами, по которому стороны договорились о следующем: ФИО1 , именуемая в дальнейшем «Истец», в лице представителя ФИО3, действующая на основании доверенности 

<

адрес>0 от 31.10. 2016 г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» (далее - «Ответчик»), в лице Генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» являющиеся сторонами в деле № (2-7979/2016;) ~ М-7500/2016 рассматриваемом в Центральном районном суде 

<

адрес> в целях урегулирования спорных отношении и прекращения производства по указанному делу стороны спора, руководствуясь ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключили настоящее мировое соглашение о следующем:

Ответчик обязуется в установленные настоящим мировым соглашение сроки, устранить в полном объеме недостатки и произвести работы, изложенные в пунктах 2-4 настоящего мирового соглашения, в 

<

адрес> расположенной по адресу: 

<

адрес> (далее- квартира истца) 

По результатам осмотра квартиры истца, были выявлены следующие недостатки и определен следующий порядок их устранения:

- трещина на балконе в ограждении лоджии в районе деформационного шва;

- деформационный шов по наружной стене – трещина со стороны балкона, со стороны квартиры (ширина раскрытия 2 см);

- трещина на стене в комнате (ширина раскрытия 1 см)

Способ и порядок устранения выявленных недостатков: Вскрытие (расшитие) деформационного шва; ремонт уплотнений деформационных швов (конопатка швов просмоленной паклей, заделка упругими прокладками, заполнение швов тепло-гидроизолирующим материалом); восстановление отделочного слоя. 

3. Ответчик обязуется произвести демонтаж гипсокартонного листа, установленного во время проведения ремонтных в июле 2013 года в месте расположения стояка отопления и деформационного шва, и в случае выявления в месте расположения демонтированного листа гипсокартона недостатков (трещин, зазоров), осуществить их устранение. 

4. Стороны договорились, что по результатам ремонтно-восстановительных работ, предусмотренных пунктами 2-3 настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется осуществить работы по оклейке обоев в квартире истца, своими силами с использованием материала приобретаемого за счет Истца.

5. Указанные недостатки и ремонтно-восстановительные работы, Ответчик обязуется устранить в полном объеме собственными силами, за счет собственных средств (за исключением работ, предусмотренных п.4), в срок, начиная с 10 мая 2017г. до 31 мая 2017 года.

6. Истец обязуется в предусмотренный п. 5 настоящего мирового соглашения срок обеспечить доступ в квартиру истца работников ООО «Тантал» для проведения ремонтно-восстановительных работ и по окончанию принять результат выполненных работ.

7. Ответчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу истца, если этот вред возник по вине Ответчика и в процессе выполнения предусмотренных настоящим мировым соглашением работ. 

8. Обязанности Ответчика считаются исполненными надлежащим образом с момента подписания между сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.

9. Соглашением сторон устанавливается двухлетний срок обнаружения скрытых недостатков результата выполненных ремонтно-восстановительных работ в соответствии с п. 2, 3 настоящего мирового соглашения. Указанный срок исчисляется со дня подписания между сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

10. В случае обнаружения истцом ФИО1 в течение двухлетнего срока скрытых недостатков, истец имеет право на безвозмездное устранение выявленных недостатков ответчиком в течение 1 (одного) месяца со дня обнаружения недостатков или иного срока согласованного между обеими сторонами. В случае неустранения выявленных недостатков ответчиком в указанные сроки, истец имеет право поручить исправление работ другому лиц, с последующей компенсацией расходов, понесенных для устранения выявленных скрытых недостатков.

11. Истец отказывается от следующих заявленных исковых требований:

- о взыскании с ответчика ООО «Тантал» в пользу истца ФИО1 компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты>; 

- о взыскании с ответчика ООО «Тантал» в пользу истца ФИО1 штрафа в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение исполнителем в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

12. В случае надлежащего исполнения сторонами условий мирового соглашения в полном объеме стороны не будут иметь каких-либо претензий и требований друг к другу.

13. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителей и иные расходы сторон, связанные с делом по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

14. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, лицам участвующим в деле известны и понятны.

15. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для каждой стороны гражданского дела и для представления в материалы дела Центрального районного суда г. Читы соответственно.

Производство по делу по иску ФИО1 к ООО «Тантал» о возложении обязанности устранить недостатки, и компенсации морального вреда, прекратить. 

На определение может быть подана частная жалоба в Забайкальский краевой суд через Центральный районный суд г.Читы в течение пятнадцати дней.

Судья: подпись Калашникова Т.А.

Подлинник документа находится в материалах

гражданского дела №2-494-17 

Центрального районного суда г.Читы