Дело № 2-1756/2024

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Волгоград 23 мая 2024 года

Советский районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Макаровой Т.В.,

при секретаре Архипове Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, штрафа, судебных и почтовых расходов,

У С Т А Н О В И Л:

Истцы ФИО1, ФИО2 обратились в суд с иском к ООО «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, штрафа, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что 26 декабря 2022 года между истцами ФИО2, ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» заключен договор №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Согласно п. 2.1 Договора «Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимого имущества, а именно многоквартирный жилой дом адрес, и после

получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, указанный в п.2.2, настоящего Договора (далее - «Объект»), а Участник обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на основании передаточного акта.

В соответствии с п. 2.2 Договора и Приложении №2 к Договору, объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира общей проектной площадью 56, 71 (пятьдесят шесть целых семьдесят одна сотая) кв. м., проектный номер 612, расположенная на 6 (шестом) этаже первого подъезда (первой секции) по проекту в многоквартирном жилом доме адрес

В соответствии с пунктом 2.7 Договора Планируемый срок завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома установлен на 1 квартал 2023 года.

В соответствии с п.2.8. Договора Срок передачи Объекта Участнику: 30.09.2023года.

В соответствии с п. 5.2. Договора Цена настоящего Договора определена по соглашению Сторон и составляет 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

22 сентября 2023 года между истцами ФИО2 (Далее по тексту «Участник 1»), ФИО1 (Далее по тексту «Участник 2») и ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» (именуемое в дальнейшем «Застройщик») в лице Ф.И.О.1, действующей на основании доверенности №34/118-н/34 - 2020-1-1201 от 06.08.2020 г., заключено дополнительное соглашение №1 к договору №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года.

В соответствии с пунктом 2.7 Дополнительного соглашения №1 планируемый срок завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома установлен на 3 квартал 2023 года.

В соответствии с п.2.8. Договора Срок передачи Объекта Участнику: 30.11.2023 года.

26 февраля 2024 года ответчик ООО «Специализированный застройщик Рент- Сервис» справкой, выданной истцам подтвердил, что в отношении именно двухкомнатной квартиры общей проектной площадью 56, 71 (пятьдесят шесть целых семьдесят одна сотая) кв. м., проектный номер 612, расположенная на 6 (шестом) этаже первого подъезда (первой секции) по проекту в многоквартирном жилом доме адрес, являющейся предметом договора №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года оплата произведена в полном объеме в размере 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек, и отсутствии каких либо претензий по оплате к истцам.

Таким образом, обязательства по оплате обусловленной договором цены в сумме 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек истцами выполнены в полном объеме и в срок.

19 февраля 2024 года между истцами и ответчиком ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» был подписан акт приема-передачи долевого строительства к договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года.

Таким образом, в установленный Договором срок, объект долевого участия истцам не передан, что свидетельствует о нарушении Застройщиком условий заключенного договора о передаче объекта долевого строительства 30.11.2023 года.

С целью соблюдения досудебного урегулирования возникшего спора, истцами 25.03.2023года в адрес ответчика посредством почтового отправления, была направлена соответствующая досудебная претензия, которая осталась без удовлетворения.

Просил взыскать с ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в пользу ФИО2 и ФИО1 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 462877 рублей 09 копеек в размере 487251 рубль 83 копейки, по 243625 рублей 91 копейки в пользу каждого, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, по 5000 рублей в пользу каждого истца, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 1900 рублей по 950 рублей в пользу каждого истца, расходы на оплату услуг представителя в размере 10000 рублей по 5000 рублей в пользу каждого, штраф в размере 50%.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в пользу ФИО1 почтовые расходы в размере 500 рублей.

Истцы ФИО1, ФИО2 в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом и своевременно, просили рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом и своевременно, предоставил суду возражение, в котором просил применить положения ст.333 ГК РФ и предоставить отсрочку исполнения решения.

Исследовав и проверив материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска, исходя из следующего.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства, если иное не установлено договором.

В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Статьей 6 этого же закона предусмотрено, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 10 ФЗ № 214 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В судебном заседании установлено, что 26 декабря 2022 года между истцами ФИО2, ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» заключен договор №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Согласно п. 2.1 Договора «Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимого имущества, а именно многоквартирный жилой дом адрес, и после получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, указанный в п.2.2, настоящего Договора (далее - «Объект»), а Участник обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на основании передаточного акта.

В соответствии с п. 2.2 Договора и Приложении №2 к Договору, объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира общей проектной площадью 56,71 (пятьдесят шесть целых семьдесят одна сотая) кв. м., проектный номер 612, расположенная на 6 (шестом) этаже первого подъезда (первой секции) по проекту в многоквартирном жилом доме адрес

В соответствии с пунктом 2.7 Договора Планируемый срок завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома установлен на 1 квартал 2023 года.

В соответствии с п.2.8. Договора Срок передачи Объекта Участнику: 30.09.2023года.

В соответствии с п. 5.2. Договора Цена настоящего Договора определена по соглашению Сторон и составляет 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

22 сентября 2023 года между истцами ФИО2 (ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Рент-Сервис» заключено дополнительное соглашение №1 к договору №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года.

В соответствии с пунктом 2.7 Дополнительного соглашения №1 планируемый срок завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома установлен на 3 квартал 2023 года.

В соответствии с п.2.8. Договора Срок передачи Объекта Участнику: 30.11.2023 года.

26 февраля 2024 года ответчик ООО «Специализированный застройщик Рент- Сервис» справкой, выданной истцам подтвердил, что в отношении именно двухкомнатной квартиры общей проектной площадью 56, 71 (пятьдесят шесть целых семьдесят одна сотая) кв. м., проектный номер 612, расположенная на 6 (шестом) этаже первого подъезда (первой секции) по проекту в многоквартирном жилом доме №27 в квартале «Приозерный» жилого микрорайона «Родниковая долина-1» в 

<

...> являющейся предметом договора №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года оплата произведена в полном объеме в размере 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек, и отсутствии каких либо претензий по оплате к истцам.

Таким образом, обязательства по оплате обусловленной договором цены в сумме 5 424 341 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи триста сорок один) рубль 00 копеек истцами выполнены в полном объеме и в срок.

19 февраля 2024 года между истцами и ответчиком ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» был подписан акт приема-передачи долевого строительства к договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №272ВГД/27ПС+1(ПЛ)-Н участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2022 года.

Таким образом, в установленный Договором срок, объект долевого участия истцам не передан, что свидетельствует о нарушении Застройщиком условий заключенного договора о передаче объекта долевого строительства 30.11.2023 года.

Согласно п. 7.10 Договора в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Объекта Участнику, Застройщик уплачивает Участнику неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены Договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере.

С целью соблюдения досудебного урегулирования возникшего спора, истцами 25.03.2023года в адрес ответчика посредством почтового отправления, была направлена соответствующая досудебная претензия, которая осталась без удовлетворения.

Истцы просят взыскать неустойку за период с 01.12.2023 по 18.02.2024 в размере 462877,09 рублей из расчета 5424341,00 руб. х 80 дней. х 1/150 х 15%/100%

Согласно п. 1(1) Постановления Правительства РФ от 18 марта 2024 г. № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени),иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» в период с 1 июля 2023 г. до 31 декабря 2024 г. включительно размер процентов, неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренных частью 6 статьи 5, частью 2 статьи 6, частями 2 и 6 статьи 9, а также подлежащих уплате с учетом части 9 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в отношении которых не применяются особенности, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, начисляются исходя из текущей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на день исполнения обязательств, но не выше ключевой ставки банка Российской Федерации, действовавшей по состоянию на 1 июля 2023 г.

Ключевая ставка Центрального банка РФ по состоянию на 01 июля 2023 г. составляла 7,5%.

Стороной ответчика представлен расчет, согласно которому размер неустойки за период с 01.12.2023 по 18.02.2024 составляет 227919,33 рублей из расчета 5424341 х 80 x2 х 1/300 х 7,5%.

Судом проверен расчет ответчика и принимается в качестве допустимого по делу, поскольку он является арифметически верным и соответствует материалам дела.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

При этом пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляя право суда уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Исходя из положений вышеприведенных правовых норм и разъяснений в их взаимосвязи, суд при определении размера подлежащей взысканию неустойки вправе применить пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снизить ее размер в случае установления явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения ответчиком обязательств.

Суд полагает необходимым отметить, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение и одновременно предоставляет суду право снижения ее размера в целях устранения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств, что соответствует основывающемуся на общих принципах права, вытекающих из Конституции Российской Федерации, требованию о соразмерности ответственности.

С учетом обстоятельств рассматриваемого дела, а также принимая во внимание компенсационную природу неустойки, которая должна быть направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, суд не усматривает оснований для снижения размера неустойки, в связи с чем взыскивает с ответчика в пользу истцов неустойку в размере 216 975,64 рублей, по 108487,82 рублей в пользу каждого истца.

В соответствии со ст.4 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Целью договора долевого участия в строительстве, заключенного между истцами и ответчиком, являлось приобретение в строящемся доме конкретной квартиры для личных нужд, то есть для проживания.

Таким образом, истец, приобретая квартиру для личных нужд и инвестируя денежные средства на приобретение жилого помещения (квартиры), являлся потребителем оказываемых ООО «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» услуг.

Таким образом, законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе строительную, деятельность, распространил действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» на отношения по участию граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и тем самым предоставил им право требовать возмещения штрафа и морального вреда за нарушение соответствующих обязательств.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст.151 ГК РФ - если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Необходимо также учитывать требования ст.1101 ГК РФ, предусматривающей, что компенсация морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера денежной компенсации морального вреда должны учитываться обстоятельства дела, материальное положение сторон, а также требования разумности и справедливости.

К условиям, влекущим применение компенсации морального вреда, относятся противоправные действия, наличие самого морального вреда, причинная связь между противоправным поведением и моральным вредом, вина нарушителя. 

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание характер причинённых истцу нравственных страданий. 

Исходя из требований разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика ООО «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, по 1000 рублей в пользу каждого истца.

По мнению суда, указанная сумма не является завышенной.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

При таких обстоятельствах, с ответчика ООО «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» подлежит взысканию штраф в пользу истцов в размере 109487,82 рублей (216975,64 рублей +2000/2)/2), по 54743,91 рублей в пользу каждого истца.

Главой 7 ГПК РФ определено понятие судебных расходов и установлен порядок их взыскания.

Частью 1 ст. 88 ГПК РФ предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21 декабря 2004 года N 454-О и применимой к гражданскому процессу, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Интересы истцов при рассмотрении настоящего дела представлял Ф.И.О.7 с которым был заключен договор об оказании юридических услуг и оплачено 10 000 рублей.

Исходя из требований ст.100 ГПК РФ, учитывая конкретные обстоятельства дела, исходя из принципов разумности, справедливости, объема оказанных представителем юридических услуг, сложности дела, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истцов расходы по оплате услуг представителя в размере 10000 рублей, по 5000 рублей в пользу каждого истца.

Указанную сумму суд находит соразмерной объему защищаемого права.

Истцом ФИО1 заявлены требования о взыскании почтовых расходов в размере 500 рублей.

Указанные расходы суд признает необходимыми и подлежащими включению в судебные издержки по правилам абзаца 9 ст. 94 ГПК РФ.

Однако требования истца ФИО1 суд полагает необходимым удовлетворить частично в размере 100 рублей, поскольку каких – либо достоверных документальных доказательств несения почтовых расходов в большем размере суду не представлено и материалы дела не содержат.

Кроме этого истцами понесены расходы на нотариальное удостоверение доверенности в размере 1900 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истцов по 950 рублей в пользу каждого истца.

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Кроме того, в соответствии со ст.89 ГПК РФ, льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу ч. 1 ст. 333.19 НК РФ государственная пошлина по данному иску составляет 5369 рублей 76 копеек.

Истцами были заявлены требования о компенсации морального вреда, которые являются требованиями нематериального характера. В силу ч. 3 ст. 333.19 НК РФ государственная пошлина составляет 300 руб.

При таких обстоятельствах, поскольку истцы на основании закона были освобождены от уплаты государственной пошлины, и решение суда состоялось в его пользу, то с ответчика ООО «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» суд полагает необходимым взыскать государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в размере 5869 рублей 76 копеек.

Разрешая ООО «СЗ Рент-Сервис» о предоставлении отсрочки исполнения решения, суд приходит к следующему.

Согласно ч.1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 18 марта 2024 г. № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства...» в отношении применения неустойки (штрафов, пени), процентов, возмещения убытков и иных финансовых санкций к застройщику в части их уплаты, предусмотренных настоящим пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления в силу настоящего постановления, предоставляется отсрочка до 01 января 2025 года. 

Указанные требования, содержащиеся в исполнительном документе, предъявленном к исполнению со дня вступления в силу настоящего постановления, в период отсрочки не исполняются банками или иными кредитными организациями, осуществляющими обслуживание счетов застройщика.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным заявление удовлетворить и предоставить ответчику ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» отсрочку исполнения решения суда в части взыскания неустойки и штрафа по 31 декабря 2024 года включительно.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1, ФИО2 к ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, штрафа, судебных и почтовых расходов, - удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в пользу ФИО1, неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 108487 рублей 82 копейки, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 950 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 рублей, штраф в размере 54 743 рубля 91 копейки, почтовые расходы в размере 100 рублей.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в пользу ФИО2 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 108487 рублей 82 копейки, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 950 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 5000 рублей, штраф в размере 54 743 рубля 91 копейки.

В удовлетворении остальной части исковых требований с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рент-Сервис» в пользу ФИО1, ФИО2 о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, компенсации морального вреда, почтовых расходов свыше взысканных сумм, - отказать.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» в доход бюджета муниципального образования город-герой Волгоград госпошлину в размере 5869 рублей 76 копеек.

Предоставить ООО «Специализированный застройщик Рент-Сервис» отсрочку исполнения решения суда в части взыскания неустойки и штрафа по 31 декабря 2024 года включительно.

Решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца после изготовления решения суда в окончательной форме в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда путем подачи апелляционных жалоб через Советский районный суд г. Волгограда.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 30 мая 2024 года.

Судья подпись Т.В. Макарова

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные 

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные

иные данные