УИД: 52RS0008-01-2024-004296-68 Дело № 2-3653/2024 

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12.11.2024г Приокский районный суд города Нижнего Новгорода

в составе: судьи Чирковой М.А.

при секретаре Долиной А.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей,

у с т а н о в и л :

ФИО1 обратился с иском к ФИО2 о защите прав потребителей. В обоснование требований указано, что 23 мая 2024 года между ФИО3 и ФИО4 заключен договор подряда № на строительство. Согласно п. 1 Договора ФИО5 обязан совершить строительные работы, предусмотренные договором по адресу: д.

<

адрес>. Согласно п.5.1 Договора Общая стоимость работ составляет 800 000 руб. Согласно п.5.2 Договора ФИО3 получил аванс в размере 100 000 руб. и по расписке 785 000 руб. Стороны определили срок начала работы 31 мая 2024 года, срок окончания работы 15 июня 2024 года. Получив денежные средства, ФИО3 выполнил только планировку и подготовку участка, полагает, что стоимость этих работ составляет 200 000 руб от цены договора. ФИО3 не выполнил согласно условиям договора следующие виды работ: 1. Укладку геотекстиля, песка, армирования и заливку бетона М300 5,5х6,5 м, 2. Возведение стен из гaзоблоков, 3. Установка металлоконструкции, 4. Засыпка щебня под навес, 5. Возведение крыши над гаражом, 6. Установка цветного профнастила. В силу прямого указания закона ответчик несёт всю полноту ответственности за выполняемую им работу до момента сдачи её результата заказчику. B нарушение требований законодательства и условий договора принятые на себя обязательства ФИО3 не исполнены. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, a заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно п.3.1.1. подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в полном соответствии c заданием заказчика, в соответствии c действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности. Согласно п.3.1.4 Договора Подрядчик обязан в установленные Договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику. ФИО3 по месту жительства и регистрации направлены претензии o возврате денежных средств по неисполненному обязательству по договору. Однако, ФИО3 денежные средства не возвратил, уклоняется от встреч и выплаты денежных средств. 785 000 руб. + 100 000 руб.= 885 000 руб. переданные ФИО3 Выполнены работы на сумму 200 000 руб. 885 000 руб. -200 000 руб. = 685 000 руб. долг по договору Неустойка за нарушение сроков выполнения работ (статья 28 Закона РФ «O защите прав потребителей»): Долг за невыполненные работы по договору: 685 000 руб. Начало периода просрочки: 16.06.2024 Дата расчета : 06.09.2024 Процент: 3%, но не более чем 100% от цены товара Поскольку неустойка не может превышать цену выполнения работы, полагает, что неустойка подлежащая взысканию составляет 300 000 руб. Полагает, что c ответчика должен быть взыскан моральный вред в размере 10 000 руб. Просит взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 за невыполненные строительные работы по договору подряда № на строительство денежные средства в размере 685 000 руб, неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы 300 000 руб, компенсацию морального вреда 10 000 руб.

В дальнейшем истец уточнил исковые требования, просит 1. Расторгнуть договор подряда на строительство от 23 мая 2024 года между ФИО2 и ФИО1. 2. Взыскать c ФИО2 в пользу ФИО1 за невыполненные строительные работы по договору подряда № от 23 мая 2024 года на строительство денежные средства в размере 685 000 руб. 3. Взыскать c ФИО2 в пользу ФИО1 неустойку за нарушения установленных сроков выполнения работы денежные средства в размере 300 000 руб. 4. Взыскать c ФИО2 в пользу ФИО6 

Александра Александровича компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. 

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, суд исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии со ст.730 Гражданского кодекса РФ 1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). 3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии со ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

В соответствии со ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Установлено, что 29.05.2024г между ФИО1 и ФИО2 заключен договор подряда № на строительство, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить следующие виды работ: 1. Планировка и подготовка участка, 2. Укладка геотекстиля, песка, армирование и заливка бетона М300 5,5х6,5 м (+0,5) = 5,5х7 м, 3. Возведение стен из газоблоков, 4. Установка металлоконструкции (труба 100х100), 5. Засыпка щебня под навес, 6. Возведение крыши над гаражом и навесом, 7. Установка цветного профнастила. Все работы должны быть выполнены по адресу 

<

адрес> (п. 1 договора).

Обеспечение выполняемых подрядчиком работ и их выполнение подрядчик осуществляет своими силами и средствами, на своем оборудовании, из собственных материалов (п. 2.1 договора).

Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору в полном соответствии с заданием заказчика, в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, в установленные настоящим договором сроки завершить работы и сдать результат работ заказчику (п. 3.1.1, 3.1.4 договора).

Производимые работы: начало работ 31.05.2024г, окончание работ 15.06.2024г (п. 4.1 договора).

Общая стоимость работ 800 000 руб. Работы оплачиваются в 2 этапа: аванс в размере 100 000 руб перед началом работ (п. 5.1, 5.2 договора).

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с настоящим договором с оформлением актов приема выполненных работ (п. 6.1 договора).

В случае невыполнения работ в определенные договором сроки по п.4.1 настоящего договора не по вине заказчика, заказчик вправе выставить подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы работ по договору за каждый просроченный день (п. 7.4 договора).

В счет исполнения договора истцом ответчику переданы денежные средства в размере 785 000 руб согласно расписке, составленной ответчиком, аванс в размере 100 000 руб.

В установленный срок работы не выполнены. Согласно объяснениям истца в рамках исполнения договора выполнены работы частично по планировке и подготовке участка стоимостью 200 000 руб. Доказательств обратного ответчиком не представлено.

14.08.2024г истец направила ответчику претензию об отказе от исполнения договора, возврате денежных средств, убытков, которая отставлена ответчиком без удовлетворения.

Т.о. между сторонами заключен договор подряда, по которому истец внес в счет оплаты сумму 885 000 руб. Работы выполнены в части планировки и подготовки участка стоимостью 200 000 руб.

В связи с этим внесенная сумма с учетом выполненных работ в размере 685 000 руб (=885 000 - 200 000) подлежит взысканию с ответчика.

В связи с нарушением срока выполнения работ подлежит взысканию неустойка из расчета 3% в день от суммы стоимости работ.

Размер неустойки за период с 16.06.2024г по 06.09.2024г составит 685 000* 3%*83= 1 705 650 руб, но не более цены договора. При этом истцом заявлены требования о взыскании неустойки в размере 300 000 руб.

Неустойка в сумме 300 000 руб подлежит взысканию с ответчика.

В связи с нарушением условий договора, несвоевременным его исполнением, истице причинен моральный вред. В счет возмещения морального вреда с учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени нарушения прав истицы, подлежит взысканию сумма 10 000 руб.

С ответчика подлежит взысканию штраф в сумме (685 000 +300 000 +10 000)х50%=497 500 руб.

С учетом ст.333 Гражданского кодекса РФ размер штрафа подлежит снижению до 200 000 руб.

С ответчика подлежит взысканию госпошлина в госдоход в сумме 13 050 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда на строительство от 23 мая 2024 года, заключенный между ФИО2 и ФИО1. 

Взыскать с ФИО2 (п-т №) в пользу ФИО1 (п-т №) денежные средства в размере 685 000 руб, неустойку в размере 300 000 руб, компенсацию морального вреда 10 000 руб, штраф 200 000 руб.

Взыскать с ФИО2 (п-т №) госпошлину в госдоход в сумме 13 050 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд города Нижний Новгород в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд города Нижний Новгород в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья М.А.Чиркова

Мотивированное решение изготовлено 21.11.2024г.