Дело № 2-1676/17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

17 мая 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе

председательствующего судьи Николаевой Н.Д.,

при секретаре Журавель С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО6, ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6, ФИО1 обратились в суд с иском к ООО «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

В обоснование иска указали, что 01.11.2015 между ними и ответчиком был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в соответствии с которым ответчик обязался осуществить строительство многоквартирного жилого дома, сдать в эксплуатацию и передать в собственность участнику после окончания строительства однокомнатную квартиру, проектный номер 78, общей площадью 42,09 кв.м. Цена договора составила 1 759 600 рублей. Срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее 06.04.2016.

Свои обязательства по указанному договору истцы исполнили в полном объеме, оплатили полностью стоимость квартиры. Квартира была передана 26.07.2016, что подтверждается актом приема-передачи объекта долевого строительства, то есть с нарушением установленного законом срока.

Истцы обращались к ответчику с претензией, в которой потребовали в досудебном порядке урегулировать сложившийся спор, выплатить им неустойку за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства. Однако ответ на претензию не поступал. Полагает, что действиями ответчика им также причинен моральный вред, который они оценивают в 50 000 руб.

Просят взыскать с ООО «Запад-2» в свою пользу в равных долях: неустойку в связи с нарушением предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с 07.04.2016 по 26.07.2017 в размере 143 231,44 руб., 50 000 руб. в счет компенсации морального вреда, штраф в размере 50 % от присужденной судом денежной суммы; судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб., расходы по оплате доверенности в размере 2 200 руб.

Истцы ФИО2 в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены.

В судебном заседании представитель истцов ФИО3, действующий на основании доверенности от 20.04.2017, и представитель ответчика ООО «Запад-2» ФИО4, действующий на основании доверенности от 21.07.2016, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого: ООО «Запад-2» обязуется выплатить ФИО2 в срок до 05.06.2017 неустойку в связи с нарушением срока передачи объекта долевого строительства за период с 07.04.2016 по 26.07.2016 в размере 130 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 4000 руб., судебные расходы в размере 6 200 руб., в равных долях на каждого по 70 100 руб., а ФИО6 и ФИО1 отказываются от остальных своих исковых требований в полном объеме.

Производство по делу просят прекратить. 

В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Условия мирового соглашения изложены сторонами в письменном виде, заявление подписано ими и приобщено к материалам дела. Полномочия представителя истцов и представителя ответчика на заключение мирового соглашения предусмотрены в доверенностях. 

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ. 

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, суд считает, что соглашение подлежит утверждению, а производство по делу следует прекратить.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, ст. 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по иску ФИО6, ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Запад-2» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов, по условиям которого: 

общество с ограниченной ответственностью «Запад-2» обязуется выплатить ФИО6 и ФИО5 Александровне в срок до 05.06.2017 неустойку в связи с нарушением срока передачи объекта долевого строительства за период с 07.04.2016 по 26.07.2016 в размере 130 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 4000 руб., судебные расходы в размере 6 200 руб., в равных долях на каждого по 70 100 руб., а ФИО6 и ФИО1 отказываются от остальных своих исковых требований в полном объеме.

Производство по настоящему делу прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 дней.

Судья Н.Д. Николаева