Дело №2-340/2024 

УИД 43RS0017-01-2024-000435-50

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Кирово-Чепецк 04 марта 2024 года

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Ефимовой Л.А., при секретаре Блохиной Е.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 2-340/2024 по исковому заявлению Кирово-Чепецкого городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «СтройХлынов» о возложении обязанности,

установил:

Кирово-Чепецкий городской прокурор обратился в суд с иском в интересах РФ и неопределенного круга лиц к ООО «СтройХлынов» о возложении обязанности.

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой проведена проверка по публикации в СМИ на странице группы «Чепецк.Ру» социальной сети ВКонтакте о соблюдении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в деятельности ООО «СтройХлынов», по результатам которой выявлены нарушения. Согласно муниципальному контракту № *** от 18.09.2023, заключенному между МКУ «ДЭС» г.Кирово-Чепецка и ООО «СтройХлынов», ответчик обязался выполнить работы по устройству недостающих искусственных неровностей и улично-дорожной сети МО «Город Кирово-Чепецк» (безопасность движения), окончание работ определено - 06.10.2023, однако, по состоянию на 13.11.2023 работы в полном объеме не выполнены. В адрес директора ООО «СтройХлынов» внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, - нарушения по настоящее время не устранены, работы не выполнены. 

В судебном заседании представитель истца помощник Кирово-Чепецкого городского прокурора Крюкова Е.Ю. вышеуказанные доводы и поддержала. Просит суд обязать ООО «СтройХлынов» выполнить работы в рамках муниципального контракта № *** от 18.09.2023 по устройству недостающих искусственных неровностей на улично-дорожной сети МО «Город Кирово-Чепецк (безопасность движения) по следующим адресам: 

<

адрес> в срок до 01.08.2024.

Представитель третьего лица МКУ «ДЭС» ФИО1 в судебном заседании требования Кирово-Чепецкого городского прокурора поддержала, в дополнении пояснила, что ООО «СтройХлынов» условия муниципального контракта № *** от 18.09.2023 не выполнены, работы не сданы. В продлении срока выполнения работ по указанному контракту ООО «СтройХлынов» отказано.

Представитель ответчика ООО «СтройХлынов» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом по адресу регистрации, направленное по адресу его регистрации судебное заказное письмо возвращено в адрес суда в связи с истечением срока хранения. 

По смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ извещение считается доставленным в том случае, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился, адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи, с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

В соответствии со ст.233 ГПК РФ суд полагает возможным с согласия представителя истца рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 

Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав представленные письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В судебном заседании установлено, что 18.09.2023 между МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» г.Кирово-Чепецка, действующего от имени МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (заказчик), и ООО «СтройХлынов» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №*** на выполнение работ по устройству недостающих искусственных неровностей на улично-дорожной сети МО «Город Кирово-Чепецк» (безопасность движения). (л.д.20-31)

Согласно п.1.3 контракта выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по устройству недостающих искусственных неровностей на улично-дорожной сети МО «Город Кирово-Чепецк» (безопасность движения).

В силу п. 3.1.2 контракта срок окончание выполнения работ установлен по 06 октября 2023 года.

В связи с невыполнением работ по муниципальному контракту №*** от 18.09.2023, МКУ «ДЭС» г. Кирово-Чепецка в адрес директора ООО «СтройХлынов» направлена претензия № 802 от 09.10.2023 с требованием осуществить сдачу выполненных работ в строгом соответствии с условиями контракта. (л.д.32)

Согласно ответу ООО «СтройХлынов» работы по муниципальному контракту не выполнены в срок в связи с нехваткой людей, отсутствием подходящей погоды, планируемый срок завершения работы до 30.10.2023. (л.д.34)

Из сообщения ОГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» от 24.10.2023 следует, что 23.10.2023 сотрудниками отделения ГИБДД в ходе проведенной проверки было установлено ненадлежащее содержание искусственных неровностей вблизи пешеходных переходов по ул. Мелиораторов и пр. Мира г. Кирово-Чепецка Кировской области. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» не может быть принято решение о нарушении требований ГОСТа, поскольку заказчик работы не принял. Срок устранения недостатков определен до 30.10.2023. (л.д.35) 

Согласно ответу ООО «СтройХлынов» работы по муниципальному контракту на дату 03.11.2023 выполнены не в полном объеме, не приняты заказчиком, и будут завершены при наступлении благоприятных погодных условий. (л.д.36)

13.11.2023 прокуратурой города Кирово-Чепецка в адрес директора ООО «СтройХлынов» внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с требованием о безотлагательном рассмотрении представления с участием представителя прокуратуры города и принять исчерпывающие меры к устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих. (л.д.41-43).

13.12.2023 директор ООО «СтройХлынов» в ответе на представление сообщил о частичном устранении выявленных нарушений, которые не выполнены из-за неблагоприятных погодных условий. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудники ООО «СтройХлынов» привлечены к дисциплинарной ответственности. (л.д.44).

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Однако в судебном заседании установлено, что ответчик ООО «СтройХлынов» взятых на себя обязательств по выполнению работ в рамках муниципального контракта № *** от 18.09.2023 не исполняет, достаточных мер к устранению выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд не принял, работы по устройству недостающих искусственных неровностей и улично-дорожной сети МО «Город Кирово-Чепецк» (безопасность движения), по настоящее время не произвел.

Статья 12 ГК РФ предусматривает осуществление защиты гражданских прав путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также к исполнению обязанности в натуре.

Учитывая, что выявленные нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, суд считает необходимым заявленные исковые требования Кирово-Чепецкого городского прокурора удовлетворить в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 235-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Кирово-Чепецкого городского прокурора удовлетворить.

Обязать ООО «СтройХлынов» инн 

<

***>, ОГРН 

<

***>, выполнить работы в рамках муниципального контракта №*** от 18.09.2023 по устройству недостающих искусственных неровностей на уличной сети МО «Город Кирово-Чепецк» (безопасность движения) по следующим адресам: Кировская 

<

адрес>

Ответчик может подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда через Кирово-Чепецкий районный суд.

Иными лицами решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене данного решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления через Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области.

Судья Л.А. Ефимова

Мотивированное решение составлено 11.03.2024.

Судья Л.А. Ефимова