Дело № 2-93/2020

50RS0031-01-2019-012435-10

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 января 2020 года г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Рожновой О.Е.,

при секретаре Бозаджи Е.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» об урегулировании разногласий при заключении договора о технологическом присоединении,

у с т а н о в и л:

Истец обратился с указанным иском к ответчику, в котором просит суд, уточнив требования, урегулировать разногласия, возникшие при заключении Договора, а именно: 

- в п. 3 Договора слова «2 года» заменить словами «9 месяцев»;

- абзацы второй-четвертый п. 5 Договора заменить абзацем вторым следующего содержания: «осуществить действия по строительству газопровода-ввода до точки подключения, а также по подготовке газопровода к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;»;

- абзацы третий-пятый п. 7 Договора исключить;

- абзац третий п. 8 Договора исключить;

- пункт 10 Договора изложить в следующей редакции: «Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) для заявителей 1 категории определяется согласно распоряжению Комитета по ценам и тарифам МО от 11 декабря 2018 года № 332-Р «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения АО "Мособгаз" на территории Московской области на 2019г.» и составляет 65 072,25 рублей (с учетом НДС). Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).»;

- приложение № 6 исключить;

- в п. 7 технических условий № (далее - ТУ) слова «730 дней» заменить словами «9 месяцев»;

- пункт 8.2 ТУ изложить в следующей редакции: «Исполнитель осуществляет строительство газопровода-ввода до объекта капитального строительства, указанного в п. 3 ТУ от источника газоснабжения.»;

- пункт 8.3. ТУ исключить;

- в пункте 9.2. ТУ слова «в соответствии с пунктом 5 Договора» заменить словами «в соответствии с Актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)»;

- пункт 9.3. исключить;

- в пункте 9.4. ТУ слова «535 п.м.» заменить на «не более 200 п.м.»;

- пункт 9.5. ТУ исключить;

взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., расходы по уплате юридических услуг в размере 35 000 руб., сумму уплаченной государственной пошлины в размере 300 руб.

Требования мотивирует тем, что обратился к ответчику 17.07.2019г. с заявкой на технологическое подключение, которая была зарегистрирована 16.08.2019г. 02.09.2019г. АО «Мособлгаз» представил проект технических условий и проект Договора в электронном виде № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения на сумму 4 158 767,92 руб. 03.09.2019г. истец посредством личного кабинета известил ответчика о мотивированном отказе от подписания договора, прикрепив отказ и протокол разногласий, 05.09.2019г. указанный отказ и протокол разногласий были представлены в офис ответчика. 

Ответа на отказ и протокол разногласий, истец не получал, а условия Договора и технических условий не соответствуют действующему законодательству и нарушают права истца, поскольку согласно Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 истец относится к заявителям первой категории, то есть к заявителям, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 5 куб. метров в час включительно при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости). 

На основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам МО от 11 декабря 2018 года № 332-Р «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения АО "Мособгаз" на территории Московской области на 2019г.» плата за технологическое подключение заявителей 1 категории составляет 65 072,25 руб., а распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 14.12.2018 № 342-р «Об установлении на 2019 год стандартизированных тарифных ставок для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Мособлгаз» к истцу не применяется, в ввиду отсутствия необходимости строительства сети газораспределения и пункта редуцирования газа, отсутствия индивидуального проекта, который подготавливается в соответствии с п. 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

Давление газа в газопроводе среднего давления, предложенного исполнителем к подключению, не превышает 0,3 МПа, а реально составляет 0,1 МПа, в горизонтальном бурении также нет необходимости, так как необходимый газопровод-ввод не проходит через асфальтированную дорогу, также нет необходимости в трубе диаметром свыше 158 мм, включая прокладку газопровода более 30 метров бестраншейным способом.

Считая свои права нарушенными, истец обратился в суд.

Истец, его представитель в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом, ранее истцом было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Представитель истца ранее, принимая участие в судебном заседании настаивал на иске.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражал, в удовлетворении иска просил отказать, поддержал доводы возражений на исковое заявление, в которых требования считал не подлежащими удовлетворению, изложенные доводы не состоятельными, не соответствующими фактическим обстоятельствам. Указывал на ошибочность выводов истца, поскольку они противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в области технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ценообразования.

Так, частью 10 статьи 48 ГрК РФ предусмотрено, что порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Согласно п. 2 Правил «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

"заявитель" - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; 

к заявителям первой категории относятся заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

исполнитель - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов;

точка подключения - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя.

Согласно п. 32 Правил именно исполнитель, а не заявитель определяет технические условия: а) на основе анализа пропускной способности сети газораспределения; б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения; в) с учетом принятых исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Филиалом АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» в порядке и сроки, предусмотренные Правилами подключения, была принята и зарегистрирована за № заявка истца, о подключении к сети газораспределения объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕС кадастровый номер земельного участка № По результатам рассмотрения, которой был подготовлен ответ, и направлен с подписанным со стороны ответчика проектом Договора, который соответствует типовой форме.

Против взыскания компенсации морального вреда возражал, ссылался, что истцом доказательств причинения ему физических и нравственных страданий со стороны ответчика не представлено. Действия АО «Мособлгаз» по рассмотрению заявки истца, подготовке Договора основаны на нормах Правил подключения, нормах действующего законодательства Российской Федерации, вина АО «Мособлгаз» в данной ситуации отсутствует.

Доводы истца о нарушение АО «Мособлгаз» сроков рассмотрения заявки на подключение жилого дома к сети газораспределения, мотивированного отказа являются ошибочными, противоречащими требованиям Правил подключения.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца, его представителя.

Суд, выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 18 Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно ч. 2 ст. 445 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

В силу ч. 1 ст. 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В соответствии с п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

В силу ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Судом установлено, что истцу ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок для садоводства, категория земель: земли: сельскохозяйственного назначения, общей площадью 723 кв.м, по адресу: АДРЕС а так же расположенный на нем жилой дом (л.д. 26-27).

17.07.2019г. истцом посредством личного кабинета пользователя на сайте ..... была подана заявка № на технологическое подключение. Которая 19.07.2019г. была возвращена на доработку, получения согласия основного абонента СНТ «Галактика», на территории которого, располагается земельный участок истца.

13.08.2019г. указанная заявка была возвращена с доработки с приложением согласия СНТ «Галактика». 16.08.2019г. заявка снова возвращена на доработку, в связи с отсутствием необходимости прикладывать согласие СНТ «Галактика».

16.08.2019г. АО «Мособлгаз» заявка истца была зарегистрирована.

02.09.2019г. АО «Мособлгаз» был представлен проект технических условий и проект Договора № в электронном виде о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения на сумму 4 158 767,92 руб. (л.д. 11-19).

03.09.2019г. истец посредством личного кабинета известил ответчика об отказе от подписания договора, прикрепив отказ и протокол разногласий, которые 05.09.2019г. были представлены в офис ответчика (л.д. 20-25).

В ответ на мотивированный отказ и протокол разногласий филиалом АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» подготовлен ответ № 326/19 от 12.09.2019г., направленный в адрес истца 12.09.2019г., согласно которому отказано в подписании протокола разногласий к договору № и протокола разногласий к ТУ, поскольку изложенные в них условия не соответствуют действующему законодательству. Мероприятия по подключению (техническому присоединению) садового дома к определенному технической комиссией газопроводу среднего давления меньше или равно 0,3 МПа, D=273 мм включают в себя: 1) разработку проекта сети газораспределения по объекту: «Газопровод среднего давления меньше или равно 0,3 МПа, газопровод среднего давления меньше или равно 0,1 МПа, с установкой газорегуляторного пункта»; 2) выполнение работ по созданию сети газораспределения с прокладкой газопровода: материал труб стальной, диаметр труб 108 мм, давление газа меньше или равно 0,3 МПа; выполнение работ по созданию сети газораспределения с газопровода: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 110 мм, давление газа меньше или равно 0,3 МПа, включая строительство части газопровода (23 погонных метра) бестраншейным способом; газорегуляторный пункт для снижения давления газа от 0,9 МПа до 0,12 МПа; выполнение работ по созданию сети газораспределения с прокладкой газопровода: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 160 мм, 63 мм, 32 мм, давление газа 0,1 МПа; выполнение работ по фактическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуска газа. Предварительный размер платы за подключение рассчитан на основании Распоряжения Комитета по тарифам и ценам Московской области от 14.12.2018г. № 342-р и Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФСТ России от 16.08.2018г. № 1151/18, и составляет 4 158 767,92 руб. (л.д. 202-205).

Согласно п. 77 Правил в случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий. Указанный отказ направляется заявителем исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить получение отказа.

В силу п. 79 Правил при направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

Согласно акту приемки газопровода от 05.01.1990г. по адресу: Ногинск-9 объект 3006, диаметр Ду 150, 250, 300 мм рабочее давление 3,0 кгс/см2 (л.д. 134-135).

Сооружение – газопровод среднего давления с К№ протяженностью 1 390 м, по адресу: АДРЕС, АДРЕС, на основании приказа заместителя Министра обороны Российской Федерации от 29.11.2013г. №, передан в собственность Московской области, принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП МО «Мособлгаз» (л.д. 137-185).

Согласно журналу технического обслуживания № АДРЕС на 05.12.2019г. составляет на входе 0,4 МПа на выходе 0,3 МПа (т. 2 л.д. 100-106).

Согласно режимной карте настройки оборудования пункта редуцирования газа № АДРЕС рабочее давление редукционной арматуры (регулятор давления) составляет 0,3 МПа.

Между жилым домом истца и газопроводом-источником расположена автомобильная дорога, покрытие которой составляет асфальт и бетонные плиты и которая связывает несколько населенных пунктов и используется неопределенным кругом лиц, в том числе населением, проживающим в СНТ «Галактика», д. Дуброво.

При рассмотрении возможности газификации СНТ «Галактик» была выявлена необходимость пересечения автодороги, которая расположена на земельном участке с К№

Согласно сведениям ЕГРН правообладателем указанного земельного участка является Ногинский муниципальный р-н Московской области.

Согласно ответу Администрации Богородского г.о. Московской области от 16.12.2019г. № прокладка коммуникаций открытым способом через подъездную дорогу к СНТ «Галактика» противоречит п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим использование автомобильных дорог лицам запрещается повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов.

Филиалом АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» разработана схема газоснабжения 72-х жилых домов СНТ «Галактика», расположенного по адресу: АДРЕС (том 2 л.д. 40-50).

В силу п. 74 Правил при представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 65 - 69 и 71 настоящих Правил, в полном объеме исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки): а) в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

б) в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, в случае заключения договора о подключении с заявителями второй и третьей категорий, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) для указанных категорий заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности. При этом исполнитель в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) уведомляет заявителя о необходимости получения исполнителем согласований, указанных в настоящем подпункте, с приложением документов, подтверждающих направление запроса о согласовании;

в) в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении), направленной в том числе посредством официального сайта исполнителя, за исключением случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

На основании пп. «г» п. 75 Правил срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Согласно п. 83 Правил договор о подключении содержит следующие существенные условия: а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению; б) срок осуществления мероприятий по подключению; в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту); ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил; и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении; л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения; н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

Согласно п. 13 (1) Правил в случае если размер платы за технологическое присоединение должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту, размер соответствующей платы за технологическое присоединение определяется исходя из технических параметров подключения и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

В соответствии с п. 26 (22) Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение. В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

В соответствии с абз. 2 п. 15 Правил состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, определяется в соответствии с программой газификации.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Пунктом 26 (23) Основных положений, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, пунктом 6 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, предусмотрено, что плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа.

В соответствии с п. 87 Правил подключения, в случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении.

Пунктом 94 Правил подключения установлено, что в случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Порядок установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту предусмотрен пунктами 105, 107, 108 Правил подключения.

После установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту согласно пункту 110 Правил подключения исполнитель направляет дополнительное соглашение к договору о подключении, которым корректируется стоимость услуг по подключению, а также решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, на основании которого корректируется стоимость услуг по подключению (технологическому присоединению), не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации, но не ранее вступления в силу указанного решения.

Мероприятия по подключению жилого дома истца предусматривают врезку в газопровод наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа, а именно в газопровод-источник (стальной газопровод среднего давления Р = 0,3 МПа, D = 273 мм (Ду = 250 мм).

Следовательно, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования жилого дома истца к газопроводу-источнику подлежит установлению органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (таким органом в Московской области является Комитет по ценам и тарифам Московской области), исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Принадлежащий истцу земельный участок располагается в зоне застройки негазифицированных земельных участков СНТ «Галактика», в связи, с чем технические условия, являющиеся приложением к договору о подключении № К3364-08/19-ТП/3, предусматривают проектирование и строительство распределительного газопровода в соответствии со схемой газоснабжения. Выполнение схемы газоснабжения необходимо для определения характеристик проектируемого газопровода, которые бы обеспечили резерв пропускной способности газопровода для газоснабжения всех негазифицированных строений. 

Условия спорного договора № соответствуют типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения утв. Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 N 713, доказательств обратного суду не представлено.

Необходимость установления платы за технологическое присоединение жилого дома по индивидуальному проекту к сети газораспределения (газопроводу-источнику) исключает возможность отнесения истца к заявителям «первой категории», а также заявителям «второй категории» и «третьей категории».

Мероприятия по строительству газопровода к жилому дому Истца отсутствуют в Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20.12.2004 № 778/50.

Установка пункта редуцирования газа, в целях подключения жилого дома к сети газораспределения, необходима для снижения давления газа до требуемых параметров в связи с тем, что источником газоснабжения жилого дома является газопровод-источник с давлением газа 0,3 МПа, а также обусловлена необходимостью обеспечения бесперебойного и надежного газоснабжения существующих потребителей газа.

Между жилым домом и газопроводом-источником расположена автомобильная дорога, покрытие которой составляет асфальт и бетонные плиты и которая связывает несколько населенных пунктов и используется неопределенным кругом лиц, в том числе населением, проживающим в СНТ «Галактика», АДРЕС, что подтверждается сведениями из публичной кадастровой карты и фотографиями автомобильной дороги, что вызывает необходимость прокладки газопровода бестраншейным способом под автомобильной дорогой.

АО «Мособлгаз» обратилось в Администрацию Богородского городского округа Московской области (ранее Администрация Ногинского муниципального района Московской области) по вопросу предоставления информации по способу прокладки газопровода через подъездную дорогу к СНТ «Галактика» для подключения жилого дома Истца к сети газораспределения. 

Согласно ответу на указанное обращение Администрация Богородского городского округа Московской области в письме от 16.12.2019 № сообщило, что прокладка коммуникаций открытым способом через подъездную дорогу к СНТ «Галактика» противоречит Закону № 257-ФЗ.

Согласно п. 4, 6 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим использование автомобильных дорог лицам запрещается создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения; повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов.

Согласно ч. 8 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.

На основании изложенного, оценив исследованные доказательства в совокупности, принимая во внимание, тот факт, что согласно схемы газоснабжения, утвержденной органами местного самоуправления муниципального образования, газификация объектов капитального строительства в зоне расположения дома истца, предусматривается путем строительства сети газораспределения, суд оснований для удовлетворения исковых требований не усматривает.

Так же, суд приходит к выводу об урегулировании разногласий, возникшие при заключении договора № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, между ФИО1 и АО «Мособлгаз», следующим образом:

Пункт 3 договора «Срок выполнения мероприятий по подключению (Технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора»;

- абзацы второй-четвертый п.5 договора: 

«Исполнитель обязан: 

разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения);

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению № 2 (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;»;

абзацы третий-пятый п.7 договора «Заявитель обязан: 

… разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);»;

абзац третий п. 8 Договора «Заявитель вправе:

… выполнять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства за границами своего участка (либо их часть), если максимальный расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения)»;

пункт 10 Договора

«Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению и действующих на момент заключения настоящего договора стандартизированных тарифных ставок, а также исходя из предварительных технических параметров проекта газоснабжения, на основании предварительного расчета размера платы (приложение № 6), и составляет 4 158 767 рублей 92 копейки (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 92 копейки), в том числе НДС 20 процентов 693 127 рублей 99 копеек (Шестьсот девяносто три тысячи сто двадцать семь рублей 99 копеек).

Стоимость работ по разработке проектной документации и проведения ее экспертизы включается в состав платы и составляет 1 277 682 рубля 00 копеек (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20 процентов 212 947 рублей 00 копеек (Двести двенадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 копеек).

Размер платы по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов - Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

В случае, если размер платы при утверждении будет изменен органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, стороны с целью корректировки размера платы заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 30 дней после утверждения размера платы.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

В течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Договора Заявитель осуществляет внесение части платы за технологическое присоединение в размере 1 277 682 рубля 00 копеек (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20 процентов 212 947 рублей 00 копеек (Двести двенадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 копеек).

Порядок внесения оставшейся части платы за технологическое присоединение определяется сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписываемом после утверждения размера платы по индивидуальному проекту.

При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении»;

Приложение № 6 к Договору по тексту приложения № 6 к Договору;

пункт 7 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору

«Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней.»;

пункт 8.2 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору

«Исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту: «газопровод среднего давления Р

<

0,3 МПа, с установкой газорегуляторного пункта» от источника газоснабжения до точки подключения со следующими параметрами:

газопровод: материал труб стальной, диаметр труб 108 мм, давление газа Р

<

0,3 МПа;

газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 110 мм, давление газа Р

<

0,3 МПа;

газорегуляторный пункт для снижения давления газа от Р

<

 0,3 МПа до Р

<

 0,1 МПа.

газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 110 мм, 63 мм, 32 мм давление газа Р

<

0,3 МПа»;

пункт 8.3 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от газопровода в точке подключения до газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.»;

пункт 9.2 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Точка подключения определяется в соответствии с пунктом 5 Договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения»;

пункт 9.3 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Признаки индивидуального проекта: проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа»;

пункт 9.4 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Ориентировочная протяженность от источника газоснабжения до границы технологического присоединения 535 п. м.»;

пункт 9.5 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Требуется прокладка газопровода бестраншейным способом».

В силу п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании ч. 1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Таким образом, суд оснований для взыскания компенсации морального вреда, судебных издержек не усматривает. Суду доказательств виновного поведения ответчика в отношении истца не представлено. Ответчиком сроки рассмотрения заявки истца нарушены не были, нарушения законодательства о защите прав потребителей так же допущено не было, все действия АО «Мособлгаз» основываются на нормах действующего законодательства, вина АО «Мособлгаз» отсутствует.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к АО «Мособлгаз» об урегулировании разногласий при заключении договора № о технологическом присоединении на условиях, предложенных ФИО1, взыскании компенсации морального вреда в сумме 10 000 руб., расходов на оплату госпошлины, расходов на оплату услуг представителя в сумме 35 000 руб. оставить без удовлетворения.

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, между ФИО1 и АО «Мособлгаз», следующим образом:

Пункт 3 договора «Срок выполнения мероприятий по подключению (Технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора»;

- абзацы второй-четвертый п.5 договора: 

«Исполнитель обязан: 

разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения);

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора;

проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению № 2 (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора;»;

абзацы третий-пятый п.7 договора «Заявитель обязан: 

… разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель);

представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);»;

абзац третий п. 8 Договора «Заявитель вправе:

… выполнять мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства за границами своего участка (либо их часть), если максимальный расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения)»;

пункт 10 Договора

«Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению и действующих на момент заключения настоящего договора стандартизированных тарифных ставок, а также исходя из предварительных технических параметров проекта газоснабжения, на основании предварительного расчета размера платы (приложение № 6), и составляет 4 158 767 рублей 92 копейки (Четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 92 копейки), в том числе НДС 20 процентов 693 127 рублей 99 копеек (Шестьсот девяносто три тысячи сто двадцать семь рублей 99 копеек).

Стоимость работ по разработке проектной документации и проведения ее экспертизы включается в состав платы и составляет 1 277 682 рубля 00 копеек (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20 процентов 212 947 рублей 00 копеек (Двести двенадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 копеек).

Размер платы по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов - Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

В случае, если размер платы при утверждении будет изменен органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, стороны с целью корректировки размера платы заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 30 дней после утверждения размера платы.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

В течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Договора Заявитель осуществляет внесение части платы за технологическое присоединение в размере 1 277 682 рубля 00 копеек (Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 20 процентов 212 947 рублей 00 копеек (Двести двенадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 копеек).

Порядок внесения оставшейся части платы за технологическое присоединение определяется сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписываемом после утверждения размера платы по индивидуальному проекту.

При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении»;

Приложение № 6 к Договору по тексту приложения № 6 к Договору;

пункт 7 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору

«Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней.»;

пункт 8.2 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору

«Исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту: «газопровод среднего давления Р

<

0,3 МПа, с установкой газорегуляторного пункта» от источника газоснабжения до точки подключения со следующими параметрами:

газопровод: материал труб стальной, диаметр труб 108 мм, давление газа Р

<

0,3 МПа;

газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 110 мм, давление газа Р

<

0,3 МПа;

газорегуляторный пункт для снижения давления газа от Р

<

 0,3 МПа до Р

<

 0,1 МПа.

газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 110 мм, 63 мм, 32 мм давление газа Р

<

0,3 МПа»;

пункт 8.3 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) от газопровода в точке подключения до газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.»;

пункт 9.2 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Точка подключения определяется в соответствии с пунктом 5 Договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения»;

пункт 9.3 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Признаки индивидуального проекта: проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа»;

пункт 9.4 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Ориентировочная протяженность от источника газоснабжения до границы технологического присоединения 535 п. м.»;

пункт 9.5 технических условий, являющихся приложением № 1 к Договору 

«Требуется прокладка газопровода бестраншейным способом».

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья