ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5-1/2024 УИД 43RS0039-01-2023-000601-19

17 января 2024 года г. Уржум

Судья Уржумского районного суда Кировской области Ускова Е.А., 

с участием и.о. прокурора Уржумского района Кировской области Широкова Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО «СТРОЙ-РП», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, 

У С ТА Н О В И Л:

Согласно постановлению о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки установлено, что между КОГБУЗ «Уржумская центральная районная больница» (Государственный заказчик) и ООО «СТРОИ- РП» (Поставщик) заключен Государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку модульной конструкции врачебной амбулатории для нужд КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ» (далее - Контракт).

В силу п.п. 1.1, 2.1, 6.1 Контракта Поставщик обязуется поставить модульную конструкцию врачебной амбулатории для нужд КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ» (далее - товар) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением к Контракту, а Государственный заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

Поставка и монтажные работы модульной конструкции должны быть осуществлены Поставщиком не позднее 30 календарных дней с момента направления заявки Государственного заказчика. 

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке товара (УПД) в единой информационной системе в сфере закупок и

направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными пунктами 4.8 Контракта.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка в адрес ООО «СТРОЙ-РП» направлена Государственным заказчиком ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, работы должны быть закончены не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным заказчиком в адрес ООО «СТРОЙ-РП» направлена претензия.

Вместе с тем, предусмотренные контрактом работы в установленный срок не выполнены.ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «СТРОЙ-РП» объявлено предостережение, ДД.ММ.ГГГГ в его адрес внесено представление №/№, которое направлено электронной почтой по адресу stroirp70@gmail.com, а также почтой.

Ответ на представление в нарушение установленных нормативных сроков в прокуратуру района не направлен.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «СТРОЙ-РП» направлено требование о повторном рассмотрении представления, установлен срок - до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ направлена повестка о необходимости явки в прокуратуру района для дачи объяснений и решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Требование о повторном рассмотрении представления не выполнено, по повестке в установленный срок представитель ООО «СТРОЙ-РП» в прокуратуру не явился.

В судебное заседание и.о. прокурора 

<

адрес> ФИО2 представил постановление от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении ООО «СТРОЙ-РП» в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Исследовав письменные материалы, прихожу к следующим выводам.

Согласно п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае наличия по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела.

Исходя из вышеприведенных правовых норм и установленных обстоятельств, производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.10 КоАП РФ, П О С Т А Н О В И Л:

На основании п.7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 17.7 КоАП РФ в отношении ООО «СТРОЙ-РП» № прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.А. Ускова