Дело № 2 – 555/2018 29 ноября 2018 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Сланцевский городской суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего судьи Феоктистовой М.Ю.

при секретаре Смирновой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Импульс» о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ООО «Строительная компания «Импульс» о взыскании неустойки в размере 

<

данные изъяты>, штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в размере 50 % от присужденной судом суммы, компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты>.

В исковом заявлении указано, что 18 июля 2012 года между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест» был заключен договор № К-П-30-03/530 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома, в соответствии с которым ООО «Строительная компания «Импульс» привлекло ООО «СигмаИнвест» в качестве дольщика с приобретением им прав и обязанностей по инвестированию строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>). Договором № К-П-30-03/530 от 18 июля 2012 года установлен плановый срок окончания строительства и предоставления объекта для разрешения на ввод в эксплуатацию II квартал 2013 года. В силу п. 2.2 договора общая сумма долевого участия дольщика составляет 

<

данные изъяты>. 30 января 2013 года между ООО «Сигма Инвест», именуемом в дальнейшем Обществом, и ФИО1, именуемым в дальнейшем Инвестор, был заключён договор № 30.01.2013, а 15 марта 2013 года заключено Соглашение. В соответствии с предметом договора Инвестор вступает в инвестирование строительства жилого дома по адресу: город Санкт-Петербург, 

<

адрес> Объектом инвестирования строительства инвестора является жилое помещение в виде 1-комнатной квартиры с условным номером 363-I, расположенной на 12 этаже подъезда № 6 секции № 3 вышеуказанного объекта общей площадью 50,2 кв.м. В силу п.1.3 Договора размер инвестирования строительства составляет 

<

данные изъяты>. Пунктом 1.5 договора установлен плановый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию II квартал 2013 года. Инвестором ФИО1 условия договора долевого участия в инвестировании строительства жилого дома исполнены надлежащим образом и в полном объёме, оплата произведена в полном объёме в соответствии с графиком платежей в размере 

<

данные изъяты>. Однако сроки передачи квартиры по вышеуказанному договору нарушены, в связи с чем ФИО1 был вынужден обратиться в Сланцевский городской суд с исковым заявлением. Решением по делу № 2-613/2015 от 28 декабря 2015 года Сланцевский городской суд в удовлетворении искового требования ФИО1 отказал. 16 марта 2016 года Ленинградский областной суд решение Сланцевского городского суда отменил и требования ФИО1 частично удовлетворил. Неустойка, взысканная Ленинградским областным судом по делу № 33- 1376/2016, рассчитана с 1 июля 2013 года по 29 июля 2015 года включительно. 

Объект, расположенный по адресу: 

<

адрес> в эксплуатацию не введён, по акту приёма - передачи квартира ФИО1 не передана. В связи с чем ФИО1 был вынужден обратиться в Сланцевский городской суд с повторными исками к ООО СК «Импульс» о взыскании неустойки за период с 30 июля 2015 года по 28 мая 2016 года, с 29 мая 2016 года по 08 сентября 2016 года, с 9 сентября 2016 года по 23 ноября 2016 года, с 24 ноября 2016 года по 29 декабря 2016 года, с 30 декабря 2016 года по 17 марта 2017 года, 18 марта 2017 года по 17 мая 2017 года, с 18 мая 2017 года по 26 сентября 2017 года, с 27 сентября 2017 года по 24 января 2018 года, с 25 января 2018 года по 10 апреля 2018 года и компенсации морального вреда.

Решениями Сланцевского городского суда Ленинградской области по делу № 2-694/2016 года от 9 сентября 2016 года, № 2-1038/2016 от 22 ноября 2016 года, № 2-74/2017 от 17 января 2017, № 2-198/2017 от 16 марта 2017 года, № 2-336/2017 от 19 апреля 2017 года, № 2-532/2017 от 25 сентября 2017 года, № 2-831/2017 от 2 декабря 2017 года, № 2-143/2018 от 28 марта 2018 года, № 2-337/2018 от 18 июня 2018 года иски были удовлетворены. 

Объект, расположенный по адресу: 

<

адрес> по-прежнему в эксплуатацию не введён, по акту приёма - передачи квартира ФИО1 не передана. 

Неустойка за период с 11 апреля 2018 года по 20 июня 2018 года - составит 70 дней - рассчитана по формуле 

<

данные изъяты> дней и составляет 

<

данные изъяты>. 

Истец снизил размер неустойки до 

<

данные изъяты>.

На претензию об урегулировании споров в досудебном порядке, отправленную по почте 21 июня 2018 года, ответчик не отреагировал. 

В связи с неправомерными действиями ООО «Строительная компания «Импульс» истец испытывал нравственные страдания, выразившиеся в постоянном состоянии стресса в течение последних трёх лет, которые вызваны неуверенностью и сомнениями в том, что жильё в ближайшее время будет передано по акту приёма - передачи. При заключении договора участия в долевом строительстве его уверяли в высокой степени надёжности, однако неисполнение ответчиком обязательств создавали ощущение неопределённости, вызывали у истца неврастеническое состояние. Истец не имеет возможности использовать квартиру для проживания, сделать ремонт и оборудовать мебелью жилое помещение. 

В судебном заседании ФИО1 исковые требования полностью поддержал и пояснил, что в настоящее время объект достроен другой подрядной организацией - «ЛенСпецСму», квартиру он получил после предъявление иска в суд г. Санкт-Петербурга о признании права собственности на жилое помещение, уже делает ремонт в квартире, но столь длительное ожидание квартиры причинили истцу нравственные и физические страдания, обострились все хронические заболевания, появились постоянные головные боли, сердечнососудистые заболевания. Просит удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Строительная компания «Импульс» ФИО2, действующий по доверенности, в суд явился, исковые требования не признал, доводы представленного письменного отзыва на иск поддержал (л.д. 39, 40, 57-58, 72, 73-79), и пояснил, что службой судебных приставов Санкт-Петербурга возбуждено исполнительных производств по искам ФИО1 на общую сумму 

<

данные изъяты>, в то время как неустойка в силу ст. 28 Закона о защите прав потребителей не может превышать цену договора, т.е. 

<

данные изъяты>. Неоднократное обращение ФИО1 в суд с аналогичными исками считает злоупотреблением правом и просит в иске отказать в полном объеме.

Представитель третьего лица ООО «СигмаИнвест» в суд не явился, о времени и месте судебного разбирательства уведомлялся надлежащим образом, но все судебные извещения возвращены почтовой службой за истечением срока хранения (л.д. 63, 64, 69, 70). 

Принимая во внимание положения ст.ст. 113, 119, 167 ГПК РФ, учитывая разъяснения п. п. 63 - 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23 июня 2015 года «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд рассмотрел иск в отсутствие третьего лица. 

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В силу ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ) его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 1 ст. 27 указанного нормативного правового акта он вступает в силу по истечении трех месяцев после дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2005 года.

Таким образом, решающим критерием для применения указанного закона к рассматриваемым правоотношениям является время получения застройщиком, которым в рассматриваемом случае является ООО «Строительная компания «Импульс», разрешения на строительство дома, в котором расположен спорный объект.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона № 214-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ, от 17 июня 2010 года № 119-ФЗ, от 3 июля 2016 года № 304-ФЗ), действовавших на момент заключения договоров), настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно п. 3 ст. 1 Закона № 214-ФЗ действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве. Указанные отношения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Статья 3 Закона № 214-ФЗ предусматривает, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Форма разрешения на строительство во исполнение указанного Закона утверждена Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 года № 698.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что до установления Правительством РФ формы разрешения на строительство признаются действительными формы разрешения на строительство, принятые законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Также признаются действительными разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные физическим или юридическим лицам до введения в действие Градостроительного кодекса (пункт 3 статьи 8).

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса (далее - ГрК РФ) разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Разрешение на строительство на земельном участке, за исключением случаев, прямо предусмотренных ГрК РФ, выдается органом местного самоуправления по месту нахождения такого земельного участка (ч. 4 ст. 51 ГрК РФ).

В силу ч. 7 ст. 51 ГрК РФ в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы, в том числе правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план земельного участка; материалы, содержащиеся в проектной документации; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ст. 49 настоящего Кодекса); разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 настоящего Кодекса); согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

На основании ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что 18 июля 2012 года между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест» был заключен договор № К-П-30-03/530 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома, в соответствии с которым застройщик ООО «Строительная компания «Импульс» привлек ООО «СигмаИнвест» в качестве дольщика с приобретением им прав и обязанностей по инвестированию строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью приобретения ООО «СигмаИнвест» в свою собственность жилого помещения по окончанию строительства объекта.

Согласно п. 1.1. договора ответчик является застройщиком дома по указанному адресу на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 131 от 28 января 2004 года.

В соответствии с п. 2.2. договора стоимость долевого взноса составила 

<

данные изъяты>. Указанная денежная сумма уплачена ООО «СигмаИнвест» в полном объеме.

Пунктом 1.5. договора предусмотрен плановый срок окончания строительства и предоставления объекта для получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2013 года. Этим же договором определено, что в случае принятия органом исполнительной власти решения об изменении сроков окончания строительства объекта, указанный срок изменяется в соответствии с этим решением.

30 января 2013 года между ООО «СигмаИнвест» на основании Договора долевого участия № К-П-30-03/530 от 18 июля 2012 года и ФИО1 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома по адресу: г. 

<

адрес>

Цена договора составила 

<

данные изъяты>, которые были уплачены истцом, что подтверждается платежными документами и не оспаривается стороной ответчика.

14 марта 2013 года между сторонами заключено соглашение орасторжении вышеуказанного договора, денежные средства, переданные подоговору от 30 января 2013 года, зачисляются в счет уплаты соглашения подоговору № К-П-30-03/530 от 18 июля 2012 года.

15 марта 2013 года между ООО «СигмаИнвест» и ФИО1 заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору № К-П-30-03/530 от 18 июля 2012 года долевого участия в инвестированиистроительства жилого дома.

На момент заключения инвестиционного договора между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест», а в последующем договора участия в долевом строительстве спорного объекта недвижимости между ООО «СигмаИнвест» и ФИО1, действовал Градостроительный кодекс РФ.

Следовательно, для признания правомочными действий ООО «Строительная компания «Импульс» по привлечению денежных средств дольщиков в юридически значимый период у данной организации должно было иметься разрешение на строительство жилого дома, выданное в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Распоряжением администрации Санкт-Петербурга от 23 декабря 2002 года № 2667-ра, действовавшим на момент возникновения для ООО «Строительная компания «Импульс» права по привлечению денежных средств инвесторов для строительства спорного дома, были утверждены территориальные строительные нормы Санкт-Петербурга «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости». В соответствии с указанными строительными нормами разрешение на строительство обозначено как документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт и реставрацию здания, строения, сооружения и благоустройство территории. Разрешение на строительство в Санкт-Петербурге выдается губернатором Санкт-Петербурга, а также председателем Комитета по строительству и архитектуре собственникам объекта недвижимости. 

Из материалов дела усматривается, что Правительством Санкт-Петербурга 28 января 2004 года издано Постановление № 131 «О проектировании и строительстве жилого дома со встроенными помещениями с подземной стоянкой по адресу: 

<

адрес>

Указанным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга |утверждено решение инвестиционно-тендерной комиссии (протокол от 31 июля 2003 года № 406) о проектировании и строительстве ООО «Строительная компания «Импульс» жилого дома со встроенными помещениями и подземной стоянкой на закрепленном земельном участке площадью 21116 кв.м за счет собственных и привлеченных средств.

Сроки строительства дома по указанному адресу неоднократно продлевались.

15 августа 2015 года ООО «Строительная компания «Импульс» получила разрешение на строительство дома по указанному адресу сроком по 28 августа 2017 года.

Анализ приведенных выше документов, изданных Правительством Санкт-Петербурга, позволяет сделать вывод о том, что разрешение на строительство спорного объекта недвижимости в установленном порядке было получено ООО «Строительная компания «Импульс» на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28 января 2004 года № 131, то есть до вступления в силу Закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Следовательно, положения Закона № 214-ФЗ к рассматриваемым правоотношениям по заключению 18 июля 2012 года инвестиционного Договора между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест», а также последующих договоров между ООО «СигмаИнвест» и ФИО1, применены быть не могут.

При этом следует отметить, что сам факт заключения 18 июля 2012 года между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест» договора № К-П-30-03/530 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома, а также заключенных между ООО «СигмаИнвест» и ФИО1 договора № 30.01.2013 от 30 января 2013 года об инвестировании строительства жилого дома, соглашения от 14 марта 2013 года о расторжении договора № 30.01.2013 от 30 января 2013 года и соглашения от 15 марта 2013 года о передаче прав и обязанностей по договору № К-П-30-03/530 долевого участия в инвестировании строительства жилого дома ни одной из сторон не оспаривается. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» споры о защите прав потребителей регулируют отношения между гражданином, имеющим намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а с другой стороны - организацией либо индивидуальным предпринимателем (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющих продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, и являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите нрав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Анализ заключенных между ООО «СигмаИнвест» и ФИО1 договоров, в том числе утвержденного ООО «Строительная компания «Импульс» соглашения от 15 марта 2013 года о передаче прав и обязанностей по договору от 18 июля 2012 года, заключенному между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест», позволяет сделать вывод о том, что истец приобретает квартиру для личных нужд, а не для использования в целях предпринимательской деятельности. В этой связи на возникшие правоотношения распространяется действие Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Основанием заявленных ФИО1 требований явилось нарушение установленного договором от 30 января 2013 года срока передачи ему объекта строительства. 

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно договору от 18 июля 2012 года между ООО «Строительная компания «Импульс» и ООО «СигмаИнвест», права и обязанности по которому принял истец по договору цессии от 15 марта 2013 года, плановый срок окончания строительства им предоставления объекта для получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2013 года.

Срок передачи квартиры дольщику ответчиком ООО «Строительная компания «Импульс» нарушен, в связи, с чем имеются правовые основания для удовлетворения заявленных требований в части взыскания неустойки за нарушение срока исполнения работ.

Положением п. 5 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка за период с 11 апреля 2018 года по 20 июня 2018 года составит 

<

данные изъяты> 70 (дней просрочки) = 

<

данные изъяты>, однако истец уменьшил размер неустойки до 

<

данные изъяты>. 

Суд соглашается с данным размером неустойки и не находит оснований для дальнейшего снижения неустойки. 

Доводы представителя ответчика о том, что неоднократное обращение ФИО1 в суд с аналогичными исками следует расценивать как злоупотреблением правом и на этом основании в иске следует отказать, судом отклоняются, поскольку действующее законодательство ограничений по периодам для взыскания неустойки не содержит. Неустойка является мерой ответственности за нарушенное обязательство и предъявляется истцом ФИО1 ко взысканию последовательно за разные временные периоды до тех пор, пока ему не будет передана квартира. 

Возражения ответчика о том, что ФИО1 знал, что дом сдан в эксплуатацию, но не требовал у ответчика признания права собственности на квартиру, пытаясь получить материальную выгоду в связи с взысканием неустойки в завышенном размере на основании неоднократных обращений в суд с однородными исками, суд находит несостоятельными. 

В соответствии с п. 25 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года, суд отказывает во взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, установив факт злоупотребления правом со стороны участника долевого строительства, который уклоняется или отказывается от принятия объекта долевого строительства в установленный срок (за исключением случая, когда участником долевого строительства предъявлено застройщику требование о составлении акта о несоответствии объекта долевого строительства установленным требованиям к качеству объекта долевого строительства).

Однако материалы дела не содержат доказательств того, что истец уклонялся или отказывался от принятия квартиры.

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Законом предусмотрена презумпция причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) предусмотренных законами и иными правовыми актами РФ прав потребителей, в связи с чем потребитель освобожден от необходимости доказывания в суде факта своих физических и нравственных страданий.

То обстоятельство, что ответчиком нарушены договорные сроки передачи квартиры истцу, чем нарушены его права как потребителя, несомненно причинило истцу нравственные страдания. Однако заявленную сумму компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> суд находит избыточной и, с учётом всех обстоятельств дела, считает отвечающей принципам разумности и справедливости компенсацию в размере 

<

данные изъяты>. При этом суд исходит из того, что необратимых неблагоприятных последствий от ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств для истца не наступило.

На основании ст. 13 ч. 6 Закона РФ № 2300-1 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая изложенное, с ООО «Строительная компания «Импульс» в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 

<

данные изъяты> = (

<

данные изъяты> + 

<

данные изъяты>) * 50%.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика надлежит также взыскать государственную пошлину, от уплаты которой истец был освобождён ст. 333.36 ч. 2 п. 4 Налогового кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Импульс» удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Импульс» в пользу ФИО1 неустойку в размере 

<

данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты>, штраф в размере 

<

данные изъяты>

Всего 

<

данные изъяты>

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Импульс» в доход бюджета МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Ленинградский областной суд с подачей жалобы через Сланцевский городской суд Ленинградской области.

Председательствующий судья Феоктистова М.Ю.

Мотивированное решение составлено 3 декабря 2018 года.