Дело № 2-.../17 г. 

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ

Приокский районный суд города Нижнего Новгорода 

в составе председательствующего: судьи Кшнякиной Е.И.

при секретаре: Яцкевич Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью "Х" о защите прав потребителей, взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику с вышеуказанными требованиями.

В обоснование исковых требований ссылается на то, что между ФИО1 и ООО "Х" были заключены следующие договоры подряда:

- Договор строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся монтаж канализации, со сроком выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору истцом уплачен аванс в размере ... руб..

- Договор № ... подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся монтаж дверей, окон, потолка и прочего внутреннего оборудования дома, со сроком выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору истцом уплачен аванс в размере ... руб..

В настоящее время работы по указанным договорам не выполнены, работники подрядчика на объекте не появляются. Срок выполнения работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ истек.

По договору от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик должен был приступить к работе ДД.ММ.ГГГГ, однако своевременно не приступил. Учитывая, что текущий строительный сезон подошел к концу, а подлежащие выполнению работы имеют значительный объем, является очевидным, что они не будут закончены в срок, предусмотренный договором.

Таким образом, по договору от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик нарушил конечный срок выполнения работ; по договору от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик нарушил начальный срок выполнения работ, а кроме того, является очевидным, что работа не будет выполнена в срок.

В связи с указанными обстоятельствами истец обратился к ответчику с уведомлениями о расторжении договора и требованием о возврате денежных средств. Требования согласно отметке получены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

В дополнение к требованиям о возврате денежных средств ответчику направлена претензия - по фактическому месту нахождения ДД.ММ.ГГГГ, по юридическому адресу ДД.ММ.ГГГГ. Ответа на претензию также не последовало.

В силу п. 9.2.1. договора от ДД.ММ.ГГГГ заказчик вправе досрочно расторгнуть договор, если подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение 30 календарных дней.

Десятидневный срок, предоставленный исполнителю для возврата уплаченных денежных средств, истек ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ - дата начала начисления неустойки. 

На ДД.ММ.ГГГГ (дату составления иска), т.е. за ... дней просрочки, размер начисленной неустойки составляет:

-... руб. по договору от ДД.ММ.ГГГГ из расчета ... руб. * ... дней *3%;

- ... руб.по договору от ДД.ММ.ГГГГ из расчета ... руб. * ... дней * 3%.

При этом условие о неустойке, установленное п. 7.8. договора от ДД.ММ.ГГГГ, и условие о сроке возврата денежных средств, установленное п. 9.3. указанного договора, не применяются, как противоречащие ФЗ "О защите прав потребителей".

В целях взыскания задолженности ФИО1 обратилась за юридической помощью в ООО "Ю", в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходному кассовому ордеру № ... от ДД.ММ.ГГГГ ею за юридические услуги уплачено ... руб.

Истец просит взыскать с ответчика: уплаченные за работу денежные средства в размере ... рублей; неустойку за невозврат денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере ... рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере ... рублей.

В дальнейшем, ФИО1 уточнила исковые требования, просит суд взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме ... рублей;денежные средства, уплаченные по договору подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей;неустойку за невозврат денежных средств по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей;неустойку за невозврат денежных средств по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей;расходы на оплату услуг представителя в размере ... рублей (л.д. ...).

В дальнейшем в связи с частичным погашением задолженности в размере ... рублей, истец просит взыскать с ответчика: денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме ... рублей; денежные средства, уплаченные по договору подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей; неустойку за невозврат денежных средств по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей; неустойку за невозврат денежных средств по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере ... рублей (л.д. ...).

В судебное заседание ФИО1 не явилась, о времени и месте извещена надлежащим образом под расписку (л.д. ...). Просила рассмотреть дело в свое отсутствие (л.д. ...).

Представитель истца ФИО2, действующая по доверенности (л.д. ...), исковые требования с учетом уточнений поддержала в полном объеме.

Ответчик ООО "Х" в судебное заседание не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом по почте (л.д. ...), в связи с истечением срока хранения конверты с судебным извещением возвращены в суд почтовой организацией (л.д. ...). Каких-либо письменных возражений по существу заявленных требований суду не представил.

По смыслу 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Закон создает равные условия для лиц, участвовавших в процессе, предоставив им право самим определить объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе, и реализовать их по своему усмотрению.

Заявитель, не обеспечивший получение поступающей на его адрес корреспонденции, несет риск возникновения неблагоприятных последствий в результате неполучения судебных документов.

Уклонение ответчика от явки в учреждение почтовой связи для получения судебного извещения расценивается судом как отказ от его получения и свидетельствует о злоупотреблении ответчиком процессуальными правами, что недопустимо в силу ст.35 ГПК РФ.

В соответствии со ст.117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

Согласно ст.165.1 п.1 ГК РФ 

1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Таким образом, неявка ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является его волеизъявлением, свидетельствующим о добровольном отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном заседании, и не может быть препятствием для рассмотрения дела по существу и не является нарушением его процессуальных прав.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

При этом в соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Согласно ст. 708 ГК РФ:

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ч. 1,3 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии со статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ст. 735 Гражданского кодекса Российской Федерации, цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Согласно ст.13 ч.1 Закона о защите прав потребителей

За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии со ст.27 Закона «О защите прав потребителей» 

Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст.28 ч.1, 2 Закона «О защите прав потребителей» 

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Х" и ФИО1 заключен договор № ..., согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению, с использованием оборудования подрядчика работ согласно сметной документации по адресу: 

<

адрес> (п. 1.1) ( л.д. ...).

Стоимость работ по настоящему договору: ... рублей (п. 2.1).

Датой начала работ является ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (п. 3.1)

Работы должны быть окончены не позднее: ДД.ММ.ГГГГ (п. 3.2). Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.4).

Порядок оплаты: этап 1: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей (п. 4.1), этап 2.ДД.ММ.ГГГГ- ... рублей заказчик производит оплату в течение 3(трех) дней, после подписания сторонами выполненных работ, а также в случаях предусмотренных пунктами 5.6 и 5 (п. 4.2). Расчёты производятся посредством наличного платежа (п. 4.3).

Подрядчик обязуется: …выполнить все работы, в соответствии со сметой в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (п. 6.1.1).

Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору и в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 7.1).

Согласно смете ( приложение к договору подряда) подрядчик (ООО "Х") обязался провести работы по монтажу канализации (с материалами) и разработку грунта, стоимость работ ... рублей (л.д. 13).

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Х" и ФИО1 заключен договор № ..., согласно которому подрядчик обязуется в соответствии с перечнем работ, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительно-монтажные работы дома размером 8,7 м*10,8 м соответственно в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1.1) (л.д. ...).

Перечень работ, смета и план-график должны быть согласованы и подписаны сторонами не позднее 7 календарных дней со дня подписания настоящего договора. Дата подписания является исходной датой для исчисления сроков, указанных в плане- графике (п. 1.2).

Содержание работ определяется перечнем производимых работ и сметой, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора; технические характеристики и качество выполнения работ определяются нормативной документацией и стандартами, действующими в РФ, применяемыми для выполнения работ данного вида (п. 2.1).

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 (трёх) дней с момента получения авансового платежа в соответствии с п. 3.2. настоящего договора (п. 2.2).

Стоимость работ по настоящему договору определяется суммой в размере ... рублей (п. 3.1).

Заказчик выплачивает подрядчику авансовый платеж в размере ... рублей: этап 1: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 2: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 3: ДД.ММ.ГГГГ -... рублей; этап 4: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 5: ДД.ММ.ГГГГ-... рублей; этап 6: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 7: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 8: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 9: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 10: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 11: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей; этап 12: ДД.ММ.ГГГГ - ... рублей (п.3.2).

Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение всех работ в соответствии с п.п. 2.1.-2.2., соблюдая при этом технологию производства работ, правила техники безопасности, пожарной безопасности, при соблюдении требований, предъявляемых к качеству выполнения работ в соответствии с настоящим договором (п. 5.1).

Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования (претензии) сторон (п. 7.7).

Сторона, не исполнившая обязательства по оплате (возврату) денежных средств без уважительных причин и/или законных оснований обязана уплатить другой стороне договора неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки (п. 7.8).

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению (п. 9.1).

Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор письменно уведомив об этом подрядчика не позднее 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях: если выполнение работ по договору Подрядчиком будет задержано более чем на 30 календарных дней; если подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течение 30 календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; если подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора (п. 9.2.1-9.2.3).

Во всех этих случаях подрядчик обязан в течение 15 банковских дней с момента получения требования заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную подрядчику в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ (п. 9.3).

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из договора является для сторон обязательным (п. 11.1).

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня получения претензии адресатом (п. 11.4).

ФИО1 свои обязательства по внесению предоплаты выполнила надлежащим образом, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ... рублей по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...); квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ... рублей и квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ... рублей по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...).

Однако, в нарушение условий заключенного договора подряда, ответчик не исполнил свои обязательства по выполнению работ в установленные договором сроки, в связи с чем, ФИО1 обратилась к ответчику с претензиями, в которых просила расторгнуть договоры и возвратить уплаченные за услуги суммы в размере ... рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ., в размере ... рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...), которые получены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ., однако оставлены без внимания.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 вновь обратилась к ответчику с претензией о возврате уплаченных по договорам подряда от ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств и неустойки (л.д. ...).

Из объяснений представителя истца следует, что после обращения ФИО1 в суд ответчиком были возвращены денежные средства в размере ... рублей по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств обратного, равно как и доказательств надлежащего выполнения своих обязательств по договорам строительного подряда ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, требования истца о возврате уплаченной по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. суммы в размере ... рублей, и уплаченной по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ. суммы в размере ... рублей обоснованы и подлежат удовлетворению.

В силу положений ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В силу ч. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно отметкам претензии (по двум договорам) получены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. ...). Таким образом, период просрочки исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, при расчете неустойки за несвоевременный возврат денежных средств и нарушение сроков удовлетворения требований потребителя судом принимаются во внимание положения ч. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Требования истца о взыскании неустойки в размере 3% на основании закона "О защите прав потребителей" за нарушение сроков возврата уплаченных по договору денежных средств, являются обоснованными, поскольку п. 7.8 и п. 9.3, 11.4 заключенного сторонами договора № ... от ДД.ММ.ГГГГ. предусмотрены иные сроки удовлетворения требования потребителя и иная неустойка, значительно меньше по размеру, чем предусмотрено законодательством о защите прав потребителей. Вместе с тем, установленный законом размер неустойки, не может быть уменьшен сторонами, т.к. это противоречит Федеральному закону "О защите прав потребителей" и нормам статей 332, 400 ГК РФ.

В силу ст. 332 ГК РФ:

1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.

Согласно ч. 2 ст. 400 ГК РФ соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В данном случае, условия договора подряда на выполнение строительных работ № ... от ДД.ММ.ГГГГ., изложенные в п. 7.8 и п. 9.3, 11.4 являются ничтожными в силу императивных норм п. 2 ст. 400 ГК РФ и п. 1 ст. 16 закона "О защите прав потребителей".

Истец просит взыскать неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в размере ... рублей по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ. и в размере 333 598,20 рублей по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, просрочка составила ... дней.

... х 3% х ... = ... руб. (по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ.)

... х 3% х ... = ... руб. (по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ.).

Поскольку суд не вправе выйти за пределы заявленных исковых требований, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков возврата денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в размере ... рублей по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ. и в размере ... рублей по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ

В силу п. 5 ст. 28 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер взыскиваемой неустойки не превышает размера уплаченных по договорам в качестве предоплаты денежных средств, поэтому подлежит взысканию в полном объеме.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Учитывая, что ответчик является юридическим лицом, от которого соответствующего заявления об уменьшении неустойки в суд не поступало, соответственно у суда отсутствуют основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Сумма штрафа составит: (... руб. + ... руб.) : 2 = ... руб. (по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ.); (... руб. + ... руб.) : 2 = ... руб. (по договору № ... от ДД.ММ.ГГГГ.).

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

Судом установлено, что истцом понесены судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме ... рублей, что подтверждается договором на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ. и квитанцией к приходному кассовому ордеру № ... от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму ... рублей (л.д. ... ).

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Норма закона - ст. 100 ГПК РФ предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. Реализация данного права судом возможна, если он признает расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при этом, как неоднократно указывал Конституционный суд РФ, суд обязан создать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс прав и обязанностей сторон. 

Принимая во внимание объект судебной защиты, объем юридической помощи, оказанной истцу, а также, учитывая принцип разумности, суд считает, что в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в сумме ... рублей.

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО "Х" следует взыскать государственную пошлину в доход государства пропорционально удовлетворенной части исковых требований в сумме ... рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Х" в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ., в сумме ... рублей ; неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств в сумме ... руб.; штраф в размере ... руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Х" в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ., в сумме ... рублей ; неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств в сумме ... руб.... коп.; штраф в размере ... руб. ... коп. ; расходы на оплату услуг представителя в сумме ... руб.

В остальной части взыскания судебных расходов ФИО1 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Х" государственную пошлину в доход государства в размере ... руб. ... коп. 

Ответчик вправе подать в Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня получения копии решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда через Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Е.И.Кшнякина