ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 июня 2018 года г. Красноярск

Октябрьский районный суд г. Красноярска 

в составе: Кирсановой Т.Б. 

при секретаре Панченко Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 А7 к ОАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя, -ОРОт О ДОСААФ России по Красноярсклому краю ртв 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 А8 обратился суд с иском к ответчику о защите прав потребителя, мотивировав свои требования тем, что 11 января 2017 года между ним и ответчиком был заключен Договор У об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения его энергопринимающих устройств - жилого дома, в том числе по проектированию и строительству ТП-10/0, 4 кВ; от ВЛ-10кВ Ф.121-18 до проектрируемой ТП-10/0, 4 кВ; по проектированию и строительству ВЛ-10кВ, перед проектируемой ТП-10/0, 4 кВ, установке разъединителя: от проектируемой ТП-10/0, 4 кВ до границы земельного участка проектирование и строительство ЛЭП-0, 4 кВ. В свою очередь он обязался произвести монтаж измерительного комплекса учета электроэнергии, перед прибором учета установить отключающий аппарат в возможностью его опломбирования; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП, при этом место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине, произвести оплату за технологическое присоединение в размере 550 рублей. Он свои обязательства по внесению оплаты и технические условия выполнил, однако, ответчик нарушил условия договора и по настоящее время не осуществил технологическое присоединение. Просит возложить на ответчика обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающего устройства для электроснабжения жилого дома по адресу: Х, Х течении месяца с момента вступления решения в законную силу, взыскать с ответчика судебные расходы.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, в адрес суда направил отзыв, в котором просил назначить срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению в течении 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В силу ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, а потому суд, с учетом мнения истца, полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, выслушав истца, исследовав представленные доказательства, приходит к следующему:

В судебном заседании установлено, что истец, на основании договора купли-продажи земельного участка от 17 мая 2014 года, является собственником земельного участка по адресу: Х с кадастровым номером 24:50:0100018:887, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 20 февраля 2016 года. 

В силу ст. 307, 309, 310 ГК РФ обязательства возникают из договоров, должны исполняться надлежащим образом и односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Согласно ч.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с ч.1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

По правилам ч.1 ст. 27 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее «Закон о защите прав потребителей») исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Положениями ч.1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно п.3 и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям ( утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 N 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В судебном заседании установлено, что 11 января 2017 года между сторонами был заключен Договор У.Х об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, с учетом протокола разногласий от 11 января 2017 года, согласно которому ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения его энергопринимающих устройств заявителя - жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электрохозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0, 23 кВ. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 11 июля 2017 года.

Как следует из технических условий, которые являются неотъемлемой частью Договора технологического присоединения, сетевая организация обязалась выполниь работы по по проектированию и строительству ТП-10/0, 4 кВ; от ВЛ-10кВ Ф.121-18 до проектрируемой ТП-10/0, 4 кВ, по проектированию и строительству ВЛ-10кВ, перед проектируемой ТП-10/0, 4 кВ, установке разъединителя: от проектируемой ТП-10/0, 4 кВ до границы земельного участка проектирование и строительство ЛЭП-0, 4 кВ.. Заявитель, в свою очередь, обязался осуществить монтаж измерительного комплекса учета электроэнергии, перед прибором учета установить отключающий аппарат в возможностью его опломбирования; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП, при этом место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине, произвести оплату за технологическое присоединение в размере 550 рублей.

Срок действия технологических условий, согласно договору технологического присоединения,, составляет 5 лет со дня заключения договора.

Истец свои обязательства, в том числе по оплате расходов на технологическое присоединение в сумме 550 рублей выполнил, что подтверждается квитанцией об оплате от 11 января 2017 года.

В тоже время, в судебном заседании установлено, что ответчиком свои обязательства по технологическому присоединению не исполнены, что подтверждается пояснениями истца в судебном заседании, претензией истца в адрес ответчика от 13 июля 2017 года, постановлением Управления антимонопольной службы по Красноярскому краю о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 29 января 2018 года, согласно которому ПАО «МРСК Сибири» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 9. 21 КоАП РФ – нарушение порядка технологического присоединения к электрическим сетям – неосуществление мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истцу.

При таких обстоятельствах, учитывая, что обязательства, в определенный договором, срок не исполнены и срок выполнения технологического присоединения сторонами не изменен, суд находит, что требования истца о возложении обязанности по исполнению обязательств по технологическому присоединению законны, обоснованы и подлежат полному удовлетворению.. В тоже, учитывая объемы работ, суд считает необходим установить срок на осуществление технологического присоединения –1 месяц с даты вступления настоящего решения в законную силу.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей и расходов на составление искового заявления в размере 10000 рублей..

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, гл. 22 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Возложить обязанность на ОАО "МРСК Сибири" осуществить в течении 1 месяца с даты вступления решения в законную силу технологическое присоединение энергопринимающего устройства электрической энергии, установленного на объекте – жилого дома по адресу: Х, принадлежащего ФИО1 А9

Взыскать с ОАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО1 А10 судебные расходы в размере 10300 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течении семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течении месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если таковое заявление подано, - в течении месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Председательствующий Т.Б. Кирсанова

Заочное решение изготовлено и подписано 20 июня 2017 года