УИД 77RS0002-02-2025-004321-40

Дело № 2-4282/2025

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 21 августа 2025 года

Басманный районный суд адрес в составе 

председательствующего судьи Гусевой И. В., 

при секретаре фио, 

с участием представителя истца фио,

представителя ответчика фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к адрес о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с указанным иском, ссылаясь на следующие обстоятельства. 

Между адрес и ФИО1 был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 20 февраля 2024 г. № 24МГ-ДДТП-2405. Истец произвел оплату по договору в размере сумма Срок исполнения договора был установлен продолжительностью 165 дней со дня заключения дополнительного соглашения № 1 от 26 марта 2024 г. Указанный срок истек 07 сентября 2024 г. Работы по договору не выполнены. Договором предусмотрена неустойка. 

В этой связи ФИО1 просила суд обязать ответчика исполнить условия договора; взыскать с ответчика договорную неустойку за период с 08 сентября 2024 г. по 23 апреля 2025 г. в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.  

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменных возражениях относительно иска. 

Заслушав объяснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Правоотношения по технологическому присоединению к газораспределительной сети регламентированы Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

Между адрес и ФИО1 был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения от 20 февраля 2024 г. № 24МГ-ДДТП-2405, в соответствии с которым ответчик обязался осуществить подключение дома по адресу: адрес, г.адрес, квартал 168, вл. 2, стр. 1, кадастровый номер 77:17:0130104:28, а истец обязался обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. 

Дополнительным соглашением № 1 от 26 марта 2024 г. цена договора была установлена в размере сумма

Порядок оплаты установлен дополнительным соглашением в четыре этапа: сумма – не позднее 20 февраля 2024 г., сумма – в течение 11 рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, сумма – в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, сумма – в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 

Истец произвел оплату по договору в размере сумма 

Срок исполнения договора был установлен продолжительностью 165 дней со дня заключения дополнительного соглашения № 1 от 26 марта 2024 г. 

Указанный срок истек 07 сентября 2024 г.

Из искового заявления, объяснений представителя истца следует, что обязательства по договору ответчиком не исполнены. 

Указанное обстоятельство ответчиком не оспаривается. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 74 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547, пунктами 10 и 12 технических условий № 48-17-2405-1/24 (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 26 марта 2024 г. № 1 к договору), истец обязан:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

- обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий;

- обеспечить применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

- иметь в наличии акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

- обеспечить объект капитального строительства приборами учета марка автомобиля, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Обязательство ответчика по договору является встречным. 

В соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Из возражений ответчика следует, что истцом не представлены сертификаты соответствия на газоиспользующее оборудование, акт первичного обследования дымоходов и вентканалов. 

Доказательств обратного суду не представлено. 

Истцом не оспаривается тот факт, что в адрес ответчика были направлены только паспорта газоиспользующего оборудования без сертификатов соответствия.

Доводы истца о том, что срок действия технических условий № 48-17-2405-1/24 истек 07 сентября 2024 г., не могут послужить основанием от освобождения истца от необходимости предоставить в установленном порядке указанные в данных технических условиях документы. 

При таких обстоятельствах требование истца о возложении на ответчика обязанности исполнить договор удовлетворению не подлежит.

Соответственно, не подлежат удовлетворению и производные требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к адрес о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления его в окончательной форме через Басманный районный суд адрес.

Мотивированное решение суда изготовлено 12 сентября 2025 года.

Судья И.В.Гусева