Дело № 2-11/2026 (2-206/2025)

24RS0020-01-2025-000337-94

2.219

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 января 2026 года с. Идринское

Идринский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Тимофеевой С.С.,

при секретаре Козловой А.И.,

с участием помощника прокурора Идринского района Красноярского края Иратова Р.В.,

рассмотрев гражданское дело по иску прокурора Идринского района Красноярского края, действующего в интересах ФИО1, к филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» о возложении обязанности осуществить присоединение к электрической сети, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Идринского района, действующий в интересах ФИО1, обратился в суд с иском к филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» о возложении обязанности осуществить присоединение к электрической сети, взыскании компенсации морального вреда, мотивировав требования иска тем, что по обращению ФИО1 прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой установлено, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.165.24, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения для энергоснабжения по объекту - «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом» (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, 300 метров на северо-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению условиями договора установлен 1 год со дня заключения договора, договор заключен в январе 2024 года (последняя оплата по договору осуществлена 25.05.2024). В соответствии с разделом 3 договора плата за оказание услуг за технологическое присоединение внесена своевременно. Прокуратурой района 22.08.2025 в адрес ПАО «Россети Сибирь» внесено представление, которое было рассмотрено, наличие нарушений признаны ответчиком, однако мероприятия по технологическому присоединению со стороны сетевой организации до настоящего времени не выполнены.

Просит возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 300 метров на северо-запад от 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, принадлежащий ФИО1, в соответствии с условиями договора от №20.2400.165.24, в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда 30 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Территориальное отделение в г. Минусинске Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, Администрация Идринского района.

Истец - помощник прокурора в Идринском районе Красноярского края Иратов Р.В. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явилось, о времени и месте его проведения извещено своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомило, до судебного заседания от представителя ответчика ФИО5 (доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №) поступил отзыв на иск, в котором он просил в случае удовлетворения требований прокурора Идринского района в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» снизить моральный вред до 500 рублей, указывая на то, что задержка исполнения мероприятий по технологическому мероприятию согласно договору вызвана недостатком финансирования. Расходы сетевой организации, которые не покрываются платой за ТП, органом государственного регулирования так же не компенсируются, что приводит к необходимости покрытия за собственный счет и образованию «выпадающих» доходов. При этом, затраты на технологическое присоединение часто в многократном размере превышают внесенную заявителем плату. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. В части компенсации морального вреда требование является недоказанным и необоснованным.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю ФИО6 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела без участия представителя, направил письменное заключение в целях защиты прав потребителя, согласно которому требования истца об осуществлении технологического присоединения, компенсации морального вреда подлежат удовлетворению.

Иные лица в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, согласно требованиям ст.113 ГПК РФ. В силу ч.3 ст.167 ГПК РФ неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, в порядке заочного производства в соответствии с главой 22 ГПК РФ.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Обязательство прекращается надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ).

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 указанного Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 данных Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

Согласно положений статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу положений п.п.1, 2 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как установлено в судебном заседании, собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 300 м на северо-запад от 

<

адрес>, с кадастровым номером №, является муниципальное образование Идринский район.

Между муниципальным образованием Идринский район и истцом ФИО1 05.04.2023 заключен договор аренды №51/2023 земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения по вышеуказанному адресу, срок действия договора аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

02.02.2024 между «Россети Сибирь» (Сетевая организация) и ФИО1 (Заявитель) заключен договор №.2400.165.24, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя "«Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом)", расположенного по адресу: 

<

адрес>, 300 м на северо-запад от 

<

адрес>, с кадастровым номером №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом» (который будет располагаться) по вышеуказанному адресу.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора предусмотрен размер платы за технологическое присоединение и составляет 66844 руб. 05 коп., в том числе НДС 20% в сумме 11140 руб. 67 коп.

В соответствии с п. 6 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающих устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на доступ в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договор, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

Согласно чекам по операциям от 09.02.2024, 25.05.2024, 30.12.2024, 03.01.2025, 18.01.2025, ФИО1 через Сбербанк оплачена услуга за технологическое присоединение в общем размере 66845 руб., получатель ПАО «Россети Сибирь», технологическое присоединение.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью договора, действуют 2 года со дня заключения договора.

В соответствии с п. 2 технических условий № наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом» расположенный по адресу: 

<

адрес>, 300 м на северо-запад от 

<

адрес>, с кадастровым номером №.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2025 (п. 6 технических условий).

В силу пункта 10 технических условий № сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение; обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение и обеспечение работы энергопринимающих устройств.

Кроме того, сетевая организация также осуществляет требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя, в том числе: выполняет проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовывает со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; строительство ТП 6 (10) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить с проектом; строительство ЛЭП- 6(10) кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 6 (10) кВ (п. 10.2.1), протяжённость и характеристики ЛЭП уточнить проектом; определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 6 (10) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом; строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6 (10) кВ (п. 10.2.1) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Требования, которые надлежало выполнить заявителю, указаны в пункте 11 приведенных технических условий, среди которых: обеспечить на границе балансовой принадлежности электрических сетей поддержание качества электрической энергии; установление приборов измерения и регистрации качества электрической энергии, фильтрокомпенсирующих устройств, средств обеспечения нечувствительности систем управления непрерывным технологическим процессом в соответствии с действующей НТД РФ, в случае если в ходе проектирования энергопринимающих устройств заявителя установлено их влияние на ухудшение соответствующих параметров качества электрической энергии в точках технологического присоединения; ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП.

Кроме того, заявитель осуществляет требования проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «Россети Сибирь»: разработка проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

В соответствии с пунктом 6 Договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий, осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора; не позднее 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Истец, обращаясь в суд с настоящим иском, ссылался на неисполнение сетевой организацией обязанностей, возложенных на нее договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2024 № 20.2400.165.24.

Согласно п. 12 договора датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение является дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Доказательств невыполнения истцом мероприятий по технологическому присоединению стороной ответчика не представлено.

Факт неисполнения условий заключенного с истцом договора о технологическом присоединении, сторона ответчика не отрицала, документов подтверждающих обратное, не представила.

Ссылка стороны ответчика на особенности хозяйственной деятельности, а также недостаток финансирования не свидетельствует о наличии оснований для неисполнения сетевой организацией своих обязанностей по договору, в связи с чем отклоняется судом.

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований истца и возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору оказания услуг по технологическому присоединению №.2400.165.24 от ДД.ММ.ГГГГ осуществить технологическое присоединение электропринимающих устройств истца, объекта – «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/садовый/Дачный дом» (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, 300 м на северо-запад от 

<

адрес>, с кадастровым номером №, поскольку факт неисполнения ответчиком в установленный срок обязательств по договору установлен судом и подтвержден материалами дела, доказательств исполнения обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлено.

Также ответчиком не представлено доказательств уважительности причин невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям суд не усматривает.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, необходимости времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, суд полагает возможным установить срок для исполнения возложенных на ответчика обязательств по договору № 20.2400.165.24 от 02.02.2024 не позднее шести месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу.

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.

Судом установлено, что действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика, суд определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 1 000 рублей.

Доводы ПАО «Россети Сибирь» о недоказанности и необоснованности возмещения морального вреда, несостоятельны, поскольку как установлено судом, действиями ответчика нарушены права истца, как потребителя, на своевременное получение услуг по договору, тем самым истцу причинены нравственные страдания.

В соответствии с ч. 1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные истцом, в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Учитывая, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в силу закона, с ответчика в доход местного бюджета согласно ст. 333.19 НК РФ надлежит взыскать государственную пошлину пропорционально удовлетворённой части исковых требований, в сумме 7000 рублей (4000 рублей (требования имущественного характера, не подлежащего оценки – возложении обязанности совершить присоединение) + 3000 рублей (за требование неимущественного характера).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Идринского района Красноярского края, действующего в интересах ФИО1 удовлетворить.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь», (ИНН №), обязанность в срок не позднее шести месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащего ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, (паспорт гражданина РФ №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел 

<

адрес>, 242-027), объекта - «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, 300 м на северо-запад от 

<

адрес>, с кадастровым номером №, к электрическим сетям в соответствии с условиями договора №.2400.165.24 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь», (ИНН №), в пользу ФИО1 (паспорт гражданина РФ №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел 

<

адрес>, 242-027), компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь», (ИНН №), в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья С.С. Тимофеева

Мотивированное заочное решение изготовлено 04 февраля 2026 года.

Верно

Судья С.С. Тимофеева